АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

 

16 октября 2024 года

 

Дело № А33-18517/2024

Красноярск

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 2 октября 2024 года.

В полном объёме решение изготовлено 16 октября 2024 года.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Мурзиной Н.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «КЛМ Арт» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 660075, 

<

...>, помещ. 63 оф. 10-01)

к обществу с ограниченной ответственностью «АлСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 660079, 

<

...>)

о взыскании неустойки,

в присутствии (до перерыва):

от истца: ФИО1 – представителя по доверенности 19.01.2024,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ворониной А.Н., 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «КЛМ Арт»  (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «АлСтрой»  (далее – ответчик) о взыскании неустойки за нарушение сроков окончания работ в размере 15 987 370, 89 рублей.

Определением от 25.06.2024 исковое заявление принято к производству суда, возбуждено производство по делу.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явился. Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в его отсутствие.

К дате судебного заседания от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований, в соответствии с которым истец просит взыскать с ответчика 10 129 006,75 руб. неустойки по договору № 2122187376022554164000000/03-07 от 19.07.2021.

В судебном заседании представитель истца поступившее ходатайство поддержал в полном объеме.

Ходатайство истца об уточнении исковых требований удовлетворено судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрение дела продолжено с учетом принятых уточнений.

Истец заявленные требования поддержал по основаниям, изложенным в исковом заявлении, с учетом принятого судом ходатайства об уточнении исковых требований.

В судебном заседании в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 08 час. 40 мин. 2 октября 2024 года.

После окончания перерыва лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явились. Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие лиц, участвующих в деле.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между обществом с ограниченной ответственностью «КЛМ Арт» (заказчиком) и обществом с ограниченной ответственностью «АлСтрой» (подрядчиком) 19.07.2021 заключен договор подряда № 2122187376022554164000000/03-07, по условиям пункта 1.1 которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить с использованием своего оборудования и материалов, работы по монтажу слаботочных систем на объекте: «Оздоровительный комплекс геотермальных источников с бассейном, устройство открытых площадок для отдыха и принятия солнечных и воздушных ванн», расположенном по адресу: Камчатский край, Елизовский район, ул. Санаторная, д. 21.

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях договора (пункт 1.2 договора).

В соответствии с пунктом 1.4 договора объем, содержание и перечень работ определены в локальных сметных расчетах (приложение № 1 к договору).

В пункте 1.8 договора согласовано, что работы по договору выполняются во исполнение государственного оборонного заказа, идентификационный код государственного оборонного заказа (ИГК) № 2122187376022554164000000 (шифр объекта В-26/18-36).

На правоотношения сторон по договору распространяются требования Федерального закона № 275-Ф3 от 29.12.2012 «О государственном оборонном заказе» (пункт 1.9 договора).

В силу пункта 2.1 договора его предварительная цена составляет 34 155 334,80 руб., в том числе НДС 20 %. Детализация стоимости работ приведена в локальных сметных расчетах (приложение № 1 к договору). В цену договора включена стоимость всех затрат подрядчика, необходимых для выполнения работ по  договору, в том числе: стоимость всех работ согласно договору, в том числе локального сметного расчета (приложение № 1); затраты, связанные с обеспечением строительства (реконструкции) рабочими, включая заработную плату, транспортные, командировочные расходы, питание, проживание, страхование; транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых подрядчиком; накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения договора; все иные затраты, прямо не предусмотренные, но необходимые для исполнения подрядчиком обязательств договору.

В пункте 2.8 договора указано, что оплата выполненных подрядчиком работ по договору производится заказчиком в течение 30 рабочих дней после подписания сторонами итогового акта приемки выполненных работ на основании оригинала счета. Заказчик вправе в течение 30 рабочих дней после подписания заказчиком оформленных подрядчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, оригиналов счета и счета-фактуры произвести дополнительное финансирование.

Как указано в пункте 2.9 договора оплата выполненных подрядчиком работ по договору производится заказчиком в порядке, установленном настоящим разделом договора за вычетом ранее перечисленного аванса, произведенного промежуточного финансирования, законных процентов до предела, не превышающего 95 % от цены договора.

В соответствии с пунктом 2.10 договора денежная сумма в размере 5 % от стоимости выполненных работ по договору, удерживается заказчиком по каждому акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в качестве обеспечения выполнения подрядчиком принятых на себя гарантийных обязательств в установленный договором гарантийный срок (гарантийное удержание).

Согласно пункту 2.12 договора окончательный расчет по договору производится по истечении гарантийного срока, установленного пунктом 4.1 в течение 30 рабочих дней через 12 месяцев с даты подписания итогового акта выполненных работ, а также подписания заказчиком и подрядчиком протокола об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу по форме, установленной приложением № 2 к договору на основании оригинала счета. Гарантийное удержание может быть частично или полностью удержано заказчиком и не выплачиваться подрядчику в случаях если подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определенные заказчиком.

Пунктом 3.1 договора в редакции дополнительного соглашения № 2 от 10.02.2022 установлен срок выполнения работ по настоящему договору: срок начала выполнения работ – 19.07.2021, срок завершения выполнения работ – 20.02.2022. Датой выполнения всех обязательств подрядчика по договору (за исключением гарантийных) является дата приемки работ заказчиком и подписания сторонами итогового акта приемки выполненных работ. Подписание итогового акта приемки выполненных работ – в течение 15 дней с момента завершения строительно-монтажных работ.

В соответствии с пунктом 5.2 договора сдача-приемка выполненных работ подрядчиком и приемка их заказчиком производится в следующем порядке: сдача-приемка выполненных работ за текущий (отчетный) месяц осуществляется по журналу учета выполненных работ (форма КС-6а), акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), которые подрядчик представляет в срок не позднее 25 числа текущего (отчетного) месяца.

В пункте 5.4 договора указано, что одновременно с предоставлением акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подрядчик представляет заказчику сопроводительным письмом первичные учетные документы (заверенные копии товарных накладных, счетов-фактур, универсальных передаточных документов на оборудование и материалы, указанные в сметах «по прайс-листу», заверенные копии договоров по прочим затратам, включая технологические присоединения, договоров на авторский надзор и проектные работы и т.д.), а также надлежащим образом оформленную исполнительную документацию на выполненные объемы работ. При сдаче выполненных работ подрядчик обязан предоставить документы (копии договоров, товарных накладных), подтверждающие стоимость приобретенных материалов (товаров). Заказчик при приемке работ и рассмотрении актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости работ и затрат по форме КС-3 принимает стоимость материалов по ценам, указанным в прайс-листах, поименованных в локальном сметном расчете к договору. Если подрядчик приобрел материалы по цене выше, чем указано в прайс-листах, цена работ не подлежит увеличению. Приобретение и использование подрядчиком при выполнении работ более дешевых материалов, чем предусмотрено в прайс-листах, не является экономией подрядчика по смыслу пункта 1 статьи 710 ГК РФ.

Согласно пункту 5.5 договора заказчик осуществляет приемку работ, указанных в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) в течение 30 рабочих дней со дня получения от подрядчика указанного акта. В случае, если подрядчиком не была представлена надлежащим образом оформленная исполнительная документация, и/или качество предъявляемых к приемке работ не удовлетворяет установленным требованиям, и/или предъявленные к приемке работы не соответствуют фактически выполненным объемам работ, заказчик в указанный в настоящем абзаце срок направляет подрядчику письменный мотивированный отказ в приемке соответствующих работ, возвращает исполнительную документацию и направляет требование об устранении выявленных в ходе приемки недостатков. Повторное рассмотрение заказчиком представленных подрядчиком документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документом в установленном настоящим пунктом порядке.

В силу пункта 6.4 договора за нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, включая промежуточные сроки, подрядчик уплачивает заказчику на основании письменного требования последнего в сроки, указанные в таком требовании, пени в размере 0,1 % от цены договора, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки выполнения работ и до момента фактического исполнения обязательств в полном объеме, включая день исполнения обязательства.

Договор действует до 31.12.2023 включительно. В случае, если сторонами не исполнены свои обязательства по договору до окончания этого срока, то договор продолжает действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору, в т.ч. гарантийных обязательств подрядчика. Действие договора распространяются на фактические правоотношения сторон, возникшие с 01.04.2020. Продление срока действия договора не влечет продления срока выполнения работ по договору (пункт 11.2 договора в редакции дополнительного соглашения от 05.04.2023 № 3 к договору).

Сторонами подписаны локальные сметные расчеты № 1 на сумму 20 297 579,40 руб., № 2 на сумму 186 606,72 руб., № 3 на сумму 192 547,80 руб., № 4 на сумму 2 833 856,28 руб., № 5 на сумму 1 540 586,52 руб., № 6 на сумму 1 101 584,88 руб., № 7 на сумму 42 266,88 руб., № 8 на сумму 1 083 039,12 руб., № 9 на сумму 1 366 342,56 руб., № 10 на сумму 5 154 148,80 руб., № 11 на сумму 356 775,84 руб. на общую сумму 34 155 334,80 руб.

Во исполнение обязательств по договору подрядчиком выполнены, а заказчиком приняты работы на общую сумму 35 304 503,36 руб., в подтверждение чего представлены подписанные сторонами

- акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 28.09.2021 на сумму 33 762 руб., от 23.12.2021 № 2 на сумму 585 746,22 руб., № 3 на сумму 598 202,46 руб., № 4 на сумму 160 155,30 руб., от 10.06.2022 № 5 на сумму 1 181 453,76 руб., № 6 на сумму 1 308 781,38 руб., № 7 на сумму 158 673,24 руб., № 8 на сумму 262 458,24 руб., № 9 на сумму 830 428,92 руб., № 10 на сумму 39 918,72 руб., № 11 на сумму 778 971,96 руб., № 12 на сумму 147 804,12 руб., от 01.08.2022 № 13 на сумму 1 994 370,30 руб., № 14 на сумму 67 047,66 руб., № 15 на сумму 169 855,50 руб., № 16 на сумму 6 329 955,78 руб., № 17 на сумму 78 243,18 руб., от 18.11.2022 № 18 на сумму 26 306,82 руб., № 19 на сумму 35 707,14 руб., № 20 на сумму 23 068,32 руб., № 21 на сумму 203 200,32 руб., № 22 на сумму 63 875,46 руб., № 23 на сумму 17 091,12 руб., от 19.12.2023 № 24 на сумму 10 334 878,80 руб., № 25 на сумму 22 462,26 руб., № 26 на сумму 561 861,66 руб., № 27 на сумму 550 075,08 руб., № 28 на сумму –15 858,42 руб., № 29 на сумму 29 685,72 руб., № 30 на сумму -26 606,56 руб., № 31 на сумму 4 767 237,60 руб., № 32 на сумму 29 111,70 руб., № 33 на сумму 34 956 руб., № 34 на сумму 16 849,20 руб., № 35 на сумму 569 349,60 руб., № 36 на сумму 150 337,20 руб., № 37 на сумму 312 810 руб., № 38 на сумму 274 004,40 руб., № 39 на сумму 248 340 руб., № 40 на сумму 2 263 590 руб., № 41 на сумму 86 341,20 руб.;

- справки о стоимости выполненных работ № 1 от 28.09.2021 на сумму 33 762 руб., № 2 от 23.12.2021 на сумму 1 344 103,98 руб., № 3 от 10.06.2022 на сумму 4 708 490,34 руб., № 4 от 01.08.2022 на сумму 8 639 472,42 руб., № 5 от 18.11.2022 на сумму 369 249,18 руб., от 19.12.2023 № 6 на сумму 16 252 847,84 руб., № 7 на сумму 3 956 577,60 руб.

Платежными поручениями от 30.08.2021 № 2589 на сумму 5 000 000 руб., от 13.10.2021 № 3147 на сумму 5 000 000 руб., от 23.11.2021 № 3670 на сумму 4 000 000 руб., от 03.12.2021 № 3878 на сумму 3 000 000 руб., от 29.07.2022 № 2767 на сумму 2 354 245,17 руб., № 2770 на сумму 627 051,99 руб. заказчик произвел оплату работ на общую сумму 19 981 297,16 руб.

22.12.2023 сторонами подписано соглашение о зачете взаимных требований, в соответствии которым стороны прекращают взаимные обязательства путем проведения зачета встречных однородных требований на сумму 6 705 521,28 руб. (пункт 1 соглашения).

В соответствии с пунктом 2 соглашения о зачете взаимных требований на момент подписания соглашения стороны имеют друг к другу следующие требования:

- у общества «АлСтрой» существует требование к обществу «КЛМ Арт», возникшее на основании договора подряда от 19.07.2021 № 2122187376022554164000000/03-07, в соответствии с которым общество «КЛМ Арт» должно оплатить обществу «АлСтрой» денежные средства 15 324 406,23 руб. (пункт 2.1 соглашения о зачете);

- у общества «КЛМ Арт» существует требование к обществу «АлСтрой», возникшее на основании договора подряда от 09.01.2020 № 505-01-2020, в соответствии с которым общество «АлСтрой» должна оплатить обществу «КЛМ Арт» денежные средства в размере 6 705 521,28 руб. (пункт 2.2 соглашения о зачете).

К моменту подписания соглашения срок исполнения по требованиям, указанным в п. 2.1, п. 2.2. настоящего соглашения, уже наступил (пункт 3 соглашения о зачете).

Согласно пунктам 4 – 4.2 соглашения о зачете стороны договорились прекратить встречные однородные обязательства в следующем порядке:

- стороны договорились полностью прекратить обязательства общества «АлСтрой» перед обществом «КЛМ Арт» в размере 6 705 521,28 руб., вытекающие из договора подряда от 09.01.2020 № 505-01-2020;

- стороны договорились частично прекратить обязательства общества «КЛМ Арт» перед обществом «АлСтрой» на сумму 6 705 521,28 руб., вытекающие из договора подряда от 19.07.2021 № 2122187376022554164000000/03-07.

Как указано в пунктах 5-5.2 соглашения после проведения зачета встречных однородных требований в соответствии с п. 4.1., п. 4.2. размер оставшихся требований по указанным договорам, на дату подписания настоящего соглашения, составляет:

- у общества «АлСтрой» перед обществом «КЛМ Арт» по договору подряда от 09.01.2020 № 505-01-2020 задолженность отсутствует;

- у общества «КЛМ Арт» перед обществом «АлСтрой» по договору подряда от 19.07.2021 № 2122187376022554164000000/03-07 в размере 8 617 684,92 руб.

Датой зачета является дата подписания соглашения (пункт 6 соглашения о зачете).

В связи с нарушением подрядчиком срока выполнения работ заказчик обратился к подрядчику с претензией от 18.04.2024 № 115 об оплате неустойки в размере 23 600 745,63 руб.

Претензия подрядчиком не получена и 04.06.2024 выслана отправителю в связи с истечением срока хранения, что подтверждается сведениями об отслеживании почтового отправления с идентификатором 66011595000463.

20.05.2024 заказчиком также направлено подрядчику уведомление о зачете взаимных требований от 15.05.2024 № 63, согласно которому общество «КЛМ АРТ» имеет задолженность перед обществом «АЛСТРОЙ», которая подтверждается следующими документами: 

Документ подтверждающий

Сумма зачета

Наименование услуги

Договор №

2122187376022554164000 000/03-07 от 19.07.2021

номер

дата

23121901

19.12.2023

6 852 459,75

Услуги

 

Итого:

 

6 852 459,75

 

Общество «АЛСТРОЙ» имеет задолженность перед обществом «КЛМ АРТ», которая подтверждается следующими документами:

Документ, подтверждающий

Сумма зачета

Наименование

услуги

Договор №

2122187376022554164000 000/03-07 от 19.07.2021

Номер 

Дата 

Исх 115

18.04.2024

6 852 459,75

Услуги, претензия

 

Итого

 

6 852 459,75

 

Согласно почтовой квитанции и описи вложения в письмо уведомление о зачете встречных требований от 15.05.2024 № 63 возвращено отправителю из-за истечения срока хранения 22.06.2024, что подтверждается сведениями об отслеживании почтового отправления с идентификатором 66000002463335.

Ссылаясь на выполнение работ с нарушением срока, частичный зачет суммы начисленной неустойки, истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании неустойки за нарушение сроков окончания работ в размере 10 129 006,75 руб. (с учетом уточнения).

Ответчик отзыв на исковое заявление с указанием возражений по существу заявленных требований не представил.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуальным Кодексом Российской Федерации.

В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации, статьями 7, 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданское законодательство в Российской Федерации основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора.

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (статьи 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Заключенный между сторонами договор по своей правовой природе является договором подряда, отношения по которому регламентированы главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Во исполнение обязательств по договору подрядчиком выполнены, а заказчиком приняты работы на общую сумму 35 304 503,36 руб., в подтверждение чего представлены подписанные сторонами

- акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 28.09.2021 на сумму 33 762 руб., от 23.12.2021 № 2 на сумму 585 746,22 руб., № 3 на сумму 598 202,46 руб., № 4 на сумму 160 155,30 руб., от 10.06.2022 № 5 на сумму 1 181 453,76 руб., № 6 на сумму 1 308 781,38 руб., № 7 на сумму 158 673,24 руб., № 8 на сумму 262 458,24 руб., № 9 на сумму 830 428,92 руб., № 10 на сумму 39 918,72 руб., № 11 на сумму 778 971,96 руб., № 12 на сумму 147 804,12 руб., от 01.08.2022 № 13 на сумму 1 994 370,30 руб., № 14 на сумму 67 047,66 руб., № 15 на сумму 169 855,50 руб., № 16 на сумму 6 329 955,78 руб., № 17 на сумму 78 243,18 руб., от 18.11.2022 № 18 на сумму 26 306,82 руб., № 19 на сумму 35 707,14 руб., № 20 на сумму 23 068,32 руб., № 21 на сумму 203 200,32 руб., № 22 на сумму 63 875,46 руб., № 23 на сумму 17 091,12 руб., от 19.12.2023 № 24 на сумму 10 334 878,80 руб., № 25 на сумму 22 462,26 руб., № 26 на сумму 561 861,66 руб., № 27 на сумму 550 075,08 руб., № 28 на сумму –15 858,42 руб., № 29 на сумму 29 685,72 руб., № 30 на сумму -26 606,56 руб., № 31 на сумму 4 767 237,60 руб., № 32 на сумму 29 111,70 руб., № 33 на сумму 34 956 руб., № 34 на сумму 16 849,20 руб., № 35 на сумму 569 349,60 руб., № 36 на сумму 150 337,20 руб., № 37 на сумму 312 810 руб., № 38 на сумму 274 004,40 руб., № 39 на сумму 248 340 руб., № 40 на сумму 2 263 590 руб., № 41 на сумму 86 341,20 руб.;

- справки о стоимости выполненных работ № 1 от 28.09.2021 на сумму 33 762 руб., № 2 от 23.12.2021 на сумму 1 344 103,98 руб., № 3 от 10.06.2022 на сумму 4 708 490,34 руб., № 4 от 01.08.2022 на сумму 8 639 472,42 руб., № 5 от 18.11.2022 на сумму 369 249,18 руб., от 19.12.2023 № 6 на сумму 16 252 847,84 руб., № 7 на сумму 3 956 577,60 руб.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Пунктом 3.1 договора (в редакции дополнительного соглашения от 10.02.2022 № 2 к договору) установлен срок завершения выполнения работ – 20.02.2022.

Как следует из представленных в материалы дела документов, работы выполнены с нарушением срока 19.12.2023, о чем свидетельствует подписанные сторонами акты о приемке выполненных работ от 19.12.2023.

Ссылаясь на нарушение ответчиком сроков выполнения работ, истец обратился в арбитражный суд с требованиями о взыскании неустойки в размере 10 129 006,75 руб.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. В силу статьи 331 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме.

В силу пункта 1 статьи 332 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

В силу пункта 6.4 договора за нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, включая промежуточные сроки, подрядчик уплачивает заказчику на основании письменного требования последнего в сроки, указанные в таком требовании, пени в размере 0,1 % от цены договора, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки выполнения работ и до момента фактического исполнения обязательств в полном объеме, включая день исполнения обязательства.

Согласно части 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса. В части 3 указанной статьи установлено, что цена работ может быть определена путем оставления сметы.

В силу пункта 2.1 договора его предварительная цена составляет 34 155 334,80 руб., в том числе НДС 20 %. Детализация стоимости работ приведена в локальных сметных расчетах (приложение № 1 к договору).

Согласно представленным в дело документам, сторонами подписаны локальные сметные расчеты № 1 на сумму 20 297 579,40 руб., № 2 на сумму 186 606,72 руб., № 3 на сумму 192 547,80 руб., № 4 на сумму 2 833 856,28 руб., № 5 на сумму 1 540 586,52 руб., № 6 на сумму 1 101 584,88 руб., № 7 на сумму 42 266,88 руб., № 8 на сумму 1 083 039,12 руб., № 9 на сумму 1 366 342,56 руб., № 10 на сумму 5 154 148,80 руб., № 11 на сумму 356 775,84 руб. на общую сумму 34 155 334,80 руб.

Вместе с тем, как было отмечено ранее, сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ на сумму 35 304 503,36 руб.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что сторонами внесены изменения в договор в части цены договора на основании подписанных актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, следовательно, цена договора составляет 35 304 503,36 руб.

Согласно представленному истцом расчету за нарушение срока выполнения работ по договору истцом начислена неустойка на сумму 10 129 006,75 руб., исходя из расчета: 35 304 503,36 руб. (цена договора) х 0,1% (размер пени, установленный пунктом 6.4 договора) х 481 (дни просрочки за период с 21.02.2022 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 19.12.2023) – 6 852 459,75 руб. (произведенный истцом зачет встречных требований).

Ответчиком расчет неустойки не оспорен, контррасчет не представлен.

Судом установлено, что при расчете неустойки истцом учтены положения постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами».

В указанном истцом периоде просрочки количество дней просрочки составляет 38 дней и 443 дня (в общем 481 день) с 21.02.2022 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 19.12.2023 соответственно.

Проверив указанный расчет, суд установил, что истцом неверно определено количество дней просрочки. Так, просрочка исполнения обязательства за период с 21.02.2022 по 31.03.2022 составляет 39 дней, за период с 02.10.2022 по 19.12.2023 – 444 дня.

Вместе с тем, учитывая, что начисление неустойки исходя из меньшего количества дней является правом истца и законных интересов не нарушает, суд признает указанный расчет обоснованным.

Проверив расчет неустойки, суд признал его арифметически неверным, поскольку исходя из показателей, указанных в расчете сумма неустойки составит 10 129 004,75 руб. (35 304 503,36 руб. (цена договора) х 0,1% х 481 (количество дней просрочки) – 6 852 459,75 руб. (зачет) = 16 981 464,50 руб. (сумма неустойки) - 6 852 459,75 руб. (зачет) = 10 129 004,75 руб.

Учитывая вышеизложенное, требования истца о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ подлежит частичному удовлетворению на сумму 10 129 004,75 руб. Оснований для удовлетворения требований в остальной части у суда не имеется.

Размер государственной пошлины за рассмотрение иска с учетом уточнения на сумму 10 129 006,75 руб. составляет 73 645 руб.

Истцом при обращении с настоящим иском в суд оплачена государственная пошлина в размере 102 937 руб. по платежному поручению от 17.06.2024 № 1490.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Учитывая результат рассмотрения спора, 73 645 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца, 29 292 руб. излишне уплаченной государственной пошлины подлежит возвращению истцу из федерального бюджета на основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АлСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «КЛМ Арт» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в размере 10 129 004,75 руб., судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 73 645 руб.

В удовлетворении остальной части требований – отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «КЛМ Арт» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину, оплаченную по платежному поручению от 17.06.2024 № 1490 в размере 29 292 руб.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

Н.А. Мурзина