Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-5585/2016

08 февраля 2017 года

город Якутск

Резолютивная часть решения объявлена 01.02.2017

Мотивированное решение изготовлено 08.02.2017

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Немытышевой Н.Д., при ведении протокола секретарем судебного заседания Каратаевой Т.М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» к обществу с ограниченной ответственностью «РОСТ-Строй» о взыскании 8 549 022, 58 рублей,

при участии в судебном заседании:

представителя истца ФИО2, по доверенности, ФИО3, по доверенности,

представителя ответчика ФИО4, по доверенности,

У С Т А Н О В И Л:

12.10.2016 в Арбитражный суд РС (Я) поступило исковое заявление публичного акционерного общества "Якутскэнерго" к обществу с ограниченной ответственностью "РОСТ-Строй" о взыскании 8 549 022,58 руб.

Через канцелярию суда поступили ходатайство истца от 31.01.2017 № 119/1370 о приобщении копии договора № 787 от 04.04.20.14 с приложениями, дополнительного соглашения № 1 от 15.11.2016, доказательства вручения возражения на отзыв ответчику, копии возражения на отзыв, приложения № 3 к договору № 5.

В судебном заседании истец представил копии писем № 215/11306 от 26.07.2016, № б/н от 15.06.2016, ответчик представил дополнение к отзыву от 01.02.2016.

Суд в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  приобщил представленные документы в материалы дела.

Истец поддерживает исковые требования.

Ответчик просит в иске отказать.

Рассмотрев материалы дела, исследовав представленные доказательства, суд установил следующие обстоятельства имеющие значение для рассмотрения спора.

04.04.2014 между ОАО АК «Якутскэнерго» (исполнитель) ФИО5 (заказчик) заключен договор № 787 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заказчика: Торговый центр «1000 мелочей» (II очередь), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 800 кВт;

категория надежности - III;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 0,4 кВ, а заявитель, в свою очередь обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 1).

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: Торговый центр «1000 мелочей» (II очередь), в 114 квартале г. Якутска (пункт 2 договора).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истекает во II квартале 2016 года (пункт 5 договора).

В соответствии с пунктом 10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с утвержденным постановлением Правления ГКЦ-РЭК РС (Я) от 20.12.2013 № 320 «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО АК «Якутскэнерго» и составляет 21 372 556,48 руб., в том числе НДС 18% 3 260 220,48 руб.

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в соответствии с графиком платежей по приложению № 3 (пункт 11 договора), в следующем порядке: 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора в сумме 2 137 255,65 руб. – апрель 2014 года, 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора в сумме 6 411 766,94 руб. – май 2014 года; 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора в сумме 4 274 511,30 руб.- сентябрь 2014 года; 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения в сумме 6 411 766,94 руб. – январь 2016 года; 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения в сумме 2 137 255,65 руб. – июнь 2016 года.

26.12.2014 между ФИО5 (сторона-1), ООО «Рост-Строй» (сторона-2) и ОАО АК «Якутскэнерго» (сторона-3) заключено соглашение № 5 о передаче прав и обязанностей по договору № 787 от 04.04.2014 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предмет соглашения: на основании письма ФИО5  от 05.12.2014, договора № 1 аренды земельного участка от 10.10.2014, Сторона-1 передает, а Сторона-2, принимает в полном объеме права и обязанности по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 787 от 04.04.2014 по объекту «Торговый центр «1000 мелочей» (П очередь), в 114 квартале г. Якутска заявленной мощностью 800 кВт, в сумме 21 372 556,48 руб., в т.ч. НДС 18 % 3 260 220,48 руб., заключенному между ОАО АК «Якутскэнерго» и ФИО5 (пункт 1.1 соглашения).

С момента подписания настоящего соглашения права и обязанности Стороны-1 по договору об осуществлении технологического присоединения к электрической сети № 787 от 04.04.2014 по объекту «Торговый центр «1000 мелочей» (П очередь), в 114 квартале г. Якутска передаются Стороне- 2 (пункт 1.2 соглашения).

На момент заключения настоящего соглашения Сторона-1 оплату Стороне-3 за оказание услуги технологического присоединение не производила (пункт 1.3 соглашения).

С момента подписания настоящего соглашения Сторона-2 перечисляет денежные средства на расчетный счет Стороне-3 в сумме 21 372 556,48 руб., в т.ч. НДС 18 % 3 260 220,48 руб. 48 копеек в соответствии с графиком платежей по Приложению № 3 (пункт  3.1 соглашения).

Решением Якутского городского суда РС (Я) от 18.12.2014 по делу № 2-12197/2014 по гражданскому делу по иску ОАО АК «Якутскэнерго» к ФИО5 о взыскании задолженности за оказание услуги по технологическому присоединению к электрической сети, с ФИО5 в пользу ОАО АК «Якутскэнерго» взыскана задолженность в размере 12 823 533,89 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 60 000 руб., всего – 12 883 533, 89 руб. 

Определением Якутского городского суда РС (Я) от 06.02.2015 по делу № 2-12197/2014 № 13-173/2015, заявление ФИО5 о процессуальном правопреемстве удовлетворено, произведена замена ответчика по делу ФИО5 на ООО «Рост-Строй».

15.11.2016 между ПАО «Якутскэнерго» (сетевая организация) и ООО «Рост-Строй» (заявитель) заключено дополнительное соглашение № 1 к договору № 787 от 04.04.2014 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого пункт 5 изложен в редакции: срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истекает во II квартале 2018 года.

Претензией от 05.09.2016 № 119/13408  сетевая организация уведомила ООО «Рост-Строй» о наличии задолженности по упомянутому выше договору в размере 8 549 022,58 руб. и предложила погасить ее в добровольном порядке, указав на возможность обращения за взысканием задолженности в судебном порядке (л.д.30, 31).

Оставленная без ответа и исполнения претензия явилась основанием для обращения ПАО «Якутскэнерго» в Арбитражный суд РС (Я) с настоящим иском.

Ответчик с исковыми требованиями не согласен, по основаниям, изложенным в отзыве (л.д.69-70), указав, что  объем работ, предусмотренный в договоре,  истцом не выполнен, акт сдачи-приемки работ сторонами не подписан, дополнительным соглашением № 1 от 15.11.2016 стороны продлили срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению до II квартала 2018 года. Поскольку требования истца направлены на понуждение ответчика выполнить встречное обязательство по договору- оплатить аванс, истцом выбран ненадлежащий способ защиты нарушенного права, в связи с чем исковые требования о взыскании суммы аванса удовлетворению не подлежат.

Истец представил возражения на отзыв (л.д.88), указав, что работы полностью не выполнены истцом, для дальнейшего выполнения работ необходимо финансирование, которого нет на данный момент. Между сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 от 15.11.2016, в связи с продлением срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, но условия оплаты и график платежей остался без изменений.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно пункту 2 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

Исходя из правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 10.07.2012 № 2551/12 по делу № А56-66569/2010, договор технологического присоединения является самостоятельным видом гражданско-правового договора.

Нормы, регламентирующие договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, не включены в раздел IV «Отдельные виды обязательств» Гражданского кодекса Российской Федерации, однако эти нормы содержатся в специальных нормативных актах, закрепляющих правила подключения к системам энергоснабжения.

В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Данный договор является публичным.

Пунктом 7 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861) предусмотрено, что технологическое присоединение - это состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание условий для получения электрической энергии потребителем через энергоустановки сетевой организации, завершающийся фактической подачей напряжения и составлением акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акта об осуществлении технологического присоединения.

По договору об осуществлении технологического присоединения к электрической сети одна сторона (сетевая организация) обязуется в установленный действующими правилами порядке присоединить по заявке другой стороны (абонента) принадлежащие ему энергопринимающие устройства к электрической сети сетевой организации, а абонент обязуется оплатить мероприятия по технологическому присоединению и соблюдать его технические условия.

В пункте 19 Правил № 861 предусмотрено, что по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Заключенный между сторонами договор квалифицирован судом как договор технологического присоединения, который подпадает под регулирование специальных норм, закрепляющих правила подключения к системам энергоснабжения, таких как статья 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

Решением Якутского городского суда РС (Я) от 18.12.2014 по делу № 2-12197/2014 по гражданскому делу по иску ОАО АК «Якутскэнерго» к ФИО5 о взыскании задолженности за оказание услуги по технологическому присоединению к электрической сети, с ФИО5 в пользу ОАО АК «Якутскэнерго» взыскана задолженность в размере 12 823 533,89 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 60 000 руб., всего – 12 883 533, 89 руб.

Между тем, указанным решением не подтвержден факт выполнения работ истцом.

Как следует из материалов дела, дополнительным соглашением № 1 от 15.11.2016 стороны продлили срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению до II квартала 2018 года.

Федеральный закон "Об электроэнергетике" от 26.03.2003 № 35-ФЗ и Правила № 861 также не содержат положений о возможности принудительного взыскания авансовых (предварительных) платежей.

Таким образом, законом возможность принудительного взыскания аванса в спорном случае не закреплена, а значит, невозможно обязать заказчика вносить авансовые платежи в отсутствие встречного исполнения условий договора со стороны сетевой организации.

Согласно статье 328 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению (пункт 2).

Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне (пункт 3).

Из приведенного следует право истца отказаться от исполнения обязательства и потребовать возмещения убытков, но не взыскания авансовых платежей.

Между тем, наличие убытков материалами дела не подтверждено.

При таких обстоятельствах у суда отсутствуют правовые основания для удовлетворения исковых требований, в удовлетворении исковых требований следует отказать полностью.

Определением суда от 18.10.2016 истцу произведен зачет государственной пошлины в размере 145 597 руб., возвращенной по справке от 29.08.2016 по делу № А58-4516/2016, оплаченной платежным поручением № 87722 от 05.08.2016, 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В иске отказать полностью.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

Судья

Н.Д. Немытышева