АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

153022, 

<

...>

http://ivanovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Дело № А17-9071/2024

г. Иваново

30 июня 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 16 июня 2025 года

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Калюжного А.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Камышанским А.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к акционерному обществу «Ивановская городская электрическая сеть» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 

<

...>)

о взыскании 24 975 руб. пени за период с 20.04.2022 по 27.11.2022 за просрочку исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 20.10.2021 №3/9-767 (с учетом принятых судом уточнений исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ),

третье лицо: публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 603001 

<

...>),

при участии сторон:

от истца – ФИО2 по доверенности №37 АА 2042967 от 21.01.2025, диплом, паспорт;

от ответчика – не явился, извещен; от третьего лица – не явился, извещен

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее также ? истец) обратился в Арбитражный суд Ивановской области с исковым заявлением к акционерному обществу «Ивановская городская электрическая сеть) о взыскании 49 320 руб. пени за период с 20.04.2022 по 27.11.2022 за просрочку исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 20.10.2021 №3/9-767.

Определением от 30.09.2024 исковое заявление принято к производству в порядке упрощенного производства, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 603001 

<

...>).

18.11.2024 от третьего лица поступил отзыв на иск, с просьбой отказать истцу в удовлетворении исковых требований по основаниям, изложенным в отзыве.

От ответчика отзыв не поступил.

В силу части 5 статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом характера и сложности дела арбитражный суд вправе по своей инициативе или по ходатайству лиц, участвующих в деле, провести судебное заседание с вызовом лиц, участвующих в деле, без перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства.

В соответствии с частью 2 статьи 226 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела в порядке упрощенного производства рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления искового заявления, заявления в арбитражный суд, а в случае назначения судебного заседания ? в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления искового заявления, заявления в арбитражный суд.

Определением суда от 25.11.2024 продлен срок для представления дополнительных документов до 17 декабря  2024 года, назначено судебное заседание на 19 декабря 2024 года.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для рассмотрения дела по общим правилам искового производства, предусмотренным частью 5 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением суда от 24.12.2024 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, предварительное судебное заседание назначено на 28.01.2025, впоследствии отложено на 10.03.2025, 15.04.2025.

Протокольным определением суда от 15.04.2025 завершена подготовка дела к судебному разбирательству, судебное заседание суда первой инстанции назначено на 02.06.2025, в котором объявлен перерыв до 06.06.2025, затем до 16.06.2025.

Ответчик и третье лицо, признанные судом надлежащим образом извещенными, явку представителей не обеспечили, просили рассмотреть дело в их отсутствие (ходатайствами от 17.12.2024).

Информация о движении дела (дате, времени и месте судебных заседаний в порядке подготовки дела к рассмотрению по существу, судебных заседаний первой инстанции, об отложении судебных заседаний, а также об объявляемых в заседаниях перерывах) размещалась на официальном сайте Арбитражного суда Ивановской области в сети Интернет по веб-адресу: www.ivanovo.arbitr.ru.

На основании частей 2,3 и 5 статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено дело в отсутствие представителей ответчика и третьего лица.

Представитель истца в судебном заседании 16.06.2025 уточнил размер исковых требований заявлением от 16.06.2025, которое в порядке ст. 49 АПК РФ принято судом, рассмотрение дела продолжено в рамках взыскания с ответчика неустойки по договору технологического присоединения № 3/9-767 от 20.10.2021 г. за период с 20.04.2022 г. по 27.11.2022 г. в сумме 24 975 руб., поддержал исковые требования с учетом уточнения, просил их удовлетворить в полном объеме.

Ответчик просил в иске отказать по основаниям, изложенным в отзыве от 15.11.2024, отзыве от 17.12.2024 (повторный), пояснил, что в целях дальнейшего исполнения договора, несмотря на отсутствие статуса сетевой организации у АО «Ивгорэлектросеть», в интересах заявителя, 28.11.2022 между АО «Ивгорэлектросеть», филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» и ИП ФИО1 заключено трехстороннее соглашение о замене стороны в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №3/9-767 от 20.10.2021 г. (№371023783) энергопринимающих устройств здания делового центра по адресу: 

<

...> у д. 12, кад. №37:24:040228:1022. Ответчик предпринял все возможные меры, в целях исполнения договора со стороны другой сетевой организации, несмотря на невозможность проведения работ в связи с потерей статуса сетевой организации.

Третье лицо просило в иске отказать по основаниям, изложенным в отзыве от 17.12.2024, позиция идентична позиции ответчика.

Изучив представленные в материалы дела письменные доказательства, заслушав представителя истца, ответчика (в ранее проведенных судебных заседаниях), суд установил следующие обстоятельства и пришел к следующим выводам.

20.10.2021 между ИИ ФИО1 (далее - предприниматель) и АО «Ивгорэлектросеть» (далее — общество) заключен договор № 3/9-767 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств (далее - технологическое присоединение) здания делового центра, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики) с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимагощих устройств - 150 кВт категория надежности - II (вторая); класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение - 0,4 кВ. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения здания Делового центра по адресу; г, Иваново, уд. Ярославская, у д. 12, кад. №37:24:040228:1022 (пункт 1,2 договора).

Сетевая обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях (подпункт 6.1 пункта 6 договора).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению согласно условиям договора составляет 6 (шесть) месяцев со дня заключения договора (пункт 5 договора).

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 17 договора).

            В установленный договором срок работы выполнены не были.

            В связи с тем, что с 01.01.2022 АО «Ивгорэлектросеть» утратило статус сетевой организации и работы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению были приостановлены, 28.11.2022 заключено трехстороннее соглашение о замене стороны в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 33/9-767 от 20.10.2021 между АО «Ивгорэлектросеть» (сторона-1), филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» (сторона-2) и ИП ФИО1 (сторона-3), согласно которому, сторона-1 передает, а сторона-2 принимает в полном объеме права и обязанности по договору и становится стороной по договору в части, касающейся технологического присоединения вышеназванного объекта стороны-3 к электрическим сетям, за исключением обязанности по оплате стороной-1 штрафных санкций за несвоевременное исполнение стороной-1 мероприятий по технологическому присоединению (пункт 2.1 соглашения).

            Подписанием настоящего соглашения, сторона-3 согласовывает замену по договору стороны-1 на сторону-2 и переход прав и обязанностей по договору со стороны-1 на сторону-2 в части, касающейся технологического присоединения вышеназванного объекта стороны-3 к электрическим сетям (пункт 2.2 соглашения).

            В пункте 2.3 соглашения стороны согласовали пункт 5 договора № 3/9-767 от 20.10.2021г. принять в следующей редакции: «Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения настоящего соглашения».

Разделом 5 соглашения сторонами определена их ответственность.

Согласно пункту 5.3 соглашения при заключении настоящего соглашения стороны исходят из того, что сторона-3 не вправе требовать от стороны-2 оплаты штрафных санкций по договору в части, касающейся технологического присоединения вышеназванного объекта стороны-3 к электрическим сетям, право на начисление которых возникло у стороны-3 в отношении стороны-1 по договору до момента заключения настоящего соглашения.

Перемена стороны по договору в части, касающейся технологического присоединения вышеназванного объекта стороны-3 к электрическим сетям в соответствии с настоящим соглашением не влечет каких-либо изменений условий договора, за исключением условий, установленных (измененных) настоящим соглашением. В случае противоречия условий договора настоящему соглашению, применяются условия настоящего соглашения (пункт 6.1. соглашения).

Платежными поручениями № 8778 и 9252, на общую сумму 45 000 рублей, в которых, из пояснений истца, в назначении платежей допущена опечатка: вместо договора № 3/9-767 от 20.10.2021 г. указано 3/9-757 от 20.10.2021 г., факт опечатки также подтверждается счетом на оплату № 1162, ссылка на который также содержится в назначении платежей упомянутых платежных поручений, истец оплатил 45 000 руб., что составляет 45% от стоимости технологического присоединения согласно пункту 11 договора, согласно которому внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора; 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора, но не позже дня фактического присоединения; 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения; 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. 

Оставшиеся 55 % от цены договора были выплачены третьему лицу по делу - ПАО «Россети Центр и Приволжье» 29.02.2024 (платежное поручение от 29.02.2024 №15156), после его исполнения, что не оспаривается ни ответчиком, ни третьим лицом.

Мероприятия по осуществлению технологического присоединения выполнены ПАО «Россети Центр и приволжья» в полном объеме 09.02.2024 (в соответствии с п. 2.3. соглашения срок выполнения обязательств составляет 6 месяцев с даты заключения соглашения и истек 28.05.2023), после обращения истца в прокуратуру и в УФАС по Ивановской области.

Поскольку указанный факт не оспаривался сторонами и третьим лицом, судом было отказано в удовлетворении ходатайства истца об истребовании подтверждающих документов из прокуратуры и УФАС по Ивановской области.

Претензией от 29.05.2024 истец потребовал от ответчика оплаты неустойки за период с 20.04.2022 по 27.11.2022 за несвоевременное исполнение АО «Ивгорэлектросеть» мероприятий по технологическому присоединению по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 20.10.2021 №3/9-767.

Поскольку оплаты не последовало, истец обратился в Арбитражный суд Ивановской области с настоящим иском.

В силу статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в числе которых поименованы договоры.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таковых условий и требований ? в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 3 Федерального закона N 35-ФЗ территориальной сетевой организацией является коммерческая организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, а в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, - с использованием объектов электросетевого хозяйства или части указанных объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 и статьи 421 ГК РФ юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора (пункт 2 статьи 1 и статьи 421 ГК РФ).

Согласно пункту 2 статьи 421 ГК РФ стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

Нормы, регламентирующие правоотношения в сфере осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств, не включены в раздел IV "Отдельные виды обязательств" ГК РФ, однако эти нормы содержатся в специальных нормативных актах, закрепляющих правила подключения к системам тепло- и энергоснабжения.

Применительно к энергоснабжению такие нормы содержатся в статье 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" (далее - Правила N 861).

Порядок технологического присоединения, в том числе объектов, принадлежащих сетевым организациям, урегулирован Правилами N 861.

В соответствии с пунктом 12 Правил N 861 мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: а) разработку схемы электроснабжения; б) технический осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств уполномоченным органом государственной власти при участии представителей сетевой организации; в) подготовку и выдачу технических условий; г) выполнение технических условий (со стороны лица, энергопринимающее устройство которого присоединяется, и со стороны сетевой организации); д) фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства в электрической сети; е) проверку выполнения технических условий и составление акта о технологическом присоединении.

Технологическое присоединение - это состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание условий для получения электрической энергии потребителем через энергоустановки сетевой организации, завершающийся фактической подачей напряжения и составлением акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акта об осуществлении технологического присоединения (пункт 7 Правил N 861).

Правила N 861 определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В пункте 16 Правил N 861 предусмотрено, что договор должен содержать следующие существенные условия: а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора; в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами сроков исполнения своих обязательств; г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон; д) размер платы за технологическое присоединение.

Из положений подпункта "б" пункта 16 Правил N 861 следует, что сроки, установленные для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, являются императивно установленными, т.е. предельными и для сетевой организации, и для заявителя, и ответственность сторон за несоблюдение сроков исполнения обязательств являются одним из существенных условий договора технологического присоединения.

Расчет неустойки в связи нарушением условий договора технологического присоединения регламентирован подпунктом "в" пункта 16 Правил N 861, который предусматривает обязанность стороны договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном абзацем порядке, за год просрочки.

Также механизм расчета неустойки содержится в пункте 17 Приложения N 11 "Типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям" к Правилам N 861.

Со слов истца, ответчик по своей инициативе исключил данный пункт об ответственности из текста договора с истцом, в остальных положениях договор идентичен типовой форме.

Вышеназванное условие Правил об ответственности подлежит применению сторонами договора независимо от его наличия или отсутствия в договоре, поскольку постановление Правительства РФ является нормативным правовым актом, обязательным для применения на всей территории Российской Федерации.

Предусмотренный постановлением механизм защиты прав получателя услуг не может быть отменен на основании волеизъявления одной из сторон договора.

В силу положения статьи 2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», законодательство Российской Федерации об электроэнергетике состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона и иных регулирующих отношения в сфере электроэнергетики федеральных законов, а также указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, принимаемых в соответствии с указанными федеральными законами.

Таким образом, постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 включено в систему законодательства РФ об электроэнергетике. Соответственно, предусмотренная данным постановлением неустойка является законной неустойкой.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, 0,25 процента от общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном абзацем порядке, за год просрочки.

Истец произвел расчет размера неустойки от размера платы за технологическое присоединение в размере 45% от цены договора, что составило 45 000 руб., размер неустойки не превышает период просрочки, определенный пунктом 17 контракта.

Установленная законом неустойка, выполняя в данном случае как функцию обеспечения исполнения обязательства, так и являясь мерой гражданско-правовой ответственности, не нарушает баланс интересов должника и кредитора, стимулируя должника к правомерному поведению, в то же время, не позволяя кредитору получить несоразмерное удовлетворение за нарушенное право.

Заключив договор технологического присоединения объекта ответчика к электрическим сетям, ответчик знал о требованиях закона в части срока исполнения мероприятий, мерах ответственности за его нарушение, а потому обязан был выполнять мероприятия в установленный срок.

01.01.2022 ответчиком утрачен статус сетевой организации, о чем истец не был уведомлен ответчиком.

28.11.2022 сторонами заключено трехстороннее соглашение о замене стороны в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №3/9-767 от 20.10.2021.

В силу п. 1 ст. 453 ГК РФ при изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.

В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора (п. 3 ст. 453 ГК РФ).

Следовательно, по общему правилу, изменение договора влечет изменение соответствующих обязательств сторон лишь на будущее время и не освобождает стороны от ответственности за нарушение обязательств, возникших до такого изменения.

Таким образом, поскольку срок исполнения обязательства был сторонами изменен только 28.11.2022, то есть после наступления первоначального установленного сторонами срока исполнения обязательства (20.04.2022), у ответчика с этого момента до даты заключения трехстороннего соглашения, установившего другой срок выполнения работ, имеется просрочка исполнения обязательства.

Иное, то есть, освобождение ответчика от уплаты неустойки за период с даты наступления первоначального срока до заключения трехстороннего соглашения, в отсутствие в нем такого условия, не следует.

В соответствии с пунктом 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Из части 1 статьи 314 Гражданского кодекса следует, что если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Как установлено судом, по условиям договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 20.10.2021 №3/9-767, срок исполнения мероприятий по технологическому присоединению должно быть завершено не позднее 20.04.2022 (п. 5 договора).

Поскольку этого не произошло, то с указанной даты (20.04.2022) до даты заключения трехстороннего соглашения (28.11.2022) истец начислил неустойку.

Трехсторонне соглашение было заключено сторонами после истечения предусмотренного договором срока, период неустойки определен истцом верно.

Согласно статье 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, которой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании указанного, истцом произведен расчет неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению за период с 20.04.2022 по 27.11.2022 в размере 24 975 руб.

Также, из материалов дела следует, что в момент действия договора, ответчиком мероприятия по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям истца не производились.

При этом, судом установлено, что истцом обязательства по оплате технологического присоединения исполнены в размере 45 %, что предусмотрено п. 11 договора.

В силу п. 1 ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

В соответствии с пунктом 17 типового Договора, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Поскольку факт ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных договором, подтвержден материалами дела и в материалы дела не представлено доказательств наличия обстоятельств, определенных в качестве оснований освобождения от ответственности, требование истца о взыскании неустойки заявлено правомерно.

Истец просит взыскать с ответчика неустойку за нарушение технологического присоединения, которая составляет 24 975 руб., из расчета за 222 дня просрочки. Расчет неустойки судом проверен и признан арифметически правильным.

Доводы ответчика о том, что оно не могло исполнить договор в связи с тем, что с 01.01.2022 не является сетевой организацией на территории Ивановской области, отклоняются судом.

В силу пункта 1 статьи 416 ГК РФ невозможность исполнения, если она вызвана наступившим после возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает, влечет прекращение обязательства.

Документы, подтверждающие расторжение договора с сетевой организацией не представлены, таким образом договор признается действующим и обязательным к исполнению.

На момент прекращения данного статуса, технологическое присоединение объекта истца не выполнено.

Нормами действующего законодательства не предусмотрено оснований, освобождающих сетевую организацию от обязанности по осуществлению мероприятий, направленных на технологическое присоединение объекта потребителя.

Поскольку судом установлено, что ответчиком допущены нарушения условий договора, то требование о взыскании неустойки подлежат удовлетворению в заявленной сумме.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ уплаченная истцом государственная пошлина в связи с удовлетворением исковых требований относится на проигравшую сторону.

Руководствуясь статьями 64, 65, 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества «Ивановская городская электрическая сеть» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) 24975 руб. пени за период с 20.04.2022 по 27.11.2022 за просрочку исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 20.10.2021 №3/9-767, 10 000 руб. судебных расходов по оплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия. Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.

Судья:

А.Н. Калюжный