АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

 

 

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-1939/2024

г. Чебоксары

05 ноября 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 22 октября 2024 года.

 

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Владимировой О.Е.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Михайловой Е.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Герса", 428037, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, Г.О. ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ А.В.АСЛАМАСА, Д. 3, КВ. 37, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,

к обществу с ограниченной ответственностью "Стройтрест", Россия 428034, г. Чебоксары, Чувашская Республика, пр. Московский д. 52 А, оф. 302, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,

о взыскании 1 982 550 руб. 00 коп.,

при участии:

от истца ФИО1 по дов. от 01.03.2024 (сроком на 3 года),

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Герса" обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Стройтрест" о взыскании 1 982 550 руб. 00 коп. долга за выполненные работы по договору субподряда от 02.06.2023 №1 на производство строительных работ по благоустройству территории парка «Ельниковская роща» в г. Новочебоксарск Чувашской Республики, а также пени с 06.03.2024 по день фактического исполнения обязательства по уплате основного долга.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования.

Ответчик в заседание не явился, отзыв на иск не представил.

В силу положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие ответчика.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

02.06.2023 общество с ограниченной ответственностью "Стройтрест" (заказчик) и общество с ограниченной ответственностью "Герса" (исполнитель) заключили договор субподряда №1, по условиям которого Субподрядчик обязуется выполнить собственными и привлеченными силами работы по подготовке основания, установке металлического бордюра (1200x70x150мм) и укладке бетонной плитки (ГОСТ 17608-2017) при выполнении работ по благоустройству территории парка «Ельниковская роща» в г. Новочебоксарске Чувашской Республики, в соответствии с разделом 001.1-РП-СПОЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка (листы План покрытий листы 1.2, Конструкции дорожных одежд, Узлы устройства покрытий, Устройство водоотводного лотка, План раскладки плитки листы 1-3) (Приложение №1 к договору), Графиком выполнения работ (Приложение №2 к договору), строительными нормами, правилами и сдать объект готовый к эксплуатации Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ в сроки в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Пунктом 1.3 договора установлено, что Генподрядчик предоставляет все необходимые для выполнения работ материалы и оборудование согласно ПСД по строительству Объекта. Субподрядчик обязан убедиться, что все материалы и комплектующие, применяемые в работе, имеют соответствующие сертификаты и разрешения.

Согласно пункту 2.1 договора цена договора составляет ориентировочно 3500000 рублей 00 копеек из расчета 1050 рублей за 1 квадратный метр готового плиточного покрытия (ориентировочно 2853,3 кв.м), 200 рублей подрезка бетонной плитки за 1 пог.м (ориентировочно 1500 пог.м) и является стоимостью фактически выполненных качественных работ. Стоимость работ является твердой и не подлежит корректировке после фактического выполнения Субподрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором.

Пунктом 2.4 договора предусмотрено, что Генподрядчик обязан оплачивать выполненные по договору работы на основании сметы договора и при условии получения денежных средств от муниципального заказчика на цели настоящего договора и фактически выполненных в пределах Локальных смет Субподрядчиком работ не позднее 15 календарных дней с даты подписания Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ и получения в полном объеме исполнительной документации (актов освидетельствования скрытых работ, документов, подтверждающих качества материалов, оборудования, актов испытания). Авансирование не предусмотрено.

Генподрядчик, в случае принятия работ у субподрядчика, имеет право не оплачивать за выполненные Субподрядчиком работы до полного исполнения Субподрядчиком обязательства по передаче исполнительной документации. Срок 15 дней для оплаты работ начинается после получения Подрядчиком пакета исполнительной документации в полном объеме (пункт 2.4 договора).

В соответствии с пунктом 4.1 договора субподрядчик производит выполнение работ в соответствии со сроками, установленными в настоящем договоре и графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение №3 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - График).

Срок исполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору с момента заключения Договора до 05 августа 2023 года (пункт 4.2 договора).

Письмами от 24.01.2024, от 20.02.2024 истец уведомлял ответчика о готовности к сдаче результата работ.

В связи с уклонением ответчика от приемки работ акты от 29.02.2024 №1 на сумму 2395000 руб., от 29.02.2024 №2 на сумму 402550 руб. истцом подписаны в одностороннем порядке на общую сумму 2797550 руб.

С учетом внесенных платежей 26.07.2023 в размере 465000 руб. и 31.08.2023 в размере 350000 руб. сумма долга ответчика, по данным истца, составляет 1982550 руб.

Поскольку до настоящего времени задолженность за выполненные работы ответчиком в полном объеме не оплачена, истец обратился в суд с настоящим иском.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств допускается в исключительных случаях, прямо указанных в законе.

В соответствии со статьей 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

По правилам статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 753 ГК РФ, пунктом 14 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

При этом в силу части 2 статьи 65 АПК РФ обязанность доказывания обоснованности мотивов отказа от приемки выполненных работ возложена законом на заказчика; при непредставлении таких доказательств заказчиком односторонний акт приемки выполненных работ является надлежащим и достаточным доказательством фактического выполнения подрядчиком работ, перечисленных в акте.

В силу положений части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены. 

Ответчик не представил доказательства направления мотивированного отказа от подписания актов выполненных работ, равно как и доказательства наличия обоснованных причин для отказа от их подписания.

Учитывая изложенное, суд полагает, что работы по актам от 29.02.2024 №1 на сумму 2395000 руб., от 29.02.2024 №2 на сумму 402550 руб. считаются принятыми ответчиком.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Надлежащих доказательств в опровержение объема, стоимости и качества выполненных работ ответчик суду не представил.

Учитывая изложенное, требование истца о взыскании с ответчика 1982550 руб. долга подлежит удовлетворению.

Истец просит взыскать с ответчика пени с 06.03.2024 по день фактического исполнения обязательства по уплате основного долга.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ). 

Пунктом 7.2 договора предусмотрено, что в случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором. Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Генподрядчик уплачивает пени (неустойку) за несвоевременное исполнение обязательства по оплате выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ (при соблюдении Субподрядчиком всех условий договора) исключительно при условии получения средств от муниципального заказчика на цели настоящего договора и неправомерном их удержании.

С учетом изложенного суд удовлетворяет требование истца о взыскании пени в сумме 274 979 руб. 69 коп. за период с 18.03.2024 по 22.10.2024 и с 23.10.2024 по день фактической оплаты долга исходя из 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени. 

Правовых оснований для уменьшения размера неустойки по статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации у суда не имеется.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина относится на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройтрест" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Герса" 1 982 550 (Один миллион девятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп. долга, 274 979 (Двести семьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят девять) руб. 69 коп. пени за период с 18.03.2024 по 22.10.2024 и с 23.10.2024 по день фактической оплаты долга исходя из 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени, 32 826 (Тридцать две тысячи восемьсот двадцать шесть) руб. расходов по государственной пошлине. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

 

Судья

О.Е. Владимирова