ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-23920/2020

Дело № А40-304437/19

г. Москва

20 июля 2020 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе судьи А.Л. Фриева 

рассмотрев апелляционную жалобу ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России» на Решение Арбитражного суда г.Москвы от 12.03.2020 по делу №А40-304437/19, принятое в порядке упрощенного производства, по иску ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к ответчику: ФГУП «ОКБ ОТ РАН» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки по договору №111-13 от 15.07.2013 г. в размере 791.038,47 рублей,

У С Т А Н О В И Л:

ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с ФГУП «ОКБ ОТ РАН» в пользу общества неустойки в размере 791038,47 рублей.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.03.2020 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой считает его незаконным и необоснованным, просит решение суда отменить, в удовлетворении иска отказать.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства в соответствии со статьей 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации без вызова сторон.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы на основании следующего.

Из материалов дела видно, что между истцом и ответчиком был заключен договор от 15.07.2013 № 111-13.

Согласно условиям договора ответчик обязался выполнить ОКР согласно срокам, установленным в Календарном плане.

В обоснование заявленных требований истец указал, что ответчиком допущена просрочка выполнения работ по этапу № 3 ОКР в период с 03.12.2016 по 05.03.2017.

Факт нарушения обязательств ответчика по 2 этапу ОКР также был установлен вступившими в законную силу судебными актами по делам № А40-108528/19 и № А40-6537/19.

В соответствии с п. 4.2 договора за нарушение ответчиком сроков выполнения этапа ОКР, истец вправе взыскать с ответчика неустойку в размере 0,1% от стоимости соответствующего этапа работ за каждый день просрочки.

Согласно расчету истца сумма неустойки за вышеуказанный период составила 791038,47 рублей.

Разрешая спор, и удовлетворяя иск, суд первой инстанции исходил из того, что факт нарушения ответчиком обязательств по контракту подтверждается материалами дела, расчет неустойки произведен истцом верно.

При этом суд отклонил доводы ответчика, изложенные в отзыве на иск, так как установил, что ответчик не извещал заказчика о приостановлении работ, своим правом, предоставленным ст. 716 ГК РФ на приостановление работ не воспользовался. Суд руководствовался тем, что обращения в адрес заказчика не направлялись и доказательств обратного ответчиком не представлено.

Апелляционный суд соглашается с выводами суда первой инстанции и отклоняет доводы жалобы по следующим основаниям.

Доводы жалобы о срыве сроков поставок и поставке дефектных материалов не подтверждаются имеющимися в материалах дела доказательствами. Более того, отношения ответчика с его контрагентами не входит в предмет доказывания по настоящему спору. Представленные в материалы дела ответчиком документы подтверждают лишь факт закупки и поставки комплектующих материалов.

Ссылка ответчика в качестве подтверждения факта выполнения работ по 2 этапу договора на товарно-транспортную накладную не свидетельствует о том, что ответчиком не была допущена просрочка в выполнении работ. 

Согласно представленному в дело акту работы были выполнены ответчиком 25.12.2019, то есть – с нарушением установленных договором сроков.

Проверив расчет неустойки, суд апелляционной инстанции признает его верным, в связи с чем, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что заявленные требования подлежат удовлетворению в полном объеме. Оснований для применения ст. 333 ГК РФ в рассматриваемом случае не имелось.

В отношении довода апелляционной жалобы о несоблюдении претензионного порядка урегулирования спора, суд апелляционной инстанции отмечает, что в материалах дела имеется претензия от 25.11.2020 № 4545/71, которая была получена ответчиком 02.12.2020, что подтверждается отчетом об отслеживании почтового отправления, представленным истцом в материалы дела во исполнение определения Арбитражного суда города Москвы от 22.11.2019 об оставлении иска без движения.

При указанных обстоятельствах, доводы ответчика о несоблюдении истцом претензионного порядка подлежат отклонению. 

Принимая во внимание вышеизложенное, а также, учитывая конкретные обстоятельства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынесено законное и обоснованное решение.

Оснований, установленных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для отмены судебного решения арбитражного суда первой инстанции, по настоящему делу не имеется.

Государственная пошлина относится на заявителя жалобы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266, 268, 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 12.03.2020 по делу № А40-304437/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

 

Судья:  А.Л. Фриев