АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-39867/23

21 июня 2024 года.

г. Ростов-на-Дону

Резолютивная часть решения объявлена   06 июня 2024 г.

Полный текст решения изготовлен            21 июня 2024 г.

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Меленчука И.С.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Бурбой А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №29 "Колобок" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

третье лицо - отдел образования Администрации Белокалитвинского района

о взыскании 451 586 руб. задолженности, 33 658,21 руб. пени

встречному иску муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №29 "Колобок"

к публичному акционерному обществу "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"

о взыскании 171 241,41 руб. пени

при участии:

от истца:  представитель ФИО1 по доверенности от 01.01.2023, ФИО2 по доверенности от 23.06.2023

от ответчика: представитель ФИО3 по доверенности от 25.01.2024,

от третьего лица: представитель ФИО3 по доверенности от 10.01.2024,

установил:

публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" обратилось в суд с иском к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №29 "Колобок" о взыскании 451 586 руб. задолженности по контракту №12 от 28.05.2021, 33 658,21 руб. пени с 12.05.2023 по 30.10.2023. Определением суда от 07.11.2023 привлечено третье лицо.

От ответчика в материалы дела поступило встречное исковое заявление о взыскании 141 858,22 руб. пени с ходатайством об отсрочке уплаты госпошлины.

Встречное исковое заявление, а также приложенные к нему документы поданы с соблюдением требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) ответчик до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, вправе предъявить истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным иском. Частью 3 статьи 132 АПК РФ предусмотрено, что встречный иск принимается арбитражным судом в случае, если встречное требование направлено к зачету первоначального требования; удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска.

Предъявление встречного иска согласно части 2 статьи 132 АПК РФ осуществляется по общим правилам предъявления исков.

Рассмотрев ходатайство истца о рассрочке уплаты государственной пошлины, суд считает его подлежащим удовлетворению, поскольку истцом надлежащим образом подтверждено тяжелое материальное положение.

В соответствии с частью 1 статьи 333.41 Налогового кодекса РФ отсрочка или рассрочка уплаты государственной пошлины предоставляется по ходатайству заинтересованного лица в пределах срока, установленного пунктом 1 статьи 64 Налогового кодекса РФ – на срок, не превышающий один год.

В связи с изложенным, ходатайство истца об отсрочке уплаты государственной пошлины подлежит удовлетворению до вынесения окончательного судебного акта по делу, но не более, чем на один год.

Поскольку встречное исковое заявление соответствует требованиям статьи 132 АПК РФ, направлено к зачету первоначального требования и исключает удовлетворение первоначального иска, то оно подлежит принятию судом.

По правилам статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании 23.05.2024 объявлен перерыв до 06.06.2023 до 12 час. 00 мин.

После окончания перерыва судебное заседание продолжено.

Судом в порядке ст. 49 АПК РФ удовлетворено ходатайство истца об уменьшении цены иска до 469 167,75 руб., из них 451 586 руб. – задолженность, 17 581,75 руб. – пени, пени по день фактической оплаты задолженности.

Судом удовлетворено ходатайство истца о приобщении к материалам дела контррасчета пени по встречному иску.

Судом в порядке ст. 49 АПК РФ удовлетворено ходатайство ответчика об увеличении цены встречного иска до 171 241,41 руб. пени.

Определения суда, выносимые по рассматриваемому делу, опубликованы на официальном портале арбитражных судов «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Суд, исследовав материалы дела, изучив все представленные документальные доказательства и оценив их в совокупности, установил следующее.

Между ПАО «Газпром газораспределениеРостов-на-Дону» (далее - истец) и муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад N? 29 «Колобок» (далее - ответчик) 28.05.2021заключен контракт N? 12 (далее - контракт).

В соответствии с пунктом 1.1 контракта истец обязуется выполнить работы, указанные в п.1.2 настоящего контракта, и сдать их результат ответчику, а ответчик обязуется принять работы и оплатить их. Пунктом 1.2контракта предусмотрено, что истец обязуется разработать проектную документацию по объекту: «Капитальный ремонт объекта МБДОУ ДС N?29«Колобок» по адресу: 347028, Ростовская область, Белокалитвинский район, п.Синегорский, ул. Белинского 2 в части замены системы теплоснабжения (с установкой автоматизированного газоиспользующего теплоагрегата), демонтажем и заменой системы отопления», (далее - работы) в соответствии со сметными расчетами (сводной сметой на проектные работы и инженерные изыскания в составе: сметой N 1 на проектные работы, сметой N 2 на проектные работы) - Приложение N 1 к контракту, сметой на проверку проектных решений - Приложение N 2 к контракту, заданием на проектирование – Приложение N 3 к контракту, дополнительными требованиями к заданию проектирование - приложение N 4 к Контракту, которые являются неотъемлемой частью контракта, а ответчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, которые установлены контрактом.

Цена контракта составляет 451 586 руб., в том числе НДС: 75 264,33 руб. (пункт 2.1).

Расчет с истцом за выполненные в полном объеме работы осуществляется ответчиком на основании счета, счета-фактуры и акта сдачи - приемки выполненных работ после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

Работы выполнены истцом в полном объеме. В соответствии с актом приема-передачи документации от 27.09.2021 результаты работ переданы ответчику частично. 14.03.2023 ответчику направлены акты приема-передачи оставшейся части документации. Акты получены ответчиком 04.04.2023.

В соответствии с п.4.3. контракта срок приемки работ составляет 5 (пять) календарных дней. Письмо оставлено без ответа, акты не подписаны. В нарушение условий контракта результаты работы ответчиком в установленный срок не приняты и оплата не произведена. В связи с этим 25.05.2023 истцом направлена претензия с требованием принять и оплатить результаты выполненных работ. Претензия оставлена без ответа, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Изучив материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Правовая природа анализируемых правоотношений сторон квалифицируется как отношения, регулируемые нормами Гражданского кодекса Российской Федерации о подряде и нормами Федерального  закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Согласно статье 746 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному контракту государственным заказчиком выступают государственный орган, обладающий необходимыми инвестиционными ресурсами, или организация, наделенная соответствующим государственным органом правом распоряжаться такими ресурсами, а подрядчиком - юридическое лицо или гражданин.

В соответствии со статьями  702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить работы в порядке, предусмотренном договором.

Статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. В статье  310 Гражданского кодекса Российской Федерации установлена недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства.

Основанием для подачи иска послужило наличие задолженности за выполненные истцом работы.

Ответчик против удовлетворения иска возражал, указал, что работы, предусмотренные контрактом, должны быть выполнены в срок: с момента заключения настоящего контракта до 24 декабря 2021 года Истцом значительно нарушен срок выполнения работ, который непосредственно отразился на результате и сроках выполнения, как самого контакта, так и другого контракта, непосредственно имеющее отношение на результат работ, а именно контракт, заключенный (так же с ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону») по результатам открытого конкурса от 18 октября 2021 г. №03583003594210000020017 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования (замена узлов управления системы отопления, электроснабжение узлов управления системы отопления, замена сетей наружного электроснабжения, замена наружных тепловых сетей, газоснабжение, устройство фундаментов под тепловые газовые установки, монтаж теплового газового оборудования с установкой автоматизированного газоиспользующего теплоагрегата для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №29 «Колобок» на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт МБДОУ ДС № 29 «Колобок» по адресу: 347028, 

<

...> в части замены системы теплоснабжения (с установкой автоматизированного газоиспользующего теплоагрегата), с демонтажем и заменой системы отопления»). Средства на выполнение работ по капитальному ремонту (согласно заключенному контракту от 18 октября 2021 г. №03583003594210000020017) выделены за счет резервного фонда Правительства Ростовской области на основании распоряжения от 07.09.2021 № 756 «О выделении средств» для 21 образовательной организации, в том числе и МБДОУ ДС № 29 «Колобок». В связи с выделением средств на основании распоряжения от 07.09.2021 № 756 «О выделении средств» ответчику пришлось принять от истца часть выполненных работ, согласно акту приема передачи документации от 27.09.2021 оплата за частичное выполнение работ контрактом не предусмотрена.

Также ответчик указал, что 05.10.2021 в адрес истца направленно письмо № 65.06/3403 о предоставлении проектных решений с положительным заключением государственной экспертизы по разделу: «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» на что от истца получен ответ о том, что в целях исполнения контрактов от 28.05.2021, заключенных с муниципальными бюджетными образовательными учреждениями Белокалитвинского района, филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону в г. Белая Калитва подписал 24 договора субподряда с ООО «УК«Главстройпроект» на разработку проектной документации по 24 объектам и 06.10.2021 с ООО «УК«Главстройпроект» было уведомлено о необходимости предоставления проектных решений с положительным заключением государственной экспертизы по разделу: «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (письмо от 08.10.2021 № 01-6-12/2041).

В связи с тем, что работы 24.12.2021 выполнены не были, в адрес истца ответчиком направлена претензия о нарушении сроков выполнения работ от 25.12.2021, на которую от истца поступил ответ от 20.01.2022 о том, что учитывая социальную значимость объекта капитального строительства, действуя добросовестно, ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» примет меры для завершения всех работ в кратчайшие сроки.

Указанное послужило основанием для обращения ответчика со встречными требованиями о взыскании пени за просрочку выполнения работ.

Из материалов дела следует, что в соответствии с актом приема-передачи от 27.09.2021 результаты работ переданы ответчику частично (проект раздел 5 и 11).  19.02.2024 в адрес МБДОУ ДС № 29 «Колобок» заказным письмом направлена   проектная документация и положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки проектных решений по объекту. В связи с истечением срока хранения (ввиду неполучения) данное письмо выслано обратно истцу 26.03.2024 (неудачная попытка вручения от 20.02.2024).

Работы приняты ответчиком в 2021 году на сумму 138 644 руб. Оставшаяся часть направлена истцом в 2024 году. Ответчик качество и объем работ не оспорил, мотивированных возражений не заявил. Оплата работ ответчиком в полном объеме не произведена.

В соответствии с частью 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В рассматриваемом случае, мотивированный отказ от подписания акта ответчик не  выразил, в связи с чем, в соответствии со статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, работы считаются принятыми.

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работы цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работа в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Согласно пунктам 1, 3 статьи 724 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

В рассматриваемом случае, возможное наличие недостатков не освобождает от оплаты выполненных работ, а порождает право заказчика на обращение к подрядчику об устранении недостатков, уменьшения цены, возмещение расходов на устранение недостатков.

При этом суд учитывает, что факт выполнения спорных работ подтверждается тем, что спорный объект, для которого разрабатывалась проектная документация, газифицирован, что подтверждается актами о готовности сетей к технологическому подключению, о подключении от 22.08.2022, что ответчиком не оспаривается.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что работы подрядчиком фактически выполнены.

Представленные документы, помимо акта в совокупности с доказательствами направления акта, а также перепиской сторон, подтверждают факт выполнения работ истцом и использования результата работ заказчиком.

С учетом изложенного, требование истца о взыскании 451 586 руб. задолженности подлежит удовлетворению.

Также истцом заявлено о взыскании с ответчика пени в размере 17 581,75 руб. с 26.03.2024 по 06.06.2024 с последующим начислением по день фактической оплаты задолженности (уточненные требования).

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права. В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Кодекса неустойкой (штрафом, пенями) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. В силу пункта 1 статьи 333 Кодекса, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить.

В соответствии п. 6.6 контракта, в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, исполнитель вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом.

Как разъяснено в пунктах 65 и 66 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограниченна (например, пункт 6 статьи 16.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств").

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статья 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.

В рассматриваемом случае, суд считает доказанным ненадлежащее исполнение обязательств по договору ответчиком, по основаниям, приведенным выше. Ответчиком о снижении размера пени не заявлено.

Суд проверил расчет пени и считает его неверным ввиду следующего.

Согласно п. 2.2 контракта расчет с исполнителем за выполненные в полном объеме работы осуществляется заказчиком на основании счета, счета-фактуры и акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанных заказчиком и исполнителем. Оплата Заказчиком выполненных работ производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. 

Пунктом 4.3 предусмотрено, что заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения проектной документации, производит экспертизу качества выполненных работ на соответствие их требованиям контракта, проверяет выполнение обязательств по контракту в установленные им сроки, принимает результаты выполненных работ и направляет исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или отказывается в принятии выполненных работ и направляет мотивированный отказ. Исполнитель обязан устранить указанные заказчиком недостатки за свой счет в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа.

Таким образом, учитывая п.п. 4.3, 2.2 контракта и направление проектной документации ответчику 19.02.2024 (неудачная попытка вручения ответчику 20.02.2024), работы должны быть приняты и оплачены ответчиком до 26.03.2024, в связи с чем, пени подлежат начислению с 27.03.2024.

С учетом перерасчета суда, требование истца о взыскании пени подлежит удовлетворению с 27.03.2024 по 06.06.2024 в размере 17 340,90 руб. с последующим начислением пени с 07.06.2024 по день фактической оплаты задолженности 451 586 руб. в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату оплаты, в день. В остальной части требования суд отказывает.

Рассмотрев встречный иск о взыскании пени в размере 171 241,41 руб. с 25.12.2021 по 04.06.2024 (уточненная редакция требований).

В силу ч.1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно п. 6.5. контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Факт несвоевременного выполнения работ истцом не оспаривается.

Как указано выше, срок работ по контракту предусмотрен до 24.12.2021, фактически в полном объеме работы сданы ответчику 20.02.2024.

Расчет пени судом проверен и признан неверным, поскольку ответчиком не учтено, что обязательства истцом по контракту не исполнены лишь частично на сумму 312 942 руб. с учётом выполнения работ в пределах срока контракта в 2021 году на сумму 138 644 руб.

При указанных обстоятельствах начисление пени на общую сумму контракта без учета надлежащего исполнения части работ противоречит принципу юридического равенства, предусмотренному пунктом 1 статьи 1 Кодекса, поскольку создает преимущественные условия кредитору, которому, следовательно, причитается компенсация не только за не исполненное в срок обязательство, но и за те работы, которые были выполнены надлежащим образом. Между тем превращение института неустойки в способ обогащения кредитора недопустимо и противоречит ее компенсационной функции, в связи с чем, неустойка подлежит исчислению исходя из размера неисполненных обязательств в размере 312 942 руб.

Также суд учитывает, что Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Как разъяснено в пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойка (ст.330 Гражданского кодекса Российской Федерации), пени за просрочку уплаты налога или сбора (ст.75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (пп.2 п.3 ст. 9.1, абзац десятый п.1 ст.63 Закона о банкротстве).

Исходя из смысла и цели введения моратория для обеспечения стабильности экономики путем оказания поддержки отдельным хозяйствующим субъектам взыскание неустойки за нарушение обязательства в период действия моратория не отвечает существу соответствующего правового регулирования.

Действие моратория распространяется на всех подпадающих под него лиц, которые не обязаны доказывать свое тяжелое материальное положение для освобождения от ответственности за нарушение обязательств в период моратория. Мера поддержки в виде неначисления неустойки распространяется на период действия моратория вне зависимости от даты образования задолженности.

Таким образом, пени в течение срока действия моратория на банкротство (с 01.04.2022 по 01.10.2022), введенного постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497, не подлежит начислению.

Истцом о снижении пени по статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не заявлено.

Учитывая изложенное, суд произвел перерасчет пени на сумму невыполненной части работ с исключением периода действия моратория, с 25.12.2021 по 20.02.2024, размер которых составил - 100 809,05 руб. и подлежит удовлетворению в указанном размере. В остальной части встречного иска суд отказывает.

В соответствии с частью 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при принятии решения арбитражный суд, в том числе, распределяет судебные расходы.

Истцом оплачена госпошлина в размере 12 705 руб. платежным поручением №32215 от 23.10.2023.

Размер госпошлины по иску составляет – 12 383 руб.

По встречному иску ответчиком госпошлина не оплачена, размер госпошлины составляет – 6 137 руб.

Поскольку иск удовлетворен частично (99,95%), то расходы истца по оплате госпошлины относятся на ответчика в размере 12 377 руб., излишне уплаченная госпошлина размере 322 руб. подлежит возврату истцу. Поскольку встречный иск удовлетворен частично (58,87%), госпошлина относится пропорционально на сторон со взысканием в доход федерального бюджета: с истца в размере 3 613 руб., с ответчика – 2 524 руб.

Учитывая, что требования носят встречный характер, судом произведен зачет встречных требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №29 "Колобок" в пользу публичного акционерного общества "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" 481 303,90 руб., из них 451 586 руб. -задолженность, 17 340,90 руб. – пени, 12 377 руб. – судебные расходы по оплате госпошлины, а также пени с 07.06.2024 по день фактической оплаты задолженности 451 586 руб. в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату оплаты, в день.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с публичного акционерного общества "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в пользу муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №29 "Колобок" 100 809,05 руб. пени.

В остальной части встречного иска отказать.

В результате зачета взысканных сумм взыскать с муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №29 "Колобок" в пользу публичного акционерного общества "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" 380 494,85 руб., а также пени с 07.06.2024 по день фактической оплаты задолженности 380 494,85 руб. в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату оплаты, в день.

Взыскать с публичного акционерного общества "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в доход федерального бюджета 3 613 руб. госпошлины.

Взыскать с муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №29 "Колобок" в доход федерального бюджета 2 524 руб. госпошлины.

Возвратить публичному акционерному обществу "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" из федерального бюджета 322 руб. госпошлины, уплаченной платежным поручением №32215 от 23.10.2023.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                                          Меленчук И. С.