9_6409237  

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-65399/2017

г. Москва

30 октября 2017 года

Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-65399/2017 по иску  Гаражно-строительного кооператива «КЛЕН» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, 630111, 

<

...>) к  Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-строительная  компания «СИБИРЯК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 630020, 

<

...>) об обязании устранить  недостатки по договору генподряда № 09-2014 от 28.04.2014,  

при участии в судебном заседании: согласно протоколу, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью  Производственно-строительная компания «СИБИРЯК» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, 630020, 

<

...>) в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу  устранить следующие недостатки строительных работ, выявленные на  объекте незавершенном строительством по адресу: 

<

...> стр.:  

-линейные размеры кирпичной кладки в осях А-Е, 5-14 выполнены не в  соответствии с проектом;  

-линейные размеры в осях А-Е различаются от проектных данных от 30  до 80 мм;  

- линейные размеры в осях 5-14 различаются от проектных данных - составляет 40, 780 вместе 36,550, -увеличение длины стен составляет 4,230 м;  

-измеренная толщина шва кирпичной рядовой кладки в местах  устройства армирования кладки металлической сеткой, толщина шва  

колеблется от 15 до 20 мм, что является несоответствием требованием СНиП  3.03.01-87 [12];  

-металлическая сетка, уложенная в швы кирпичной кладки  прерывистыми участками по длине стены, что является несоответствием  требованиям проектной и нормативной документации – СНиП 3.03.01-87;  

-подземные части погребов, выполненные из бетонных блоков ФСБ,  расположенные вдоль осей Б и Е, в осях 5-14 не имеют проектного решения  и в проектной документации отсутствуют;  

-наклонная часть въездного пандуса, выполненная в отметках - 0,30 - +1,15 и в осях 1-2/Б-Г в виде частично бетонного монолитного участка и ж/б  плит перекрытия, не соответствует проектному решению - применение  сборного ж/бетона в виде плит ПК 76,5.15-8;  

-горизонтальная площадка въездного пандуса, выполненная на отметке  +1,15 в осях 2-3/Б в виде бетонного монолитного участка, не соответствует  проектному решению - применению сборного ж/бетона в виде плит ПК 76,5.  15-8;  

-ведение исполнительной документации не соответствует  нормативным требованиям при производстве строительных работ;  

-инженерное сопровождение хода строительства, соблюдение  технологии строительного производства, качество примененных материалов  документально не подтверждено.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  Производственно-строительная компания «СИБИРЯК» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, 630020, 

<

...>) в доход федерального бюджета 6000 (шесть тысяч) руб. 00 коп.