АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-9361/2016

г. Белгород

11 октября 2017 года

Арбитражный суд Белгородской области  

в составе судьи Танделовой З.М. 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств  аудио- и видеозаписи секретарем судебного заседания ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению МБУ детский  оздоровительный лагерь "Электроника" (ИНН 

<

***>,  ОГРН

<

***>)  

к ООО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС-СП" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

об обязании выполнить работы и взыскании 480 760, 15 руб. 

и исковому заявлению ООО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС-СП" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к МБУ детский оздоровительный лагерь "Электроника" (ИНН 

<

***>,  ОГРН

<

***>)  

о взыскании 729 285, 41 руб. 

При участии в судебном заседании:  

от МБУ детский оздоровительный лагерь "Электроника": представитель  ФИО2, доверенность от 06.02.2017;  

от ООО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС-СП": представить ФИО3,  доверенность от 01.08.2017  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования МБУ детский оздоровительный лагерь  "Электроника" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> удовлетворить  частично.  

2. Обязать ООО «ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС-СП» выполнить по  контракту от 28.06.2016 № Ф.2016.126163 следующие работы:  

- разборку покрытий полов: дощатых – 3,7 кв.м;  

- гидроизоляцию стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя – 9,9  кв.м;  

- кладку перегородок из кирпича: неармированных толщиной в ½ кирпича  при высоте этажа до 4 м – 6,6 кв. м;  

- укладку перемычки брусковой 1ПБ10-1/бетон В15 (М200), объем 0,008 м3,  расход арматуры 0,31 кг/(серия 1.038.1-1 вып. 1) – 12 шт.;  

- штукатурку поверхностей внутри здания цементно-известковым или  цементным раствором по камню и бетону – 89,78 кв.м;  

- гладкую облицовку стен, столбов, пилястр и откосов – 22,96 кв.м; 

- сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной  смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или  оклейки обоями: потолков – 27,07 кв.м;  

- сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной  смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или  оклейки обоями: стен;  

- устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом  клее с защитой рубероидом: первый слой – 27,07 кв.м;  

- устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм – 3,6 кв.м; 

- устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих –  5 м/пог., в том числе уголок внутренний для пластикового плинтуса, высотка  49 мм – 6 шт.;  

- высококачественную окраску масляными составами по дереву: полов; 

-установку блока дверного, одностворчатого, 3-х филёнчатого, глухого  соснового, лакированного, размер дверного полотна 690х2090 мм – 12  

комплектов, замка врезного оцинкованного с цилиндровым механизмом из  латуни – 12 комплектов;  

- устройство основания под колодец: бетонного – 0,1 куб.м, из плиты днища  ПД 110.120.12-6/бетон В15 (М200) – 1 шт.;  

- установку люка: – 1 шт., 

ревизии полиэтиленовой с крышкой размером 100х50 мм – 3 шт.,  

заглушки канализационной полипропиленовой диаметром 110 мм – 9 шт.,  решеток металлических вентиляционных для пола – 12 шт.,  

зонтов вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,  прямоугольные, периметром шахты 400 мм – 12 шт.;  

- установку дверных блоков по ширине и высоте дверных проемов;  - гидроизоляцию под перегородками и на полу;  

- прокладку трубопроводов ГВС и ХВС в стяжке пола с теплоизолирующей  (компенсирующей) оболочкой;  

- штукатурные, малярные и облицовочные работы; 

-горизонтальную гидроизоляция пола, а также гидроизоляцию стен в  душевых;  

- очищение старой краски под облицовочной керамической плиткой; 

- устройство порогов в санузлах, разделяющих помещения санузлов от  коридора.  

 3. Взыскать с ООО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС-СП" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу МБУ детский оздоровительный лагерь  "Электроника" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) пени за нарушение  сроков выполнения работ по контракту № Ф.2016.126163 за период с  01.10.2016 по 04.10.2017 в сумме 221 993, 53 руб., судебные расходы по  экспертизе в сумме 34 378,50 руб., а всего 256 372,03 руб.  

 4.Судебные расходы по экспертизе в сумме 34 378,50 руб. отнести на  МБУ детский оздоровительный лагерь "Электроника" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

 5.В остальной части иска отказать. 

 6.Иск ООО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС-СП" удовлетворить частично 

7.Взыскать МБУ детский оздоровительный лагерь "Электроника" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО  

"ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС-СП" (ИНН 6151018730, ОГРН 1146182001261)  задолженность по оплате стоимости выполненных работ по контракту №  Ф.2016.126163 от 28.06.2016 в размере 647 370 руб.02 коп руб., пени за  просрочку оплаты стоимости выполненных работ за период с 07.11.2016 по  07.10.2017 в размере 59 816,99 руб., судебные расходы по государственной  пошлине в сумме 17 058, 42 руб., а всего 724 245,43 руб.  

8.В остальной части иска отказать. 

9.Судебные расходы по государственной пошлине в сумме 527,58 руб.  отнести на ООО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС-СП" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>).  

10.В результате зачета взаимных требований взыскать с МБУ детский  оздоровительный лагерь "Электроника" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу ООО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС-СП" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) 467 873,40 руб.  

11.Взыскать с ООО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС-СП" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в сумме 3 824 руб.  

 12.Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской  области.  

Судья Танделова З. М.