Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Москва

Дело № А40-112290/19

116-983 

24 сентября 2019 г.

Резолютивная часть решения объявлена 23 августа 2019 года

Полный текст решения изготовлен 24 сентября 2019 года

Арбитражный суд в составе судьи Стародуб А. П., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело 

по исковому заявлению: АО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗПРОЕКТСТРОЙ» (ОГРН: 

<

***>)

к  ООО "ИНЖСТРОЙПРОЕКТ" (ОГРН: 

<

***>)

третье лицо: АО «СИТИ-XXI век»

о взыскании 1 000 000 рублей убытков.

при участии представителей: 

от истца:  ФИО2 по доверенности от 01.01.2019 года

от ответчика:  не явился, извещен.

от третьего лица: ФИО3 по доверенности от 10.04.2019 года 

У С Т А Н О В И Л:

АО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗПРОЕКТСТРОЙ» обратилось в арбитражный суд города Москвы с иском к  ООО "ИНЖСТРОЙПРОЕКТ"  о взыскании убытков в сумме 1 000 000 рублей.

Представитель ответчика надлежащим образом извещенный о месте и времени рассмотрения спора в суд не явился, отзыв не представил.

Дело рассмотрено в порядке ст.123, ч.1, 3 ст. 156 АПК РФ.

В судебном заседании представитель истца и третьего лица,  не возражали против рассмотрения спора в отсутствие представителя ответчика. Истец иск поддержал.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителя истца и третьего лица, суд пришел к выводу, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 12 июля 2017 года между Истцом и 2м Ответчиком заключён договор подряда № 12/07-СМР в соответствии с которым ООО «ИНЖСТРОЙПРОЕКТ» (2й Ответчик) обязался выполнить комплекс работ по перекладке тепловой сети по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское, проспект Мира, вл. 95 стр. 3,4 (кадастровый номер земельного участка: 77:02:00220 15:1001) на объекте строительства: «Апартаменты с общественным центром и подземной автостоянкой». Заказчиком (бенефициаром) указанного строительства является АО «СИТИ-XXI ВЕК».

В соответствии с условиями договора (п.4.1.7.) «Подрядчик несет ответственность за выполнение работ по Договору, в том числе самостоятельно и за свой счёт оплачивает все, связанные с выполнением работ по Договору неустойки, административные штрафы и причиненные убытки. Заказчик (Истец) 

не несёт ответственности за действия Подрядчика, равно как и за действия, привлекаемых Подрядчиком для исполнения Договора третьих лиц (субподрядчиков и т.д.)».

Также, к обязанностям Подрядчика относится (п.4.1.10.): «Обеспечить в месте проведения Работ соблюдения всех мероприятий по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии, пожарной и экологической безопасности, электробезопасности. Обеспечить персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Нести ответственность за нарушения, допущенные в месте проведения Работ».

30 мая 2018 года и 29 августа 2018г. ОАТИ г. Москва (объединение административ-но-технических инспекций города Москвы) в ходе осуществления строительного надзора выявило нарушения Правил проведения земляных работ и Кодекса города Москвы об административных правонарушениях. Были вынесены Постановления об административных правонарушениях и о назначениях административных наказаний: 20.07.18г. №18-44-П30-00109/01 (УИН 0355071800000019113466214) – 700.000 руб., 06.09.18г. №18-44-Ф01-00087/01 (УИН 0355071800000020277975090) – 300.000 руб.,

1. В Постановлении по делу об административном правонарушении о наз-начении административного наказания от 20.07.2018г. № 18-44-П30-00109/01  УИН 0355071800000019113466214 установлено, что 30.05.2018 г. в 15.14 по адресу 

<

...> ЗАО ИЦ «СОЮЗПРОЕКТСТРОЙ» совершил администра-тивное правонарушение предусмотренное ч. 2 ст. 8.18 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных право-нарушениях», а именно «Нарушение срока выполнения работ в соответствии с утверждёнными графиками и ордером на производство работ по прокладке инженерных сетей (благоустройство территории не восстановлено)».

2. В Постановлении по делу об административном правонарушении о назначении административного наказания от 06.09.2018г. № 18-44-Ф01-00087/01 УИН 03550718 00000020277975090 установлено, что 29.08.2018г. в 10.00 по адресу 

<

...> выявлено: Выявлен факт отсутствия информационного щита, неудовлетворительного содержания ограждений, отсутствия аварийного освещения при производстве работ ЗАО ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗПРОЕКТ-СТРОЙ» по ордеру № 15020302. Заказчик - АО «СИТИ-ХХI ВЕК» что является нарушением п.3.6 Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве», утверждённых постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015г. № 299-ПП и влечёт административную ответственность, установленную ч.1 ст.8.18 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года №45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях».

17 марта 2019 года Ответчикам предъявлена претензия б/н с требованием оплатить административные штрафы. Ответа на претензию не получено до настоящего времени ни от одного из Ответчиков.

В связи с чем, требования истца подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы по госпошлине.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 65, 110, 167- 171, 176, 180 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО «ИНЖСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН: 

<

***>) в пользу АО «Инженерный Центр СоюзПроектСТрой» (ОГРН: 

<

***>) сумму убытков в размере 1.000.000  руб., расходы  по госпошлине 23.000  руб. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в  Девятый Арбитражный апелляционный суд.

Судья:

А.П. Стародуб