44/2023-142528(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-6317/2023

г. Чебоксары

02 ноября 2023 года

Резолютивная часть решения вынесена 20 октября 2023 года. 

Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в составе судьи Владимировой О.Е., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению 

казенного учреждения Чувашской Республики "Республиканская служба единого  заказчика" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального  хозяйства Чувашской Республики (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),  428003, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, ул. Ю. Гагарина д. 20,  пом. 1  

к обществу с ограниченной ответственностью "Стройтех" (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>), 428034, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, ул.  Филиппа Лукина д. 5, помещ. 13,  

о взыскании 265 413 руб. 23 коп., установил: 

казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба  единого заказчика" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики обратилось в арбитражный суд с  иском к обществу с ограниченной ответственностью "Стройтех" о взыскании  265413 руб. 23 коп. неустойки за период с 01.06.2022 по 29.11.2022 за просрочку  исполнения обязательств по государственному контракту № 279 от 17.12.2021 по  строительству врачебной амбулатории с. Шимкусы бюджетного учреждения  Чувашской Республики "Янтиковская центральная районная больница"  Министерства здравоохранения Чувашской Республики.  

Определением суда от 30.08.2023 исковое заявление было принято к  рассмотрению в порядке упрощенного производства.  

Копии определения суда от 30.08.2023 были направлены сторонам и  получены ими, что подтверждается почтовыми уведомлениями. Кроме того,  информация о принятии искового заявления к производству была размещена  

арбитражным судом на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

Ответчик в отзыве от 21.09.2023 иск не признал, указал, что период действия  контракта на строительство врачебной амбулатории с ФИО1 ЧР  «Янтиковская центральная районная больница» Министерства здравоохранения ЧР  пришелся на 2022 год. Этот год был отягощен последствиями короновирусных  ограничений и санкционным давлением недружественных государств, которому  подверглись все отрасли экономики. В результате логистические цепочки поставок  строительных материалов, налаженные ООО «Стройтех» до заключения контракта,  были нарушены, пришлось искать новых поставщиков, что в свою очередь  повлияло на сроки исполнения работ по Контракту. При этом, итоговый результат  работ по контракту был выполнен ООО «Стройтех» с минимальными  отклонениями по срокам. В целях смягчения последствий, вызванных санкциями и  нестабильностью в экономической сфере, Постановлением Правительства  Российской Федерации от 28 марта 2022 г. № 497 был введен мораторий на  возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в  отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных  предпринимателей. ООО «Стройтех» полагает, что пени по Контракту № 279 от  17.12.2021 на период действия моратория не подлежали начислению и удержанию.  

Дело рассмотрено без вызова сторон в порядке, предусмотренном главой 29  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

20.10.2023 по делу вынесена резолютивная часть решения согласно части 1  статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Мотивированное решение составлено на основании части 2 статьи 229  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по заявлению  ответчика, поступившему в суд 26.10.2023.  

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.  

17.12.2011 казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская  служба единого заказчика" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (заказчик) и общество с  ограниченной ответственностью "Стройтех" (подрядчик) заключили  государственный контракт № 279, по условиям которого Подрядчик принимает на  себя обязательства выполнить работы по строительству врачебной амбулатории с.  Шимкусы бюджетного учреждения Чувашской Республики "Янтиковская  центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской  Республики (далее - объект) в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии  с проектной документацией, техническим заданием (Приложение № 1), сметой  контракта (Приложение № 2), Графиком выполнения строительно-монтажных  работ (Приложение № 3), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных  работ в сроки и в порядке предусмотренные настоящим Контрактом и Графиком  оплаты выполненных работ по контракту (Приложение № 4).  

В соответствии с пунктом 2.1 контракта в редакции дополнительного  соглашения № 5 от 29.11.2022 цена Контракта является твердой, определена на весь  срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату  налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика,  связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта  (цена работ) составляет: 22373846 (Двадцать два миллиона триста семьдесят три  

тысячи восемьсот сорок шесть) руб. 71 коп., в том числе налог на добавленную  стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов.  

Пунктом 1.4 контракта предусмотрены следующие сроки выполнения работ  по настоящему Контракту: с даты заключения Контракта по 31 мая 2022 г. (в  соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение   № 3).  

Дополнительным соглашением № 4 от 29.07.2022 к контракту от 17.12.2021   № 279 срок выполнения работ продлен до 31.08.2022.  

Соглашением от 12.12.2022 стороны решили расторгнуть контракт,  определив, что на момент подписания настоящего соглашения Подрядчиком  выполнены работы по Контракту на сумму 22152323 (двадцать два миллиона сто  пятьдесят две тысячи триста двадцать три) руб. 25 коп., а Заказчиком перечислены  денежные средства в указанном размере.  

Нарушение ответчиком сроков выполнения работ явилось основанием для  обращения истца в суд с настоящим иском.  

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с  условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от  исполнения обязательств допускается в исключительных случаях, прямо указанных  в законе.  

В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации  по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный  договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо  выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику  необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить  обусловленную цену.  

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации  сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются  актом, подписанным обеими сторонами.  

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не  предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как  начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (пункт 1  статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Обязательства по государственному контракту исполнены ответчиком с  нарушением сроков, что подтверждается подписанными сторонами актами о  приемке выполненных работ от 06.05.2022 № 1, от 06.05.2022 № 2, от 02.06.2022   № 3, от 17.08.2022 № 4, от 23.09.2022 № 5, от 10.11.2022 № 6, от 29.11.2022 № 7 и  ответчиком не оспаривается.  

Требования истца об уплате пени, изложенные в претензиях № 01-06/4499 от  14.12.2022, ответчиком не исполнены.  

Истцом заявлено требование о взыскании 265413 руб. 23 коп. неустойки за  период с 01.06.2022 по 29.11.2022.  

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или  договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае  просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан  доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса  Российской Федерации).  

В силу части 4 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ) в контракт  включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика  (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств, предусмотренных контрактом.  

В соответствии с частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки  исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе  гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных  случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком  (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом,  заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате  неустоек (штрафов, пеней).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком  (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом  срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере,  определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,  но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,  предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком  (подрядчиком, исполнителем) (часть 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).  

Пунктом 7.7 контракта предусмотрено, что в случае просрочки исполнения  Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или  ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных  Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек  (штрафов, пеней).  

Согласно пункту 7.8 контракта пеня начисляется за каждый день просрочки  исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная  со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока  исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной  трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения  Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,  предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения  Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев,  если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок  начисления пени.  

Поскольку просрочка исполнения подрядчиком своих обязательств по  контракту материалами дела подтверждена, основания для привлечения ответчика  к ответственности у истца имеются.  

Согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 №  127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) для  обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при  чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном  изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской  

Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по  заявлениям, подаваемым кредиторами (далее – мораторий), на срок,  устанавливаемый Правительством Российской Федерации.  

Постановлением № 497 с 01.04.2022 на территории Российской Федерации  сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по  заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в  том числе индивидуальных предпринимателей (за исключением лиц, указанных в  пункте 2 данного постановления).  

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 9.1 Закона о банкротстве на  срок действия моратория в отношении должников, на которых он  распространяется, наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и  седьмым – десятым пункта 1 статьи 63 данного Федерального закона.  

В силу абзаца десятого пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве не  начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за  неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и  обязательных платежей, за исключением текущих платежей.  

Мораторием предусмотрен запрет на начисление неустоек, иных  финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных  обязательств и обязательных платежей в период с 01.04.2022 по 01.10.2022.  

На основании изложенного суд удовлетворяет требование истца о взыскании  пени частично в сумме 106598 руб. 53 коп. за период с 02.10.2022 по 29.11.2022  согласно следующему расчету:  

Период просрочки 

Задолженность с по дней Ставка Формула Неустойка  

804 931,65  

02.10.2022  

Новая задолженность на 804 931,65 руб. 

804 931,65  

02.10.2022  

01.10.2022  

0 

7.5 

804 931,65 × 0 × 1/300 × 7.5%  

0,00 р. 

1 693 498,20  

02.10.2022  

Новая задолженность на 888 566,55 руб. 

1 693 498,20  

02.10.2022  

01.10.2022  

0 

7.5 

1 693 498,20 × 0 × 1/300 × 7.5%  

0,00 р. 

1 797 990,48  

02.10.2022  

Новая задолженность на 104 492,28 руб. 

1 797 990,48  

02.10.2022  

01.10.2022  

0 

7.5 

1 797 990,48 × 0 × 1/300 × 7.5%  

0,00 р. 

2 230 375,46  

02.10.2022  

Новая задолженность на 432 384,98 руб. 

2 230 375,46  

02.10.2022  

01.10.2022  

0 

7.5 

2 230 375,46 × 0 × 1/300 × 7.5%  

0,00 р. 

2 723 799,73  

02.10.2022  

Новая задолженность на 493 424,27 руб. 

2 723 799,73  

02.10.2022  

01.10.2022  

0 

7.5 

2 723 799,73 × 0 × 1/300 × 7.5%  

0,00 р. 

2 921 768,70  

02.10.2022  

Новая задолженность на 197 968,97 руб. 

2 921 768,70  

02.10.2022  

01.10.2022  

0 

7.5 

2 921 768,70 × 0 × 1/300 × 7.5%  

0,00 р. 

3 083 655,15  

02.10.2022  

Новая задолженность на 161 886,45 руб. 

3 083 655,15  

02.10.2022  

01.10.2022  

0 

7.5 

3 083 655,15 × 0 × 1/300 × 7.5%  

0,00 р. 

3 113 951,74  

02.10.2022  

Новая задолженность на 30 296,59 руб. 

3 113 951,74  

02.10.2022  

01.10.2022  

0 

7.5 

3 113 951,74 × 0 × 1/300 × 7.5%  

0,00 р. 

3 311 637,81  

02.10.2022  

Новая задолженность на 197 686,07 руб. 

3 311 637,81  

02.10.2022  

01.10.2022  

0 

7.5 

3 311 637,81 × 0 × 1/300 × 7.5%  

0,00 р. 

3 778 179,38  

02.10.2022  

Новая задолженность на 466 541,57 руб. 

3 778 179,38  

02.10.2022  

01.10.2022  

0 

7.5 

3 778 179,38 × 0 × 1/300 × 7.5%  

0,00 р. 

3 876 315,83 02.10.2022 Новая задолженность на 98 136,45 руб.  

3 876 315,83  

02.10.2022  

01.10.2022  

0 

7.5 

3 876 315,83 × 0 × 1/300 × 7.5%  

0,00 р. 

3 896 838,62  

02.10.2022  

Новая задолженность на 20 522,79 руб. 

3 896 838,62  

02.10.2022  

01.10.2022  

0 

7.5 

3 896 838,62 × 0 × 1/300 × 7.5%  

0,00 р. 

3 998 867,73  

02.10.2022  

Новая задолженность на 102 029,11 руб. 

3 998 867,73  

02.10.2022  

01.10.2022  

0 

7.5 

3 998 867,73 × 0 × 1/300 × 7.5%  

0,00 р. 

5 463 775,30  

02.10.2022  

Новая задолженность на 1 464 907,57 руб. 

5 463 775,30  

02.10.2022  

01.10.2022  

0 

7.5 

5 463 775,30 × 0 × 1/300 × 7.5%  

0,00 р. 

5 569 144,85  

02.10.2022  

Новая задолженность на 105 369,55 руб. 

5 569 144,85  

02.10.2022  

01.10.2022  

0 

7.5 

5 569 144,85 × 0 × 1/300 × 7.5%  

0,00 р. 

5 909 341,16  

02.10.2022  

Новая задолженность на 340 196,31 руб. 

5 909 341,16  

02.10.2022  

01.10.2022  

0 

7.5 

5 909 341,16 × 0 × 1/300 × 7.5%  

0,00 р. 

7 152 929,28  

02.10.2022  

Новая задолженность на 1 243 588,12 руб. 

7 152 929,28  

02.10.2022  

01.10.2022  

0 

7.5 

7 152 929,28 × 0 × 1/300 × 7.5%  

0,00 р. 

7 190 463,04  

02.10.2022  

Новая задолженность на 37 533,76 руб. 

7 190 463,04  

02.10.2022  

01.10.2022  

0 

7.5 

7 190 463,04 × 0 × 1/300 × 7.5%  

0,00 р. 

7 218 130,52  

02.10.2022  

Новая задолженность на 27 667,48 руб. 

7 218 130,52  

02.10.2022  

01.10.2022  

0 

7.5 

7 218 130,52 × 0 × 1/300 × 7.5%  

0,00 р. 

7 227 018,88  

02.10.2022  

Новая задолженность на 8 888,36 руб. 

7 227 018,88  

02.10.2022  

29.11.2022  

59 

7.5 

7 227 018,88 × 59 × 1/300 × 7.5% 

106 598,53 р.  

Сумма основного долга: 7 227 018,88 руб. 

Сумма неустойки: 106 598,53 руб. 

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации государственная пошлина относится на стороны пропорционально  взысканной сумме.  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 226 – 229 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройтех" в пользу  казенного учреждения Чувашской Республики "Республиканская служба единого  заказчика" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального  хозяйства Чувашской Республики 106`598 (Сто шесть тысяч пятьсот девяносто  восемь) руб. 53 коп. неустойки за период с 02.10.2022 по 29.11.2022 за просрочку  исполнения обязательств по государственному контракту № 279 от 17.12.2021 по  строительству врачебной амбулатории с. Шимкусы бюджетного учреждения  Чувашской Республики "Янтиковская центральная районная больница"  Министерства здравоохранения Чувашской Республики.  

В остальной части в иске отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройтех" в доход  федерального бюджета 3 337 (Три тысячи триста тридцать семь) руб.  государственной пошлины.  

Решение подлежит немедленному исполнению. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае  составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном  объеме.  

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде  апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и  постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному  делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции по  основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.  

Судья О.Е. Владимирова