АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

01 июня 2020 года

Дело № А33-39793/2019

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 25 мая 2020 года.

В полном объёме решение изготовлено 01 июня 2020 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Лескова Р.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «СибМеталл» (ИНН 2460112660, ОГРН 1192468013407, г. Красноярск)

к обществу с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Бранс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Новосибирск)

о взыскании задолженности по договору поставки,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика:

- АО «Кудряшовское» (630511, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Криводановка. Переулок Садовый, д. 2).

в присутствии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, директора общества с ограниченной ответственностью «СибМеталл» согласно актуальной выписке из ЕГРЮЛ., личность удостоверена паспортом,

от ответчика: ФИО2, представителя по доверенности от 25.09.2019, личность удостоверена паспортом, диплом

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО3,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «СибМеталл» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Бранс» (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору поставки №01/08/19 от 01.08.2019 в размере 970 424,40 руб. с учетом НДС 20%, пени в размере 97 042,44 руб.

Определением от 13.01.2020 года исковое заявление принято к производству суда в порядке упрощенного производства.

Определением от 03.03.2020 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, АО «Кудряшовское», предварительное судебное заседание, судебное заседание назначены на 13.04.2020.

Определением от 10.04.2020 дата предварительного судебного заседания изменена на 25.05.2020. 

В предварительное судебное заседание, судебное заседание третье лицо, надлежащим образом уведомленное о времени и месте предварительного и судебного заседания, не явилось, представителей не направило. В соответствии со статьями 123, 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в его отсутствие.

В материалы дела от третьего лица поступил отзыв на иск.

Суд приобщил данный отзыв к материалам дела, в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель истца требования поддержал, просит суд удовлетворить иск в полном объеме.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска по основаниям, изложенным в отзыве на иск, представил суду дополнительные пояснения.

Суд приобщил данные пояснения к материалам дела, в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству», в связи с отсутствием возражений лиц, участвующих в деле, судом вынесено протокольное определение о завершении предварительного судебного заседания, окончании подготовки дела к судебному разбирательству и об открытии судебного заседания арбитражного суда первой инстанции.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Общество с ограниченной ответственностью «СК БраНс» (покупатель) и общество с ограниченной ответственностью «СибМеталл» (поставщик) заключили договор поставки от 01.08.2019 № 01/08/19 с протоколом разногласий от 12.08.2019 и протоколом согласования разногласий от 16.08.2019, в соответствии с пунктом 1.1. которого  поставщик, на условиях договора и в течение срока его действия обязан поставлять покупателю либо указанному им грузополучателю товар, а покупатель обязуется оплачивать и обеспечивать приемку товара согласно условиям, определенным настоящим договором.

Развернутая номенклатура (ассортимент) и технические характеристики, сроки и условия поставки, количество и цена подлежащего поставке товара, порядок и условия оплаты согласовываются сторонами применительно к каждому периоду поставки по партиям в спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2. договора).

Поставка товара по настоящему договору осуществляется для выполнения покупателем комплекса строительно-монтажных работ по Договору подряда № 01-552-19 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ в рамках инвестиционного проекта «Строительство 3-й очереди свинокомплекса АО «Кудряшовское», по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, Администрация МО р.п. Колывань от 04.07.2019г. в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство 3-й очереди свинокомплекса АО «Кудряшовское» по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, Администрация МО р.п. Колывань» (пункт 1.3. договора).

Поставщик осуществляет изготовление и поставку товара после согласования чертежей КМД с АО«Кудряшовское» (заказчик) и покупателем. Согласование чертежей КМД заказчиком и покупателем происходит в течение 2 календарных дней (пункт 1.4. договора).

Согласно пункту 3.2. договора оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика на основании счёта на оплату выставленного поставщиком покупателю в 2-х подлинных экземплярах. При перечислении денежных средств на расчетный счет поставщика покупатель обязан указать в платежном поручении номер договора и согласованной спецификации на товар. Обязательства покупателя по оплате товара считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет поставщика. Порядок оплаты товара согласовывается сторонами в спецификациях.

Пунктом 6.3 договора предусмотрено, что в случае задержки оплаты товара или услуг, покупатель, по письменному требованию поставщика, уплачивает ему пеню в размере 0,1% от стоимости, соответственно подлежащего оплате товара или услуги, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от стоимости не оплаченного в срок товара или услуги.

Сторонами подписана спецификация от 05.08.2019 № 1, в соответствии с которой поставке подлежит 9 позиции товара, на строительную площадку № 9, находящуюся по адресу Новосибирская область, Колыванский район, Администрация МО р.п. Колывань (в границах земельного участка 54:10:028210:59) для зданий «Адаптер с СБК» и «Галерея 10» в период с 23.08.2019 по 30.08.2019, в том числе позиция № 1 Адаптер СБК, Галерея 10, вес 51,870 тн, цена за тону без НДС – 69 165 руб. 84 коп., сумма с НДС 4 305 158 руб. 54 коп., срок поставки 23.08.2019 – 30.08.2019. 

Согласно пункту 6, 6.1. спецификации от 05.08.2019 № 1 Условия оплаты: Оплата за поставленный товар осуществляется в следующем порядке: стоимость изготовления товара составляет 82 999 руб., включая НДС 20% за тонну. В стоимость включены: разработка КМД (конструкции металлические детализированные), товаросопроводительных документов, изготовление, покраска, упаковка и доставка до базиса поставки (объекта). Оплата товара осуществляется покупателем в течение 10 дней со дня приемки товара и подписания товаросопроводительных документов (товарные накладные, счет-фактуры) в указанном в них размере.

Спецификация от 05.08.2019 № 1 подписана со стороны ООО «Брани» - 07.08.2019, со стороны ООО «СибМеталл» - 13.08.2019. 

12.08.2019 ООО «Сибметалл» письмом № 47 обратилось в ООО СК «БраНс» за согласованием разработанных чертежей КМД для зданий «Адаптер с СБК» и «Галерея №10». Разработчиком чертежей КМД и изготовителем металлоконструкции на основании чертежей КМД являлось ООО «Сиблесстрой Плюс», что подтверждается надписью в угловом штампе чертежей КМД (лист 1 шифр 01-317-17-9К-1-КМД-0001 от 09.08.2019г.) и указанием места отгрузки товара в транспортной накладной № 1 от 27.08.2019.

Согласование чертежей КМД ООО СК «БраНс» было выполнено 15.08.2019 письмом №672 и 23.08.2019 письмом №481. Общий объем металлоконструкций согласно чертежей КМД для зданий «Адаптер с СБК» и «Галерея № 10» составил 42,078 тонны.

В ходе согласования чертежей КМД (письма № 446 от 14.08.2019, № 2636 от 15.08.2019) АО «Кудряшовское» сообщило ООО СК «БраНс», что чертежи КМД по Галерее № 10 не были приложены к письму от 14.08.2019 № 446.

Письмом от 23.08.2019 № 481 ООО СК «БраНс» сообщило ООО «СибМеталл», что чертежи КМД на здание «Ожидание» согласованы, за исключением следующих пунктов:

Степень очистки металлоконструкций перед окрашиванием принять согласно чертежей КМ (вторая степень);

Соединение на высокопрочных болтах нижнего пояса фермы принять согласно чертежей КМ (М24 с контролируемым натяжением 24450 кг);

Чертежи КМД на здание «Галерея 10», «Галерея 10.1», «Галерея 10.2» согласованы за исключением следующего пункта: Степень очистки металлоконструкций перед окрашиванием принять согласно чертежей КМ (вторая степень).

Так же ответчик сообщил истцу, что ему необходимо внести изменения в чертежи КМД по зданию «Адаптер с СБК» в части соединения на высокопрочных болтах (М24, согласно чертежей КМ) нижнего пояса фермы и второй степени очистки поверхности перед окрашиванием (согласно чертежей КМ).

По УПД от 27.08.2019 № 19 на основании договора поставки от 01.08.2019 № 01/08/19 истец поставил, а ответчик принял товар – адаптер с СБК, галерея 10 в количестве 11,692 тонн, на общую сумму 970 424 руб. 40 коп. 

Письмом от 30.08.2019 № 499 ответчик сообщил истцу, что по условиям Договора № 01/08/19 от 01.08.2019, ООО «СИБМЕТАЛЛ» в срок 23.08.2019 - 30.08.2019 обязалось поставить по позиции «Адаптер с СБК, Галерея 10» металлоконструкции на сумму с НДС 4 305 158,54 руб., весом 51,87 тонн. Фактически по состоянию на 30.08.2019 на площадку завезено 11,692 тонн прогонов на сумму 970 424,40 руб. с НДС. Ответчик уведомил истца о нарушении взятых на себя обязательств по Договору № 01/08/19 от 01.08.2019, в части сроков поставки и комплектности товара и потребовал в течение разумного срока (7 дней) осуществить поставку недостающего товара.

В ответном письме от 30.08.2019 № 55 истец уведомил ООО СК «БраНс» об отсутствии необходимого металлопроката для полного изготовления металлоконструкций для зданий «Адаптер с СБК» и «Галереи» №10.

Комиссией состоящей из представителей АО «Кудряшовское» и ООО СК «БраНс» составлен акт № 2 от 02.09.2019, которым зафиксирован факт поставки некомплектного товара. 

Письмом исх. №56 от 04.09.2019 ООО «СибМеталл» уведомило ООО СК «БраНс» о том, что поставка металлоконструкций для здания «Адаптер с СБК», в которых используется труба 140x100x6 начнется не ранее 12.09.2019.

Ссылаясь на то, что ООО «СибМеталл» не поставило в предусмотренный договором срок в необходимом количестве металлоконструкции для зданий «Адаптер с СБК» и «Галерея 10», и не имеет возможности допоставить не поставленный товар в установленный покупателем срок, ответчик направил в адрес истца уведомление от 05.09.2019 № 515 об отказе от исполнения договора поставки №01/08/19 от 01.08.2019, в связи с нарушением сроков поставки товара, в том числе нарушением срока поставки комплектного товара.

Истец направил в адрес ответчика претензию от 25.11.2019 № 89 с требованием в течение 3 дней с момента получения претензии оплатить 970 424 руб. 80 коп. задолженности за поставленный товар и 79 574 руб. 80 коп. пени. 

Письмом от 10.12.2019 № 771 истец в связи с расторжением договора поставки №01/08/19 от 01.08.2019 обратился к ответчику с требованием вывезти с объекта 11,692 тонн металла, поставленного ранее. 

Ссылаясь на неоплату поставленного по УПД от 27.08.2019 № 19 товара, истец обратился в арбитражный суд с требованиями о взыскании с общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Бранс» задолженности по договору поставки №01/08/19 от 01.08.2019 в размере 970 424,40 руб., пени в размере 97 042,44 руб.

Ответчик исковые требования не признал, на основании доводов изложенных в отзыве на исковое заявление и в дополнительных пояснениях:

- согласно спецификации №1 от 05.08.2019 к договору ООО «СибМеталл» было обязано поставить на строительную площадку № 9, находящуюся по адресу Новосибирская область, Колыванский район, Администрация МО р.п. Колывань (в границах земельного участка 54:10:028210:59), металлоконструкции в количестве 51,870 тонн для зданий «Адаптер с СБК» и «Галерея 10» в период с 23.08.2019 года по 30.08.2019 года;

- в ходе согласования чертежей КМД количество металлоконструкций для зданий «Адаптер с СБК» и «Галерея 10» было уточнено, в результате чего ООО «СибМеталл» было обязано поставить на строительную площадку № 9 металлоконструкции для данных зданий в количестве 42,078 тонны;

- согласование чертежей КМД на металлоконструкции для здания «Адаптер с СБК» и «Галерея 10» подтверждается письмами (исх № 672 от 15.08.2019 г. и № 481 от 23.08.2019г.);

- ООО «СибМеталл» имело возможность в согласованный договором срок изготовить и поставить на строительную площадку № 9 металлоконструкции в количестве 42,078 тонны;

- 29.08.2019 ООО «СибМеталл» поставило на строительную площадку № 9 металлоконструкции только в количестве 11,692 тонн;

- в соответствии со спецификацией № 1 к договору порядок оплаты товара: в течение 10 календарных дней со дня приемки товара при условии поставки партии товара в объеме и в сроки согласованные сторонами в спецификации № 1. Таким образом, Поставщик обязан был поставить товар в объеме и сроки согласно Спецификации № 1;

- поставщик недопоставил товар, в согласованном сторонами объеме и в согласованный сторонами срок, нарушив существенные условия договора;

- покупатель в значительной степени был лишен того, на что мог рассчитывать при соблюдении ООО «СибМеталл» существенных условий договора;

- в связи с непоставкой товара в согласованном сторонами договором объеме и в согласованный договором срок с 23.08.2019 по 30.08.2019, ООО СК «БраНс» письмом (исх. № 499 от 30.08.2019 года) уведомило ООО «СибМеталл» о нарушении сроков поставки металлоконструкций для «Адаптер с СБК» и «Галерея 10» и потребовало от ООО «СибМеталл» в течение 7 дней осуществить допоставку недопоставленного Товара. Получение ООО «СибМеталл» письма ООО СК «БраНс» (исх. № 499 от 30.08.2019 года) подтверждается письмом ООО «СибМеталл» (исх. № 55 от 30.08.2019 года);

- учитывая расстояние от места изготовления товара (г. Красноярск) до места доставки товара (Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Колывань), предоставленный поставщику срок допоставки товара (7 дней) является разумным;

- письмом исх. № 55 от 30.08.2019 ООО «СибМеталл» уведомило ООО СК «БраНс» об отсутствии необходимого металлопроката для полного изготовления металлоконструкций для зданий «Адаптер с СБК» и «Галереи» №10;

- письмом исх. № 56 от 04.09.2019 года ООО «СибМеталл» уведомило ООО СК «БраНс» о том, что поставка металлоконструкций для здания «Адаптер с СБК», в которых используется труба 140x100x6 начнется не ранее 12.09.2019;

- в соответствии с пунктом 3 статьи 511 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена, если в договоре поставки не предусмотрено иное;

- так как договором поставки № 01/08/19 от 01.08.2019 года не исключено право ООО СК «БраНс» на отказ от принятия товара, поставка которого просрочена, ООО СК «БраНс», руководствуясь п. 3 ст. 511 ГК РФ вправе отказаться от принятия товара (металлоконструкций для зданий «Адаптер с СБК» и «Галерея 10», которые своевременно не поставлены на строительную площадку №9;

- так как ООО «СибМеталл» не поставило в предусмотренный договором срок в полном объеме металлоконструкции для зданий «Адаптер с СБК» и «Галерея 10», а также не имеело возможности допоставить не поставленный товар в установленный покупателем срок (7 дней), что подтверждается письмом ООО «СибМеталл» исх. № 55 от 30.08.2019 года и письмом исх. № 56 от 04.09.2019 года ООО СК «БраНс» руководствуясь п. 2 ст. 523 ГК РФ вправе отказаться от исполнения договора поставки № 01/08/19 от 01.08.2019 года;

- ООО СК «Бранс» уведомило ООО «Сибметалл» об отказе от принятия металлоконструкций для здания «Адаптер с СБК» и «Галереи 10» и об отказе от исполнения договора поставки №01/08/19 от 01.08.2019 (исх. № 515 от 05.09.2019). С этого момента ООО «СибМеталл» должно было вывезти продукцию в объеме 11,692 тонны металла со строительной площадки № 9;

- письмом исх. № 771 от 10.12.2019 ООО СК «БраНс» еще раз уведомило ООО «СибМеталл» о существенных нарушениях обязательств Поставщиком, об отказе от исполнения договора поставки и о необходимости вывезти со строительного объекта 11,692 тонны металла;

- на основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 1 статьи 310, пунктом 2 статьи 450, пунктом 1 и пунктом 2 статьи 450.1, пунктом 2 статьи 480, пунктом 3 статьи 511, пунктом 2 статьи 519, пунктом 2 статьи 523 Гражданского кодекса Российской Федерации ответчик просил в удовлетворении требований отказать. 

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы присутствующих в заседании лиц, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В том числе гражданские права и обязанности могут возникать из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ст. 310 ГК РФ).

Между истцом и ответчиком заключен договор поставки товара №01/08/19 от 01.08.2019, правоотношения сторон, регулируются нормами главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу статьи 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В соответствии со статьей 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя.

Согласно части 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

Истец ссылаясь на УПД от 27.08.2019 № 19 на общую сумму 970 424 руб. 40 коп. просит взыскать с ответчика задолженность в размере 970 424 руб. 40 коп. и 97 042,44 руб. пени.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

В силу п. 3.1. ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Как следует из материалов дела, спецификацией от 05.08.2019 № 1 стороны определили конкретные характеристики подлежащего поставке оборудования. Поставке подлежит 9 позиции товара, на строительную площадку № 9, находящуюся по адресу Новосибирская область, Колыванский район, Администрация МО р.п. Колывань (в границах земельного участка 54:10:028210:59) для зданий «Адаптер с СБК» и «Галерея 10» в период с 23.08.2019 по 30.08.2019, в том числе позиция № 1 Адаптер СБК, Галерея 10, вес 51,870 тн, цена за тону без НДС – 69 165 руб. 84 коп., сумма с НДС 4 305 158 руб. 54 коп., срок поставки 23.08.2019 – 30.08.2019. 

В ходе согласования чертежей КМД количество металлоконструкций для зданий «Адаптер с СБК» и «Галерея 10» было уточнено, в результате чего ООО «СибМеталл» было обязано поставить на строительную площадку № 9 металлоконструкции для данных зданий в количестве 42,078 тонн.

Согласно пункту 6, 6.1. спецификации от 05.08.2019 № 1 оплата за поставленный товар осуществляется в следующем порядке: стоимость изготовления товара составляет 82 999 руб., включая НДС 20% за тонну. В стоимость включены: разработка КМД (конструкции металлические детализированные), товаросопроводительных документов, изготовление, покраска, упаковка и доставка до базиса поставки (объекта). Оплата товара осуществляется покупателем в течение 10 дней со дня приемки товара и подписания товаросопроводительных документов (товарные накладные, счет-фактуры) в указанном в них размере.

Согласование чертежей КМД на металлоконструкции для здания «Адаптер с СБК» и «Галерея 10» подтверждается представленными в материалы дела письмами № 672 от 15.08.2019, № 481 от 23.08.2019.

Таким образом, ООО «СибМеталл» имело возможность в согласованный договором срок изготовить и поставить на строительную площадку № 9 металлоконструкции в количестве 42,078 тонн.

Согласно представленному в материалы дела УПД от 27.08.2019 № 19 на основании договора поставки от 01.08.2019 № 01/08/19 истец поставил товар – адаптер с СБК, галерея 10 в количестве 11,692 тонн, на общую сумму 970 424 руб. 40 коп. 

Согласно пункту 1 статьи 478 Кодекса продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий условиям договора купли-продажи о комплектности.

Покупатель (получатель), которому поставлены товары с нарушением условий договора поставки, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 480 настоящего Кодекса, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о некомплектности поставленных товаров, без промедления доукомплектует товары либо заменит их комплектными товарами (пункт 1 статьи 519 Кодекса).

В силу положений пунктов 1, 2 статьи 480 Кодекса, в случае передачи некомплектного товара (статья 478) покупатель вправе по своему выбору потребовать от продавца:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- доукомплектования товара в разумный срок.

В связи с непоставкой товара в согласованном сторонами договором объеме и в согласованный договором срок с 23.08.2019 по 30.08.2019, ООО СК «БраНс» письмом № 499 от 30.08.2019 уведомило ООО «СибМеталл» о нарушении сроков поставки металлоконструкций для «Адаптер с СБК» и «Галерея 10» и потребовало от ООО «СибМеталл» в течение 7 дней осуществить допоставку недопоставленного товара. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 519 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель (получатель), которому поставлены товары с нарушением условий договора поставки, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 480 настоящего Кодекса, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о некомплектности поставленных товаров, без промедления доукомплектует товары либо заменит их комплектными товарами.

Согласно части 2 статьи 480 Гражданского кодекса Российской Федерации если продавец в разумный срок не выполнил требования покупателя о доукомплектовании товара, покупатель вправе по своему выбору: потребовать замены некомплектного товара на комплектный; отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Так как ООО «СибМеталл» своевременно не поставило комплектный товар для зданий «Адаптер с СБК» и «Галереи 10», а также не выполнило требование о допоставке недопоставленного товара в срок, указанный ответчиком, письмом исх. № 55 от 30.08.2019, последний уведомлением от 05.09.2019 № 515 отказался от исполнения договора поставки от 01.08.2019 № 01/08/19 и письмом от 10.12.2019 № 771 в связи с расторжением договора поставки №01/08/19 от 01.08.2019 обратился к истцу с требованием вывезти с объекта 11,692 тонн металла, поставленного ранее по УПД от 27.08.2019 № 19. 

Истцом не опровергнуты доводы ответчика о некомплектности поставленного товара (о поставке товара по количеству, комплектности не соответствующего условиям договора), не представил доказательств, бесспорно свидетельствующих о том, что поставленная ответчику продукция соответствовала условиям договора; допоставка товара истцом не осуществлена.

Обстоятельства дела свидетельствуют о том, что истец не только не исполнил надлежащим образом обязательства по договору, но и уклонился от допоставки комплекта металлоконструкций в полном объеме, в связи с чем ответчик обоснованно воспользовался правом, предоставленным пунктом 2 статьи 520 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Следовательно, обязательство по оплате некомплектных металлоконструкций в размере 970 424 руб. 40 коп. и пени в размере 97 042 руб. 44 коп. у ООО СК «БраНс» отсутствует.

Довод истца о непоставке комплекта металлоконструкций по причине неоплаты поставленных 29.08.2019 прогонов подлежит отклонению в силу следующего. 

Согласно пункту 1 статьи 408 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство прекращается в результате надлежащего исполнения. Пункт 1 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации  покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено ГК РФ, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

По условиям договора поставки исполнение ответчиком обязанности по оплате товара является встречным исполнением к исполнению истцом обязательств по поставке комплекта металлоконструкций.

Поскольку истцом поставлены только часть элементов металлоконструкций, согласованных в спецификации № 1 (некомплект), то обязательство по передаче товара ответчику в соответствии с статьей 479 Гражданского кодекса Российской Федерации истцом не выполнило. В связи с чем на стороне ответчика не возникает встречное обязательство по оплате некомплектного товара. Истцом не представлены доказательства наличия у ответчика обязательства по уплате авансовых платежей и нарушения этого обязательства. Положения договора поставки от 01.08.2019 № 01/08/19 и спецификации № 1 не содержат условий о внесении покупателем авансового платежа.

На основании изложенного, требования ООО «СибМеталл» удовлетворению не подлежат. 

В силу статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца. 

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170   Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что решение  в окончательной форме будет изготовлено в течение 5 рабочих дней, подписано в виде электронного документа усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и направлено лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд, находящийся в г.Красноярске.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

Р.В. Лесков