312/2019-65246(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть) 

город Омск  № дела  22 мая 2019 года А46-19866/2018  

Арбитражный суд Омской области в составе  

судьи Целько Т.В., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, 

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление казенного учреждения Омской  области «Омскоблстройзаказчик» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная  компания «Сибцентрострой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований  относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Энерго-Бизнес- плюс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об обязании устранить выявленные замечания в пределах гарантийного срока, о  взыскании 5 436 885 руб.,  

В заседании приняли участие:  

от истца - ФИО2 по доверенности № 03 от 09.01.2019 г., ФИО3 по  

доверенности № 18 от 20.02.2019 г.; 

от ответчика - ФИО4 по доверенности № 31/01 от 31.01.2019 г., ФИО5 по  

доверенности от 25.06.2018 г.; от третьего лица - не явились, извещены надлежащим образом; 

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная  компания «Сибцентрострой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) устранить  выявленные замечания в пределах гарантийного срока на объекте капитального строительства  «Реконструкция объектов БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3». I очередь.  Реконструкция хирургического стационара № 1», расположенного по адресу: ул.  Магистральная, д. 31, корп. 1, Советский административный округ, 

<

...>, а  именно:  

- выполнить работы по замене непроектного кабеля ВВГнг, который не соответствует  нормам противопожарной безопасности, на кабель ВВГнг-FPRLS в объеме 30% (согласно  пунктам календарного плана выполнения работ по государственному контракту от  

22.11.2012 г. № 08-2012 4.17, 4.23, локальной смете 02-01-18 изм. 4 «Силовое оборудование»,  пункты 103-123, актам формы КС-2 № 11 от 28.03.2013 г., № 23 от 26.04.2013 г., № 36 от  20.05.2013 г., № 42 от 30.05.2013 г., № 53 от 25.06.2013 г., № 111 от 09.10.2013 г., № 412 от  27.03.2017 г., № 291 от 13.10.2016 г., № 12 от 28.03.2013 г., № 233/15 от 02.11.2015 г., № 414  от 27.03.2017 г., № 292 от 13.10.2016 г., № 309 от 26.07.2016 г., № 37 от 20.05.2013 г., № 62 от  25.06.2013 г., № 30 от 07.05.2013 г.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная  компания «Сибцентрострой» (ИНН 5504090122, ОГРН 1045507007446) в пользу казенного  учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик» (ИНН 5503007795, ОГРН  1025500755554) 348 626 руб. 91 коп. неустойки, а также 9 218 руб. расходов по уплате  государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Возвратить казенному учреждению Омской области «Омскоблстройзаказчик» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 42 507 руб. 81 коп.  государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению № 577 от 22.09.2016 г.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и  может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Омской области.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и  подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Омской области разъясняет, что в соответствии со статьей 177  (статьей 186) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение  (определение), выполненное в форме электронного документа, направляется лицам,  участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа  не позднее следующего дня после дня его принятия (вынесения).  

По ходатайству указанных лиц копии решения (определения) на бумажном носителе  могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены  им под расписку.  

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных  дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья Т.В. Целько