РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-104831/21-110-712

г. Москва

26 апреля 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 19 апреля 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 26 апреля 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Государственного казенного учреждения города Москвы "МОСРЕСТАВРАЦИЯ" (129366, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, 21, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "ГРАДОСТРОЙ" (129337, МОСКВА ГОРОД, КРАСНАЯ СОСНА УЛИЦА, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/КОМ 1/6, РМ 4, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 36 245 504,18 рублей,

 

при участии:

от истца – ФИО1 по дов. от  09.01.2024,

от ответчика- не явился, 

 

УСТАНОВИЛ:

Государственное казенное учреждение города Москвы "МОСРЕСТАВРАЦИЯ" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ГРАДОСТРОЙ" о взыскании 29 967 181,56 руб. пеней по государственному контракту от 26.06.2018 г. № 40-ГК/18, 6 777 081,09 руб. штрафа за неисполнение обязательств по государственному контракту.

Решением суда от 08 ноября 2021 года исковые требования удовлетворены частично.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 января 2022 года решение Арбитражного суда города Москвы от 08.11.2021г. (резолютивная часть от 21.10.2021г.) по делу № А40-104831/21 оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 29 апреля 2022 года решение Арбитражного суда города Москвы от 08 ноября 2021 года, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 января 2022 года по делу № А40-104831/2021 оставлены без изменения.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 27 октября 2022 года решение Арбитражного суда города Москвы от 08.11.2021 по делу № А40-104831/2021, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.01.2022 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.04.2022 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд   рассмотрел спор в их отсутствие на основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

При новом рассмотрении дела истец поддержал заявленные требования в полном объеме.

Заслушав представителя истца, исследовав и оценив в совокупности доказательства, выполнив указания кассационной инстанции, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, Между ГКУ "Мосреставрация" (далее - Заказчик, Истец) и ООО "ГРАДОСТРОЙ" (далее - Подрядчик, Ответчик) расторгнут в одностороннем порядке государственный контракт от 26 июня 2018 г. № 40-ГК/18 на выполнение производственных работ по сохранению с приспособлением к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения "Особняк Рутковских, 1888 г." по адресу: 

<

...> (далее - Контракт, Объект) на основании решения Истца от 20 ноября 2020 г. № 16-20-01-08-1389/0 об одностороннем отказе от исполнения Контракта на основании подпункта 8.1.1.2 подпункта 8.1.1 пункта 8.1 статьи 8 Контракта и в соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 9 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступило в силу 8 декабря 2020 г.

Цена Контракта составила 150 601 901 (Сто пятьдесят миллионов шестьсот одна тысяча девятьсот один) рубль 80 коп. (пункт 2.1 статьи 2 Контракта).

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 3 Контракта (в редакции соглашения от 25 декабря 2019 г. № 6 об изменении условий Контракта) сроки выполнения Ответчиком работ по Контракту - с даты заключения Контракта не позднее 31 мая 2020 г.

Согласно календарному плану (приложение № 1 к техническому заданию, являющемуся приложением № 1 к Контракту), изложенному в редакции соглашения от 19 мая 2020 г. № 8 об изменении условий Контракта (далее - Календарный план):

Срок выполнения Ответчиком работ по 1 этапу Контракта, включая подготовительные работы, сбор исходно-разрешительных документов и производственные работы, - с момента заключения Контракта в течение 60 (шестидесяти) календарных дней (с 27 июня 2018 г. по 27 августа 2018 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 2 этапу Контракта -с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком работ по 1 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 28 августа 2018 г. по 26 сентября 2018 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 3 этапу Контракта -с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 2 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 27 сентября 2018 г. по 26 октября 2018 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 4 этапу Контракта -с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 3 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 27 октября 2018 г. по 26 ноября 2018 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 5 этапу Контракта -с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 4 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 27 ноября 2018 г. по 26 декабря 2018 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 6 этапу Контракта -с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 5 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 27 декабря 2018 г. по 25 января 2019 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 7 этапу Контракта -с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 6 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 26 января 2019 г. по 25 февраля 2019 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 8 этапу Контракта -с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 7 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 26 февраля 2019 г. по 27 марта 2019 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 9 этапу Контракта -с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 8 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 28 марта 2019 г. по 26 апреля 2019 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 10 этапу Контракта -с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 9 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 27 апреля 2019 г. по 27 мая 2019 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 11 этапу Контракта -с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 10 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 28 мая 2019 г. по 26 июня 2019 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 12 этапу Контракта -с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 11 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 27 июня 2019 г. по 26 июля 2019 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 13 этапу Контракта -с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 12 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 27 июля 2019 г. по 26 августа 2019 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 14 этапу Контракта -с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 13 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 27 августа 2019 г. по 25 сентября 2019 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 15 этапу Контракта -с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 14 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 26 сентября 2019 г. по 25 октября 2019 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 16 этапу Контракта -с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 15 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 26 октября 2019 г. по 25 ноября 2019 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 17 этапу Контракта -с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 16 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 26 ноября 2019 г. по 25 декабря 2019 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 18 этапу Контракта -с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 17 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 26 декабря 2019 г. по 24 января 2020 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 19 этапу Контракта -с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 18 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 25 января 2020 г. по 24 февраля 2020 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 20 этапу Контракта -с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 19 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 25 февраля 2020 г. по 25 марта 2020 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 21 этапу Контракта по пункту 21.1 Календарного плана - с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 20 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 26 марта 2020 г. по 24 апреля 2020 г. включительно). Срок оформления Ответчиком исполнительной и разрешительной документации для приемки работ по пункту 21.3 Календарного плана - с установленного Календарным планом момента оформления акта приемки законченного реставрацией Объекта в течение 20 (двадцати) календарных дней (с 7 мая 2020 г. по 26 мая 2020 г. включительно).

В силу пункта 7.7 статьи 7 Контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Ответчик выполнил, а Истец принял работы по 1 этапу Контракта 3 августа 2018 г. на сумму 4 807 404 (Четыре миллиона восемьсот семь тысяч четыреста четыре) рубля 93 коп., что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ 1 этапа за период с 27 июля 2018 г. по 3 августа 2018 г.

Ответчик выполнил, а Истец принял работы по 2 этапу Контракта 15 сентября

2018    г. на сумму 3 287 221 (Три миллиона двести восемьдесят семь тысяч двести двадцать один) рубль 22 коп., что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ 2 этапа за период с 4 августа 2018 г. по 15 сентября 2018 г.

Ответчик выполнил, а Истец принял работы по 3 этапу Контракта 29 октября 2018 г. на сумму 5 833 980 (Пять миллионов восемьсот тридцать три тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 12 коп., что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ 3 этапа за период с 16 сентября 2018 г. по 29 октября 2018 г. Ответчиком допущена просрочка выполнения работ по 3 этапу Контракта на 3 (три) календарных дня, размер пени Ответчика составляет 60 565 (Шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 59 коп.

Ответчик выполнил, а Истец принял работы по 4 этапу Контракта 27 ноября 2018 г. на сумму 13 699 056 (Тринадцать миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьдесят шесть) рублей 91 коп., что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ 4 этапа за период с 30 октября 2018 г. по 27 ноября 2018 г. Ответчиком допущена просрочка выполнения работ по 4 этапу Контракта на 1 (один) календарный день, размер пени Ответчика составляет 19 362 (Девятнадцать тысяч триста шестьдесят два) рубля 05 коп.

Ответчик выполнил, а Истец принял работы по 5 этапу Контракта 20 декабря 2018 г. на сумму 12 158 231 (Двенадцать миллионов сто пятьдесят восемь тысяч двести тридцать один) рубль 30 коп., что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ 5 этапа за период с 28 ноября 2018 г. по 20 декабря 2018 г.

Ответчик выполнил, а Истец принял работы по 6 этапу Контракта 19 февраля 2019         г. на сумму 4 477 561 (Четыре миллиона четыреста семьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 79 коп., что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ 6 этапа за период с 21 декабря 2018 г. по 19 февраля 2019 г. Ответчиком допущена просрочка выполнения работ по 6 этапу Контракта на 25 (двадцать пять) календарных дней, размер пени Ответчика составляет 392 473 (Триста девяносто две тысячи четыреста семьдесят три) рубля 36 коп.

Ответчик выполнил, а Истец принял работы по 7 этапу Контракта 28 марта 2019 г. на сумму 9 623 812 (Девять миллионов шестьсот двадцать три тысячи восемьсот двенадцать) рублей 28 коп., что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ 7 этапа за период с 20 февраля 2019 г. по 28 марта 2019 г. Ответчиком допущена просрочка выполнения работ по 7 этапу Контракта на 31 (тридцать один) календарный день, размер пени Ответчика составляет 467 003 (Четыреста шестьдесят семь тысяч три) рубля 01 коп.

Ответчик выполнил, а Истец принял работы по 8 этапу Контракта 25 июля 2019 г. на сумму 5 084 942 (Пять миллионов восемьдесят четыре тысячи девятьсот сорок два) рубля 37 коп., что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ 8 этапа за период с 29 марта 2019 г. по 25 июля 2019 г. Ответчиком допущена просрочка выполнения работ по 8 этапу Контракта на 120 (сто двадцать) календарных дней, размер пени Ответчика составляет 1 645 512 (Один миллион шестьсот сорок пять тысяч пятьсот двенадцать) рублей 14 коп.

Ответчик выполнил, а Истец принял работы по 9 этапу Контракта 26 августа 2019 г. на сумму 6 008 501 (Шесть миллионов восемь тысяч пятьсот один) рубль 80 коп., что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ 9 этапа за период с 26 июля 2019 г. по 26 августа 2019 г. Ответчиком допущена просрочка выполнения работ по 9 этапу Контракта на 122 (сто двадцать два) календарных дня, размер пени Ответчика составляет 1 648 499 (Один миллион шестьсот сорок восемь тысяч четыреста девяносто девять) рублей 50 коп.

Ответчик выполнил, а Истец принял работы по 10 этапу Контракта 9 октября 2019 г. на сумму 12 500 042 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч сорок два) рубля 24 коп., что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ 10 этапа за период с 27 августа 2019 г. по 27 сентября 2019 г. Ответчиком допущена просрочка выполнения работ по 10 этапу Контракта на 135 (сто тридцать пять) календарных дней, размер пени Ответчика составляет 1 757 466 (Один миллион семьсот пятьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 48 коп.

Ответчик выполнил, а Истец принял работы по 11 этапу Контракта 5 ноября 2019 г. на сумму 10 180 940 (Десять миллионов сто восемьдесят тысяч девятьсот сорок) рублей 61 коп., что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ 11 этапа за период с 28 сентября 2019 г. по 28 октября 2019 г. Ответчиком допущена просрочка выполнения работ по 11 этапу Контракта на 132 (сто тридцать два) календарных дня, размер пени Ответчика составляет 1 626 117 (Один миллион шестьсот двадцать шесть тысяч сто семнадцать) рублей 68 коп.

Ответчик выполнил, а Истец принял работы по 12 этапу Контракта 5 декабря 2019 г. на сумму 10 070 970 (Десять миллионов семьдесят тысяч девятьсот семьдесят) руб. 70 коп., что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ 12 этапа за период с 29 октября 2019 г. по 28 ноября 2019 г. Ответчиком допущена просрочка выполнения работ по 12 этапу Контракта на 132 (сто тридцать два) календарных дня, размер пени Ответчика составляет 1 483 296 (Один миллион четыреста восемьдесят три тысячи двести девяносто шесть) рублей 74 коп.

Ответчик выполнил, а Истец принял работы по 13 этапу Контракта 20 декабря 2019 г. на сумму 5 420 872 (Пять миллионов четыреста двадцать тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 40 коп., что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ 13 этапа за период с 29 ноября 2019 г. по 20 декабря 2019 г. Ответчиком допущена просрочка выполнения работ по 13 этапу Контракта на 116 (сто шестнадцать) календарных дней, размер пени Ответчика составляет 1 193 236 (Один миллион сто девяносто три тысячи двести тридцать шесть) рублей 81 коп.

По состоянию на 8 декабря 2020 г. Ответчиком не выполнены работы по 14 этапу Контракта, просрочка выполнения работ по 14 этапу Контракта - 440 (четыреста сорок) календарных дней, размер пени Ответчика составляет 3 208 882 (Три миллиона двести восемь тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 17 коп.

По состоянию на 8 декабря 2020 г. Ответчиком не выполнены работы по 15 этапу Контракта, просрочка выполнения работ по 15 этапу Контракта - 410 (четыреста десять) календарных дней, размер пени Ответчика составляет 2 873 325 (Два миллиона восемьсот семьдесят три тысячи триста двадцать пять) рублей 54 коп.

По состоянию на 8 декабря 2020 г. Ответчиком не выполнены работы по 16 этапу Контракта, просрочка выполнения работ по 16 этапу Контракта - 379 (триста семьдесят девять) календарных дней, размер пени Ответчика составляет 2 581 047 (Два миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча сорок семь) рублей 83 коп.

По состоянию на 8 декабря 2020 г. Ответчиком не выполнены работы по 17 этапу Контракта, просрочка выполнения работ по 17 этапу Контракта - 349 (триста сорок девять) календарных дней, размер пени Ответчика составляет 2 345 926 (Два миллиона триста сорок пять тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 15 коп.

По состоянию на 8 декабря 2020 г. Ответчиком не выполнены работы по 18 этапу Контракта, просрочка выполнения работ по 18 этапу Контракта - 319 (триста девятнадцать) календарных дней, размер пени Ответчика составляет 2 144 270 (Два миллиона сто сорок четыре тысячи двести семьдесят) рублей 61 коп.

По состоянию на 8 декабря 2020 г. Ответчиком не выполнены работы по 19 этапу Контракта, просрочка выполнения работ по 19 этапу Контракта - 288 (двести восемьдесят восемь) календарных дней, размер пени Ответчика составляет 1 935 893 (Один миллион девятьсот тридцать пять тысяч восемьсот девяносто три) рубля 22 коп.

По состоянию на 8 декабря 2020 г. Ответчиком не выполнены работы по 20 этапу Контракта, просрочка выполнения работ по 20 этапу Контракта - 258 (двести пятьдесят восемь) календарных дней, размер пени Ответчика составляет 1 734 237 (Один миллион семьсот тридцать четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 67 коп.

По состоянию на 8 декабря 2020 г. Ответчиком не выполнены производственные работы по 21 этапу Контракта по пункту 21.1 Календарного плана, просрочка выполнения производственных работ по 21 этапу Контракта по пункту 21.1 Календарного плана - 228 (двести двадцать восемь) календарных дней, размер пени Ответчика составляет 1 532 582 (Один миллион пятьсот тридцать две тысячи пятьсот восемьдесят два) рубля 13 коп.

По состоянию на 8 декабря 2020 г. Ответчиком не оформлена исполнительная и разрешительная документация для приемки работ по пункту 21.3 Календарного плана, просрочка оформления исполнительной и разрешительной документации для приемки работ по пункту 21.3 Календарного плана - 196 (сто девяносто шесть) календарных дней, размер пени Ответчика составляет 1 317 482 (Один миллион триста семнадцать тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 88 коп.

Общая стоимость невыполненных Ответчиком объемов работ, предусмотренных 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 этапами Контракта, составляет 47 448 363 (Сорок семь миллионов четыреста сорок восемь тысяч триста шестьдесят три) рубля 13 коп.

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Ответчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы - 753 009 (Семьсот пятьдесят три тысячи девять) рублей 01 коп.

В соответствии с подпунктом 11.3.1 пункта 11.3 статьи 11 Контракта претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии сторона Контракта должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

На дату подачи настоящего искового заявления обязательство по уплате пеней и штрафов Ответчиком не исполнено, ответ на требование не получен.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 25 января 2023 года производство по делу № А40-104831/21-110-712 приостановлено до признания ООО "ГРАДОСТРОЙ" банкротом либо прекращения производства по делу №А40-82239/2021-73-153 "Б".

Согласно определению Арбитражного суда города Москвы от 17 января 2024 г., производство по делу № А40-82239/2021-73-153 "Б" о признании несостоятельным (банкротом) ООО "ГРАДОСТРОЙ" прекращено на основании абз. 8 п. 1 ст. 57 Закона о банкротстве.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или иными правовыми актами (п. 1 ст. Гражданского кодекса Российской Федерации).

Между тем пункт 7.3 статьи 7 Контракта устанавливает ответственность подрядчика в виде неустойки (штрафа) за неисполнение обязательств по Контракту, а пункт 7.7 статьи 7 Контракта ответственность подрядчика в виде неустойки (пени) за нарушение срока исполнения обязательств по Контракту, поскольку подрядчик может как допустить и просрочку исполнения обязательств и последующее неисполнение, так и допустив просрочку, выполнить обязательства по Контракту.

Верховный суд Российской Федерации в определении от 27 октября 2022 года указал, что истолкование приведенных норм Закона о контрактной системе в их взаимосвязи позволяет сделать вывод о том, что законодательство о контрактной системе отделяет просрочку исполнения обязательства от иных нарушений поставщиком обязательств и устанавливает специальную ответственность за просрочку исполнения обязательства в виде пени. Ответственность в виде штрафа применяется за неисполнение обязательства.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст.   110, 123, 156, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ГРАДОСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>)  в пользу Государственного казенного учреждения города Москвы "МОСРЕСТАВРАЦИЯ" (ОГРН: 

<

***>) 29 468 423 руб. 09 коп. неустойки, 6 777 081 руб. 09 коп. штрафа.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ГРАДОСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>)  в федеральный бюджет госпошлину в размере 200 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

Судья:

А.В. Мищенко