10293_5627472  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-35807/17

22 марта 2019 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Украинцевой Ю. В.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью управляющей компании «Мега Дом» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Феникс-Инвест» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки строительных работ, 

 Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «Феникс-Инвест» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 60 календарных дней со дня вступления в  законную силу решения (в случае объективной возможности и погодных условий)  безвозмездно выполнить работы по устранению дефектов (недостатков), допущенных при  строительстве 7-ми этажного многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ростов-на- Дону, ул. Портовая, 215/50 (крыши и конструкции стен) и выявленных в ходе  эксплуатации жилого дома, а именно выполнить работы по замене всего слоя кровельного  покрытия (рулонный гидроизолирующий материал) по всей крыши в точном соответствии  с проектом ООО МКП «5 принципов» от 2012 г. по объекту «Многоквартирное жилое  здание со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Портовая, 215 в г.  Ростове-на-Дону (с учетом внесенных изменений), положительным заключением ГАО РО   № 61-1-4-0298-12 от 02.05.2012 и в соответствии с требованиями действующих  строительных норм правил, а именно:  

 - демонтаж покрытия из цементной стяжки;  - демонтаж водоприемных воронок;  - демонтаж гидроизоляционного покрытия кровли; 

 - очистка поверхности парапетов для организации крепления прижимных планок;  

-выравнивание поверхности фибропенобетонной стяжки легким раствором для улучшения  адгезии наплавляемого гидроизоляционного ковра;  

 - выполнение примыканий из легкого раствора в угла по периметру кровли в местах  подъема гидроизоляционного ковра на вертикальные поверхности;  

 - выполнение 2-х слойного гидроизоляционного покрытия;  - устройство водоприемных воронок;  - монтаж прижимных планок по периметру примыканий:  - монтаж покрытия из цементной плитки; -переустройство крышек вентиляционных шахт. 

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «Феникс-Инвест» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 90 календарных дней со дня вступления в  законную силу решения безвозмездно произвести необходимый комплекс работ по  устранению результатов залития в местах общего пользования 7-ми этажного  многоквартирного дома по адресу: 

<

...>, в том числе  являющихся следствием выполнения работ по замене всего слоя кровельного покрытия  (рулонный гидроизолирующий материал) по всей крыши.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Феникс-Инвест» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  управляющей компании «Мега Дом» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 6000  рублей 00 копеек в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины,  понесенных при подаче иска, 65 500 рублей 00 копеек в возмещение расходов за  проведение судебной экспертизы.  

 Возвратить обществу с ограниченной ответственностью управляющей компании  «Мега Дом» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) с депозитного счета арбитражного  суда Ростовской области денежные средства, перечисленные за проведение судебной  экспертизы по платежному поручению № 000109 от 12.04.2018 в размере 13 836 рублей по  реквизитам, указанным в заявлении общества.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Украинцева Ю. В.