АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

432068, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 14 

Тел. (8422)33-46-08 Факс (8422)32-54-54 E-mail info@ulyanovsk.arbitr.ru Интернет: 

www.ulyanovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ арбитражного суда первой инстанции (резолютивная часть) 

г. Ульяновск Дело № А72-11727/2023  «29» января 2024 года  

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Абдуловой И.С., 

Руководствуясь ст. ст. 49, 110, 167-170, 176, 177, 180-182 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,   

Р Е Ш И Л :

Ходатайство истца об уточнении исковых требований удовлетворить. Исковые требования удовлетворить. 

Обязать Общество ограниченной ответственностью «Волгатехконтакт» в течение  месяца со дня вступления решения суда в законную силу устранить дефекты и недостатки  выполненных по контракту № 0168200002419002523 от 03.06.2019г. работ по ремонту  общего имущества многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Караганова в г.Ульяновске, а  именно:  

- устранить отсутствие покрытия вытяжных каналов в соответствии с п.40 Акта о  приемке выполненных работ № 1 от 30.09.2019;  

- устранить частичное отсутствие кирпичной кладки на вытяжных каналах путем  ремонта кирпичной кладки в соответствии с п.36 Акта о приемке выполненных работ № 1  от 30.09.2019;  

- выполнить покрытие выхода на кровлю в соответствии с технологией установки из  обрешетки досок и профлиста согласно п.40 Акта о приемке выполненных работ № 1 от  30.09.2019;  

- устранить намокание и разрушение кирпичной кладки по месту расположения  парапета (кв.13) согласно п.33 Акта о приемке выполненных работ № 1 от 30.09.2019;  

- устранить разгерметизацию оцинкованного покрытия на карнизном свесе в районе  подъездов № 1, 3 согласно п.33 Акта о приемке выполненных работ № 1 от 30.09.2019г.;  

- устранить разрушения кирпичной кладки стены с торцевой части дома согласно  п.36 Акта о приемке выполненных работ № 1 от 30.09.2019;  

- устранить выкрашивание кирпича на вытяжных каналах согласно п.36 Акта о  приемке выполненных работ № 1 от 30.09.2019.  

Взыскать с Общества ограниченной ответственностью «Волгатехконтакт» в доход  федерального бюджета госпошлину в сумме 6 000 руб. 00 коп.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его  принятия.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  порядке и сроки, установленные ст. ст. 257-259 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.  

Судья И.С.Абдулова