63/2023-96078(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (р е з о л ю т и в н а я ч а с т ь)

Дело № А13-2275/2023

город Вологда

26 сентября 2023 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Вологодской области  

р е ш и л :

обязать общество с ограниченной ответственностью «Гермес Трейд» в  течение месяца со дня вступления решения Арбитражного суда Вологодской  области в законную силу устранить выявленные недостатки в выполненных  работах по договорам подряда № УК00/02-2018 от 24.05.2018, № УК005/032018 от 24.05.2018, № УК010/01-2018 от 24.05.2018, № УК010/02-2018 от  24.05.2018, № УК010/03-2018 от 24.05.2018:  

I. по договору подряда № УК00/02-2018 на благоустройство дворовой  территории в многоквартирном доме № 4 по ул. Моченкова в г. Череповце:  

- восстановить, устранить разрушение асфальтового покрытия на проезде  напротив 1,2,4 подъездов МКД № 4 по ул. Моченкова, а также напротив арки и  образование трещины в асфальтобетонном покрытии на проезде напротив 4  подъезда;  

II. по договору подряда № УК005/03-2018 на благоустройство дворовой  территории в многоквартирном доме № 8 по ул. Моченкова в г. Череповце:  

- устранить разрушение асфальтового покрытия на проезде напротив  1,2,3,4 подъездов МКД 8 по ул. Моченкова, напротив ареки, а также  разрушение стыка двух полотен асфальтового покрытия на проезде напротив  2,3,4 подъездов;  

III. по договору подряда № УК010/01-2018 на благоустройство дворовой  территории в многоквартирном доме № 22 по ул. Пионерской в г. Череповце:  

- устранить образование трещин на поверхности асфальтового покрытия  проезда напротив 1,2,3,4 подъездов МКД № 22 по ул. Пионерской, а также  разрушение (шелушение, выкрашивание материала) асфальтового покрытия  проезда между 4 и 5 подъездам;  

IV. по договору подряда № УК010/02-2018 на благоустройство дворовой  территории в многоквартирном доме № 26 по ул. Ветеранов в г. Череповце:  

- 1 и 4 подъезды МКД 26 по ул. Ветеранов – обеспечить прилегание  асфальтобетонного покрытия тротуара к бордюрному камню,  

- 2 подъезд – устранить деформацию (проседание, провал)  асфальтобетонного покрытия перед бетонной плитой входа в подъезд,  образование трещин на поверхности асфальтобетонного покрытия тротуара,  

- 3 подъезд – устранить образование трещин на поверхности  асфальтобетонного покрытия тротуара,  

- 5 подъезд – устранить деформацию (вспучивание и проседание)  асфальтобетонного покрытия тротуара,  

- На проезде напротив 1 и 6 подъездов – устранить образование трещин  на поверхности асфальтобетонного покрытия, а также разрушение  (выкрашивание, образование ям) асфальтобетонного покрытия проезда  напротив 2,3,4 и 5 подъездов;  

V. по договору подряда № УК010/03-2018 на благоустройство дворовой  территории в многоквартирном доме № 24 по ул. Ветеранов:  

- устранить образование трещин на поверхности асфальтобетонного  покрытия по всей длине проезда от 1 подъезда и до конца МКД 24 по ул.  Ветеранов,  

- устранить выкрашивание материала с поверхности покрытия проезда на  углу МКД,  

- устранить разрушение асфальтобетонного покрытия проезда между 3 и  4 подъездами,  

- устранить разрушение асфальтобетонного покрытия на бордюрном  пандусе 2 подъезда.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гермес Трейд» в  пользу общества с ограниченной ответственностью управляющей компании  «Сатурн» 30 000 руб. в возмещение расходов на уплату государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.  

Судья Е.В. Дегтярева