Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-4470/2019

13 ноября 2019 года

город Якутск

Резолютивная часть решения объявлена 06.11.2019

Полный текст решения изготовлен 13.11.2019

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Терских В. С., при ведении протокола секретарем судебного заседания Ефремовым В.И., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Новая строительная компания» (ИНН 1435206520, ОГРН 1081435009457) от 22.04.2019 №185 к «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)» (ИНН 1435972500, ОГРН 1131400001545) о взыскании 14 289,22 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 – по доверенности от 23.10.2019;

от ответчика: не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Новая строительная компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в суд с иском от 22.04.2019 №185 к «Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 52 403,31 руб.

Определением суда от 26.04.2019 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением суда от 24.06.2019 определено рассмотреть дело по общим правилам искового производства.

Истцом неоднократно уточнялся размер исковых требований.

08.10.2019 от истца поступило заявление об уточнении исковых требований от 08.10.2019 без номера. С учетом заявленных уточнений истец просит взыскать с ответчика по договору № РТС214А180075 от 18.11.2018 сумму основного долга в размере 12 088, 06 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 472, 34 руб., по договору № РТС214А180076 от 18.10.2018 сумму основного долга в размере 688,70 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 26,91 руб., по договору № РТС214А180078 проценты за пользование чужими денежными средствами 1013, 21 руб., всего - 14 289, 22 руб.

Определением от 22.10.2019 судом уточнение принято.

Ответчиком отзыв на исковое заявление не представлен.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд определил рассмотреть дело в отсутствие представителя истца.

Судом установлены обстоятельства дела.

Между обществом с ограниченной ответственностью «Новая строительная компания» и «Фонд капитального ремонта Республики Саха (Якутия)» по итогам электронных аукционов № РТС214А180075, № РТС214А180076, № РТС214А180078 заключены договоры на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, по которым ООО «НСК» выступило подрядчиком, «Фонд Капремонта РС (Я)» – заказчиком.

Так, 18.10.2018 сторонами заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах № РТС214А180075, согласно пункту 2.1. договора заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту на следующих объектах:

- Респ. Саха/Якутия/, 

<

...>;

- Респ. Саха/Якутия/, 

<

...>:

- Респ. Саха/Якутия/, 

<

...>.

Согласно заключенному договору на данных объектах ремонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия должен быть произведен не позднее 30 календарных дней с даты подписания акта открытия объекта.

Согласно пункту 3.1. договора от 18.10.2018 № РТС214А180075 стоимость работ составляет 1 339 778, 24 руб. 12.02.2019 сторонами заключено дополнительное соглашение № РТС РТС214А180075(Д-1) от 12.02.2019, которым изменена стоимость договора, после заключения дополнительного соглашения стоимость договора составляет 1 193 783, 85 руб.

В рамках договора № РТС214А180075 сторонами составлены и подписаны акты открытия объектов по капитальному ремонту от 23.10.2018, в которых определены начало срока проведения работ – 23.10.2018 и окончание срока проведения работ – 22.11.2018.

В процессе выполнения работ по договору № РТС214А180075 заказчиком и подрядчиком без замечаний составлены и подписаны акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 на общую сумму 1 193 783, 85 руб.: № 1 от 10.12.2018 на сумму 114 613, 57 руб., № 1 от 10.12.2018 на сумму 431 120, 98 руб., № 1 от 10.12.2018 на сумму 648 049, 30 руб.

Заказчик на основании выполненных работ, составленных актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат произвел частичную оплату работ платежным поручением от 27.03.2019 № 808 на сумму 1 181 695, 79 рублей.

Вместе с договором № РТС214А180075 в этот же день сторонами заключен другой договор - № РТС214А180076, согласно которому договору заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту на следующих объектах:

- Респ. Саха /Якутия/, 

<

...>;

- Респ. Саха /Якутия/, 

<

...>.

Ремонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия должен быть произведен не позднее 30 календарных дней с даты подписания акта открытия объекта (пункт 2.1. договора).

Согласно пункту 3.1. договора от 18.10.2018 № РТС214А180076 стоимость работ составляет 861 117, 83 руб. 

12.02.2019 сторонами заключено дополнительное соглашение № РТС РТС214А180076(Д-1) от 12.02.2019, которым изменена стоимость договора, после заключения дополнительного соглашения стоимость договора составляет 696 828, 46 руб.

В рамках договора № РТС214А180076 сторонами составлены и подписаны акты открытия объектов по капитальному ремонту от 23.10.2018, в которых определены начало срока проведения работ – 23.10.2018 и окончание срока проведения работ – 22.11.2018.

В процессе выполнения работ по договору № РТС214А180076 заказчиком и подрядчиком без замечаний составлены и подписаны акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 на общую сумму 696 828, 46 руб.: № 1 от 22.11.2018 на сумму 238 417, 08 руб., № 1 от 11.22.2018 на сумму 458 411, 38 руб.

Заказчик на основании выполненных работ, составленных актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат произвел частичную оплату работ платежным поручением от 27.03.2019 № 809 на сумму 696 139, 76 рублей.

Также 15.11.2018 сторонами заключен договор № РТС214А180078, по которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту на следующих объектах:

- Респ. Саха /Якутия/, 

<

...>: ремонт системы электроснабжения - не позднее 40 календарных дней с даты подписания акта открытия объекта;

- Респ. Саха /Якутия/, 

<

...>: ремонт системы электроснабжения - не позднее 40 календарных дней с даты подписания акта открытия объекта; ремонт системы водоотведения - не позднее 40 календарных дней с даты подписания акта открытия объекта;

- Респ. Саха /Якутия/, 

<

...>: ремонт системы электроснабжения - не позднее 40 календарных дней с даты (2.1. договора).

Согласно заключенному договору от 15.11.2018 № РТС214А180078 на данных объектах ремонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия должен быть произведен не позднее 40 календарных дней с даты подписания акта открытия объекта.

Согласно пункту 3.1. договора от 15.11.2018 № РТС214А180078 стоимость работ составляет 2 600 492, 49 руб.

В рамках договора № РТС214А180078 сторонами составлены и подписаны акты открытия объектов по капитальному ремонту от 20.11.2018, в которых определены начало срока проведения работ – 20.11.2018 и окончание срока проведения работ – 30.12.2018.

Сторонами договора составлены акты о приемке законченного капитального ремонта части (очереди) многоквартирного жилого здания от 07.02.2019 на сумму 536 095, 03 руб. и на сумму 548 483, 94 руб., всего на сумму 1 084 578, 97 руб.

Заказчик на основании выполненных работ, составленных актов о приемке ремонта произвел оплату работ платежными поручениями от 02.04.2019 № 842 на сумму 201 851, 90 руб., от 02.04.2019 № 845 на сумму 30 033, 29 руб., от 02.04.2019 № 840 на сумму 209 005, 41 руб., от 02.04.2019 № 839 на сумму 172 386, 53 руб., от 02.04.2019 № 843 на сумму 169 648, 32 руб., от 02.04.2019 № 844 на сумму 83 955, 35 руб., от 02.04.2019 № 838 на сумму 74 058,69 руб., от 02.04.2019 № 841 на сумму 42 427, 69 руб., от 18.04.2019 № 1065 на сумму 101 211, 79 руб., всего на сумму 1 084 578, 97 руб.

Таким образом, подрядчиком выполнены работы, а заказчиком приняты и оплачены работы на сумму 1 084 578, 97 руб., при том, что договором предусмотрены работы, цена которых составляет 2 600 492, 49 руб.

08.04.2019 подрядчиком в адрес заказчика направлена претензия 08.04.2019 № 158 с требованием оплатить задолженность в размере 154 620, 56 руб. по договорам № РТС214А180075, № РТС214А180076, № РТС214А180078. Претензия получена заказчиком 10.04.2019 и оставлена без удовлетворения.

Неисполнение заказчиком требований, указанных в претензии, послужило основанием для обращения общества с ограниченной ответственностью «Новая строительная компания» с исковым заявлением в арбитражный суд к «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)».

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил, в связи с чем, суд в порядке части 4 статьи 131 АПК РФ рассматривает дело по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Суд, изучив и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. Гражданские права и обязанности могут возникать, в частности, из договоров и иных сделок.

Проанализировав условия заключенных договоров, суд приходит к выводу, что сложившиеся между сторонами правоотношения подлежат регулированию нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

Истцом заявлено требование о взыскание сумм основного долга по договору № РТС214А180075 в размере 12 088, 06 руб., по договору № РТС214А180076 от 18.10.2018 в размере 688,70 руб.

Как следует из материалов дела, заказчик произвел оплату работ по договору № РТС214А180075 платежным поручением от 27.03.2019 № 808 на сумму 1 181 695, 79 рублей, по договору РТС214А180076 платежным поручением от 27.03.2019 № 809 на сумму 696 139, 76 рублей.

При этом стоимость фактически принятых работ ответчиком без возражений и замечаний по договорам № № РТС214А180075 и № РТС214А180076 составляют 1 193 783, 85 руб. и 696 828, 46 руб., соответственно.

Таким образом, заказчик произвел частичную уплату по договорам № РТС214А180075, № РТС214А180076, не доплатив при этом сумму в размере 12 088, 06 руб. по договору № РТС214А180075, сумму в размере 688, 70 руб. по договору № РТС214А180076.

Ответчиком обоснование и расчет лишь частичной уплаченной задолженности по договорам № РТС214А180075, № РТС214А180076 не представлены.

Согласно статье 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Доказательств оплаты указанных работ в полном объеме ответчиком в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации также не представлено.

Как установлено статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу об удовлетворении требования о взыскании сумм основного долга по договору № РТС214А180075 в размере 12 088, 06 руб., по договору № РТС214А180076 от 18.10.2018 в размере 688,70 руб.

Также истцом требование о взыскании с ответчика по договору № РТС214А180075 от 18.11.2018 суммы процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку оплаты выполненных работ в размере 472, 34 руб., по договору № РТС214А180076 от 18.10.2018 суммы процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку оплаты выполненных работ в размере 26,91 руб., по договору № РТС214А180078 суммы процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку оплаты выполненных работ в размере 1013, 21 руб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Как установлено ранее по договору № РТС214А180075 заказчик произвел частичную оплату выполненных работ, не доплатив при этом 12 088, 06 руб.

Истец по договору № РТС214А180075 просит взыскать сумму процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку оплаты работ по договору за период с 01.04.2019 по 08.10.2019 в размере 472,34 руб.

Поскольку согласно пунктам 11.3. договоров № РТС214А180075, № РТС214А180076, № РТС214А180078 заказчик на свое усмотрение вправе оплачивать выполненные подрядчиком работы поэтапно до 01.04.2019, просрочка оплаты выполненных работ наступает с 02.04.2019, в связи, с чем расчет истца судом признан неверным.

С учетом того, что просрочка уплаты долга наступает с 02.04.2019 размер процентов за пользование чужими денежными средствами составляет 469, 77 руб., исходя из следующего расчета:

- в период с 02.04.2019 по 16.06.2019 c учетом того, что сумма долга составляет 12 088,06 руб., при процентной ставки 7,75 %, при количестве дней просрочки – 76 дней, проценты за пользование чужими денежными средствами составляет – 195,06 руб.;

- в период с 17.06.2019 по 28.07.2019 c учетом того, что сумма долга составляет 12 088,06 руб., при процентной ставки 7,50 %, при количестве дней просрочки – 42 дня, проценты за пользование чужими денежными средствами составляет – 104,32 руб.;

- в период с 29.07.2019 по 08.09.2019 c учетом того, что сумма долга составляет 12 088,06 руб., при процентной ставки 7,25 %, при количестве дней просрочки – 42 дня, проценты за пользование чужими денежными средствами составляет – 100,84 руб.;

- в период с 09.09.2019 по 08.10.2019 c учетом того, что сумма долга составляет 12 088,06 руб., при процентной ставки 7 %, при количестве дней просрочки – 30 дней, проценты за пользование чужими денежными средствами составляет – 69,55 руб.

Как установлено ранее по договору № РТС214А180076 заказчик произвел частичную оплату выполненных работ, не доплатив при этом 688,70 руб.

По договору № РТС214А180076 истец просит взыскать сумму процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку оплаты работ по договору за период с 01.04.2019 по 08.10.2019 в размере 26,91 руб.

Расчет истца судом проверен и признан неправильным.

С учетом того, что просрочка уплаты долга наступает с 02.04.2019 размер процентов за пользование чужими денежными средствами составляет 26, 76 руб., исходя из следующего расчета:

- в период с 02.04.2019 по 16.06.2019 c учетом того, что сумма долга составляет 12 088,06 руб., при процентной ставки 7,75 %, при количестве дней просрочки – 76 дней, проценты за пользование чужими денежными средствами составляет – 11,11 руб.;

- в период с 17.06.2019 по 28.07.2019 c учетом того, что сумма долга составляет 12 088,06 руб., при процентной ставки 7,50 %, при количестве дней просрочки – 42 дня, проценты за пользование чужими денежными средствами составляет – 5,94 руб.;

- в период с 29.07.2019 по 08.09.2019 c учетом того, что сумма долга составляет 12 088,06 руб., при процентной ставки 7,25 %, при количестве дней просрочки – 42 дня, проценты за пользование чужими денежными средствами составляет – 5,75 руб.;

- в период с 09.09.2019 по 08.10.2019 c учетом того, что сумма долга составляет 12 088,06 руб., при процентной ставки 7 %, при количестве дней просрочки – 30 дней, проценты за пользование чужими денежными средствами составляет – 3, 96 руб.

По договору № РТС214А180078 истец просит взыскать сумму процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку оплаты работ по договору за период с 01.04.2019 по 18.04.2019 в размере 1 013, 21 руб.

Поскольку согласно пункту 11.3. договора № РТС214А180078 заказчик на свое усмотрение вправе оплачивать выполненные подрядчиком работы поэтапно до 01.04.2019, просрочка оплаты выполненных работ наступает с 02.04.2019.

Заказчик на основании выполненных работ, составленных актов о приемке ремонта произвел оплату работ по договору № РТС214А180078 платежными поручениями от 02.04.2019 № 842 на сумму 201 851, 90 руб., от 02.04.2019 № 845 на сумму 30 033, 29 руб., от 02.04.2019 № 840 на сумму 209 005, 41 руб., от 02.04.2019 № 839 на сумму 172 386, 53 руб., от 02.04.2019 № 843 на сумму 169 648, 32 руб., от 02.04.2019 № 844 на сумму 83 955, 35 руб., от 02.04.2019 № 838 на сумму 74 058,69 руб., от 02.04.2019 № 841 на сумму 42 427, 69 руб., от 18.04.2019 № 1065 на сумму 101 211, 79 руб., всего на сумму 1 084 578, 97 руб., то есть заказчик допустил просрочку уплаты оплаты работ по договору № РТС214А180078.

Вместе с тем расчет истца судом проверен и признан неправильным.

С учетом того, что просрочка уплаты долга наступает с 02.04.2019 размер проценты за пользование чужими денежными средствами составляет 782, 92 руб., исходя из следующего расчета:

- в период с 02.04.2019 по 03.04.2019 c учетом того, что сумма долга составляет 1 084 578, 97 руб., при процентной ставки 7,75 %, при количестве дней просрочки – 2 дня, проценты за пользование чужими денежными средствами составляет – 460, 57 руб.;

- в период с 04.04.2019 по 18.04.2019 c учетом того, что сумма долга составляет 101 211, 79 руб. при процентной ставки 7,75 %, при количестве дней просрочки – 15 дней, проценты за пользование чужими денежными средствами составляет – 322,35 руб.;

Таким образом, заявленное требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами частично подлежит удовлетворению в размере 1 279, 45 руб. (469, 77 руб. +26, 76 руб.+782, 92 руб.).

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При подаче иска истцом уплачена государственная пошлина по платежному поручению № 242 от 19.04.2019 на сумму 5 629 руб.

В процессе рассмотрения истцом заявлено уточнение исковых требований, размер исковых требований на момент принятия решения составляет 14 289, 22 руб.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» в случае изменения размера исковых требований после возбуждения производства по делу при пропорциональном распределении судебных издержек следует исходить из размера требований, поддерживаемых истцом на момент принятия решения.

Таким образом, размер государственной пошлины при данном размере исковых требований подлежащий распределению между сторонами составляет 2 000 рублей.

По смыслу положений абзаца 2 части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, размер судебных расходов относящихся на проигравшую сторону определяется в деле, пропорционально размеру удовлетворенных материальных исковых требований.

В связи с тем, что исковые заявления подлежат удовлетворению в части, государственная пошлина подлежит распределению пропорционально удовлетворенным требованиям. Так расходы истца по уплате государственной пошлины подлежат возмещению ответчиком в сумме 1 967, 40 руб.

Излишне уплаченная государственная пошлина в размере 3 629 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить в части.

Взыскать с «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Новая строительная компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность в размере 12 776,76 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 279,45 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 967,40 руб.

В остальной части иска отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Новая строительная компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 629 руб., уплаченную по платежному поручению № 242 от 19.04.2019.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

Судья

                      В.С.Терских