61/2023-25914(1) 

 

Арбитражный суд Брянской области  241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru  

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 решения

 по делу 

№ А09-11894/2022

город Брянск

09 марта 2023 года

Арбитражный суд Брянской области в составе судьи Зенина Ф.Е.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Киселёвой С.Г.,  

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации, г.Брянск (ИНН 3250067042), к обществу с ограниченной ответственностью «ИнтерВладСтрой», г.Владимир (ИНН 3327129248), третье лицо: МКУ «Управление ЖКХ» г.Брянска, г.Брянск, об обязании устранить недостатки выполненных работ, при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО1, доверенность от 01.04.2022 № 25/16-5174,  от ответчика: не явился, извещен,  

от третьего лица: не явился, извещен, руководствуясь ст.ст.49, 167-170, 176, 180 АПК РФ, Арбитражный суд Р Е Ш И Л : Иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ИнтерВладСтрой»,  г.Владимир, в месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу  безвозмездно устранить недостатки выполненных работ по муниципальному контракту от  28.12.2019 № 0127300013119000848_123266, а именно устранить:  

- разрушение поперечного шва ПКО+20 протяженностью 50 м.,  - разрушение продольного шва на участке ПК2+50 - ПК3+00 протяженностью 20 м.,  

- разрушение продольного шва ПК3+50 протяженностью 30 м.,  

- разрушение шва сопряжения на участке ПК8+45 - ПК10+10 протяженностью  100 м.,  

- разрушение продольного шва ПК10+30 протяженностью 25 м.,  

- ямочность ПК3+00 площадью 3 кв.м.,  

- шелушение покрытия ПК6+20 площадью 12 кв.м., шелушение покрытия на участке  

ПК17+75 - ПК18+02 площадью 42 кв.м., - разрушение кромки ПК14+25 площадью 4 кв.м., - сетка трещин ПК14+50 протяженностью 120 м., 

- на участке ПК15+50 - ПК16 наплыв асфальта после укатывания покрытия  

площадью 3,5 кв.м., - выпор ПК18+50 площадью 0,3 кв.м., 

- сетка трещин ПК21+45 протяженностью 30 м., сетка ПК22+00 (разворотная  

площадка) протяженностью 50 м., на участке ПК23+00 - ПК23+50 дефект в виде сетки  

трещин площадью 80 кв.м., 

- в районе дома № 130 на всем протяжении разворотной площадки устранить  

шелушение покрытия автомобильной дороги площадью 130 кв.м. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ИнтерВладСтрой»,  

г.Владимир, в доход федерального бюджета 6000 руб. 00 коп. государственной пошлины.  Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  

принятия и может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через принявший решение в  

первой инстанции арбитражный суд. 

Судья Ф.Е. Зенин 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 03.03.2023 4:31:00Кому выдана Зенин Федор Евгеньевич