1789220/2023-413800(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ул. Самарская, 203 Б, Самара, 443001, тел.: (846) 207-55-15, 

e-mail: info@samara.arbitr.ru, www.samara.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

05 декабря 2023 года Дело № А55-14952/2023  

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Шлиньковой Е.В.  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Никоновой С.Г.,  

рассмотрев в судебном заседании 05 декабря 2023 года дело по иску, заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «Контраст Сервис»  к акционерному обществу «Самарская сетевая компания»  

об обязании 

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью «ИНСТРЭЛ»  общество с ограниченной ответственностью «СамараСтройПотенциал»  

при участии в заседании 

от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 06.08.2021; ФИО2,  выписка из ЕГРЮЛ;  

от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности от 16.10.2023; от третьих лиц – от ООО «ИНСТРЭЛ» ФИО4, представитель по доверенности от 14.07.2022; 

 Руководствуясь ст.ст. 167-171, 176, 180, 181, 110, ч. 1 ст. 259, ч. 3 ст. 319 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Обязать акционерное общество «Самарская сетевая компания» (ИНН 

<

***>) в  срок, не превышающий 30 календарных дней с момента вступления решения суда в  законную силу, выполнить обязательства по договору № ДГ-020/39 об осуществлении  технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств  общества с ограниченной ответственностью «Контраст Сервис» (ИНН 

<

***>),  расположенных по адресу: 

<

...>, в том числе, осуществить на своих  сетях технические мероприятия, обеспечивающие технологическое присоединение  объекта и передачу заявленной мощности в объеме 25кВт, а именно:  

- проектирование ЛЭП-0,4кВ от точки присоединения до точки подключения общества с  ограниченной ответственностью «Контраст Сервис», расположенной у границы  подключаемого объекта в соответствии с требованиями нормативно-технических  документов;  

- согласование проектной документации в порядке, установленном Градостроительным  кодексом Российской Федерации (со всеми заинтересованными организациями,  владельцами всех коммуникаций, находящихся в зоне строительства, Администрацией  города/муниципального района), а также получение всех необходимых технических  условий от смежных организаций в целях разработки проектной документации;  

- оформление письменного разрешения на производство работ в установленном  

Администрацией города/муниципального района порядке перед началом строительно-монтажных работ;  

- закупку материалов и оборудования для строительства, соответствующих нормам ГОСТа  или ТУ, сертифицированных в соответствии с системой Госстандарта России;  

- строительство ЛЭП-0,4кВ от точки присоединения до проектируемой точки  присоединения, расположенной у подключаемого объекта в соответствие с согласованной  проектной документацией;  

- организацию коммерческого учета электроэнергии на границе имущественной  (балансовой) принадлежности на базе трехфазного электросчетчика класса точности 1,0;  

- реконструкцию распределительных электросетей путем установки соответствующей  коммутационной аппаратуры, устройств сбора данных измерительного комплекса,  вводного и фидерного учета электроэнергии.  

 Обязать акционерное общество «Самарская сетевая компания» по результатам  выполнения мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с  техническими условиями в течение одного рабочего дня составить уведомление об  обеспечении возможности присоединения к электрическим сетям по форме,  предусмотренной приложением № 1(1) к Правилам технологического присоединения  электропринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по  производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,  принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,  утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, в форме  электронного документа и разместить это уведомление, подписанное усиленной  квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица акционерного  общества «Самарская сетевая компания», в личном кабинете заявителя.  

 Взыскать с акционерного общества «Самарская сетевая компания» в пользу общества  с ограниченной ответственностью «Контраст Сервис» судебную неустойку в размере  1 500 руб. 00 коп. за каждый день просрочки исполнения решения суда, начиная с 31 дня  после вступления решения суда по настоящему делу в законную силу. В удовлетворении  оставшейся части заявленных требований отказать.  

 Взыскать с акционерного общества «Самарская сетевая компания» в пользу общества  с ограниченной ответственностью «Контраст Сервис» расходы по государственной  пошлине в размере 6 000 руб. 00 коп.  

 Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца после его принятия судом первой инстанции с направлением  апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.  

Судья / Е.В. Шлинькова