Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

 

10 сентября 2018 года                                                                     Дело № А56-75741/2018

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" (адрес:  188653, нп. ВОЕННЫЙ ГОРОДОК АГАЛАТОВО, ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл., ВСЕВОЛОЖСКИЙ р-н, 161; 194044, Санкт-Петербург, ФИО1 пр. 60А, ОГРН:  

<

***>; 

<

***>)

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Рос-сервис" (адрес:  194044,  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. ЧУГУННАЯ, д. 14,/З/32Н/2, ОГРН:  

<

***>)

о взыскании 231 839,03 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 0,3% за период с 05.12.2017 по 25.12.2018 по договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме от 05.09.2017 № 2014-40,

в представленном отзыве ответчик просит снизить неустойку в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации до 77 279,68 руб., рассчитанную в размере 0,1%,

учитывая, что в дополнительном соглашении № 1 к договору заказчик не согласовал дополнительные виды и объемы работ и оплату сверх установленной суммы договора, 

Общество не представило доказательства невозможности проведения работ в связи с неблагоприятными погодными условиями, суд не установил оснований для применения статьи 333 ГК РФ, 

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "РОС-СЕРВИС" в пользу некоммерческой организации "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 231 839,03 руб. неустойки и 7637 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение

 подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

 

Судья                                                                            Косенко Т.А.