Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-114303/2023

24 июля 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  16 июля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  24 июля 2024 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Даценко А.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Письменная Н.П.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО" (адрес:  Россия 197349, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Гаккелевская ул, д. 21 литера А, ОГРН: 

<

***>);

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЫСТРОЕЖКА" (адрес:  Россия 192241, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 24 к. 2 литер а, помещ. 2-н, ОГРН:  

<

***>);

о расторжении договора и взыскании неустойки

 

при участии

- от истца:  ФИО1, по доверенности от 16.03.2023,

- от ответчика: не явился, извещен, 

 

установил:

Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "БЫСТРОЕЖКА" (далее – ответчик):

- о расторжении договора №ОД-СПб-29167-17/40944-Э-17 от 31.10.2017 в связи с его существенным нарушением со стороны заявителя с даты принятия судебного акта судом.

- о взыскании неустойку за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению в размере 4 403,91 руб. за период с 04.03.2018 по 14.11.2023, но с учетом ограничений, изложенных в п.16.5 Правил ТП).

  В судебном заседании 16.07.2024 приняты уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), где истец просил:

Расторгнуть договор №ОД-СПб-29167-17/40944-Э-17 от 31.10.2017 в связи с его существенным нарушением со стороны заявителя с даты принятия судебного акта судом. 

2. Взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору №ОДСПб-29167-17/40944-Э-17 от 31.10.2017 в размере 4 403,91 руб. за период с 04.03.2018 по 14.11.2023.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание своих представителей не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие. Отзыв с возражениями по заявленным требованиям ответчик не представил.

         В соответствии с частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции.

Исследовав материалы настоящего дела, оценив представленные доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, между ПАО «Россети Ленэнерго» (далее – сетевая организация, Исполнитель) и ООО «Быстроежка» (далее - Ответчик, заявитель) заключен Договор №ОД-СПб-29167-17/40944-Э-17 от 31.10.2017 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заявителя - «нестационарный торговый объект», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Троицкий пр., уч.20.

В соответствии с п. 6 договора Сетевая организация приняла на себя обязательство по осуществлению временного технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя.

Пунктом 8 договора установлена обязанность Заявителя исполнить надлежащим образом в определённый договором срок мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, а также обязанность по оплате расходов на технологическое присоединение.

Согласно п. 6 договора в течение 15 рабочих дней, со дня заключения настоящего договора, выполнить мероприятия по технической подготовке объектов электросетевого хозяйства для временного технологического присоединения объектов заявителя.

На основании п. 5. договора в течение 4 четырех месяцев Заявитель обязан был исполнить мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с п. 10 Договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Санкт-Петербургу от 30.12.2016 № 290-р составляет 4 826,20 руб., в том числе НДС 18% 736,20 руб.

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется следующим образом:

- 10% платы за технологическое присоединение в сумме 482,62 руб., в том числе НДС 18% вносят в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора;

- 30% платы за технологическое присоединение в сумме 1 447,86 руб., в том числе НДС 18% вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора;

- 20% платы за технологическое присоединение в сумме 965,24 руб., в том числе НДС 18% вносятся в течение 180 дней со дня заключения настоящего договора;

- 30% платы за технологическое присоединение в сумме 1 447,86 руб., в том числе НДС 18% вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

- 10% платы за технологическое присоединение в сумме 482,62 руб., в том числе НДС 18% вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта о технологическом присоединении.

В соответствии с п. 10 договора согласно техническим условиям к договору со стороны Сетевой организации надлежало подготовить и выдать технические условия, данные обязательства были исполнены с момента выдаче их Заявителю после подписания договора.

В соответствии с пунктом 5 договора срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению истек 03.03.2018.

Согласно пунктам 1, 4 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора; условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. Статьей 422 ГК РФ установлено, что договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами, действующим в момент его заключения.

Согласно пункту 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной, а также в случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором. 

Мероприятия по технологическому присоединению должны быть выполнены заявителем в срок до 03.03.2018, таким образом, 04.03.2019 наступил 12-ти месячный срок с даты просрочки выполнения мероприятий. В связи с этим у Сетевой организации возникли правовые основания для расторжения договора.

Таким образом, реализуя свое право, закреплённое ГК РФ, ПАО «Россети Ленэнерго» направило Заявителю претензию от 17.08.2020 исх. № ЛЭ/16-20/2787, в которой предложило заявителю направить в адрес Сетевой организации уведомление о выполнении со своей стороны технических условий.

Претензия ответчиком в добровольном порядке не удовлетворена, в связи с чем ПАО «Россети Ленэнерго» вынуждено обратиться в суд с настоящим иском.

Согласно пункту 16(5) Правил ТП, нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств -мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации в судебном порядке.

Согласно п. 18 договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Истец просил взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению в размере 4 403,91 руб. за период с 04.03.2018 по 14.11.2023.

Подпунктом «в» пункта 16 Правил ТП п. 17 договора предусмотрена обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

  В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. 

 В соответствии со статьей 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. 

 В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. 

Неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств, средством возмещения потерь кредитора, вызванных нарушением должником своих обязательств.

         Расчет неустойки не оспорен ответчиком, проверен и принят арбитражным судом.

В силу статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению в полном размере.

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Принять уточнение истцом  исковых требований согласно заявления от 27.06.2024.

  Расторгнуть договор № ОД-СПб-29167-17/40944-Э-17 от 31.10.2017 между ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО" и ООО "БЫСТРОЕЖКА".

Взыскать с ООО "БЫСТРОЕЖКА" в пользу ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО" 4 403,91 руб. неустойки и  8 000 руб. расходов по госпошлине.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

 

Судья                                                                            Даценко А.С.