АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е

 

<

...>   

 Резолютивная часть решения оглашена 11 сентября 2024 года   Решение в полном объеме изготовлено 25 сентября 2024 года     

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе судьи Тебуевой З.Х.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Джаубаевой Д.Б., рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью "Светосервис-Ставрополье" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП  

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании неосновательного обогащения и процентов,  в отсутствие представителей сторон,  

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Светосервис-Ставрополье" (далее-истец)  обратилось в суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее-ответчик) о взыскании неосновательного обогащения -  неотработанного аванса по договору от 25.09.2023 № 82/2023 на выполнение  субсубподрядных работ на объекте "Всероссийский туристско-рекреационный комплекс  "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика, магистральные сети инженерно-технического  обеспечения и устройство автодороги, пос. Лунная Поляна. Этапы 1,2" в размере 120000  рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 02.12.2023 по  15.02.2024 в размере 3938,59 рублей (л.д.18-21).  

Истец ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие его представителя (л.д.49). 

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил, явку в судебное заседание не  обеспечил.  

В соответствии с требованиями ч.ч. 1, 4 ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса  РФ копии определений по делу направлялись ответчику судом заказными письмами с  уведомлением по адресу, указанному в адресной справке МВД по КЧР (л.д.43).  

Корреспонденция во всех случаях возвратилась в суд по истечению срока хранения.  Доказательств того, что адрес регистрации ответчика изменился и на момент проведения  судебного заседания является иным, ответчиком не представлено, информация о движении  дела также была размещена на официальном сайте суда в сети Интернет.  

Суд приходит к выводу о том, что ответчик надлежащим образом извещен, в  этой связи, спор рассматривается в порядке ч.3 ст.156 Арбитражного процессуального  кодекса РФ в отсутствие представителей сторон.  

Согласно ч.1 ст.156 Арбитражного процессуального кодекса РФ непредставление  отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд  предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к  рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.  

Исходя из принципа состязательности сторон, закрепленного в статье 9 Арбитражного  процессуального кодекса РФ, а также положений статей 65, 66 Арбитражного  процессуального кодекса РФ, лицо, не реализовавшее свои процессуальные права на  представление доказательств, несет риск неблагоприятных последствий несовершения им  соответствующих процессуальных действий.  

Суд, исследовав материалы дела, оценив доводы иска, полагает, что исковые  требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.  

Из обстоятельств дела следует, что между истцом (субподрядчик) и ответчиком  (субсубподрядчик) заключен договор от 30.08.2023 № 82/2023, согласно которого  субподрядчик поручает, а субсубподрядчик обязуется на условиях, установленных  настоящим договором выполнить строительно-монтажные работы по прокладке кабельной  линии 0,4 кВ в соответствии с ведомостью объемов работ (приложение № 2), являющейся  неотъемлемой частью настоящего договора и проектной документацией (далее работы) на  объекте «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз», Карачаево-Черкесская  Республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство  автодороги, пос. Лунная Поляна. Этапы 1,2», передать результат работ субподрядчику, а  субподрядчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить в порядке и на  условиях, предусмотренных настоящим договором (л.д.25-33).  

Согласно пункту 1.2 договора субсубподрядчик в установленные договором сроки и в  пределах договорной цены обязуется качественно выполнить работы, своими силами и  средствами, с использованием давальческих материалов, предоставляемых субподрядчиком  субсубподрядчику на давальческой основе, согласно ведомости объемов работ (приложение   № 2), также при необходимости дополнительного приобретения материалов субсубодрядчик  ставит в известность субподрядчика, и после подписания дополнительного соглашения, где  прописывается перечень и сумма приобретаемого материала, производится закуп материала  за счет субподрядчика, с предоставлением субподрядчику всей необходимой документации  (товарно-кассовые чеки, товарные накладные, акты выполненных работ или оказанных  услуг, также все погрузо-разгрузочные работы).  

В соответствии с п.1.3 договора в случае необходимости субсубподрядчик вправе  воспользоваться услугами третьих лиц. В этом случае субсубподрядчик несет полную  ответственность перед субподрядчиком за действия третьих лиц.  

Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему договору, в  котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения работ (пункт 1.4  договора).  

Согласно пункту 1.5 договора на момент заключения настоящего договора  субсубподрядчик тщательно изучил и проверил всю предоставленную ему проектную  документацию, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением  работ, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на  сроки, стоимость и качество работ, подтверждает достаточность объема проектной  документации выполнения работ по договору и принимает на себя весь перечень и весь  объём работ, прописанных в настоящем договоре.  

Согласно п.1.6 договора работы, предусмотренные настоящим договором,  выполняются в рамках реализации договора от 17.02.2021 № Д-ДРП-21-003-  204263210074077030100100000274211451, заключенного с заказчиком - акционерное  общество «Курорты Северного Кавказа».  

В соответствии с п.1.7 договора субподрядчик обязуется создать субсубподрядчику  необходимые условия для выполнения субсубподрядных работ, принять работы, уплатить  обусловленную договором цену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим  договором.  

Пунктом 2.1 договора предусмотрено, что все платежи по настоящему договору  осуществляются в рублях.  

Цена Договора (договорная цена) составляет 400 000 рублей, НДС не облагается на  основании статьи 346.11 главы 26.2 НК РФ. Субсубподрядчик не платит НДС в связи с  применением упрощенной системы налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК). Общая цена по  настоящему договору не включает стоимость материалов, предоставляемых субподрядчиком  субсубподрядчику на давальческой основе и дополнительно приобретенный при  необходимости материал будет приобретаться не за счет субсубподрядчика (пункт 2.2  договора).  

Согласно п.2.3 договора стороны пришли к соглашению о выплате субсубподрядчику  аванса в размере 30% от договорной цены на основании счета, выставленного  субсубподрядчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты выставленного счета.  

В соответствии с пунктами 4.1 и 4.3 договора: начало работ - с даты поступления  аванса на расчетный субсубподрядчика, срок окончания работ - в течение 30 календарных  дней.  

Пунктом 4.2 договора предусмотрено, что выполнение всего объема работ по  договору подтверждается подписанием акта выполненных работ.  

Согласно п.4.4 договора субсубподрядчик обязан приостановить работы по указанию  субподрядчика. В этом случае сроки выполнения работ соразмерно сдвигаются на срок  вынужденного простоя, связанного с приостановлением работ по указанию субподрядчика.  Субсубподрядчик вправе потребовать от субподрядчика выплаты компенсации за  вынужденный простой в размере, согласованным с субподрядчиком.  

В соответствии с п. 4.5 договора сроки выполнения работ соразмерно продлеваются: - в случае, указанном в п. 4.4 договора; - при наступлении форс-мажорных обстоятельств. 

Пунктом 4.6 договора предусмотрено, что субсубподрядчик по согласованию с  субподрядчиком вправе выполнить работы досрочно.  

Сроки выполнения работ по настоящему договору могут быть изменены в случаях,  если возникает необходимость выполнения дополнительных работ, в случае если они не  были предусмотрены рабочей документацией, в порядке, предусмотренном настоящим  договором и на основании дополнительных соглашений сторон (пункт 4.7 договора).  

В соответствии с п.4.9 договора при наличии независящих от субсубподрядчика  обстоятельств, способных повлиять на сроки выполнения работ или повлечь их  приостановку, сроки выполнения работ пропорционально увеличиваются по отдельному  соглашению сторон.  

Пунктом 5.1.договора предусмотрена приемка результата субсубподрядных работ: 

- по завершении субсубподрядных работ субсубподрядчик передает субподрядчику  одновременно: извещение о завершении работ, акт выполненных работ, подписанный со  своей стороны,  

- в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта выполненных работ  субподрядчик совместно с представителями субсубподрядчика производит проверку  выполненных работ, части выполненных работ. При отсутствии замечаний, препятствующих  приемке субсубподрядных работ, субподрядчик подписывает со своей стороны акт  выполненных работ, передает 1 (один) экземпляр подписанного акта выполненных работ  субсубподрядчику.  

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного  исполнения сторонами своих обязательств по нему (пункт 14.1 договора).  

В соответствии с пунктом 14.2 договор может быть расторгнут по взаимному  соглашению сторон.  

Согласно п.14.3 договора субподрядчик может в любое время до сдачи ему результата  субсубподрядных работ отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке без  

каких-либо санкций со стороны субсубподрядчика. При этом субподрядчик  обязан в течение 10 дней с даты уведомления субсубподрядчика принять фактически  выполненные работы и произвести их оплату. При этом гарантийные обязательства,  предусмотренные договором, сохраняются в отношении фактически принятых и оплаченных  субподрядчиком объемов работ.  

Пунктом 14.9 договора предусмотрено, что прекращение действия договора не  прекращает обязательства сторон по несению ответственности за ненадлежащее исполнение  обязательств по договору, а также обязательств, которые должны быть исполнены сторонами  после его расторжения.  

Платёжным поручением от 25.09.2023 № 1493 истцом ответчику перечислены  денежные средства в размере 120 000 рублей в качестве аванса по договору от 30.08.2023 на  основании счета от 21.09.2023 № 93 (л.д.34).  

Письмом от 07.11.2023 № 574 истец обратился к ответчику требованием об исполнении  принятых на себя обязательств по договору в срок до 15.11.2023 (л.д.35).  

Претензией от 28.11.2023 № 606 истец уведомил ответчика о расторжении договора в  одностороннем порядке, а также потребовал в течение 5-ти рабочих дней с момента  получения письма вернуть неотработанный аванс в размере 120 000 рублей, в течение 10-ти  дней с момента получения - освободить строительную площадку (вывезти принадлежащее  субсубподрядчику оборудование, материалы, а также строительный мусор), вернуть  субподрядчику по соответствующему акту приму-передачи объект, исполнительскую  документацию в полном объеме, переданную ранее техническую документацию (л.д.36-37).  

Указанная претензия истцом направлена ответчику 29.11.2023 и возращена органом  почтовой связи отправителю ввиду невручения адресату – 03 января 2024 года (л.д.54-55).  

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна  сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)  определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат  работы и оплатить его.  

Согласно статье 708 Гражданского кодекса РФ в договоре подряда указываются  начальный и конечный сроки выполнения работы. Если иное не установлено законом, иными  правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за  нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.  

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий  и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно  предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и  

одностороннее изменение его условий не допускаются (статьи 309, 310 Гражданского  кодекса РФ).  

Пунктом 1 статьи 715 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что заказчик вправе во  всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в  его деятельность.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 715 Гражданского кодекса РФ, если подрядчик не  приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько  медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе  отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.  

Право заказчика на односторонний отказ от исполнения договора предусмотрено  условиями договора.  

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 716 Гражданского кодекса РФ подрядчик  обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить  работу при обнаружении иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят  годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее  завершения в срок.  

Ответчик не воспользовался правами, предоставленными ему законодательством и  договором, на приостановление работы в пределах срока выполнения работ по договору при  наличии обстоятельств, создающих невозможность завершения работы в срок (пункт 1  статьи 716 ГК РФ); правом на изменение договора при существенном нарушении договора  другой стороной или в связи с существенным изменением обстоятельств (статьи 450 и 451  ГК РФ). При таких обстоятельствах риск возможных неблагоприятных последствий в случае  продолжения работы несет подрядчик.  

Напротив, ответчик без указания причин не приступил к выполнению работ по  договору, так как им был возвращен весь давальческий материал, который ранее был  передан истцом, что подтверждается приходным ордером от 23.11.2023 № 35 (л.д.56-57).  

Согласно пункту 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса РФ предоставленное данным  Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на  односторонний отказ от договора (исполнения договора) может быть осуществлено  управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора  (исполнения договора).  

Договор прекращается с момента получения указанного уведомления, если иное не  предусмотрено данным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или  договором.  

Направленная истцом по адресу регистрации ответчика корреспонденция с  уведомлением о расторжении договора возвращена органом почтовой связи неврученной по  истечению срока хранения.  

Согласно интернет-сайту "Почта России" корреспонденция (трек-номер:  35734289012442) прибыла 02.12.2023 в место вручения, 03.01.2024 осуществлен возврат  отправителю (л.д.54-55).  

Между тем, сообщение считается доставленным в тех случаях, если оно поступило  лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не  было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (абзац 2 пункта 1 статьи 165.1  Гражданского кодекса РФ).  

Таким образом, учитывая положения Гражданского кодекса РФ и условия договора, суд  признает законными действия истца по одностороннему отказу от исполнения договора.  

Истцом заявлено о взыскании 120 000 рублей неосновательного обогащения. 

В силу пункта 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса РФ в случае одностороннего отказа  от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается,  договор считается расторгнутым или измененным.  

Согласно пункту 4 статьи 453 Гражданского кодекса РФ, в случае, когда до  расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны  исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила  другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об  обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не  предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.  

В силу статьи 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без установленных  законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло  имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить  последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное  обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.  

Факт получения денежных средств в заявленном размере ответчиком не оспорен. 

С момента расторжения договора в одностороннем порядке удержание ответчиком  суммы полученного от истца аванса при отсутствии доказательств равноценного  предоставления в виде результата выполненных работ является неправомерным.  

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца  120 000 рублей неосновательного обогащения.  

В соответствии с частью 2 статьи 1107 Гражданского кодекса РФ на сумму  неосновательного обогащении подлежат начислению проценты за пользование чужими  

денежными средствами с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о  неосновательности получения или сбережения денежных средств.  

В соответствии с п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса РФ за пользование чужими  денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на  сумму этих средств.  

Произведенный истцом расчет процентов за период с 02.12.2023 по 15.02.2024 в  размере 3 938, 59 рублей судом проверен и признан неверным в части определения  начальной даты начисления процентов.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или  позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно  быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения  обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных  законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или,  соответственно, в любой момент в пределах такого периода.  

Так, договор считается расторгнутым с 15.01.2023, спустя 7 дней после неудачной  попытки вручения корреспонденции по месту регистрации ответчика, и начисление  процентов возможно с 16.01.2024, в связи с чем, судом произведен собственный расчет,  согласно которого:  

Задолженность 

Период просрочки 

Ставка 

Формула 

Проценты  

с 

по 

дней 

120 000 р. 

16.01.2024 

15.02.2024 

31 

16 

120 000 х 31х 16%/366 

1 626,23 р.  

Таким образом, удовлетворению подлежат требования о взыскании процентов за  

период с 16.01.2024 по 15.02.2024 в размере 1 626, 23 рублей, в остальной части заявленных  требований надлежит отказать.  

Разрешая вопрос о судебных расходах, состоящих из уплаченной истцом при подаче  иска платёжным поручением от 12.02.2024 № 188 государственной пошлины в размере 4 718  рублей, суд, руководствуясь ч.1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ считает,  что её следует отнести на стороны пропорционально удовлетворённым требованиям.  

При таких обстоятельствах, руководствуясь ст.ст.110, 112, 167-171 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1  (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Светосервис-Ставрополье" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) сумму  неосновательного обогащения в размере 120 000 рублей, проценты за пользование чужими  

денежными средствами за период с 16.01.2024 по 15.02.2024 в размере 1 626, 23  рублей, государственную пошлину в размере 4 630 рублей, всего 126 256 (Сто двадцать  шесть тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 23 копеек.  

В удовлетворении требований о взыскании процентов за пользование чужими  денежными средствами в размере 2312,36 рублей отказать.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с момента его изготовления в  полном объеме и может быть обжаловано до истечения указанного срока в Шестнадцатый  арбитражный апелляционный суд (Вокзальная улица, дом 2, г. Ессентуки, Ставропольский  край, 357600) через Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики (проспект Ленина  9, город Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, 369000), а также может быть  обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (Рашпилевская улица, дом 4, г.  Краснодар, Краснодарский край, 350063) в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья З.Х. Тебуева