9_11622824  

 

Арбитражный суд Московской области 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-58213/2020

г. Москва

16 ноября 2021 года.

Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-58213/2020 по иску МКУ ГОЩ  "СТРОЙИНВЕСТ" (ОГРН 

<

***>) к ООО "СТРОЙКРАНСЕРВИС"  (ОГРН 

<

***>), при участии в деле третьих лиц: МАУ ГОЩ ФОК "ЛЕДОВАЯ  АРЕНА" ИМ. В.А. ТРЕТЬЯКА (ОГРН 

<

***>), ООО «Стройресурс» (ОГРН  

<

***>) и Администрации городского округа Щелково Московской области  (ОГРН 

<

***>) об обязании устранить дефекты работы по муниципальному  контракту № 0148200005414000119 от 18.07.2014,  

при участии в судебном заседании: согласно протоколу, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Обязать ООО «Стройкрансервис» в течение 12 календарных месяцев со дня  вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить следующие недостатки  (дефекты) работ, выполненных в рамках муниципального контракта №  0148200005414000119 от 18.07.2014:  

- заменить гидроизоляцию балконной плиты, а именно путем снятия старой  гидроизоляции, герметизация стыковочных швов стеновых панелей, нанесение нового  гидроизолирующего слоя с выполнением контруклона к сливным воронкам;  

- ликвидировать вертикальную трещину на стене вдоль контура внутренних ворот  гаража, путем производства демонтаж лопнувшей плитки, укрепление стены, монтаж  новой плитки;  

- исправить фильтрацию дождевой канализации, из-за которой происходит  затопление парковочной зоны, путем установки фильтра механической очистки,  демонтажа существующей крышки колодца и монтажа новой крышки по размерам,  указанным в проектной документации;  

- заменить подшипник двигателя системы приточно-вытяжной вентиляции первого  этажа;  

- устранить выявленные нарушения и отклонения конструкций здания, путем  проведения комплекса основных мероприятий:  

- провести дополнительное детальное исследование фундаментов, с отбором грунта  основания на отметке залегания фундамента по оси И/11-19. Провести поверочный расчет  фундамента совместно с грунтовым основанием. Укрепить существующий фундамент  дополнительными конструкциями.  

- провести поверочный расчет ферм покрытия и колонн, с учетом существующего  положения ферм, уточнить усилия в узлах и элементарных ферм. После проведения  поверочного расчета произвести усиление ферм по средствам установки дополнительных  конструкций.  

- произвести поверочный расчет стены лестничной клетки в осях Ж-И/3-4 и колонн  по оси Ж/4 на отметке + 3900 и колонны по оси Е/8 на отметке + 8400.  

- на основании проведенных проверочных расчетов укрепить существующие  несущие конструкции и лестничные клетки дополнительными элементами.  

Взыскать с ООО «Стройкрансервис» в доход федерального бюджета 6000 руб. 00  коп. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный  апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия  если не подана апелляционная жалоба.  

Судья П.И. Машин