Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-7553/2020

11 августа 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  18 июня 2020 года.

Полный текст решения изготовлен  11 августа 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи О.Н. Сергеевой

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРО-ЗАПАД"; в лице К/у - ФИО2 (адрес:  Россия 196247, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>; Россия 192242, Санкт-Петербург, а/я 90, ОГРН:  

<

***>; 

<

***>;

ответчик: общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "АКАДЕМСТРОЙ" (адрес:  Россия 197375, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...> ОГРН:  

<

***>);

третье лицо:  

о взыскании 1 064 243 руб. 19 коп.

при участии

- от истца: ФИО3 по доверенности от 01.04.2020

- от ответчика:  не явился, извещен надлежащим образом

установил:

ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРО-ЗАПАД" предъявило иск о взыскании с ООО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "АКАДЕМСТРОЙ" 1 031 187 руб. 12 коп. неосновательного обогащения и 33 056 руб. 07 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 06.08.19 по 26.01.20, а с 27.01.2020 по дату фактического исполнения обязательства.

Ответчик отзыв не представил.

Определением от 17.04.20 суд перешел из упрощенного в общий порядок искового производства.

Судом установлено:

19.12.2016 года между ООО «СК «Северо-Запад» (Заказчик) и ООО «СУ «Академстрой» (Подрядчик) был заключен договор строительного подряда №195/16.

Согласно Графику строительства объекта, являющегося Приложением № 1 к Договору подряда № 195/16, срок окончания строительства объекта определен сторонами как 30.09.2017г., при этом последние акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3 датируются 30.04.2017г. Приложением №2 к Договору № 195/16 установлен перечень работ, а также их стоимость.

На сегодняшний день в рамках указанного Договора не выполнены такие работы как:

- монтаж сборных ж/б элементов шахт лифтов пассажирских

- монтаж сборных ж/б элементов шахт лифтов грузопассажирских

- монтаж сборных ж/б элементов марш-площадок.

С 30.04.2017 по настоящее время, работы по договору со стороны подрядчика не выполнялись, что явилось основанием для направления 24.07.2019 г., отказа от исполнения договора в одностороннем порядке.

На основании Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) от 30.12.2016 года, от 30.01.2017 года и от 30.04.2017 года общая стоимость выполненных работ составила 1 468 812,88 руб.

Согласно платежных поручений №447 от 01.02.2017 года, №577 от 09.03.2017 года, №578 от 09.03.2017 года, общая сумма денежных средств, перечисленных ООО «СК «Северо-Запад» в пользу ООО «СУ «Академстрой» в качестве авансовых платежей во исполнение Договора строительного подряда №195/16 от 19.12.2016 года составила 3 500 000 руб., 1 000 000 (один миллион) рублей из которых был направлен согласно гарантийному письму на авансирование в рамках Договора № 165/16.

В связи с прекращением договора подряда между сторонами у Подрядчика отсутствует основания для удержания суммы аванса в размере 1 031 187,12 (один миллион тридцать одна тысяча сто восемьдесят семь) рублей 12 копеек.

24.07.2019г., Истцом была направлена претензия, которая оставлена Ответчиком без ответа.

Уведомление о расторжении договора подряда № 195/16, было получено Ответчиком -06.08.2019.

Таким образом, с ответчика, в том числе подлежат взысканию и проценты предусмотренные ст. 395 ГК РФ, начиная с 06.08.2019 по 26.01.20 в сумме 33 056 руб. 07 коп. проценты могут быть взысканы по день фактического исполнения обязательства.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по оплате государственной пошлины на ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "АКАДЕМСТРОЙ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРО-ЗАПАД" 1 064 243 руб. 19 коп, из них: 1 031 187 руб. 12 коп. неосновательного обогащения и 33 056 руб. 07 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а с 27.01.2020 проценты от суммы неосновательного обогащения по ключевой ставке ЦБ РФ по день фактического возврата денежных средств.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "АКАДЕМСТРОЙ" в доход федерального бюджета 23 642 руб. 00 коп. госпошлины.

Выдать исполнительный лист в порядке ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

          Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                                         Сергеева О.Н.