АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

город Севастополь 

«29» августа 2018 года Дело № А84-2413/18  

Полный текст судебного акта изготовлен 29.08.2018  

Резолютивная часть судебного акта оглашена 27.08.2018 Арбитражный суд города Севастополя В составе: судьи Архиповой С.Н., 

При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Колотовой О.В.,  

Рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с  ограниченной ответственностью «Управляющая компания Балаклавского района»  

к обществу с ограниченной ответственностью «Успешные люди» г. Симферополь  о взыскании неустойки,  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1, у с т а н о в и л : 

17.07.2018 в Арбитражный суд города Севастополя (суд) обратилось ООО  «Управляющая компания Балаклавского района» (истец) с исковым заявлением о  взыскании с ООО «Успешные люди» (ответчик) неустойки по государственному  контракту от 21.07.2017 в сумме 696 868,99 руб..  

Ответчик уведомлен судом о рассмотрении дела по адресу, указанному в  выписке из ЕГРЮЛ на актуальную дату, отзыв на иск не представил.  

Из материалов дела следует, что 21.07.2017 между истцом как Заказчиком и  ответчиком как Подрядчиком заключен государственный контракт, по условиям  которого Подрядчик принял обязательство своевременно выполнить работы по  капитальному ремонту спортивной площадки по адресу: 

<

...>. Цена контракта составила 1 266 520 руб. (п.2.3.). По условиям п.10.4.  контракта работы должны быть выполнены Подрядчиком в срок до 31.08.2017. На  

основании п.10.1 контракт действует до полного исполнения сторонами своих  обязательств.  

Из акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных  работ и затрат по формам КС-2, КС-3 следует, что фактически работы на сумму  33 396,36 руб. были выполнены Подрядчиком частично 31.10.2017. Соответственно,  имела место просрочка исполнения обязательств Подрядчиком на 2 месяца и  выполнение работ не в полном объеме.  

08.02.2018 стороны подписали дополнительное соглашение № 1, которым  расторгли государственный контракт с 08.02.2018 по обоюдному соглашению.  

Поскольку Подрядчик допустил просрочку исполнения обязательств в период с  01.09.2017 по 08.02.2018, истец произвел начисление пени по правилу п.9.3.1.  контракта.  

В соответствии с п.9.3.1. контракта в случае просрочки исполнения  Подрядчиком своих обязательств с него взыскивается пеня за каждый день просрочки в  размере не менее чем одна трехсотая от ставки рефинансирования ЦБ РФ,  действующей на дату уплату пени, от цены контракта, уменьшенная на сумму,  пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически  выполненными работами.  

Исходя из цены контракта 1 266 520 руб., периода просрочки 160 дней и  стоимости фактически выполненных работ в сумме 33 396,36 руб., истец произвел  расчет пени, которая составила 696 868,99 руб.. Проверив данный расчет, суд признал  его арифметическим верным и соответствующим условиям контракта и требованиям  Постановления Правительства РФ № 1063 от 25.11.2013.  

Суд полагает, что требование истца подлежит удовлетворению в полном  объеме на основании ст.ст. 329, 330 ГК РФ, ст. 34 ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013.  

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд  

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Успешные люди»  (295006, 

<

...>, ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 09.06.2018) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Управляющая компания Балаклавского района»  (299042, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,  дата регистрации 18.01.2018) неустойку за просрочку исполнения обязательств по  государственному контракту № 0574500001217000012_338073 от 21.07.2017 на  выполнение работ по капитальному ремонту спортивной площадки по адресу: г.  

Севастополь, ул. Строительная, 29, в сумме 696 868,99 руб., а также расходы по оплате  госпошлины в сумме 9 944,38 руб..  

Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя в установленный срок.  

Судья С.Н. Архипова