Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-74705/2017

03 мая 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  26 апреля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  03 мая 2018 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Дирекция транспортного строительства" (адрес:  Россия 194044, г Санкт-Петербург, 

<

...> ОГРН:  

<

***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью МК-20СХ (адрес:  Россия 192012, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...> ЛИТЕР З, ОГРН:  

<

***>);

об обязании 

 

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 26.12.2017

- от ответчика: не явился, извещен

установил:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Дирекция транспортного строительства" после уточнения исковых требований в порядке ст.49 АПК РФ просит обязать ООО МК-20СХ в течении 14 дней с момента вступления в законную силу решения суда исполнить гарантийные обязательства по государственному контракту № КР-51 от 28.07.2014, а именно: 

- устранить дефекты примыкания прирельсового профиля к рельсам (проклейку герметиком) на участках трамвайных путей с асфальтобетонным покрытием;            - восстановить асфальтобетонное покрытие у остановочного пункта пр. Наставников у дома № 22, а также взыскать 50 000 руб. 00 коп. штрафа за нарушение сроков устранения дефектов. 

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом. Дело рассматривается без его участия на основании ст.156 АПК РФ.

Определением от 05.12.2017 суд перешел из упрощенного в общий порядок искового производства на основании статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Судом установлено:

Между сторонами был заключен государственный контракт № КР-51 от 28.07.2014 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Заневский пр., ФИО3 (от Ладожского вокзала до пр. Наставников)». 

В соответствии с п. 5.2.16 Контракта Подрядчик обязан за свой счет и в кратчайшие сроки, определяемые заказчиком и/или эксплуатирующей организацией, устранять все дефекты объекта капитального ремонта, обнаруженные в течение действия Контракта и в течение гарантийного срока эксплуатации, установленного на:

дорожное покрытие - 5 лет;

трамвайные пути - 5 лет.

Согласно п. 5.2.17 Контракта наличие дефектов может быть обнаружено Заказчиком, собственником объекта или эксплуатирующей организацией. В соответствии с письменным уведомлением об обнаружении дефекта Подрядчик направляет своего полномочного представителя в установленное время для подписания Акта обнаруженных дефектов.

В течение не более 5 дней со дня подписания Акта обнаружения дефектов Подрядчик должен приступить к работам по устранению дефектов и их в установленное актом время.

Согласно гарантийному ООО «МК-20СХ» от 24.05.2017 № 644, за нарушение сроков устранения дефектов, подрядчик обязан уплатить штраф в размере 50 000 руб. 00 коп. 

10.08.2017 с участием представителя Подрядчика состоялся комиссионный осмотр Объекта, в ходе которого были выявлены следующие дефекты:

- дефекты примыкания прирельсового профиля к рельсам устранены только на 80% на участке от ул. Передовиков до Индустриального пр. На остальных участках не устранены;

- дефекты по сколам и неровностям бетонных плит;

- отклонение продольного профиля;

- частичное повреждение покрытие для слабовидящих на остановочных пунктах у ул. Передовиков, у Индустриального пр;

- отсутствует часть крышки водоотводной коробки в зоне остановочного пункта на пересечении пр. ФИО3 с Индустриальным пр;

-сколы на бортовых камнях вдоль трамвайных путей;

-отсутствует часть асфальтобетонного покрытия на остановочном пункте пр. Наставников.

Наличие данных дефектов также подтверждается отчетом обследования состояния трамвайных путей по пр. ФИО3 (от ул.Передовиков до пр. Наставников) составленным ООО «ЛСР-Строй», являющегося подрядной организацией по договору «Создание, реконструкция трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга».

Письмом от 11.08.2017 №09-9857/17-0-0 об исполнении гарантийных обязательств Дирекция направила в адрес Подрядчика уведомление о необходимости устранить выявленные дефекты в срок - до 31.08.2017.

С учетом отсутствия со стороны Подрядчика действий, направленный на устранение дефектов, Дирекция повторно, направило в адрес ООО «МК -20СХ» претензию от 04.09.2017 № 09-10728/17-0-0 с требованием устранить выявленные дефекты в срок до - 22.09.2017.

Согласно акту комиссионного осмотра от 13.10.2017 ответчик частично устранил указанные дефекты. 

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с учетом уточнений в порядке ст.49 АПК РФ. 

В связи с тем, что истцу была представлена отсрочка уплаты государственной пошлины, с ответчика подлежит взысканию 6 000 руб. 00 коп. государственной пошлины. 

Руководствуясь статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Обязать общество с ограниченной ответственностью МК-20СХ в течении 14 дней с момента вступления в законную силу решения суда исполнить гарантийные обязательства по государственному контракту № КР-51 от 28.07.2014, а именно: 

- устранить дефекты примыкания прирельсового профиля к рельсам (проклейку герметиком) на участках трамвайных путей с асфальтобетонным покрытием;            - восстановить асфальтобетонное покрытие у остановочного пункта пр. Наставников у дома № 22.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью МК-20СХ в пользу Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Дирекция транспортного строительства" 50 000 руб. 00 коп. штрафа.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью МК-20СХ в доход федерального бюджета 6 000 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Выдать исполнительные листы в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сергеева О.Н.