63/2022-269850(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-24509/2022

г. Новосибирск

19 октября 2022 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи 

Гребенюк Д.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания Савченко А.А., рассмотрев в судебном заседании дело  по иску акционерного общества «Электромагистраль» (ОГРН  1115476076715), г. Новосибирск,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строй сити» (ОГРН  1165476193981), г. Новосибирск,  

третьи лица: 1) акционерное общество «Региональные электрические сети»  (ОГРН 1045402509437), г. Новосибирск, 2) публичное акционерное общество  «Вымпел-Коммуникации» (ОГРН 1027700166636), г. Москва, 3) публичное  акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ОГРН 1027700149124), г.  Москва, 4) публичное акционерное общество «Ростелеком» (ОГРН  1027700198767), г. Санкт-Петербург,  

об обязании выполнить строительно-монтажные работы по переустройству  долевой ВОЛС-ВЛ в долевую кабельную линию связи выполнить  строительно-монтажные работы по переустройству долевой ВОЛС-ВЛ в  долевую кабельную линию связи,  

при участии представителей: истца – Леонов А.Д., доверенность № 36/22 от 26.05.2022, диплом, паспорт; 

ответчика – Токарева М.В., доверенность № 9 от 01.01.2022, диплом,  паспорт;  

третьих лиц –1-4) не явились, извещены надлежащим образом,  

руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строй сити»  исполнить добровольно принятое на себя обязательство, предусмотренное  пунктом 2.5 соглашения о компенсации затрат № ПД-1900319 от 10.10.2019  на выполнение работ на объекте «Реконструкция ВЛ 220 кВ Новосибирская  ГЭС - Научная (255) - а именно: в течение 60 календарных дней с даты  вступления в законную силу решения выполнить строительно-монтажные  работы по переустройству долевой ВОЛС-ВЛ в долевую кабельную линию  связи при условии соблюдения Технических условий, выданных  собственниками ВОЛС, а также предусмотренных выданной проектной  документацией, результаты работы сдать АО «Электромагистраль» по акту  сдачи-приемки работ (по форме КС-2) в течение 5 дней с момента  выполнения работ.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй сити» в  пользу акционерного общества «Электромагистраль» государственную  пошлину по иску в размере 6 000 рублей.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй сити» в  пользу акционерного общества «Электромагистраль» судебную неустойку  (астрент) в размере 5 000 рублей за каждый день неисполнения решения,  начиная с 66 календарного дня со дня вступления в законную силу решения  суда по делу.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с  момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня  его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск).  Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не  

превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

Судья Д.В. Гребенюк 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 24.12.2021 3:48:15

Кому выдана Гребенюк Диана Валерьевна