Арбитражный суд Чеченской Республики

364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Шейха Али Митаева, 22 «Б»

www.chechnya.arbitr.ru

e-mail: info@chechnya.arbitr.ru

тел: (8712) 22-26-32

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А77-1178/2021

01 сентября 2021 года

г.Грозный

 

Резолютивная часть решения объявлена 25 августа 2021 года. 

Решение в полном объеме изготовлено 01 сентября 2021 года.

 

Арбитражный суд Чеченской Республики в лице судьи Исмаилова Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1 М-Я.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску: 

истец: Общество с ограниченной ответственностью «Теплицстройсервис», ОГРН 

<

***> от 27.05.2004 г., ИНН 

<

***>, адрес: 364024, 

<

...> д.9

ответчик: Акционерное общество «Чеченэнерго», ОГРН 

<

***> от 08.05.2008, ИНН 

<

***>, адрес: 364020, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6

о взыскании задолженности по договору подряда и неустойки

при участии:

от истца – ФИО2 по доверенности

от ответчика – ФИО3 по доверенности 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Теплицстройсервис» обратилось в Арбитражный суд Чеченской Республики с заявлением к Акционерному обществу «Чеченэнерго» о взыскании задолженности по договору подряда в виде основного долга в сумме 121 576, 289 рублей, и неустойки в размере 4 397, 781 рублей.

В судебном заседании представитель истца требования изложенные, в исковом заявлении поддержал, просил удовлетворить. При этом пояснила, что со стороны ответчика претензий по качеству работ не поступало, акты КС-2 и КС-3 подписаны без замечаний.

Ответчик требования признал, факт надлежащего выполнения работ подтвердил, стоимость не оспорил, от проведения экспертизы отказался, последствия признания иска известны. Пояснил, что неоплата вызвана отсутствием денежных средств.

Исследовав совокупность представленных в дело доказательств, проанализировав их относимость и допустимость, а также достаточность и взаимосвязь, суд приходит к выводу о том, что заявленные требования являются обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно правилам, установленным статьями 136 и 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд, признав дело подготовленным, решает вопрос о готовности дела к судебному разбирательству. 

В связи с тем, что в деле достаточно представленных доказательств для рассмотрения спора по существу, в материалах дела отсутствуют возражения заявителя и ответчика против перехода к судебному разбирательству (Стороны были предупреждены о возможности рассмотрения дела по существу при неявке или при непредставлении возражений), в целях процессуальной экономии времени рассмотрения дела, суд признает дело подготовленным к судебному разбирательству и заканчивает подготовку дела к судебному разбирательству. 

Суд завершил предварительное заседание, перешел к судебному разбирательству и открыл судебное заседание в первой инстанции.

В соответствии с ч. 3.1. ст.70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

            Как следует из материалов дела между АО «Чеченэнерго» (Заказчик) и ООО                               «ТЕПЛИЦСТРОЙСЕРВИС», (Подрядчик) заключен договор № 46 от 01.10.2019г. на выполнение проектно-изыскательных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту: Строительство ЦПС-Город 110/10 кВ, с установкой двух трансформаторов мощностью 2/40 M BA, строительство 2х-цепной ВЛ-110 кВ с проводом АС-185 проектной протяженностью 3 км. с присоединением отпайки к существующим ВЛ-110 кВ «Грозный-Южная» (Л-114) и ВЛ-110 кВ «Грозный-Южная» (Л-115) и строительство кабельной линии КЛ-10 кВ, ориентировочной протяженностью 40км.

Договор в соответствие п.1 ст. 422, 432 ГК РФ соответствует обязательным для сторон правилам, установленным положениями главы 37 ГК РФ, действую щ ими в момент его заключения. Также Договор сторонами не расторгнут и не признан недействительным в судебном порядке.

            В соответствии с условиями указанного договора ООО «ТЕПЛИЦСТРОЙ СЕРВИС», выступая в качестве Подрядчика, по заданию АО «Чеченэнерго», являю щ егося Заказчиком, поэтапно выполнило комплекс работ по строительству данного объекта.

            Согласно акту сверки взаимных расчетов по состоянию на 26.07.2021г. задолженность в пользу ООО «ТЕПЛИЦСТРОЙСЕРВИС» составляет 121 576 289,68 рублей.

            В соответствии с пунктом 7.1.27 по строительно-монтажным, пусконаладочным работам, от стоимости оборудования и прочим затратам Подрядчика Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счета уплачивает Подрядчику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора аванс в размере 30% стоимости строительно-монтажных, пуска-наладочных работ, оборудования и прочих затрат Подрядчика, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной независимой (банковской) (в случае выдачи банком или иной кредитной организацией) гарантии на возврат аванса.

            Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 65% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, оборудования и прочих затрат Подрядчика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), ТО РГ-12 и получения счетов, счетов-фактур). Если при выполнении строительно-монтажных, пуска-наладочных работ использовались материалы и оборудование Заказчика, то в актах их стоимость в итоговых показателях не учитывается, а к акту КС-2 в обязательном порядке прилагается справка-отчет с перечнем использованных в работе материалов и оборудования Заказчика.

            Платежи в размере оставшихся 5% стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, оборудования прочих затрат Подрядчика выплачиваю тся по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Акта приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по форме № P C -14.)

            Авансовые платежи по договору не производились.

            Акт приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по форме № PC-14 подписан 30.12.2020 г. 

По результатам выполненных работ ООО «ТЕПЛИЦСТРОЙСЕРВИС» подготовило и направило акты о приемке выполненных работ (форма КС-2): от 10.11.2020г., от 30.12.2020 г., от 30.12.2020г. 

Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3): №1 от 10.11.2020 г., согласно которой стоимость выполненных работ составляет 6 966 736 рублей; № 1 от 30.12.2020 г., согласно которой стоимость выполненных работ составляет 41 209 128,66 рублей; № 2 от 30.12.2020г. согласно которой стоимость выполненных работ составляет 73 400 424,22 рублей. 

Заказчику направлены счета-фактуры № 466/3 от 10.11.2020 г., № 83/4 от 30.12.2020 г., № 83/2 от 30.12.2020 г.

Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на указанную сумму подписаны обеими сторонами. Замечания по качеству выполнения работ отсутствовали.

В соответствии с Актом сверки взаимных расчетов задолженность АО «Чеченэнерго» в пользу ООО «ТЕПЛИЦСТРОЙСЕРВИС» по состоянию на текущую дату составляет 121 576 289 рублей.

Таким образом, факт выполнения строительных работ подтвержден. 

Однако в нарушение Договора обязательства по оплате выполненных и принятых работ АО «Чеченэнерго» не исполнило.

Согласно статьям 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (ст. 740 ГК РФ). 

В соответствии с пунктом 17.1. Договора Заказчик за нарушение договорных обязательств, а именно, за задержку расчетов за выполненные работы, уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,02 % от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), но не более 5% от неоплаченной в срок суммы.

Таким образом, размер неустойки по Договору по расчетам истца составляет                  4 397 781 рублей.

Расчет неустойки судом проверен и признается верным, поскольку он составлен по правильной формуле, с использованием верных исходных данных, соответствующих фактическим обстоятельствам дела и условиям договора. 

Заявления о чрезмерности суммы неустойки, без которого суд не вправе снижать ее размер, ответчиком не сделано.

В соответствии с пунктом 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110,167,170,171 АПК РФ, арбитражный суд первой инстанции,

РЕШИЛ:

1. Взыскать с Акционерное общество «Чеченэнерго» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Теплицстройсервис» задолженность за выполненные работы по договору подряда в сумме 121 576 289 руб. и неустойку в виде пени в сумме 4 397 781 руб., а всего 125 974 070 руб. 

2. Взыскать с Акционерного общества «Чеченэнерго» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Теплицстройсервис» в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины 200 000 руб.

 

Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционной суд через Арбитражный суд Чеченской Республики в месячный срок со дня его принятия.

 

Судья                                                                                       Р.В. Исмаилов