ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-10572/2024

Дело № А40-126359/2022

г. Москва

24 июня 2024 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Бодровой Е.В., 

судей Кузнецовой Е.Е., Тетюка В.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Пулатовой К.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

ООО "СИБТЕХЭНЕРГО", 

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 27.12.2023 

по делу № А40-126359/22 

по иску ООО "Трансстроймеханизация" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 

к ООО "СИБТЕХЭНЕРГО" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании, 

и встречное исковое заявление, 

третье лицо: ООО «МЕКОНА».

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1 по доверенности от 29.12.2023, ФИО2 по доверенности от 16.02.2023,

от ответчика: генеральный директор ФИО3 по приказу №10 от 21.09.2021, 

от третьего лица: не явился, извещен.

У С Т А Н О В И Л:

ООО «Трансстроймеханизация» (далее по тексту – истец) обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Сибтехэнерго» (далее по тексту – ответчик) о взыскании (с учетом принятых в порядке ст. 49 АПК РФ уточнений): 

- неосновательного обогащения (сумму неотработанного аванса) в размере 188 184 902, 65 руб., 

- неустойки в размере 69 340 061,30 руб., 

- процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 480 457,63 руб., а также по день фактического исполнения обязательства. 

Определением арбитражного суда от 28.07.2022 г. был принят к производству встречный иск (с учетом принятых в порядке ст. 49 АПК РФ уточнений) о признании недействительным уведомления о расторжении Договора № 5007-18/1680-Б05 от 07.08.2018, о взыскании задолженности по оплате выполненных работ в размере 134 611 708, 09 руб., задолженности по гарантийным удержаниям в размере 76 925 231, 85 руб.

Решением  Арбитражного суда города Москвы от 27.12.2023 первоначальный иск удовлетворен в части, в удовлетворении встречного иска отказано.

Не согласившись с принятым решением, ООО «Сибтехэнерго» подало апелляционную жалобу, в которой просит решение Арбитражного суда города Москвы отменить, принять по делу новый судебный акт.

Определением от 14.02.2024 апелляционная жалоба ООО «Сибтехэнерго» принята к производству.

В ходе судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции истцом и ответчиком заявлено ходатайство об утверждении Мирового соглашения по настоящему делу.

В обоснование заявленного ходатайства истцом представлен подписанный сторонами текст Мирового соглашения, в следующей редакции:

«1. ООО «ТРАНССТРОИМЕХАНИЗАЦИЯ частично признает требование ООО «СИБТЕХЭНЕРГО» по оплате выполненных работ по Договору № 5007-18/1680-Б05 от 07.08.2018 г. на общую сумму 32 379 603,78 руб., в т.ч. НДС 5 396 600, 63 руб., подтвержденную Актами КС-3 № 24 от 21.06.2024 и № КС-2 №24 от 21.06 2024.

2. ООО «ТРАНССТРОИМЕХАНИЗАЦИЯ частично признает требование ООО «СИБТЕХЭНЕРГО по оплате дополнительных работ, выполненных на Объекте «Скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань. «Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область». 1этап строительства. Подготовка территории строительства», но не предусмотренных Договором № 5007-18/1680-Б05 от 07.08.2018, на сумму:

- 31 095 221,92 руб. в т.ч. НДС 5 182 536, 99 руб. (дополнительные работы, выполнение которых подтверждено экспертным заключением ООО «Научный центр «МОСЭКСПЕРТСТРОЙ» № 23/СЭ от 26.06.2023 года и принятых по Акту КС-2 №2 от 21.06.2024 года, КС-3 № 2 от 21.06.2024) и 

- 22 691 906, 07 руб., в т.ч. НДС 3 781 984, 34 руб. (дополнительные работы, выполненные ООО «СИБТЕХЭНЕРГО» и принятые по Акту № КС-2 № 1 от 21.06.2024, КС-3 № 1 от 21.06.2024).

3. ООО «ТРАНССТРОИМЕХАНИЗАЦИЯ» частично признает требование ООО «СИБТЕХЭНЕРГО» о возврате гарантийных удержаний, произведенных ООО «ТРАНССТРОИМЕХАНИЗАЦИЯ» в размере 22 410 161, 87 руб. согласно пункту 3.1.2 Договора и 29 833 348,15 руб. согласно пункту 3.4. Договора.

4. С учетом пунктов 1-3 настоящего Соглашения стороны признают, что сумма неотработанного аванса (неосновательного обогащения), подлежащая взысканию с ООО «СИБТЕХЭНЕРГО», составляет 49 774 660 (Сорок девять миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят) руб. 85 коп., в т.ч. НДС (188 184 902, 64 -32 379 603,78 - 31 095 221, 92 - 22 691 906, 07 -22 410 161, 87 - 29 833 348,15).

5. ООО «СИБТЕХЭНЕРГО» признает требование ООО «ТРАНССТРОИМЕХАНИЗАЦИЯ» о возврате неотработанного аванса на сумму 49 774 660, 80 руб., в т.ч. НДС. и обязуется течение 12 месяцев с даты настоящего Соглашения выплатить указанную сумму равными платежами по 4 147 888, 40 руб. ежемесячно, не позднее 25 числа каждого месяца, на расчетный счет ООО «ТРАНССТРОИМЕХАНИЗАЦИЯ» № 40702810901250002443 в филиале ПАО Банка ВТБ в г. Воронеже, корр.счет 30101810100000000835, БИК 042007835.

ООО «СИБТЕХЭНЕРГО» обязуется произвести первый платеж не позднее 25 июля 2024 года; последний платеж – не позднее 25 июня 2025 года.

6. В случае нарушения графика платежей, установленного пунктом 5 Соглашения, ООО «СИБТЕХЭНЕРГО» обязано перечислить ООО «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» всю сумму неотработанного аванса досрочно в течение 3-х дней с даты требования ООО «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» и оплатить неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере 0,1% от суммы долга.

7. В связи с заключением настоящего Соглашения ООО «СИБТЕХЭНЕРГО» в порядке ч. 2 ст. 49 АПК РФ отказывается от встречных исковых требований по делу № А40-126359/22-96-836 о признании недействительным уведомления о расторжении Договора № 5007-18/1680-Б05 от 07.08.2018, о взыскании задолженности по оплате работ в размере 48 444 976, 32 руб. (134 611 708, 09 - 32 379 603,78 - 31 095 221, 92 - 22 691 906, 07) и о взыскании задолженности по гарантийным удержаниям в размере 24 681 721,83 руб. (76 925 231, 85 - 29 833 348, 15 - 22 410 161, 87).

8. ООО «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» в порядке ч. 2 ст. 49 АПК РФ отказывается от исковых требований к ООО «СИБТЕХЭНЕРГО» о взыскании неустойки в размере 69 340 061,30 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 480 457,63 руб.

9. Судебные расходы относятся на ту сторону, которая их понесла и не возмещается.

10. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела № А40-1263 59/22-96-836.

11. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Девятым Арбитражным Апелляционным судом и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств».

В соответствии с правилами статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут урегулировать спор, заключив Мировое соглашение.

В силу статей 49, 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение утверждается арбитражным судом, если оно не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные пунктом 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, разъяснены сторонам.

В связи с утверждением апелляционным судом Мирового соглашения в силу части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производство по делу подлежит прекращению, апелляционная жалоба рассмотрению по существу не подлежит. 

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит возврату из федерального бюджета: 

- истцу 50% госпошлины по иску - 100 000 рублей, уплаченной по платежному поручению № 37706 от 09.06.2022;

- ответчику 50% госпошлины по встречному иску – 100 000 рублей, уплаченной по платежному поручению № 124 от 15.07.2022 и 50% госпошлины по апелляционной жалобе - 1 500 рублей, уплаченной по платежному поручению № 24 от 24.01.2024.

Руководствуясь статьями 139-141, 110, 150,  266-269(п.3), 271 АПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайство сторон удовлетворить.

Утвердить мировое соглашение от 21.06.2024, заключенное между ООО «Трансстроймеханизация» и ООО «Сибтехэнерго», в следующей  редакции:

«1. ООО «ТРАНССТРОИМЕХАНИЗАЦИЯ частично признает требование ООО «СИБТЕХЭНЕРГО» по оплате выполненных работ по Договору № 5007-18/1680-Б05 от 07.08.2018 г. на общую сумму 32 379 603,78 руб., в т.ч. НДС 5 396 600, 63 руб., подтвержденную Актами КС-3 № 24 от 21.06.2024 и № КС-2 №24 от 21.06 2024.

2. ООО «ТРАНССТРОИМЕХАНИЗАЦИЯ частично признает требование ООО «СИБТЕХЭНЕРГО по оплате дополнительных работ, выполненных на Объекте «Скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань. «Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область». 1этап строительства. Подготовка территории строительства», но не предусмотренных Договором № 5007-18/1680-Б05 от 07.08.2018, на сумму:

- 31 095 221,92 руб. в т.ч. НДС 5 182 536, 99 руб. (дополнительные работы, выполнение которых подтверждено экспертным заключением ООО «Научный центр «МОСЭКСПЕРТСТРОЙ» № 23/СЭ от 26.06.2023 года и принятых по Акту КС-2 №2 от 21.06.2024 года, КС-3 № 2 от 21.06.2024) и 

- 22 691 906, 07 руб., в т.ч. НДС 3 781 984, 34 руб. (дополнительные работы, выполненные ООО «СИБТЕХЭНЕРГО» и принятые по Акту № КС-2 № 1 от 21.06.2024, КС-3 № 1 от 21.06.2024).

3. ООО «ТРАНССТРОИМЕХАНИЗАЦИЯ» частично признает требование ООО «СИБТЕХЭНЕРГО» о возврате гарантийных удержаний, произведенных ООО «ТРАНССТРОИМЕХАНИЗАЦИЯ» в размере 22 410 161, 87 руб. согласно пункту 3.1.2 Договора и 29 833 348,15 руб. согласно пункту 3.4. Договора.

4. С учетом пунктов 1-3 настоящего Соглашения стороны признают, что сумма неотработанного аванса (неосновательного обогащения), подлежащая взысканию с ООО «СИБТЕХЭНЕРГО», составляет 49 774 660 (Сорок девять миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят) руб. 85 коп., в т.ч. НДС (188 184 902, 64 -32 379 603,78 - 31 095 221, 92 - 22 691 906, 07 -22 410 161, 87 - 29 833 348,15).

5. ООО «СИБТЕХЭНЕРГО» признает требование ООО «ТРАНССТРОИМЕХАНИЗАЦИЯ» о возврате неотработанного аванса на сумму 49 774 660, 80 руб., в т.ч. НДС. и обязуется течение 12 месяцев с даты настоящего Соглашения выплатить указанную сумму равными платежами по 4 147 888, 40 руб. ежемесячно, не позднее 25 числа каждого месяца, на расчетный счет ООО «ТРАНССТРОИМЕХАНИЗАЦИЯ» № 40702810901250002443 в филиале ПАО Банка ВТБ в г. Воронеже, корр.счет 30101810100000000835, БИК 042007835.

ООО «СИБТЕХЭНЕРГО» обязуется произвести первый платеж не позднее 25 июля 2024 года; последний платеж – не позднее 25 июня 2025 года.

6. В случае нарушения графика платежей, установленного пунктом 5 Соглашения, ООО «СИБТЕХЭНЕРГО» обязано перечислить ООО «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» всю сумму неотработанного аванса досрочно в течение 3-х дней с даты требования ООО «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» и оплатить неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере 0,1% от суммы долга.

7. В связи с заключением настоящего Соглашения ООО «СИБТЕХЭНЕРГО» в порядке ч. 2 ст. 49 АПК РФ отказывается от встречных исковых требований по делу № А40-126359/22-96-836 о признании недействительным уведомления о расторжении Договора № 5007-18/1680-Б05 от 07.08.2018, о взыскании задолженности по оплате работ в размере 48 444 976, 32 руб. (134 611 708, 09 - 32 379 603,78 - 31 095 221, 92 - 22 691 906, 07) и о взыскании задолженности по гарантийным удержаниям в размере 24 681 721,83 руб. (76 925 231, 85 - 29 833 348, 15 - 22 410 161, 87).

8. ООО «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» в порядке ч. 2 ст. 49 АПК РФ отказывается от исковых требований к ООО «СИБТЕХЭНЕРГО» о взыскании неустойки в размере 69 340 061,30 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 480 457,63 руб.

9. Судебные расходы относятся на ту сторону, которая их понесла и не возмещается.

10. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела № А40-1263 59/22-96-836.

11. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Девятым Арбитражным Апелляционным судом и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств».

Решение Арбитражного суда города Москвы от 27 декабря 2023 года по делу № А40-126359/2022 отменить. 

Производство по делу  прекратить.

Возвратить из федерального бюджета ООО «Трансстроймеханизация» государственную пошлину  по иску в сумме  100 000 рублей, уплаченную по платежному поручению № 37706 от 09.06.2022.

Возвратить из федерального бюджета ООО «Сибтехэнерго» государственную пошлину  по встречному иску – 100 000 рублей, уплаченную по платежному поручению № 124 от 15.07.2022 и госпошлину по апелляционной жалобе - 1 500 рублей, уплаченную по платежному поручению № 24 от 24.01.2024.

Выдать справки на возврат госпошлины.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа. 

Председательствующий судья:  Е.В. Бодрова 

Судьи:  Е.Е. Кузнецова 

 В.И. Тетюк 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.