Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Волгоград Дело № А12-36201/2018  «27» ноября 2018 года  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Напалковой Л. В. при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гостевой З.Б.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью "Строй-Сервис" (ИНН 

<

***>,  

ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Регион Сервис"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании предоставить оформленные в  соответствии с условиями договора № 10-10/17 от 10.10.2017 г. на выполнение  субподрядных работ акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 2 от 20.11.2017  г., № 3 от 20.12.2017 г., № 4 от 20.01.2018 г. с указанием № накладной, даты, количества и  наименования, стоимости давальческих материалов, а в итогах КС-2 с указанием суммы с  учетом материала подрядчика, общей суммы материала и за минусом материала  подрядчика; справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с указанием  сведений об общей стоимости работ с учетом давальческих материалов; ежемесячные  акты расхода давальческого материала  

при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 30.07.2018 г.;  от ответчика – не явился, извещён;  

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

Иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Регион Сервис" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 7 дней со дня вступления в законную силу  судебного акта по настоящему делу предоставить обществу с ограниченной  ответственностью "Строй-Сервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  оформленные в соответствии с условиями договора № 10-10/17 от 10.10.2017 г. на  выполнение субподрядных работ акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 2  от 20.11.2017 г., № 3 от 20.12.2017 г., № 4 от 20.01.2018 г. с указанием № накладной, даты,  количества и наименования, стоимости давальческих материалов, а в итогах КС-2 с  указанием суммы с учетом материала подрядчика, общей суммы материала и за минусом  материала подрядчика; справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с  указанием сведений об общей стоимости работ с учетом давальческих материалов;  ежемесячные акты расхода давальческого материала.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Регион Сервис" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  "Строй-Сервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000 руб. в счёт возмещения  судебных расходов по оплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  

течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.  Решение в полном объёме будет изготовлено в установленный законом срок.  

Судья Л.В. Напалкова