АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11  http://www.crimea.arbitr.ruE-mail: info@crimea.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А83-10969/2021

08 ноября 2022 года

город Симферополь

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Ищенко И.А. при ведении  

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  

открытом судебном заседании материалы искового заявления: 

Департамента городского хозяйства Администрации г. Симферополя к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» о взыскании 4 484 863,82 рублей и о расторжении контракта. При участии третьего лица ООО «Сибцентр». При участии представителей сторон: 

от истца – ФИО2, представитель по доверенности;  от иных участников – не явились.  

Руководствуясь статьями 49, 110, 150, 167 – 170, 174, 176, 180, 181 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

1.  Заявление Муниципального казенного учреждения Департамент городского  

хозяйства Администрации г. Симферополя об отказе от исковых требований в части  

расторжения муниципального контракта № 154 от 03.11.2020 и отказа от исковых  

требований в части взыскания штрафа в размере 3 296 310,80 рублей, - удовлетворить. 

2.  Принять отказ Муниципального казенного учреждения Департамент  

городского хозяйства Администрации г. Симферополя от исковых требований в части  

расторжения муниципального контракта № 154 от 03.11.2020 и отказа от исковых  

требований в части взыскания штрафа в размере 3 296 310,80 рублей.  

3.  Производство по исковому заявлению в части расторжения  

муниципального контракта № 154 от 03.11.2020 и отказа от исковых требований в части  

взыскания штрафа в размере 3 296 310,80 рублей, - прекратить. 

4. Исковые требования удовлетворить. 

5. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительные  технологии» в пользу Муниципального казенного учреждения Департамент городского  хозяйства Администрации г. Симферополя пеню в размере 364 475,32 рублей за период с  08.12.2020 по 29.03.2021, штраф за неисполнение обязательств в размере  

824 077,70 рублей по муниципальному контракту № 154 от 03.11.2020. 

6. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительные  технологии» в доход федерального бюджета сумму государственной пошлины в размере  

24 886,00 рублей. 

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если  не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня  принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в  порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный  суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения,  а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа  (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия  (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.  

Судья И.А. Ищенко