АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-1205/2016

г. Челябинск

12 июля 2017 года

Судья Арбитражного суда Челябинской области Костарева И.В., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью «ПромСтрой», г. Челябинск, ОГРН  

<

***>,  

к обществу с ограниченной ответственностью «СпецМонолитПодряд»,  г. Рязань, ОГРН 

<

***>,  

при участии в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные  требования относительно предмета спора, общества с ограниченной  ответственностью «Гринфлайт», г. Челябинск, общества с ограниченной  ответственностью инвестиционная компания «Доступное жилье», г.  Челябинск, временного управляющего ООО "ПромСтрой" ФИО2,  

о взыскании 12 160 993 руб. 96 коп. 

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью  «СпецМонолитПодряд», г. Рязань, ОГРН 

<

***>,  

 к обществу с ограниченной ответственностью «ПромСтрой», г.  Челябинск, ОГРН 

<

***>,  

о признании недействительным одностороннего отказа  при участии в судебном заседании (до перерыва):  

от истца (ответчика по встречному иску): ФИО3, представителя,  действующего на основании доверенности от 09.01.2017, представлен  паспорт,  

от ответчика (истца по встречному иску): ФИО4, представителя,  действующего на основании доверенности от 22.01.2017, представлен  паспорт,  

от третьих лиц: не явились, извещены 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167, 168, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации арбитражный суд   

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить. В удовлетворении встречного иска отказать. 

Взыскать с ответчика по первоначальному иску - общества с  ограниченной ответственностью «СпецМонолитПодряд», г. Рязань в пользу  общества с ограниченной ответственностью «ПромСтрой», г. Челябинск  неосновательное обогащение в размере 8 913 021 руб. 24 коп.; неустойку за  просрочку выполнения обязательства по договору в размере 1 016 038 руб. 16  коп.; убытки в размере 2 012 871 руб. 14 коп.; проценты за пользование  чужими денежными средствами по состоянию на 06.07.2017 в размере 1 516  241 руб. 60 коп.; штраф за не предоставление исполнительной документации  по состоянию на 06.07.2017 в размере 676 000 руб.; взыскивать с 07.07.2017  проценты за пользование чужими денежными средствами от суммы  неосновательного обогащения по день их фактической оплаты, исходя из  ключевых ставок, установленных Банком России, действующих в  соответствующие периоды просрочки по день фактической оплаты  задолженности; взыскивать штраф за не предоставление исполнительной  документации из расчета 1 000 руб. за каждый день просрочки с 07.07.2017 по  день фактического предоставления исполнительной документации; в  возмещение расходов по оплате госпошлины 89 805 руб.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью  «СпецМонолитПодряд», г.Рязань предоставить ООО «ПромСтрой»,  г.Челябинск исполнительную документацию в 2 (двух) экземплярах на  выполненные работы по устройству ж/б конструкций лестнично-лифтового  узла, наружных стен толщиной 450 мм из ячеистобетонных блоков с  утеплением, наружных стен трехслойной конструкции толщиной 470 мм из  кирпича с утеплением, наружных стен толщиной 400 мм из кирпича с  утеплением, устройству из кирпича внутренних стен, перегородок, вентшахт,  цокольных участков наружных стен, ограждения общего балкона, крылец,  парапетов, стаканов на кровле, коллекторов общеобменной вентиляции, шахт  дымоудаления, утеплению монолитных ж/б стен подвала, колонн (подвала,  тех. этажа), плит перекрытия, тамбуров (1 тех.этажа), вентшахт и стен  лестнично-лифтового узла (тех.этажа), которая включает в себя:  

Акты освидетельствования скрытых работ; Акты освидетельствования ответственных конструкций; 

Исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям зданий и  сооружений с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей  документации;  

Акты приемки выполненных работ и испытаний строительных  конструкций;  

Протоколы испытаний контрольных образцов бетона/раствора на  прочность;  

Паспорта на сопутствующие материалы, изделия и оборудование; Журнал авторского надзора; Общий и специальные журналы работ. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «СпецМонолитПодряд», г.Рязань в доход федерального бюджета госпошлину  в размере 9 866 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Судья И.В. Костарева 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно  получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  http://18aas.arbitr.ru.