Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-109435/2022

25 июля 2023 года

г.Санкт-Петербург

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "КАРЬЕР - СЕРВИС" (ИНН: 

<

***>) 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙКАРЕЛКАМЕНЬ" (ИНН: 

<

***>) 

при участии

- от истца: ФИО2 

- от ответчика: ФИО3 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "КАРЬЕР - СЕРВИС" (далее - ООО "КАРЬЕР-СЕРВИС") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙКАРЕЛКАМЕНЬ" (далее - ООО "СТРОЙКАРЕЛКАМЕНЬ") о взыскании 858799,57 руб. задолженности за выполненные работы, 336600 руб. компенсации расходов на питание и проживание персонала по договору от 13.07.2021 № 1307/21 (далее - Договор). 

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, представитель ответчика возражал против удовлетворения иска.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между ООО "КАРЬЕР-СЕРВИС" (исполнителем) и ООО "СТРОЙКАРЕЛКАМЕНЬ" (заказчиком) заключен Договор на выполнение работ по переработке принадлежащего заказчику исходного материала. 

Исполнитель на основании пункта 2.1.5 договора обязан:

- осуществлять ежедневно передачу Заказчику на Площадке полученного в ходе исполнения Договора результата работ. Данные результата работ ежедневно вносятся в ежесуточный акт o происшествии и простоях ДСК и выполненных работ (Приложение №6);

- каждый отчетный период производить подписание Акта выполненных, работ на Площадке с указанием полученного в ходе исполнения Договора Результата работ (Приложение № 7).

Заказчик по пункту 2.2.9 договора обязался осуществлять регулярное подписание Ежесуточных Актов о происшествии и простоях ДСК и выполненных работах (Приложение №6), Универсальных передаточных документов (Приложение № 3), Отчетов об использовании материалов (Приложение №4), Накладных на отпуск переработанных материалов (Приложение №5); Актов выполненных работ (Приложение №7) и иных документов в двух экземплярах влечение 5 (Пяти) дней с момента предоставления, их Исполнителем. В случае не подписания или не предоставления Заказчиком Исполнителю в указанный выше срок мотивированного отказа от подписания документов на 6 (Шестой) день документы считаются надлежаще принятыми в полном объеме со всеми правовыми последствиями такого принятия. Документы на бумажных носителях после подписания в течение 6 (Шести) календарных дней направляются Заказчиком Исполнителю.

В соответствии с п. 2.2.11 Договора заказчик обязуется надлежащим образом и за счет заказчика обеспечить питание (или компенсация питания из расчета 550 руб. без учета НДС на человека в сутки) и санитарно-бытовые условия, а также доставку специалистов исполнителя от места проживания до места проведения работ и обратно. 

Стороны подписали универсальный передаточный документ (далее - УПД) от 30.06.2022 № УПЗ00000341 на сумму 884 244,06 руб. (работы по переработке), а также УПД о компенсации питания. 

ООО "КАРЬЕР-СЕРВИС" направило ООО "СТРОЙКАРЕЛКАМЕНЬ" претензию от 30.08.2022 с требованием оплаты задолженности.

Отказ ООО "СТРОЙКАРЕЛКАМЕНЬ" удовлетворить требование послужил основанием для обращения ООО "КАРЬЕР - СЕРВИС" в суд с настоящим иском.

В соответствии со ст.ст. 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (ст. 711 ГК РФ). 

В силу п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

В соответствии со ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги.

Согласно п. 1 ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В силу ст. 783 ГК РФ общие положения о подряде (статьи 702 - 729 ГК РФ) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 ГК РФ, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

Факты сдачи-приемки услуг подтверждается подписанными сторонами УПД. 

По пункту 1.4 договора минимальный ежемесячный объем исходного материала, передаваемого Заказчиком исполнителю для выполнения работ в соответствии с настоящим Договором составляет 30 000 (Тридцать тысяч) тони на каждую единицу Оборудования (далее по тексту – Минимальный заказ).

Согласно пункту 2.2:2 договора заказчика случае:

-  не обеспечения Исполнителя Исходным материалом до Минимального заказа по причине отсутствия Исходного материала и/или невозможности погрузки Исходного материала (отсутствие требуемой техники), либо;

-  отсутствия дизельного топлива и/или электроэнергии для исполнения обязанности согласно, п.2.2.6 Договора

обязуется ежемесячно оплачивать Исполнителю цену работ по переработке Минимального заказа в размере, установленном в п. 3.1.1 настоящего Договора.

В силу пункта 3.1.1 договора цена работ по переработке Минимального заказа согласно п. 1.4 настоящего Договора устанавливается в размере 5 522 100 руб. в качестве оплаты выполненных Исполнителем работ. Общая цена работ по Договору складывается из стоимостей работ по переработке Минимальных заказов согласно п.1.4. Договора, установленных для Оборудования №1 в размере 2 195 700 руб., Оборудования № 2 в размере 3 326 400 руб. Окончательная стоимость работ по переработке Исходного материала определяется исходя из фактически переработанного количества Исходного материала по ценам, указанным в Договоре, но не может быть менее 2 195 700 руб. на Оборудовании №1 и 3 326 400 руб. на Оборудовании № 2, а также 5 522 100 руб. за работу двух единиц Оборудований № 1 и 2.

В случае необеспечения Исходным материалом до установленного Минимального заказа, а также действия иных условий согласно п. 2.2.2. настоящего Договора, либо переработка Исходного материала стоимостью менее установленной п. 3.1.2. Договора за 1 тонну цена работ не подлежит корректировке и оплачивается Заказчиком в полном объеме.

В пункте 3.1.2 договора определена стоимость работ по переработке 1 тонны Исходного материала.

В соответствии с пунктом 5.1 договора Заказчик несет ответственность в соответствие нормативным требованиям Исходного материала, предоставляемого Исполнителю для выполнения работ по переработке, а также за соответствие нормативным требованиям предоставляемого дизельного топлива. В случае предоставления Исходного материала, содержащего негабарит, глинистые включения или материала с повышенной влажностью, либо Исходного Материала не соответствующего понятию «Горная порода» (куски металла, арматура и т.д.); а также некачественного топлива, отсутствия электроэнергии, что повлекло остановку Оборудования Исполнителя, в том числе ремонт и иные, неблагоприятные последствия, составляется Ежесуточный Акт о происшествии и простоях Оборудования, и выполненных работах (Приложение № 6), в котором указывается время и причина простоя. В свою очередь, время простоя относится на виновную сторону - Заказчика. Заказчик обязуется возместить все понесенные расходы, связанные с остановкой й/или поломкой Оборудования.

Таким образом, согласно п.п.2.2.2., 3.1.1., 5.1. Договора в случае необеспечения Исполнителя Исходным материалом до Минимального заказа, либо отсутствия электроэнергии, либо отсутствия техники для погрузки Исходного материала, цена работ не подлежит корректировке и оплачивается Заказчиком в полном объеме.

Согласно прилагаемому отчету из 1C (сформирован исходя из информации в подписанных Сторонами ежесуточных актах), самые длительные простои в апреле на Оборудовании № 1 произошли по причине перемещения Оборудования по инициативе Заказчика (59 часов 05 минут), несоответствия исходного материала ТЗ (негабарит, глинистые включения, материал с повышенной влажностью) (18 часов 10 минут) и ремонта техники Заказчика (14 часов 10 минут); на Оборудовании № 2 - по причине несоответствия исходного материала ТЗ (негабарит, глинистые включения, материал с повышенной влажностью) (18 часов 10 минут), ремонта техники Заказчика (14 часов 10 минут) и отсутствия погрузчика (10 часов 10 минут).

Согласно прилагаемому отчету из 1C (сформирован исходя из информации в подписанных Сторонами ежесуточных актах), самые длительные простои в мае на Оборудовании № 1 произошли по причине отсутствия погрузчика (150 часов 50 минут), ремонта техники Заказчика (75 часов 45 минут), отсутствия топлива (66 часов 00 минут); на Оборудовании № 2 - по причине отсутствия погрузчика (148 часов 50 минут), отсутствия топлива (88 часов 00 минут) и ремонта техники Заказчика (74 часа 15 минут).

За время простоев по вине Заказчика потери составили за апрель: на Оборудовании № 1 и Оборудовании № 2 - 49 322 тонн; за май - 98 207 тонн. В отсутствие потерь, с учетом объема фактически выполненных работ в апреле и мае 2022 года, Минимальный заказ был бы выполнен Исполнителем.

По условиям Договора Исполнитель, для надлежащего выполнения работ, вправе осуществлять технологические простои до 120 часов в месяц на 2 единицах Оборудования (2 часа по п. 7 Приложения № 1 к Договору при календарном месяце длительностью 30 дней). Общее время технологических простоев находится в пределах установленного.

Истец представил акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.07.2022, исходя из которого сумма задолженности ООО «Карьер-Сервис» перед ООО "КАРЬЕР-СЕРВИС" составила 881 369,27 руб.

Ответчик против иска возражает, указывает, что согласно акту сверки взаимных расчетов за период с сентября 2021 года по июль 2022 года суммы, заявленные истцом к взысканию, оплачены. 

В то же время заказчик не учел суммы по УПД от 31.05.2022 № УС0000068/5 в размере 1 776 768,84 руб. и от 03.07.2022 № УС000000076 в размере 300 000 руб.; при учете этих УПД конечное сальдо составило бы 1 195 399,57 руб., что составляет размер исковых требований. 

Поскольку мотивированный письменный отказ от приемки работ по УПД № УС0000068/5 от 31.05.2022 в размере 1 776 768,84 руб. заказчик не представил, то работы согласно п.2.2.9. Договора считаются принятыми и подлежат оплате в полном объеме.

ООО "КАРЬЕР-СЕРВИС" предъявило на основании пункта 2.2.11 договора 336600 руб. компенсации расходов на питание и проживание персонала по актам от 30.11.2021 № УС000114/18, от 28.02.2022 № УС000000025, от 31.03.2022 № УС000000034, от 30.04.2022 № УС000000058, от 31.05.2022 № УС0000068/9 и от 30.06.2022 № УС0000073/10, подписанным ООО "СТРОЙКАРЕЛКАМЕНЬ". 

Доказательств перечисления денежных средств отдельно в счет оплаты питания по Договору в материалы дела Ответчиком не представлено.

На основании изложенного, поскольку ответчик не представил доказательства оплаты долга, суд удовлетворяет исковые требования в предъявленном размере 1195399,57 руб. 

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙКАРЕЛКАМЕНЬ" (ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "КАРЬЕР - СЕРВИС" (ИНН: 

<

***>) 1195399,57 руб. задолженности и 24954 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

 

Судья                                                                                                    Косенко Т.А.