Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

04. 04. 2025 года. Дело № А40-290875/24-43-2254

Резолютивная часть решения объявлена 31. 03. 2025 года.

Решение изготовлено в полном объеме 04. 04. 2025 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы Романов О.В., единолично,

протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Пономарев А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

ООО " Русская промышленная группа " (ОГРН 

<

***>)

к ООО " АЛМИ " (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 558 227 руб. 70 коп. – долга, пени,

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность № 10111/24 от 01.11.2024 г., от ответчика – не явился.   

Изучив имеющиеся в деле документы, заслушав представителя, арбитражный суд

У С Т А Н О В И Л :

Иск заявлен о взыскании 558 227 руб. 70 коп. – долга, пени, на основании статей 307, 309, 310, 330, 382, 384, 388.1, 392.3, 740, 746, 753 ГК РФ.

Истец направил в судебное заседание представителя, который поддержал заявленный иск, повторив доводы, изложенные в исковом заявлении, представил истребованные судом документы, предъявил подлинники документов, имеющихся в материалах дела в виде копий; каких-либо ходатайств не заявил.

Ответчик не направил представителя в судебное заседание, не представил отзыв на исковое заявление, истребованные судом документы, опровергающие иск не предъявил, расчет истца не оспорил; о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке в соответствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил.

Дело рассмотрено в соответствии с порядком предусмотренным ст. 156 АПК РФ, по имеющимся в деле документам, представленным истцом, в отсутствии отзыва и представителя ответчика. 

Суд, с учетом изложенных истцом обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами, пришел к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

Из материалов дела усматривается, что 28 августа 2017г. между ООО «АЛМИ» - Заказчик и ООО «1ДК» (ИНН 

<

***>) - Подрядчик, был заключен договор подряда № 2/28 от 28.08.2017 (далее - Договор).

В соответствии с п. 1.1 Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими силами и силами привлеченных организаций работы по изготовлению и монтажу деревянных межкомнатных дверей с металлической дверной коробкой на объекте: «Международный медицинский кластер. Первый этап строительства. Диагностический корпус. Г Москва, Западный округ, территория инновационного центра «Сколково», участок Д1-20».

Согласно п. 2.1. Договора общая стоимость работ по Договору, согласно Протоколу согласования твердой договорной цены (Приложение № 1), составляет 10 071 384,3 руб., в т.ч. НДС.

В соответствии с п. 2.2 Договора оплата по Договору производится в следующем порядке.

2.3.1. Авансовый платеж в размере 70 % от стоимости изделий в размере 6 318 688,69 руб., в т.ч. НДС Заказчик оплачивает Подрядчику в течение 5 календарных дней после подписания настоящего Договора.

 2.3.2. Авансовый платеж в размере 30 % от стоимости изделий в размере 2 708 009,44 руб., в т.ч. НДС Заказчик оплачивает Подрядчику в срок до 5 октября 2017 года.

2.2.3. Оставшийся сумму выплачивается Заказчиком Подрядчику по факту сдачи работ и подписания Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 с пропорциональным удержанием авансов. При этом оплата производится Заказчиком в течение 60 календарных дней.

Согласно п. 2.3. Договора Заказчик ежемесячно удерживает 5,0 % от общей стоимости выполненных работ по форме КС-2. Удержанная сумма подлежит возврату Подрядчику по истечению 60 месяцев с даты сдачи объекта эксплуатирующей организации, за исключением сумм, потраченных Заказчиком на устранение дефектов в работе Подрядчика.

В соответствии с п. 2.4. Договора Подрядчик обязуется оплачивать Заказчику ежемесячно стоимость оказания услуг по генподряду в размере 5,0 %, в т.ч. НДС 18 %, от стоимости общего объема выполненных Подрядчиком Работ.

После подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС № 3) в установленном порядке, работы подлежат оплате в соответствии с условиями Договора (п. 4.1.3. Договора).

Работы по Договору были Заказчиком приняты на сумму 10 071 384,13 рубля.

Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 20.10.2017, Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 20.10.2017 на сумму 1 417 724,32 рубля, Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2 от 29.12.2017, Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 2 от 29.12.2017 на сумму 3 882 039,16 рублей, Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 3 от 31.01.2018, Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 3 от 31.01.2018 на сумму 4 771 620,65 рублей, подписаны.

Согласно Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 20.10.2017 из стоимости выполненных работ удерживается гарантийная сумма 5% в размере 70 886,22 рублей и удерживаются ген. услуги 5% в размере 70 886,22 рублей.

Согласно Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 2 от 29.12.2017 из стоимости выполненных работ удерживается гарантийная сумма 5% в размере 194 101,96 рубль и удерживаются ген. услуги 5% в размере 194 101,96 рубль.

Согласно Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 3 от 31.01.2018 из стоимости выполненных работ удерживается гарантийная сумма 5% в размере 238 581,03 рубль и удерживаются ген. услуги 5% в размере 238 581,03 рубль.

При этом Акт № 3 от 31 января 2018 г. с наименованием услуг – ген. услуги по Договору № 2/28 от 12.10.2017 на 503 569,20 руб. сторонами подписан.

12 октября 2017г. Заказчиком и Подрядчиком подписано Дополнительное соглашение №1 к Договору (далее — Дополнительное соглашение № 1).

Согласно п. 1. Дополнительного соглашения № 1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить собственными и/или привлеченными силами и техническими средствами в соответствии с Протоколом (Приложение № 1 от 12.10.2017г. к Дополнительному соглашению № 1) изготовление и монтаж дверей в зону конференц-зала на объекте: «Международный медицинский кластер Сколково. Диагностический корпус».

Согласно п. 2 Дополнительного соглашения № 1 стоимость работ по Дополнительному соглашению № 1, согласно Протоколу (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1), составляет 561 524,52 руб., в т.ч. НДС.

Работы по Дополнительному соглашению № 1 к Договору были Заказчиком приняты на сумму 561 524,52 рубля.

Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 29.12.2017, Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 29.12.2017 на сумму 561 524,52 рубля подписаны.

Согласно Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 29.12.2017 из стоимости выполненных работ удерживается гарантийная сумма 5% в размере 28 076,23 рубля и удерживаются ген. услуги 5% в размере 28 076,23 рубля.

При этом Акт № 4 от 31 января 2018 г. с наименованием услуг - гену слуги по Договору № 2/28 от 12.10.2017 ДС № 1 на 28 076,23 руб. сторонами подписан.

11 декабря 2017г. Заказчиком и Подрядчиком подписано Дополнительное соглашение №2 к Договору (далее - Дополнительное соглашение №2).

Согласно п. 1. Дополнительного соглашения № 2 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить собственными и/или привлеченными силами и техническими средствами в соответствии с Протоколом (Приложение № 1 от 11.12.2017г. к Дополнительному соглашению № 2) изготовление полотен дверей на объекте: «Международный медицинский кластер Сколково. Диагностический корпус».

Согласно п. 2 Дополнительного соглашения № 2 стоимость работ по Дополнительному соглашению № 2, согласно Протоколу (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 2), составляет 147 368,48 руб., в т.ч. НДС.

Согласно п. 3 Дополнительного соглашения № 2 Аванс в размере 100 % от стоимости изделий в размере 147 368, 48 рублей, в т.ч. НДС Заказчик выплачивает на основании представленного Подрядчиком оригинала счета.

Работы по Дополнительному соглашению № 2 к Договору были Заказчиком приняты на сумму 147 368,48 рублей.

Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 31.01.2018, Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 31.01.2018 на сумму 147 368,48 рублей подписаны.

17 января 2018г. Заказчиком и Подрядчиком подписано Дополнительное соглашение №3 к Договору (далее - Дополнительное соглашение №3).

Согласно п. 1. Дополнительного соглашения № 3 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить собственными и/или привлеченными силами и техническими средствами в соответствии с Протоколом (Приложение № 1 от 17.01.2018г. к Дополнительному соглашению №3) изготовление и монтаж дополнительных дверей на объекте: «Международный медицинский кластер Сколково. Диагностический корпус».

Согласно п. 2 Дополнительного соглашения № 3 стоимость работ по Дополнительному соглашению № 3, согласно Протоколу (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 3), составляет 150 263,89 руб., в т.ч. НДС.

Согласно п. 3 Дополнительного соглашения № 3 Аванс в размере 100 % от стоимости изделий в размере 150 263,89 рубля, в т.ч. НДС Заказчик выплачивает на основании представленного Подрядчиком оригинала счета.

Работы по Дополнительному соглашению № 3 к Договору были Заказчиком приняты на сумму 150 263,89 рубля.

Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 28.02.2018, Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 28.02.2018 на сумму 150 263,89 рубля подписаны.

Кроме того, согласно УПД № 621 от 28 февраля 2018 г. на основании счета № 16 от 02.02.2018 Подрядчиком выполнены работы по реставрации дверных полотен с учетом реставрационных материалов на сумму 150 000,00 рублей.

Заказчиком перечислены платежи по Договору в размере 8 318 688,69 рублей (платежные поручения № 657 от 31.08.2017 на сумму 1 500 000,00 рублей, № 231 от 06.09.2017 на сумму 4 500 000,00, № 797 от 28.09.2017 на сумму 318 688,69 рублей, № 847 от 18.10.2017 на сумму 2 000 000,00 рублей).

Заказчиком перечислен платеж по Дополнительному соглашению № 1 к Договору в размере 400 000,00 рублей (платежное поручение № 848 от 17.10.2017 на сумму 400 000,00 рублей).

Заказчиком перечислен платеж по Дополнительному соглашению № 2 к Договору в размере 147 368,48 рублей (платежное поручение № 15 от 18.01.2018 на сумму 147 368,48 рублей).

15.02.2018 ООО «МонАрх» (ИНН 

<

***>) оплатило по письму № 20 от 14.02.2018 г. за материалы, в счет взаиморасчетов с ООО «АЛМИ» Подрядчику 461 888,41 рублей (платежное поручение № 28 от 28.03.2019 на сумму 461 888,41 рублей).

Таким образом, по Договору, Дополнительным соглашениям № 1, 2, 3 к Договору и счету № 16 от 02.02.2018 Заказчиком были приняты работы на сумму 11 080 541,02 рубль (10 071 384,13+561 524,52+147 368,48+150 263,89+150 000,00).

Заказчиком за принятые работы по Договору, Дополнительным соглашениям № 1, 2, 3 к Договору и счету № 16 от 02.02.2018 оплачено Подрядчику (ООО «1ДК») 9 327 945,58 рублей (1 500 000+4 500 000+ 318 688,69+2 000 000+ 400 000+147 368,48+461 888,41).

Заказчиком согласно КС-3 № 1 от 20.10.2017, КС-3 № 2 от 29.12.2017, КС-3 № 3 от 31.01.2018 КС-3 № 1 от 29.12.2017 удержана стоимость оказанных генуслуг 5% на сумму 531 645,43 рублей (70 886,22+194 101,96+238 581,03+28 076,23).

Заказчиком согласно КС-3 № 1 от 20.10.2017, КС-3 № 2 от 29.12.2017, КС-3 № 3 от 31.01.2018 КС-3 № 1 от 29.12.2017 удержана гарантийная сумма 531 645,43 рублей (70 886,22+194 101,96+238 581,03+28 076,23).

Таким образом, на 27 февраля 2019 года неоплаченная Заказчиком (ООО «АЛМИ) Подрядчику (ООО «1ДК») сумма по Договору, включая Дополнительное соглашение № 1, 2, 3 к Договору и счет № 16 от 02.02.2018 составляла 1 221 050,01 рублей (11 080 541,02 9 327 945,58 - 531 645,43) из которой сумма задолженности по Договору 689 404,58 рубля и сумма гарантийного удержания 531 545,43 рублей.

27 февраля 2019 года заключено Соглашение о замене стороны по Договору подряда № 2/28 от 28.08.2017 между ООО “1ДК” - Прежняя сторона Договора, ООО “Русская промышленная группа” - Новая сторона Договора, ООО “АЛМИ”

 Контрагент Прежней стороны Договора” (далее - Соглашение).

Согласно п. 1.1. Соглашения Прежняя сторона Договора передает Новой стороне Договора свои права и обязанности (уступает требования и переводит долг) по Договору № 2/28 от 28.08.2017 г. (далее по тексту - Договор) с учетом дополнительных соглашений к Договору №1 от 12.10.2017 г., №2 от 11.12.2017 г. заключенному Прежней стороной Договора с Контрагентом Прежней стороны Договора.

В соответствии с п. 1.2. Соглашения права и обязанности по Договору переходят от Прежней стороны Договора к Новой стороне Договора с согласия Контрагента Прежней стороны Договора.

Согласно п 1.3. Соглашения права и обязанности по Договору передаются Новой стороне Договора в полном объеме, которые существовали у Прежней стороны Договора к моменту перехода прав и обязанностей, включая все права и обязанности, связанные с уступаемым требованием и переводом долга в общей сумме 1 221 050,01 рублей 01 копейка, в том числе НДС в размере налоговой ставки, согласно пункту 3 статьи 164 НК РФ, включая обязанность по оплате задолженности по Договору Прежней стороне Договора в размере 689 404,58 рубля, и обязанность возвратить Прежней стороне Договора гарантийное удержание в размере 531 645,43 рублей, на условиях установленных Договором, а также обязанность устранения недостатков выявленных в гарантийный период. Срок оплаты гарантийного удержания до 31.08.2023 г.

Вместе с тем, Заказчик платежным поручением № 28 от 28.03.2019 оплатил задолженность по Договору Новой стороне Договора в размере 689 404,58 рубля, но в срок оплаты гарантийного удержания, а именно до 31.08.2023 г., сумму гарантийного удержания по Договору подряда № 2/28 от 28.08.2017г. в размере 531 645,43 рублей на расчетный счет ООО «Русская промышленная группа» не перечислил.

Таким образом, задолженность Ответчика перед Истцом по Договору составляет 531 645,43 рублей.

В соответствии с п. 2.1. Соглашения о замене стороны по Договору подряда № 2/28 от 28.08.2017 Новая сторона обязуется в срок до 31 марта 2019 г. оплатить «Прежней стороне» денежные средства в размере 1 000 000,00 руб. Оплата производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Прежней стороне Договора.

ООО «Русская промышленная группа» платежным поручением от 19.03.12019 № 786 перечислило ООО «1ДК» 1 000 000,00 рублей.

Согласно 1.6. Соглашения о замене стороны по Договору подряда № 2/28 от 28.08.2017 права и обязанности по Договору передаются Новой стороне Договора в полном объеме, которые существовали у Прежней стороны Договора к моменту их передачи, и любые другие права и обязательства, которые могут возникнуть по Договору в будущем.

В случае одновременной передачи стороной всех прав и обязанностей по договору другому лицу (передача договора) к сделке по передаче соответственно применяются правила об уступке требования и о переводе долга (ст. 392.3 ГК РФ).

Если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты (п. 1 ст. 384 ГК РФ).

Требование по обязательству, которое возникнет в будущем (будущее требование), в том числе требование по обязательству из договора, который будет заключен в будущем, должно быть определено в соглашении об уступке способом, позволяющим идентифицировать это требование на момент его возникновения или перехода к цессионарию (п. 1 ст. 388.1 ГК РФ).

Согласно Выписки из ЕГРЮЛ (прилагается) ООО «1ДК» (Прежняя сторона Договора) исключено из ЕГРЮЛ с 09 сентября 2021 года.

Таким образом, на основании Соглашения о замене стороны по Договору подряда № 2/28 от 28.08.2017 к ООО «Русская промышленная группа» перешли все права по Договору, в т.ч. право требовать у ООО «АЛМИ» возврата гарантийного удержания в размере 531 645,43 рублей и пени по Договору.

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу п. 1 ст. 711 ГК РФ, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Пунктом 1 ст. 746 ГК РФ предусмотрено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Требование истца о взыскании долга в сумме 531 645 руб. 43 коп. - законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено, имеющимися в деле документами, представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению в полном объеме.

Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

В соответствии с п. 9.4. Договора в случае несвоевременной оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает пени в размере 0,5% от размера платежа за каждый день просрочки, но не более 5% от такого платежа.

Задолженность по Договору составляет 531 645,43 рублей, а просрочка платежа на 21.11.2024 составляет 448 дней. Сумма пени с 01 сентября 2023 года (последним денем для оплаты гарантийного удержания согласно п. 1.3. Соглашения о замене стороны по Договору подряда № 2/28 от 28.08.2017 является 31.08.2023) по 21 ноября 2024 года (дата расчета пени) без учета 5 % ограничения составляет 1 222 784,49 рублей (531 645,43 х 0,5 х 460 / 100).

Сумма пени составляет 5% от суммы просроченного платежа, а именно 26 582,27 рублей, т.к. 1 222 784,49 > 5% от 531 645,43 рублей.

Расчет неустойки судом проверен, признан верным.

Требование истца о взыскании пени в сумме 26 582 руб. 27 коп. – законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению в соответствии с представленным истцом расчетом.

Расходы по уплате госпошлины относятся на Ответчика, в соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ.

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 328, 329-331, 401, 420-424, 431-434, 702, 708, 709, 711, 720, 740, 746, 753 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 121-124, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с ООО " АЛМИ " (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО " Русская промышленная группа " (ОГРН 

<

***>) 558 227 руб. 70 коп., в том числе: 531 645 руб. 43 коп. – долга, 26 582 руб. 27 коп. – пени и расходы по уплате госпошлины в сумме 32 911 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья

О.В. Романов