АРБИТРАЖНЫЙ СУД  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

улица А.Невского, дом 29/11, г. Симферополь, Республика Крым, 295000

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №  А83-8347/2017 

г. Симферополь                                                                                   «23» ноября  2017  года

Резолютивная часть решения оглашена  16.11.2017

Полный текст решения изготовлен  23.11.2017

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «КРЫМСПЕЦМОНТАЖ»

к ответчику Управлению капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Алушты Республики Крым

третьих лица, не заявляющие самостоятельных требований, относительно предмета спора Управление федерального казначейства Республики Крым, Финансовое управление Администрации г. Алушты,  

о взыскании  

с участием представителей участников процесса:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности б/н от 19.06.2017;

от истца – ФИО3, представитель по доверенности б/н от 19.06.2017;

от ответчика – не явился;

установил:

Обстоятельства  дела:  Согласно исковому заявлению истец  обратился в Арбитражный суд Республики Крым  с исковым заявлением, в котором просит взыскать с ответчика в пользу истца задолженность по оплате осуществлению строительного контроля (технического надзора) за производством работ по Муниципальному Контракту № б/н от октября 2015 г. в сумме 754430,56 руб. основного долга; взыскать штрафные санкции в размере 18860,76 рублей; взыскать понесенные по делу судебные расходы, а именно госпошлину в размере 18466,00 рублей и представительские расходы.

Исковые требования обосновываются ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств  по муниципальному контракту по осуществлению строительного контроля за производством работ.

В октябре 2015г. между Управлением капитального строительства и жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Алушты Республики Крым (далее Заказчик)  и ООО «КРЫМСПЕЦМОНТАЖ» (далее Исполнитель) был заключен муниципальный контракт на выполнение работ для муниципальных нужд по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за производством работ.

В соответствии с условиями вышеуказанного контракта Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по завершению работ по капитальному ремонту здания детского сада в с. Лучистое муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым (далее Объект) на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, а Заказчик принял на себя обязательства оплатить выполненные работы в порядке и размере установленном вышеуказанным Контрактом (п.1.1. Контракта).

По условиям Контракта, в частности раздела 2 п. 2.1., планируемая Цена Контракта (стоимость работ) составляет 740 202,20 рублей, в том числе 18% НДС.

Окончательная цена Контракта составляет 2,14% (Две целые четырнадцать сотых процента) от стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов работ по Объекту (п.2.1.1. Контракта).

На основании п.3.5 данного Контракта оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ, на основании надлежаще оформленного и подписанного сторонами акта приемки выполненных работ и документа на оплату счета с приложением реестров выполненных работ, представленного исполнителем.

Согласно представленного акта приемки выполненных работ от 01.03.2016 г., подписанного обеими сторонами договора, работы приняты заказчиком без замечаний.

Ответчик исковые требования признает, однако поясняет, что уплатить задолженность не представляется возможным ввиду отсутствия денежных средств, контракт №15/10/16 от 15.10.2015 года не был зарегистрирован в Управлении Федерального казначейства по Республике Крым и тем самым не был внесен в бюджетную смету расходов на 2017 год. 

16.11.2017 г. от истца поступило заявление о частичном отказе от исковых требований, в котором заявитель просит принять отказ от исковых требований в  части взыскания штрафных санкций в размере 18860,76 руб. 

Определением от 23.11.2017 г. суд, прекратил производство по делу в части взыскания штрафных санкций в размере 18 860,00 руб.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.    

Ответчиком не представлено доказательств исполнения своих обязательств.      

В соответствии с ч. 3-1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.    

         Согласно  постановлению Президиума ВАС РФ от 17.01.2012 № 9608/11 оспаривая расчет стороны, другая сторона должна дать собственный контррасчет с обоснованием иного подхода.

 Ответчиком контррасчета взыскиваемых сумм не представлено.     

Таким образом, исковые требования законные,  и подлежат удовлетворению.

           Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ государственная пошлина возмещается  ответчиком  истцу.                      

           На основании вышеизложенного, а также  руководствуясь статьями  110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым,  

 

РЕШИЛ:

Исковые требования  удовлетворить полностью.

Взыскать с Управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Алушты Республики Крым (ОГРН 

<

***>,        ИНН 

<

***>) в пользу  Общества с ограниченной ответственностью «КРЫМСПЕЦМОНТАЖ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность в размере 754430,56 руб., расходы по уплате госпошлины в размере 18 089,00 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.                                                                      

         Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья                                                                                                            В.И. Гайворонский