62_8414222 

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-6623/19

16 мая 2019 года

г. Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Т.В. Сороченковой, при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном по иску ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА к ООО  "ИНЖСЕТЬПРОЕКТ" об обязании устранить недостатки выполненных работ, о  взыскании 1 927 248 руб. 28 коп. - штрафа  

При участии в судебном заседании- согласно протоколу  

Руководствуясь статьями 110, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать ООО "ИНЖСЕТЬПРОЕКТ" в течение месяца со дня вступления  решения в законную силу безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по  договору № 1277-К от 07.07.2016, указанные в рекламационном акте от 21.08.2018 по  адресу: 

<

...>, а именно:  установить зонты над вентиляционными шахтами, выполнить надлежащее их  крепление; выполнить устройство снегозадержателей; выполнить устройство желобов  в местах срыва и произвести их замену в местах их деформации, оштукатурить и  окрасить поверхностный слой здания по цокольной части.  

Взыскать с ООО "ИНЖСЕТЬПРОЕКТ" в пользу Фонда капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов сумму штрафа, предусмотренную  Договором, в размере 963 624 руб. 14 коп., а также 38 272 руб. 00 коп. – расходов по  государственной пошлине.  

Во взыскании остальной части штрафа – отказать.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд  в течение месяца со дня его принятия.  

Судья Т.В. Сороченкова