АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 E-mail: info@crimea.arbitr.ru http://www.crimea.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А83-8165/2025

03 марта 2026 года

город Симферополь

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Можаровой М.Е. при ведении

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Фандиковой А.Н.,

рассмотрев дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Спецстройкрым» (ОГРН: 

<

***>,

Дата присвоения ОГРН: 03.08.2021, ИНН: 

<

***>, КПП: 910201001)

к обществу с ограниченной ответственностью «Горизонт-Юг» (ОГРН: 

<

***>,

Дата присвоения ОГРН: 22.05.2018, ИНН: 

<

***>, КПП: 910201001)

о взыскании денежных средств

и по встречному исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Горизонт-Юг» (ОГРН: 

<

***>,

Дата присвоения ОГРН: 22.05.2018, ИНН: 

<

***>, КПП: 910201001)

к обществу с ограниченной ответственностью «Спецстройкрым»

(ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 03.08.2021, ИНН: 

<

***>,

КПП: 910201001)

о взыскании денежных средств,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных

требований относительно предмета спора

- ООО «Спецмаштехнолоджи»

- ООО «Гарант-ГВ»

с участием представителей:

от ООО «Спецстройкрым» – ФИО1, представитель по доверенности от

20.01.2026; ФИО2, представитель по доверенности от 11.08.2025 № 30-ССК;

от иных лиц – не явились.

руководствуясь статьями 82, 83, 144, 184 - 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Ходатайство о назначении по делу экспертизы удовлетворить.

2. Назначить по делу судебную строительно-техническую экспертизу, проведение которой поручить эксперту акционерного некоммерческого общества «Институт учета и судебной экспертизы» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 08.11.2014, ИНН: 

<

***>, КПП: 910201001) ФИО3.

3. На разрешение эксперта поставить следующие вопросы:

1) Определить состав, объем, стоимость фактически выполненных ООО «Горизонт-Юг» работ (основных и дополнительных) и использованных материалов по договору подряда № ОДЦ-29/0923-1 от 29.09.2023 на объекте: «Реконструкция объекта незавершенного строительства под общественно-деловой центр по адресу: 

<

...>, в том числе с учетом односторонне составленных актов выполненных работ? С указанием отдельно основных и дополнительных работ.

2) Возможно ли было выполнить основные работы, предусмотренные по договору подряда № ОДЦ-29/0923-1 от 29.09.2023 без выполнения дополнительных работ, фактически выполненных ООО «Горизонт-Юг»?

3) Определить состав, объем, стоимость фактически выполненных ООО «Горизонт-Юг» работ и использованных материалов (основных и дополнительных) по договору подряда № ОДЦ-07/1123-1 от 07.11.2023 на объекте: «Реконструкция объекта незавершенного строительства под общественно-деловой центр по адресу: 

<

...>, в том числе с учетом односторонне составленных актов выполненных работ? С указанием отдельно основных и дополнительных работ.

4) Возможно ли было выполнить основные работы, предусмотренные по договору подряда № ОДЦ-07/1123-1 от 07.11.2023 без выполнения дополнительных работ, фактически выполненных ООО «Горизонт-Юг»?

5) Соответствует ли качество выполненных ООО «Горизонт-Юг» работ и использованных материалов по договору подряда № ОДЦ-07/1123-1 от 07.11.2023, условиям договора, требованиям строительных норм и правил, а также обычно предъявляемым к такого рода работам требованиям? В случае отрицательного ответа на данный вопрос указать, какие имеются недостатки, а также стоимость устранения таких недостатков.

6) Соответствует ли качество выполненных ООО «Горизонт-Юг» работ и использованных материалов по договору подряда № ОДЦ-29/0923-1 от 29.09.2023, условиям договора, требованиям строительных норм и правил, а также обычно предъявляемым к такого рода работам требованиям? В случае отрицательного ответа на данный вопрос указать, какие имеются недостатки, а также стоимость устранения таких недостатков.

4. Обязать лиц, участвующих в деле, предоставлять эксперту через Арбитражный суд Республики Крым по запросам документы, необходимые для проведения экспертизы.

5. Определить предварительный размер вознаграждения экспертам в размере

60 000,00 руб.

6. Установить срок для проведения экспертизы – 30 рабочих дней.

7. Предупредить экспертов об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, под расписку, которую направить в суд, со ссылкой на номер дела.

В случае невозможности проведения экспертизы в установленный судом срок эксперту следует заблаговременно (то есть до истечения срока, установленного в пункте 6 настоящего определения) сообщить об этом в арбитражный суд и направить в суд ходатайство о продлении срока проведения экспертизы с обоснованием уважительности причин невозможности проведения экспертизы в установленный срок и указанием срока, необходимого для окончания проведения экспертизы.

Разъяснить, что если эксперт в ходе исследования обнаружит важные для дела обстоятельства, относительно которых вопросы не были поставлены судом, он вправе по своей инициативе сделать соответствующие выводы, снабдив их специальной оговоркой.

Разъяснить эксперту, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» при проведении судебной

экспертизы эксперт не вправе вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела; самостоятельно собирать материалы для производства судебной экспертизы; сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за исключением органа или лица, ее назначивших; уничтожать объекты исследований либо существенно изменять их свойства без разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу.

Полную информацию по делу, включая время и место рассмотрения дела, можно получить посредством системы электронной подачи документов «Мой арбитр» https://kad.arbitr.ru, указав номер дела, а также на официальном сайте суда http://crimea.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ознакомление с материалами дела осуществляется в электронном виде через подачу соответствующего заявления через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на странице https://kad.arbitr.ru/, указав номер дела с обязательной отметкой об ознакомлении в электронном виде.

Судья М.Е. Можарова