4567/2023-290037(2) 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-102333/2022

30 мая 2023 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 25 мая 2023 года. Полный текст решения изготовлен 30 мая 2023 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:  судьи Новиковой Е.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании путем использования системы веб-конференции дело  по иску:  

истец: общество с ограниченной ответственностью "Стройком" (адрес: Россия 192007,  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЕКИ ВОЛКОВКИ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 19, ЛИТЕРА А,  ОФИС 19);  

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙВЕРТ- СТРОЙ" (адрес: Россия 195027, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр-кт  ПИСКАРЁВСКИЙ, д.2 Щ,оф.711; Россия 195009, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ, ВАТУТИНА УЛ., Д. 18,  ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 4-Н ОФИС 16, Р.М. 2, ОГРН: 

<

***>);  

о взыскании 

при участии - от истца: ФИО2 по доверенности (онлайн) - от ответчика: не явился (извещен) 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Стройком» (далее - ООО «Стройком»,  истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Айверт-Строй» (далее -  ООО «Айверт-Строй», ответчик) о взыскании 554459 руб. 16 коп. основного долга,  125474 руб. 04 коп. процентов по статьей 395 Гражданского кодекса РФ, 55445 руб. 90  коп. договорной неустойки.  

 В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ судом  приняты уточнения, согласно которым истец просит взыскать с ответчика 544459 руб.  16 коп. основного долга, 113248 руб. 46 коп. процентов по статьей 395 Гражданского  кодекса РФ за период с 03.08.2019 по 09.03.2023, 150993 руб. 18 коп. пени.  

В настоящем судебном заседании истец, участвующий путем использования веб- конференции, поддержал заявленные требования.  

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения  дела, в судебное заседание не явился, позицию по делу с учетом принятых уточнений не  представил.  

В силу положений части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса  РФ, если в предварительном судебном заседании лица, участвующие в деле,  отсутствуют, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения  отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения  относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить  предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции.  

Арбитражный суд, в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального  кодекса РФ, признав надлежащим уведомление ответчика, полагает возможным  завершить предварительное судебное заседание и рассмотреть дело по существу.  

Исследовав материалы дела, суд установил следующее. 

01.02.2019 между Подрядчиком ООО «Айверт-Строй» и Субподрядчиком ООО  «СТРОЙКОМ» заключен договор субподряда № 1720187376082554164000000-65- МР2  (далее - Договор) во исполнение государственного контракта от 22.12.2017 №  1720187376082554164000000 ИГК 1720187376082554164000000 по государственному  оборонного заказу, заключенного между ФГУП “ГВСУ № 14” и Министерством  обороны РФ.  

По договору субподряда, ООО «Стройком» обязалось выполнить комплекс работ,  направленных на устройство фасадов жилого дома № 11 по объекту «Строительство  жилых домов служебного фонда МО РФ микрорайона № 2 города Мирный,  Архангельская область» (2-я очередь) (шифр 500/МР2), а подрядчик ООО «АЙВЕРТ- СТРОЙ» принял обязательство принять и оплатить выполненные на условиях и в сроки,  работы, предусмотренные в Договоре.  

В п. 2.1 Договора установлен срок окончания работ - 30.06.2019 г. 

В п. 3.1 Договора предусмотрена цена работ - 1686300 руб. включая НДС.  

После выполнения субподрядчиком предусмотренных работ, выписана справка о  стоимости выполненных работ от 25.06.2019, в которой указанная сумма  подтверждается - сумма выполненных работ с учетом НДС составляет 1686300 руб.  

Работы субподрядчиком были выполнены 25.06.2019, что зафиксировано актом о  приемке выполненных работ, согласно которого стоимость работ оставляет 1686300  руб., включая НДС в сумме 281050 руб. Поскольку стоимость работ не была оплачена в  полном объеме, сумма задолженности ООО «Айверт-Строй» в пользу ООО  «СТРОЙКОМ» составила 544459 руб. 16 коп.  

 Заслушав доводы представителя истца, изучив материалы настоящего дела, оценив  собранные по делу доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу  об удовлетворении иска.  

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных  правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с  обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и  одностороннее изменение его условий не допускаются.  

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона обязуется  выполнить по заданию другой стороны определенную работу и сдать ее результат  заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  

Субподрядчик исполнил обязательства с надлежащим качеством в полном объеме  в надлежащим срок, о чем свидетельствует акт примерки выполненных работ от  25.06.2019г.  

В соответствии с п.1.1. Договора, Подрядчик обязуется принять и оплатить  выполненные работы на условиях и в срок, предусмотренные договором.  

На основании пункта 4 статьи 753 Кодекса сдача результата работ подрядчиком и  приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.  

Исследовав и оценив представленные в дело доказательства в совокупности и  взаимосвязи, с учетом установленных по делу обстоятельств, суд пришел к выводу, что  ООО «Стройком» доказало совершения действий, направленных на выполнение работ,  отраженных в акте выполненных работ от 25.06.2019 на сумму 544459 руб. 16 коп., в  связи с чем, требования Общества о взыскании долга в заявленном размере подлежит  удовлетворению.  

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором  денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения  или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности просрочки исполнения (ст.  

<

...> ГК РФ).  

Истец просит взыскать пени в размере 150993 руб. 18 коп. за период с 24.07.2019  по 02.08.2019.  

В п. 6.3 предусмотрена мера ответственности для подрядчика за нарушение сроков  оплаты работ в виде пени в размере 1 % от суммы просроченного платежа за каждый  календарный день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.  

Согласно ч.1 ст. 395 ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных  средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате  проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка  России.  

 Истец просит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами  в размере 113248 руб. 46 коп. за период с 03.08.2019 по 09.03.2023.  

 Расчеты пени и процентов судом проверены, признаны верными,  соответствующими условиям договора и действующему законодательству, ответчиком  не оспорены.  

 Требования также подлежат удовлетворению, поскольку факт нарушения  обязательства установлен.  

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации государственная пошлина в размере 19174 руб. подлежит взысканию с  ответчика в доход федерального бюджета.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области  

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Айверт-Строй» (ИНН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Стройком» (ИНН  

<

***>) 544459 руб. 16 коп. долга, 150993 руб. 18 коп. пени, 113248 руб. 46 коп.  процентов за пользование чужими денежными средствами.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Айверт-Строй» (ИНН  

<

***>) государственную пошлину в размере 19174 руб.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия Решения.  

Судья Новикова Е.В. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 13.03.2023 11:45:00

 Кому выдана Новикова Елена Владимировна