АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

248600, г. Калуга,ул. Ленина, 90; тел: (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 505-957, 599-457; 

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: arbitr@kaluga.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 

Дело № А23-8972/2018

04 марта 2019 года

г. Калуга

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Ивановой Е.В., 

руководствуясь ст. ст. 110, 112, 167-171, 174, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

обязать Федеральное государственное унитарное предприятие «АТЭКС», г.  

Москва, в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную  

силу исполнить гарантийные обязательства по государственному контракту от  

25.09.2012 № 188, безвозмездно устранив недостатки и замечания по объекту  

«Физкультурно-оздоровительный комплекс», а именно: 

- заменить 3 деформированных стеклопакета в помещениях спортзала и  

бассейна; - устранить протечку воды из железобетонной чаши бассейна; 

- восстановить работоспособность сушильной камеры в цокольном этаже  

здания; - осуществить ремонт кабельной линии уличного освещения объекта; 

- восстановить работоспособность 5 камер системы охранного  

видеонаблюдения; 

- устранить неисправность системы диспетчеризации ФОК, РТП, ДГУ,  

передать электронные ключи доступа к системе управления ДГУ;  

- устранить неисправность системы контроля и управления двух ПССС-10- 

СУ и ЗРУ, а также источник бесперебойного питания (ИБП) № 2;  

- устранить неисправность системы автоматического ввода резерва (АВР) в  

РТП; 

- устранить неисправность системы восстановления нормального режима  

работы (ВНР) в РТП; 

- устранить неисправность релейной защиты коммуникационных аппаратов в  

ЗРУ; 

- устранить неисправность шины контроля и управления двигателем ДГУ;  

- провести косметический ремонт в помещениях РТП, имеющих следы  

повреждений от протечек кровли; 

- устранить неисправность системы обогрева дорожек (7 участков из 8);  

- осуществить ремонт или замену акрилового корпуса джакузи, имеющего  

множественные очаги деформации (отслоения, вспучивания); 

- заменить покрытие пола из керамической плитки в помещениях холла Spa- 

зоны, бассейна, душевых и санузлов в количестве около 20 кв.м.; 

- устранить неисправность монитора в помещении диспетчерской РТП  

(марка Samsung UE 49KS 8000U); 

- устранить неисправность 6 прожекторов инфракрасного освещения  

системы видеонаблюдения; 

- устранить неисправность 4 блока серии ОН системы телевизионного  

вещания; 

- устранить неисправность 3 участка охранной сигнализации периметра;  

- устранить неисправность 4 кабельные линии 1 сети связи (нарушена  

герметичность); 

- устранить неисправность 17 световых табло, обозначающих пути  

эвакуации и эвакуационные выходы; - устранить неисправность 1 лучевого пожарного извещателя; - устранить неисправность 2 систем обогрева ливневых стоков; - устранить неисправность 2 светильников-ночников в спальне № 2; 

- отрегулировать эксплуатационные параметры приточной и вытяжной  

системы вентиляции, превышающие проектные параметры по уровню шума в  

помещениях №№ 203, 204; 

- отрегулировать эксплуатационные параметры приточной и вытяжной  

системы вентиляции по уровню влажности в помещениях №№ 203, 204, 209, 211,  

не соответствующие проектным данным; 

- устранить неисправность системы управления пароувлажнителя № 4  

приточной вентиляции; 

- откорректировать показания наружных датчиков системы приточной  

вентиляции (П1, П2, П5, П6, П8, П10, П12, П14/18), которые не корректно  

отображают температуру воздуха; - заменить отпавшие деревья и кустарники в количестве 332 штук; 

- заменить деформированные дверные полотна внутренних помещений в  

количестве 8 штук; 

- отрегулировать нагрев теплого пола в ванной комнате спальни № 2  

(разница около 2°С); 

- заменить треснутую кафельную плитку полов и стен в основных и  

технических помещениях Spa-зоны. 

В случае неисполнения решения суда ответчиком в установленный срок  

предоставить право государственному комплексу «Таруса» Федеральной службы  

охраны Российской Федерации выполнить указанные работы своими силами со  

взысканием с ответчика понесенных расходов. 

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия  

«АТЭКС», г. Москва, в доход федерального бюджета государственную пошлину в  

сумме 6 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после принятия в  Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через  Арбитражный суд Калужской области.  

Судья Е.В. Иванова