именем Российской Федерации

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е   Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва                                                                              Дело № А40-162285/20-27-1163

18.01.2023 года                                                                      

Резолютивная часть решения объявлена 11 января 2023 года  

Решение в полном объеме изготовлено 18 января 2023 года  

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Крикуновой В.И., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ворониной И.С.,

рассмотрев в открытом  судебном заседании вопрос о вынесении дополнительного решения по делу № А40-162285/20-27-1163  по исковому заявлению 

истец:ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14» (117556, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ФРУКТОВАЯ, ДОМ 5А, ОГРН: 1035009568439, ИНН: 5047054473)

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПМК РУССКАЯ» (357856, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КУРСКИЙ Р-Н, С. РУССКОЕ, УЛ. ПАРКОВАЯ, Д.1, ОГРН: 1022600824620, ИНН: 2612018167)

третье лицо 1: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (119019, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ЗНАМЕНКА, ДОМ 19, ОГРН: 1037700255284, Дата присвоения ОГРН: 27.02.2003, ИНН: 7704252261, КПП: 770401001)

третье лицо 2: ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (119019, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК БОЛЬШОЙ ЗНАМЕНСКИЙ, 8, 3, , ОГРН: 1087746462616, Дата присвоения ОГРН: 03.04.2008, ИНН: 7704684769, КПП: 770401001)

о взыскании денежных средств в размере 1 315 639 334 рублей 05 копеек, и по встречному иску

при участии: согласно протоколу;

УСТАНОВИЛ:

ФГУП «ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «ПМК РУССКАЯ» (далее - ответчик) с учетом уточнений, принятых судом в порядке статьи 49 АПК РФ, о взыскании по шифру 12110 неотработанного аванса по Договору в размере 394 673 539,44 руб., процентов за пользование коммерческим кредитом в размере 125 618 194,84 руб., неустойки за нарушение срока выполнения работ в размере 308 776 368,24 руб., процентов за пользование чужими денежными  средствами (неотработанный аванс после расторжения) в размере 67 489 175,24 руб., задолженности по оплате генподрядных услуг в размере 3 475 024,66 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами (генподрядные услуги) в размере 628 014,17 руб., по шифру 12111 задолженности по оплате генподрядных услуг в размере 54 645,38 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами (генподрядные услуги) в размере 4 927,19 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16 декабря 2022г. первоначальный иск удовлетворить частично, с ООО «ПМК РУССКАЯ» в пользу ФГУП «ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14» взыскано неосновательное обогащение в размере 322 352 594 руб. 20 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами 38 125 970 руб. 13 коп., задолженность за генподрядные услуги в размере 3 475 024 руб. 66 коп., проценты за генподрядные услуги 632 941 руб. 36 коп. В удовлетворении остальной части первоначального иска отказано.

Представитель истца в судебное заседание явился, огласил правовую позицию по делу.

Представители ответчика и третьих лиц в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены в соответствии со ст. 123 АПК РФ. 

В соответствии с ч. 3 ст. 156 АПК РФ при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

При указанных обстоятельствах дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчика и третьих лиц на основании ст.ст. 123, 156 АПК РФ. 

Как следует из материалов дела, судом не рассмотрен вопрос о взыскании задолженности по оплате генподрядных услуг по шифру 12111.

В порядке ст. 178 АПК РФ Арбитражный суд, принявший решение, до вступления этого решения в законную силу по своей инициативе или по заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять дополнительное решение в случае, если:

1) по какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в деле, представили доказательства, судом не было принято решение;

2) суд, разрешив вопрос о праве, не указал в решении размер присужденной денежной суммы, подлежащее передаче имущество или не указал действия, которые обязан совершить ответчик;

3) судом не разрешен вопрос о судебных расходах.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика задолженности за оказание генподрядных услуг по шифру 12111 в размере 54 645руб. 38 коп. 

В соответствии с п. 4.18 Договора, Субподрядчик оплачивает Генподрядчику оказанные им генподрядные услуги в размере 2,40 % от стоимости выполненных Субподрядчиком в отчетном периоде работ.

Согласно п. 3.1 Договора субподряда № 1516187391462090942000000/765.1 от 17.12.2015г. цена по шифру объекта 12111 составляет 4 197 002 841 руб.

В соответствии с условиями Договора Генподрядчиком Субподрядчику были оказаны генподрядные услуги по шифру: 12111 на сумму 91 272 531 руб. 31 коп.

Путем зачета встречных однородных требований прекращены обязательства Субподрядчика по оплате оказанных генподрядных услуг по шифру 12111 на сумму 91 217 885 руб. 92 коп. (т. 2, л.д. 21-22, 28-32).

Размер задолженности ответчик не оспорил.

Таким образом требование о взыскании задолженности за генподрядные услуги по шифру 12111 в размере 54 645 руб. 38 коп.  подлежит удовлетворению.

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению в части задолженность за генподрядные услуги в размере 54 645 руб. 38 коп..

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 309,310,178  АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПМК РУССКАЯ» (357856, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КУРСКИЙ Р-Н, С. РУССКОЕ, УЛ. ПАРКОВАЯ, Д.1, ОГРН: 1022600824620, ИНН: 2612018167) в пользу ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14» (117556, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ФРУКТОВАЯ, ДОМ 5А, ОГРН: 1035009568439, ИНН: 5047054473) задолженность за генподрядные услуги в размере 54 645 руб. 38 коп. 

Дополнительное решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

 

Судья:                                                                                                       В.И. Крикунова