269/2023-77645(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-19237/2022

город Саратов

21 марта 2023 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Юнио-Трейд» устранить  выявленные недостатки работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома,  расположенного по адресу: 

<

...>, в рамках гарантийных обязательств, в сроки, установленные договором №  РТС264А193998 от 08 июля 2019 года, но не превышающие 30 (тридцать) календарных дней  после вступления решения суда в законную силу, и устранить недостатки, указанные в актах  осмотра крыши и жилых помещений, в том числе:  

- демонтировать снегозадерживающие устройства (ограждение кровли) над квартирой   № 50, а также на выявленных участках кровли, имеющих дефекты;  

- разобрать кровельное покрытие над квартирой, а также на выявленных участках  кровли, имеющих дефекты, и примыкающих участках;  

- удалить металлический фартук на карнизном свесе; 

- заделать швы между плитами на карнизном свесе, а также участки сопряжения  карнизных плит и наружных стен квартир, где выявлены дефекты кровли;  

- подготовить основание под водоизоляционный ковер в соответствии требованиями  таблицы 5.1. пункта 5.1.6. СП 71.13330.2017 - основание должно быть ровным, отклонение  поверхности основания вдоль уклона и на горизонтальной поверхности ±10 мм;  

- закрепить по краю карнизного свеса металлический фартук при помощи костылей;  

- настелить рулонный ковер, усилив по периметру дополнительным слоем  примыкание к вентшахте и канализационному стояку над крышей; карнизный участок  усилить одним слоем дополнительного водоизоляционного ковра шириной не менее 250 мм,  выполненного из рулонного материала, приклеиваемого к основанию под кровлю;  

- произвести устройство ограждения кровли на ремонтируемом участке с  сопряжением с существующем ограждением в соответствии с требованиями действующего  законодательства РФ.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Юнио-Трейд» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Москва, в пользу Фонда капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных домах в Саратовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), г. Саратов, расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления судебного акта в законную силу по  заявлению взыскателя.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не  изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный  суд Саратовской области.  

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в  соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.  

Судья Арбитражного суда 

Саратовской области ФИО1  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 28.01.2022 5:05:24

 Кому выдана ФИО1