Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-30104/2024

12 февраля 2025 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  11 декабря 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  12 февраля 2025 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сурков А. А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Чащиной А.А.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: :ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТАКТ ЭКСПЛУАТАЦИЯ" (адрес:  Россия 198097, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, УЛ. ТРЕФОЛЕВА, Д. 2, ЛИТЕР БН, ПОМЕЩ. 15Н, КАБ. 13, ОГРН: 

<

***>);

ответчик: :САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ МАРИИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" (адрес:  Россия 191014, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ПР-КТ ЛИТЕЙНЫЙ, Д. 56, ОГРН: 

<

***>);

о взыскании,

при участии

- от истца: ФИО1 (доверенность от 01.04.2024);

- от ответчика: не явился, извещен;

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "КОНТАКТ ЭКСПЛУАТАЦИЯ"  (далее – Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – Арбитражный суд) с иском к Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Городская Мариинская больница"  (далее – Больница) о взыскании по контракту от 06.03.2023 № 03722000001230001400001 на выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту зданий, сооружений, их элементов, инженерных систем больницы по адресу 

<

...> в СПБ ГБУЗ «Городская Мариинская Больница» (далее – Договор): 3 504 924 руб. задолженности, пени за апрель 2023 в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ, начисленную на сумму задолженности (1 168 308 руб.) за каждый день просрочки оплаты за период с 14.06.2023 по момент погашения задолженности, пени за май 2023 в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ, начисленную на сумму задолженности (1 168 308 руб.) за каждый день просрочки оплаты за период с 13.07.2023 по момент погашения задолженности, пени за июнь 2023 в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ, начисленную на сумму задолженности (1 168 308 руб.) за каждый день просрочки оплаты за период с 19.07.2023 по момент погашения задолженности, 150 000 руб. в возмещение судебных расходов на оплату услуг представителя.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание своих представителей не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)  не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Арбитражный суд, изучив и оценив представленные в дело доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, установил следующее.

Общество (подрядчик) и Больница (заказчик) заключили Контракт.

Согласно пункту 3.1. Контракта цена по настоящему Контракту 11 855 800,00 руб. (Одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот рублей 00 копеек), НДС не облагается (УСН). 

Цена контракта включает в себя стоимость работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту зданий и сооружений, их элементов, инженерных систем и оборудования в объёмах, указанных в приложениях №-№: 1-5 к Описанию объекта закупки (Приложение №2 к Контракту), стоимость запасных частей и расходных материалов, не-обходимых для выполнения указанного в техническом задании объёма работ по техническому обслуживанию, стои-мость запасных частей и расходных материалов, необходимых для выполнения мелкого ремонта и аварийного ремон-та, если цена за единицу не превышает 20 000,00 (двадцать тысяч рублей 00 копеек), стоимость запасных частей и расходных материалов, необходимых для устранения последствий аварий (если таковой произошёл вследствие не-своевременного и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту), заработную плату персонала, материалы, транспортные расходы, демонтаж, монтаж, пуско-наладочные, погрузочно-разгрузочные рабо-ты, страхование, таможенные пошлины, налоги и другие обязательные платежи, а также прочие расходы, связанные с исполнением Контракта. 

Согласно пункту 3.2. Контракта цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом. 

Установленная Контрактом цена не может быть изменена в одностороннем порядке.

В соответствии пунктом 2.1 Контракта Контракт вступает в силу с 01.03.2023г. и действует по «31» декабря 2023 года.

В соответствии с пунктом 3.5. Контракта оплата за выполненные работы производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок на основании предоставленного Подрядчиком Заказчику счета, счета-фактуры (если Подрядчик является плательщиком НДС). Валютой, используемой для расчетов с Подрядчиком, является российский рубль. Днем исполнения обязательств Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Как указал истец, ООО «Контакт Эксплуатация», добросовестно соблюдая условия Контракта, 02 мая 2023 года и 02 июня 2023 года сформировало в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке выполненных работ за апрель и май 2023 года соответственно (акт выполненных работ, подписанный со стороны Подрядчика) с приложением необходимых для оплаты документов.

За июнь 2023 года ООО «Контакт Эксплуатация» не имело технической возможности размещения закрывающих документов в ЕИС в связи с незаконным расторжением контракта, поэтому отчет о выполненных работах за июнь с комплектом закрывающих документов был представлен Ответчику в бумажном виде с дублированием на электронную почту.

В соответствии с п. 7.4. Контракта приемка выполненных Работ осуществляется Заказчиком не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику с использованием единой информационной системы в сфере закупок документа о приемке. При поступлении документа о приемке Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Заказчик (Ответчик) отказал в подписании актов по всем вышеуказанным работам, мотивировав ненадлежащее исполнение ООО «Контакт Эксплуатация» работ по заявкам, за исключением документации за июнь 2023 года, которую Заказчик вовсе проигнорировал.

Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок на основании предоставленного Подрядчиком Заказчику счета, счета-фактуры (если Подрядчик является плательщиком НДС).

Согласно условиям Контракта, оплата выполненных работ должна была быть произведена Заказчиком:

за апрель 2023 года – не позднее 13 июня 2023 года;

за май 2023 года – не позднее 12 июля 2023 года;

за июнь 2023 года – не позднее 18 июля 2023 года;

Отказывая в принятии выполненных работ, Ответчик сослался на якобы неисполнение условий Контракта.

При этом, Ответчик в своих отказах ссылался на невыполнение Истцом заявок, выходящих за предмет заключенного Контракта, либо исполнение Истцом контракта было невозможно без участия Ответчика.

Разделом № 5 и Разделом № 6 Контракта предусмотрены требования к выполняемым Подрядчиком работам, в т.ч. выполняемые Работы должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, обязательных при выполнении Работ, соответствующих предмету настоящего Контракта.

ООО «Контакт Эксплуатация» в полном объеме исполнило предусмотренные Контрактом обязательства за отчетные месяцы, что подтверждается также внутренним анкетированием сотрудников Заказчика ООО «Контакт Эксплуатация», высоко оценивших качество оказанных услуг за отчетный месяц.

Изложенные в мотивированных отказах причины, не относятся к ненадлежащему выполнению работ Подрядчиком, а, напротив, подтверждают факт неоказания содействия со стороны Заказчика и невыполнение им своих обязательств по Контракту. 

01 июня 2023 года ООО «Контакт Эксплуатация» получило «Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта» (письмо № 1143 от 01.06.2023 года). В данном уведомлении содержались все пункты, по которым ООО «Контакт Эксплуатация» якобы ненадлежащим образом выполнило работы по Контракту, в связи с чем, по мнению Ответчика не имеет право претендовать на денежные средства по Контракту.

Решением УФАС по г. Санкт-Петербургу от 10.07.2023 по делу № РНП-78- 928/23 ООО «Контакт Эксплуатация» признано лицом, добросовестно исполнявшим обязательства по договору, а доводы Ответчика необоснованными.

Истец отметил, что, вступившим в законную силу решением суда по делу  № А56-42829/2023, с Больницы в пользу Общества взыскана задолженность по спорному контракту за март 2023 года. В рамках рассмотрения указанного дела судом установлено, что подрядчик выполнил работы по контракту надлежащим образом.

В ходе исполнения Контракта ООО «Контакт Эксплуатация» было обнаружено, что ряд оборудования, поименованное в техническом задании Контракта и указанное в расчете цены Контракта, фактически отсутствует, о чем ООО «Контакт Эксплуатация» незамедлительно уведомило СПБ ГБУЗ «Городская Мариинская Больница» и неоднократно предлагало Заказчику (Ответчику) заключить дополнительное соглашение об уменьшении цены выполняемых работ (оказываемых услуг). 

Для справедливого рассмотрения искового заявления, ООО «Контакт Эксплуатация» считает необходимым уменьшить стоимость выполненных работ с учетом отсутствия определенных видов работ по причине отсутствия соответствующего оборудования.

На объекте Заказчика отсутствовало 12 шт. дополнительного оборудования Grundfos Sololift2 WC-1 (канализационные теплонасосы). Согласно расчету, указанному в Контракте, цена за обслуживание 33 шт. указанных канализационных теплонасосов составляет 47 498 рублей. Следовательно, обслуживание 21 шт. теплонасосов составляет 30 226 рублей в месяц. 

В связи с изложенным, ООО «Контакт Эксплуатация» считает разумным указать, что цена работ за 1 (один) календарный месяц составляет сумму в размере        1 168 308 рублей.

В силу пунктов 8.5.1.- 8.5.2. Контракта в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

В связи с неоплатой выполненных работ в претензии от 20.07.2023 Общество  потребовало от Больницы погасить задолженность.

Поскольку претензия была оставлена без удовлетворения, Общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Возражая против заявленных требований, Больница указала, что за апрель, май, июнь 2023 г. оплата Заказчиком не произведена ввиду не исполнения Подрядчиком условий Контракта, а именно:

1. За апрель 2023 г. 

Подрядчик сформировал в ЕИС 02.05.2023 г. в сфере закупок документ о приемке выполненных работ, являющихся предметом Контракта. 

Руководствуясь п. 7.3. Контракта, для проведения предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик провел экспертизу. 

Экспертиза выполненных работ осуществлена технической комиссией из числа специалистов Заказчика в период с 02.05.2023 г. по 15.05.2023 г. в соответствии с п. 5.2. Контракта. Результаты работ, являющихся предметом Контракта, проверены на соответствие условиям Контракта и приложении, являющихся неотъемлемой частью Контракта. 

В результате экспертизы установлено следующее: 

1. Подрядчиком не представлен Заказчику приказ от лица своей организации о назначении ответственного производителя работ в  соответствии  с п.  5.15 Контракта. 

2. Подрядчик нарушил свои обязанности в части п. 4.2.4 Контракта и предоставляет Заказчику отчет о ходе выполнения работ не соответствующей требованию Заказчика и с нарушением срока. 

3. Подрядчик нарушил свои обязанности в части п. 4.2.16 Контракта и не предъявил Заказчику оформленные и заполненные жypнaлы содержания имушества зданий и сооружений, их элементов, инженерных сетей и инженерного оборудования. На объектах Заказчика эксплуатационная документация отсутствует. 

4. В установленный п. 5.16. Контракта срок Подрядчиком не представлен на подпись двухсторонний Акт обследования с указанием всех выявленных замечаний. Акт обследования с указанием всех выявленных замечаний предоставлен Заказчику 02.05.2023 г. Акт не соответствует предмету и условиям Контракта. Неоднократный факт ненадлежащего исполнения Контракта является фактом неисполнения Контракта, о чем указано в п. 2.11 Контракта. 

5. Подрядчик не выполнил работу по заявкам №-№ 57098 от 10.04.2023 г.; 57099 от 10.04.2023 г.; 57100 от 10.04.2023 г.; 57101 от 10.04.2023 г.; 57102 от 10.04.2023 г.; 57103 от 10.04.2023 г.; 57104 от 10.04.2023 г.; 57105 от 10.04.2023 г.; 57106 от 10.04.2023; 57107 от 10.04.2023 г.; 57108 от 10.04.2023 г.; 57109 от 10.04.2023 г.; 57110 от 10.04.2023 г. с требованием выполнить помывку фасадов зданий, очистку фасадов зданий, очистку фасадов, отливов, ролетов от граффити, в соответствии с п. 4.2.24 Контракта в объеме указанном в приложении № 1 к Описанию объекта закупки «Перечень объектов, зданий и сооружений, их элементов, инженерных систем и основного оборудования, подлежащих техническому обслуживанию и аварийному ремонту» (с указанием площади фасадов зданий) и Приложений № 3 к Описанию объекта закупки «Перечень основных работ по техническому обслуживанию зданий, сооружений, их элементов инженерных систем и оборудования», с указанием в нем работ по помывке фасадов зданий по заявке Заказчика при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период. 

5. 02.05.2023 г. Подрядчик предоставил Заказчику отчет (приложение № 1 к Информационному письму № 84 от 02.05.2023 г.) за период с 01.04.2023 г. по 30.04.2023 г. Заказчиком за отчетный период подано - 476 заявок, включая 18 аварийных заявок. В отчете Подрядчика указан перечень выполненных заявок в количестве - 241 заявки, из которых 11 заявок поданы с 06.03.2023 по 31.03.2023 г. 

6. В отчете Подрядчика указаны заявки №-№ 57312 от 14.04.2023 г.; 56706 от 30.03.2023 г.; 57052 от 10.04.2023; 57092 от 10.04.2023 г. как выполненные, но работы по указанным заявкам не выполнялись. 

7. Подрядчиком НС выполнены работы по заявкам предельный срок на устранение которых установлен Приложением № 4 к описанию объекта закупки «Срок устранения неисправностей элементов зданий и объектов», а именно заявки №-№ 57844 от 28.04.2023; 57843 от 28.04.2023 г.; 57842 от 28.04.2023 г.; 57841 от 28.04 2023 г.; 57836 от 28.04.2023; 57835 от 28.04.2023 г.; 57827 от 28.04.2023 г.; 57810 от 28.04.2023 г.; 57909 от 28.04.2023 г.; 57807 от 28.04.2023 г.; 57804 от 28.04.2023 г.; 57800 от 28.04.2023 г.; 57798 от 28.04.2023 г.; 57797 от 28.04.2023 г.; 57794 от 28.04.2023 г.; 57759 от 27.04.2023 г.; 57758 от 27.04.2023 г.; 57755 от 27.94.2023 г.; 57737 от 26.04.2023 г.; 57734 от 26.04.2023 г.; 57732 от 26.04.2024 г.; 57716 от 26.04.2023 г.; 57710 от 26.04.2023 г.; 57684 от 25.04.2023 г.; 57683 от 25.04.2023 г.; 57664 от 25.04.2023 г.; 57617 от 24.04.2023 г.; 57616 от 24.04.2023 г.; 57579 от 24.04.2023 г.; 57574 от 24.04.2023 г.; 57556 от 21.04.2023 г.; 57555 от 21.04.2023 г.; 57554 от 21.04.2023 г.; 57553 от 21.04.2023 г.; 57551 от 21.04.2023 г.; 57536 от 21.04.2023 г.; 57534 от 21.04.2023 г.; 57525 от 21.04.2023 г.; 57473 от 20.04.2023 г.; 57466 от 20.04.2023 г.; 57463 от 20.04.2023 г.; 57399 от 18.04.2023 г.; 57359 от 17.04.2023 г.; 57358 от 17.04.2023 г.; 57357 от 17.04.2023 г.; 57333 от 17.04.2023 г.; 57285 от 14.04.2023 г.; 57273 от 13.04.2023 г.; 57268 от 13.04.2023 г.; 57266 от 13.04.2023 г.; 57246 от 13.04.2023 г.; 57245 от 13.04.2023 г.; 57244 от 13.04.2023 г.; 57243 от 13.04.2023 г.; 57242 от 13.04.2023 г.; 57241 от 13.04.2023 г.; 57235 от 13.04.2023 г.; 57234 от 13.04.2023 г.; 57207 от 12.04.2023 г.; 57198 от 12.04.2023 г.; 57171 от 11.04.2023 г.; 57092 от 10.04.2023 г.; 57070 от 10.04.2023 г.; 57052 от 10.04.2023 г.; 57050 от 10.04.2023 г.; 57047 от 10.04.2023 г.; 57046 от 10.04.2023 г.; 57044 от 10.04.2023 г.; 57043 от 10.04.2023 г.; 57005 от 07.04.2023 г.; 57022 от 07.04.2023 г.; 56973 от 06.04.2023 г.; 56972 от 06.04.2023 г.; 56967 от 06.04.2023 г.; 56965 от 06.04.2023 г.; 56964 от 06.04.2023 г.; 56963 от 06.04.2023 г.; 56962 от 06.04.2023 г.; 56957 от 06.04.2023 г.; 56955 от 06.04.2023 г.; 56948 от 06.04.2023 г.; 56896 от 05.04.2023 г.; 56864 от 05.04.2023 г.; 56852 от 05.04.2023 г.; 56794 от 04.04.2023 г.; 56789 от 03.04.2023 г.; 56777 от 03.04.2023 г.; 56787 от 03.04.2023 г.; 56764 от 31.03.2023 г.; 56761 от 31.03.2023 г.; 56741 от 30.03.2023 г.; 56740 от 30.03.2023 г.; 56739 от 30.03.2023 г.; 56737 от 30.03.2023 г.; 56731 от 30.03.2023 г.; 56726 от 30.03.2023 г.; 56722 от 30.03.2023 г.; 56706 от 30.03.2023 г.; 56690 от 30.03.2023; 56646 от 29.03.2023 г.; 56626 от 28.03.2023 г.; 56624 от 28.03.2023 г.; 56608 от 28.03.2023 г.; 56604 от 28.03.2023 г.; 56598 от 28.03.2023 г.; 56575 от 27.03.2023 г.; 56574 от 27.03.2023 г.; 56569 от 27.03.2023 г.; 56567 от 27.03.2023 г.; 56566 от 27.03.2023 г.; 56565 от 27.03.2023 г.; 56559 от 27.03.2023 г.; 56548 от 27.03.2023 г. 

Подрядчик не обеспечил устойчивую, бесперебойную работу всех инженерных систем,  не поддержал исправность технического состояния элементов, конструкций, помещений и зданий нарушая условия Контракта, в том числе п. 4.2.26. 

Подрядчиком не выполнены работы по заявкам, поданным за период с 06.03.2023 г. по 31.03.2023 г. 

Не выполнение работ по заявкам, не предоставление Подрядчиком письменного предупреждения Заказчику при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения работ в срок (обязанность Подрядчика установлена п. 4.2.2. Контракта), не предоставление Подрядчиком плана-графика с указанием работ по заявкам и сроков на их выполнение, как и не предоставление Подрядчиком ведомостей с указанием дефектов свидетельствует об уклонении Подрядчика от исполнения своих обязательств по Контракту. 

В сформированном в единой информационной системе в сфере закупок документе о приемке выполненных работ, являющихся предметом Контракта, Подрядчик указал, что работы по техническому обслуживанию и аварийному ремонту дополнительного оборудования (п.-п. 2-10 Акта № 10 от 30.04.2023 г.) выполнены. В результате проверки предоставленных результатов установлено, что работы по техническому обслуживанию и аварийному ремонту дополнительного оборудования, указанного в Акте № 10 п,-п. 2-10 от 30.04.2023 г. не выполнены. 

Подрядчик не предъявил Заказчику выполненные работы для определения их качества и объемов. Не представлено технических документов (актов-нарядов; журналов технического обслуживания или иного документа, подтверждающего выполнения необходимого объёма работ). 

На момент заключения Контракта, перечень дополнительного оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и аварийному ремонту (Приложение № 2 к Контракту), изменился по причине отсутствия потребности Заказчика в дальнейшей эксплуатации оборудования, о чём проинформирован Подрядчик и Стороны договорились о заключении дополнительного соглашения к Контракту и об уменьшении цены Контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

С учётом вышеизложенного Заказчиком были выставлены следующие требования: 

1. В срок до 18.05.2023 г. предоставить Заказчику приказ от лица своей организации о назначении ответственного производителя работ в соответствии с п. 5.15. Контракта. 

2. С 18.05.2023 г. предоставлять Заказчику ежедневный отчёт о ходе выполнения работ соответствующий письменному запросу Заказчика № 888 от 25.04.2023 г. 

3. В срок до 18.05.2023 г. предоставить Заказчику оформленные и заполненные журналы содержания имущества зданий и сооружений, их элементов, инженерных сетей и инженерного оборудования в соответствии с п. 4.2.16 Контракта. 

4. В срок до 23.05.2023 г. произвести обследование объектов, подлежащих техническому обслуживанию и аварийному ремонту (с целью определения фактического технического состояния объектов), предоставить Заказчику на подписание двухсторонний Акт обследования с указанием всех выявленных замечаний. 

5. В срок до 26.05.2023 г. выполнить работы по заявкам №-№ 57098 от 10.04.2023 г.; 57099 от 10.04.2023 г.; 57100 от 10.04.2023 г.; 57101 от 10.04.2023 г.; 57102 от 10.04.2023 г.; 57103 от 10.04.2023 г.; 57104 от 10.04.2023 г.; 57105 от 10.04.2023 г.; 57106 от 10.04.2023 г.; 57107 от 10.04.2023 г.; 57108 от 10.04.2023 г.; 57109 от 10.04.2023 г.; 57110 от 10.04.2023 г. с требованием выполнить помывку фасадов зданий, очистку фасадов, отливов, ролетов от граффити, в соответствии с п. 4.2.24 Контракта в объёме указанном в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки «Перечень объектов, зданий и сооружений, их элементов, инженерных систем и основного оборудования, подлежащих техническому обслуживанию и аварийному ремонту» (с указанием площади фасадов зданий) и Приложении № 3 к Описанию объекта закупки «Перечень основных работ по техническому обслуживанию зданий, сооружений, их элементов, инженерных систем и оборудования», с указанием в нём работ по помывке фасадов зданий по заявке Заказчика при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период и предъявить Заказчику выполненные работы. 

6. В срок до 26.05.2023 г. выполнить работы по заявкам №-№ 57312 от 14.04.2023 г.; 56706 от 30.03.2023 г.; 57052 от 10.04.2023 г.; 57092 от 10.04.2023 г. и предъявить Заказчику выполненные работы. 

7. В срок до 19.05.2023 г. выполнить работы по заявкам, указанным в Таблице 1 (п. 6.2. Мотивированного отказа) и предъявить Заказчику выполненные работы. 

8. В срок до 26.05.2023 г. выполнить работы по заявкам, указанным в п. 6.3. Мотивированного отказа и предъявить Заказчику выполненные работы или предоставить Заказчику на согласование план-график на выполнение работ по указанным заявкам с указанием адекватных сроков. 

9. В срок до 26.05.2023 г. выполнить работы по техническому обслуживанию и аварийному ремонту дополнительного оборудования, указанного в перечне дополнительного оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и аварийному ремонту (Приложение № 2 к Контракту). 

Указанные выше требования были указаны в мотивированном отказе от подписания документа о приемке выполненных работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту зданий, сооружений, их элементов, инженерных систем больницы за апрель 2023. 

Таким образом, требования Заказчика со стороны Исполнителя в рамках исполнения Контракта выполнены не были.

2) За май 2023 г. 

Подрядчик сформировал в единой информационной 02.06.2023 г. системе в сфере закупок документ о приемке выполненных работ, являющихся предметом Контракта. 

Результаты работ, являющихся предметом Контракта, проверены на соответствие условиям Контракта и приложений, являющихся неотъемлемой частью Контракта. 

В результате экспертизы установлено следующее: 

1. Подрядчиком не устранены замечания ни по одному из пунктов, указанных в мотивированном отказе № 1013 от 16.05.2023 г. Результаты работ не предьявлены Заказчику. 

2.         5.06.2023 г. Подрядчик предоставил Заказчику отчёт (приложение № 1 к Информационному письму № 99 от 05.06.2023 г.) за период с 01.05.2023 г. по 31.05.2023 г. Заказчиком за отчётный период подано- 501 заявки, включая 54 аварийных заявки. В отчёте Подрядчика за май 2023 г. указан перечень выполненных заявок в количестве - 504 заявки, в числе которых 231 заявок поданы с 06.04.2023 г. по 31.04.2023 г. и ранее, результаты работ по которым Подрядчик должен предъявить отдельно. 

3. В отчёте Подрядчика указаны заявки №-№ 58698 от 29.05.2023 г.; 58679 от 29.05.2023 г.; 58635 от 26.05.2023 г.; 58587 от 25.05.2023 г.; 58571 от 24.05.2023г.; 58493 от 23.05.2023г.; 58443 от 22.05.2023 г.; 58333 от 17.05.2023 г.; 58271 от 16.05.2023 г.; 58263 от 16.05.2023 г.; 58238 от 16.05.2023 г.; 58237 от 16.05.2023 г.; 58236 от 16.05.2023 г.; 58235 от 16.05.2023 г.; 58219 от 16.05.2023 г.; 58158 от 12.05.2023 г.; 58157 от 12.05.2023 г.; 58156 от 12.05.2023 г.; 58155 от 12.05.2023 г.; 58089 от 10.05.2023 г.; 57883 от 02.05.2023 г.; 57877 от 02.05.2023 г. как выполненные. Технической комиссией Заказчика установлено, что работы по указанным заявкам не выполнены. 

4. Подрядчиком не выполнены работы по заявкам, предельный срок на устранение которых установлен Приложением № 4 к Описанию объекта закупки «Сроки устранения неисправностей элементов зданий и объектов»: 58698 от 29.05.2023 г.; 58679 от 29.05.2023 г.; 58635 от 26.05.2023 г.; 58587 от 25.95.2023 г.; 58571 от 24.05.2023 г.; 58493 от 23.05.2023 г.; 58443 от 22.05.2023 г.; 58333 от 17.05.2023 г.; 58271 от 16.05.2023 г.; 58263 от 16.05.2023 г.; 58238 от 16.05.2023 г.; 58237 от 16.05.2023 г.; 58236 от 16.05.2023 г.; 58235 от 16.05.2023 г.; 58219 от 16.05.2023 г.; 58158 от 12.05.2023 г.; 58157 от 12.05.2023 г.; 58156 от 12.05.2023 г.; 58155 от 12.05.2023 г.; 58089 от 10.05.2023 г.; 57883 от 02.05.2023 г.; 57877 от 02.05.2023 г. Невыполнение работ по заявкам, не предоставление Подрядчиком письменного предупреждения Заказчику при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения работ в срок (обязанность Подрядчика установлена п. 4.2.2. Контракта), не предоставление Подрядчиком плана-графика с указанием работ по заявкам и сроков на их выполнение, как и не предоставление Подрядчиком ведомостей с указанием дефектов свидетельствует об уклонении Подрядчика от исполнения своих обязательств по Контракту. Подрядчик не обеспечил устойчивую, бесперебойную работу, всех инженерных систем, не поддерживал исправность технического состояния отдельных элементов, конструкций, помещений и зданий нарушая условия Контракта, в том числе п. 4.2.26. 

5. В сформированном в единой информационной системе в сфере закупок документе о приемке выполненных работ, являющихся предметом Контракта, Подрядчик указал, что работы по техническому обслуживанию и аварийному ремонту дополнительного оборудования (п.-п. 2-10 Акта № 13 от 31.05.2023 г.) выполнены. В результате проверки предоставленных результатов установлено, что работы по техническому обслуживанию и аварийному ремонту дополнительного оборудования, указанного в Акте № 13 п.-п. 2-10 от 31.05.2023 г. не выполнены. Подрядчик не предъявил Заказчику выполненные работы для определения их качества и объемов. Не представлено технических документов (актов-нарядов; журналов технического обслуживания или иного документа, подтверждающего выполнения необходимого объёма работ). Исполнителю  направлялся мотивированный отказ от подписания документа о приемке выполненных работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту зданий, сооружений, их элементов, инженерных систем больницы по адресу: Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 56 за май 2023 г. № 1271 от 20.06.2023 г. Требования Заказчика со стороны Исполнителя в рамках исполнения Контракта выполнены не были.

3) За июнь 2023 г. 

Подрядчик указывает, что за июнь 2023 года ООО «Контакт Эксплуатация» не имело технической возможности размещения закрывающих документов в ЕИС в связи с незаконным расторжением контракта. Тогда как по мнению Заказчика расторжение контракта было осуществлено законно и обоснованно. На сегодняшний день данный контракт не признан незаконно расторгнутым, отсутствует вступившее в законную силу решение Арбитражного суда по данному предмету спора. 

24.07.2023 г. Подрядчик направил заказным письмом через АО «Почта России» документ о приемке выполненных работ, являющихся предметом контракта. 

В соответствии с п. 7.3. Контракта, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик провел экспертизу. Экспертиза выполненных работ осуществлена технической комиссией из числа специалистов Заказчика в период с 24.07.2023 г. по 27.07.2023 г. в соответствии с п. 5.2 Контракта. Результаты работ, являющихся предметом Контракта, проверены на соответствие условиям Контракта и приложений, являющихся неотъемлемой частью Контракта. 

В результате экспертизы было установлено следующее: 

1. Подрядчиком не установлены замечания ни по одному из пунктов, указанных в мотивированном отказе №-№ 1013 от 16.05.2023 г., 1271 от 20.06.2023 г. Результаты работ Заказчику представлены не были. В отчете Подрядчика за июнь 2023 г. указан перечень выполненных заявок в количестве - 35, в числе которых 13 заявок поданы с 01.05.2023 г. по 31.05.2023 г. и ранее, результаты работ по которым Подрядчик должен был предоставить отдельно. 

2. В отчете Подрядчика указаны заявки №-№ 58925 от 05.06.2023 г.; 58910 от 05.06.2023 г., как выполненные. Технической комиссией Заказчика установлено, что работы по указанным заявкам не выполнены. 

3. Подрядчиком не выполнены работы по заявкам №-№ 58729 от 30.05.2023 г., 56740 от 30.03.2023 г., 58633 от 26.05.2023 г., предельный срок на устранение которых установлен Приложением № 4 к Описанию объекта закупки «Сроки устранения неисправностей элементов зданий и объектов». 

Не выполнение работ по заявкам, не предоставление Подрядчиком письменного предупреждения Заказчику при обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения работ в срок (обязанность Подрядчика установлена п. 4.2.2. Контракта), не предоставление Подрядчиком плана-графика с указанием работ по заявкам и сроков на их выполнение, как и не предоставление Подрядчиком ведомостей с указанием дефектов свидетельствует об уклонении Подрядчика от исполнения своих обязательств по Контракту. 

Подрядчик не обеспечил устойчивую, бесперебойную работу всех инженерных систем, не поддерживал исправность технического состояния отдельных элементов, конструкций, помещений и зданий, нарушая условия Контракта, в том числе п. 4.2.26. 

4. Подрядчик в направленном документе о приемке выполненных работ, являющихся предметом Контракта, указал, что работы по техническому обслуживанию и аварийному ремонту дополнительного оборудования (п.-п. 2-10 Акта № 15 от 30.06.2023 г.) выполнены. В результате проверки предоставленных результатов установлено, что работы по техническому обслуживанию и аварийному ремонту дополнительного оборудования, указанного в Акте № 15 п.-п. 2-10 от 30.06.2023 г. не выполнены. 

Подрядчик не предъявил Заказчику выполненные работы для определения их качества и объемов. Не было представлено технических документов (актов-нарядов; журналов технического обслуживания или иного документа, подтверждающего выполнения необходимого объема работ). Все выше перечисленное было отражено в мотивированном отказе от подписания документа о приемке выполненных работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту зданий, сооружений, их элементов, инженерных систем больницы за июнь 2023 г., направленного Заказчиком 02.08.2023 г. № 1591. 

Таким образом, Подрядчик был вправе за свой счёт устранить указанные в мотивированных отказах замечания в установленный Заказчиком срок. 

В связи с неоднократным (повторным) нарушением условий Контракта, заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта № 1143 от 01.06.2023 г. о чём Подрядчик уведомлен надлежащим образом 01.06.2023 г. и Контракт считается расторгнутым с 13.06.2023 г. в соответствии с п.8.11. Контракта. 

В связи с неоднократным игнорированием требований Заказчика в период действия Контракта, с учётом образовавшегося объёма работ, связанного с неисполнением или ненадлежащим исполнением Контракта Подрядчиком, руководствуясь пунктом 8.12 Контракта Заказчик оставляет за собой право требовать с Подрядчика возмещения затрат, понесённых на оплату работ по всем образовавшимся неисправностям в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Контракта Подрядчиком.

Оценив материалы дела в порядке, предусмотренном статьей 71 АПК РФ, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Сложившиеся между сторонами правоотношения регулируются общими положениями об обязательствах, положениями главы 38 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе).

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно статье 702 ГК РФ (по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу статьи 711 ГК РФ сдача результата работ заказчику является основанием для возникновения у него обязательства по оплате принятых работ.

Пунктом 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат).

Пунктом 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» разъяснено, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата  работ  заказчику.

Надлежащее выполнение подрядчиком работ по Договору и сдача результата работ ответчику подтверждается представленными в материалы дела актами выполненных по Договору работ, подписанными подрядчиком в одностороннем порядке, сформированными в единой информационной системе в сфере закупок за апрель и май 2023 года, а также актом за июнь 2023 года направленным в адрес заказчика.

Из материалов дела усматривается, что заказчик за период выполнения подрядчиком работ с апреля по июнь 2023 направил в адрес последнего мотивированные отказы от приемки работ.

Суд учитывает, что аналогичные обстоятельства были предметом рассмотрения в рамках арбитражного дела № А56-42829/2023. Вступившим в законную силу решением суда по делу  № А56-42829/2023 с Больницы в пользу Общества взыскана задолженность по спорному контракту за март 2023 года.

Так в рамках рассмотрения указанного дела судом апелляционной инстанции установлено, что подрядчик выполнил работы по контракту за период с марта по июнь 2023 года в полном объеме, надлежащим образом, указанные заказчиком замечания в мотивированных отказах от приемки работ не являются обоснованными.

За нарушение подрядчиком пунктов 2.14, 4.2.16 Контракта в пользу заказчика взыскан штраф в размере 10 000 руб. Указанные нарушения являются малозначительными и никаким образом не повлияли на результат выполненных работ Иных нарушений подрядчиком условий контракта судом не было установлено.

В силу части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 16 АПК РФ, частью 1 статьи 6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Кроме того, с учетом отсутствия определенных видов работ по причине отсутствия соответствующего оборудования истец добровольно уменьшил цену работ за 1 календарный месяц до 1 168 308 рублей.

С учетом изложенных обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что подрядчик выполнил работы по контракту за период с апреля по июнь 2023 года в полном объеме, работы считаются принятыми и подлежит оплате заказчиком.

Доказательства оплаты выполненных работ ответчиком не представлены.

Таким образом, требование о взыскании задолженности надлежит удовлетворить в полном объеме.

Кроме этого, истцом заявлено требование о взыскании пени за апрель 2023 в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки ЦБ РФ, начисленную на сумму задолженности (1 168 308 руб.) за каждый день просрочки оплаты за период с 14.06.2023 по момент погашения задолженности, пени за май 2023 в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки ЦБ РФ, начисленную на сумму задолженности (1 168 308 руб.) за каждый день просрочки оплаты за период с 13.07.2023 по момент погашения задолженности, пени за июнь 2023 в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки ЦБ РФ, начисленную на сумму задолженности (1 168 308 руб.) за каждый день просрочки оплаты за период с 19.07.2023 по момент погашения задолженности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности в случае просрочки исполнения.

В силу пунктов 8.5.1.- 8.5.2. Контракта в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Судом проверен представленный истцом расчет неустойки и признан верным.

Ответчик контррасчет неустойки не представил, ходатайство об уменьшении неустойки не заявил.

При указанном положении требования о взыскании неустойки надлежит удовлетворить.

Кроме того истцом заявлено требований о взыскании 150 000 руб. в возмещение судебных расходов на оплату услуг представителя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Истцом в обоснование указанного требования представлены договор от 15.02.2024 № 2024-КЭ-1 и платежное поручение от 27.03.2024 № 131 на 150 000 руб.

В соответствии с пунктами 10 и 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек. При это разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 2 КАС РФ).

Учитывая, что истцом доказан факт оказания юридических услуг, их размер и факт оплаты, а ответчик не представил каких-либо возражений по заявленной ко взысканию сумме судебных расходов, суд находит, что заявленные требования подлежат удовлетворению в размере 150 000 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская Мариинская больница" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Контакт Эксплуатация" 3 504 924 руб. задолженности, пени за апрель 2023 в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ, начисленную на сумму задолженности (1 168 308 руб.) за каждый день просрочки оплаты за период с 14.06.2023 по момент погашения задолженности, пени за май 2023 в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ, начисленную на сумму задолженности (1 168 308 руб.) за каждый день просрочки оплаты за период с 13.07.2023 по момент погашения задолженности, пени за июнь 2023 в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ, начисленную на сумму задолженности (1 168 308 руб.) за каждый день просрочки оплаты за период с 19.07.2023 по момент погашения задолженности, 40 525 руб. в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины, 150 000 руб. в возмещение судебных расходов на оплату услуг представителя.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья                                                                            Сурков А. А.