Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-31728/2020

19 августа 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  06 августа 2020 года.

Полный текст решения изготовлен  19 августа 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе судьи  Сергеевой О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "К-ГРУПП" (адрес:  Россия 107113, г МОСКВА, г МОСКВА, ул СОКОЛЬНИЧЕСКИЙ ВАЛ 38, ОГРН:  1087746274571);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Партнер" (адрес:  Россия 192171, Санкт-Петербург, ул.Седова 73А/Д/1, ОГРН:  1037861004180);

третье лицо:  

о взыскании 3 031 643 руб. 86 коп. 

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 17.03.20 

- от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом

установил:

ООО «К-Групп» предъявило иск о взыскании с ООО "Партнер" 2 699 661 руб. 49 коп. неосновательного обогащения и 332 025 руб. 37 коп. задолженности по оплате генподрядных услуг по договору № 30052019/ЦОП от 18.06.19.

Ответчик отзыв не представил, в заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Дело рассматривается без участия ответчика на основании ст. 156 АПК РФ.

Судом установлено: 

18 июня 2019 между ООО «К-групп» (Заказчик) и ООО «Партнер» (Подрядчик) был заключен  договор подряда № 30052019/ЦОД на выполнение комплекса работ, включая изготовление, приобретение и поставку строительных материалов, оборудования, комплектующих изделий и иных деталей и узлов с выполнением сопутствующих работ и выполнения работ по монтажу поставленного оборудования на объекте: РЦОД-СП-8М/Р-НВК (

<

...>, Лит. А.). 

В счет выполнения работ по договору заказчик перечислил подрядчику аванс 4 293 295 руб. 68 коп. и в счет оплаты выполненных и принятых работ еще 2 000 000 руб. 00 коп. подрядчик выполнил работы на сумму 5 105 741 руб.42 коп. неосвоенный аванс составил 1 187 511 руб.26 коп.

03 июля 2019 стороны заключили дополнительное соглашение № 1 к договору подряда № 30052019/ЦОД от 18.06.2019 на выполнение дополнительных работ по устройству железобетонных конструкций площадка топливозаправщика, топливного канала, фундаментной плиты резервуара аварийного слива топлива, монтаж резервуара аварийного слива топлива на сумму 5 345 000 руб.00 коп. В счет выполнения этих работ ООО «К-групп» перечислило ООО «Партнер» аванс в размере 3 207 000 руб. 00 коп. Подрядчик выполнил работы на сумму 3 194 892 руб. 77 коп. Неосвоенный аванс составил 12 107 руб.23коп.

08 августа 2019 стороны заключили дополнительное соглашение № 2 к договору подряда № 30052019/ЦОД от 18.06.2019г. на выполнение дополнительных работ «Система молниезащиты здания» и «Система защитного заземления» на общую сумму 1 899 396 (Один миллион восемьсот девяноста девять тысяч триста девяноста шесть) рублей 21 коп., в том числе НДС 20%. В счет выполнения работ ООО «К-групп» перечислило ООО «Партнер» аванс в размере 1 500 000 руб. 00 коп. Согласно Графику производства работ (Приложение № 2 к Дополнительному соглашению № 2 от 08.08.2019г.) срок окончания работ - 31 октября 2019г. Однако, до настоящего времени ООО «Партнер» не выполнило указанные работы и не вернуло неосвоенный аванс, который незаконно удерживается ООО «Партнер» и является неосновательным обогащением.

22 ноября 2019г. ООО «К-групп» направило в адрес ООО «Партнер» Уведомление о расторжении дополнительного соглашения/№ 2 от 08.08.2019г. к договору № 30052019/ЦОД от 18.06.2019г. и требование о возврате неосвоенного аванса в срок до 29 ноября 2019г. Но, аванс до настоящего времени не возвращен ООО «К-групп».

В соответствии со ст. 1102 Гражданского Кодекса РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395 ГК РФ).

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии с п. 14.1. договора подряда № 30052019/ЦОД от 18.06.2019г. заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора в случае несоблюдения сроков выполнения работ по договору, а также сроков реализаций связанных с ним иных мероприятий. Кроме того, согласно ч.2. ст.715 Гражданского кодекса РФ «если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.»

17 февраля 2020 исх. № 94/1 ООО «К-групп» направило письмо, в котором уведомило ООО «Партнер» о расторжении Договора подряда № 30052019/ЦОД от 18.06.2019г. в полном объеме, а так же требование о возврате в срок до 17.03.2020г. неосвоенного аванса в сумме 2 699 661 руб. 49 коп. и стоимости генподрядных услуг в размере 332 025 руб.37 коп.   К письму был приложен акт сверки расчетов, согласно которому задолженность ООО «Партнер» перед ООО «К-групп» составила 3 031 643 руб.  86 коп. До настоящего времени ответ от ООО «Партнер» не направлен в ООО «К-групп»,  аванс не возвращен.

На день предъявления иска сумма неосвоенного аванса по договору подряда № 30052019/ЦОД от 18.06.2019 составляет 2 699 661 руб. 00 коп, задолженности по оплате генподрядных услуг размере 332 025 руб. 37 коп.  

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по оплате государственной пошлины на ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Партнер" в пользу общества с ограниченной ответственностью "К-ГРУПП" 3 031 643 руб. 86 коп, из них: 2 699 661 руб. 49 коп. неосновательного обогащения и 332 025 руб. 37 коп. задолженности по оплате генподрядных услуг, а также 38 000 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист в порядке ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья                     Сергеева О.Н.