АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660049, 

<

...>, https://krasnoyarsk.arbitr.ru/

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Именем Российской Федерации

16 октября 2025 года

Дело № А33-19705/2025

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

в удовлетворении ходатайств публичного акционерного общества «Россети Сибирь» о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, о снижении размера договорной неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации отказать. 

Удовлетворить ходатайство индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) об уточнении исковых требований в части взыскания неустойки за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению по договору от 26.10.2023 № 20.2400.10042.23   за период с 27 апреля 2024 года по 09 октября 2025 года в сумме 60 343, 33 руб.,  с 10 октября 2025 года по день фактического осуществления технологического присоединения (исполнения договора от 26.10.2023 № 20.2400.10042.23) в размере 0,25% от суммы платы за технологическое присоединение (45 470,90 руб.) за каждый день просрочки, принять уточнение иска в указанной части.

Исковые требования удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 26.10.2023 № 20.2400.10042.23 и техническим условиям № 8000576156, осуществив фактическое технологическое присоединение энергопринимающих устройств индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>), расположенных по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, кадастровый номер земельного участка 24:11:0330102:810, в том числе:    подготовку технических условий на технологическое присоединение; обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности; выполнение проектной документации в соответствии с законодательством РФ; строительство ТП 6(10) кв; строительство ЛЭП-6(10) кВ от точки, указанной в технических условиях, до проектируемой ТП;    строительство ЛЭП 0,4 кв от проектируемой ТП до точки присоединения; монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) неустойки за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению по договору от 26.10.2023 № 20.2400.10042.23   за период с 27 апреля 2024 года по 09 октября 2025 года в сумме 60 343, 33 руб.,  с 10 октября 2025 года по день фактического осуществления технологического присоединения (исполнения договора от 26.10.2023 № 20.2400.10042.23) в размере 0,25% от суммы платы за технологическое присоединение (45 470,90 руб.) за каждый день просрочки, а также 25 000 руб. судебных расходов по уплате госпошлины, несение которых подтверждается платежным поручением от 12.07.2025 № 590025.

Требование о взыскании судебной неустойки удовлетворить частично. 

В случае неисполнения решения суда в течение одного месяца  со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу,  взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>)  5 000 руб. судебной неустойки за каждый день неисполнения вступившего в силу судебного акта по настоящему делу, подлежащую исчислению со дня, следующего за днем,  установленным судом для исполнения обязательства, по день его фактического исполнения.

В удовлетворении остальной части требований о взыскании судебной неустойки отказать.

Заявление о взыскании судебных расходов удовлетворить частично.

Взыскать с  публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) 23 000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя (из расчета: 6 000 руб.  – составление претензии, 17 000 руб. – составление искового заявления).

В удовлетворении остальной части заявления о взыскании судебных расходов отказать.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.

Судья

ФИО2