130/2021-612(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00,   www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-6097/2020

г. Салехард

13 января 2021 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Е.В. Антоновой, при ведении протокола судебного заседания секретарем  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению муниципального казённого учреждения «Управление коммунального  заказа» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью научно-исследовательский центр «Атриум» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) о понуждении к надлежащему исполнению муниципального  контракта № Ф.2018.452681/265-18/ЭА от 27.09.2018,  

руководствуясь требованиями статей 110, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса РФ, суд  

РЕШИЛ:

исковые требования муниципального казённого учреждения «Управление  коммунального заказа» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) удовлетворить  полностью.  

Обществу с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр  «Атриум» (630088, 

<

...>; дата государственной регистрации в качестве юридического лица –  19.10.2017; ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) устранить в рамках гарантийных  обязательств по муниципальному контракту № Ф.2018.452681/265-18/ЭА от 27.09.2018  на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту  пищевого блока и прачечной МБДОУ «ДС «Солнышко», выявленные расхождения  проектной документации с фактическим обследованием объекта, в течение 10  календарных дней с момента вступления решения суда в силу, а именно:  

- предоставить проектные решения на дополнительные (неучтенные проектом)  работы, согласно акту № 1 от 20.05.2020;  

- предоставить локальный сметный расчет на дополнительные работы;  предоставить положительное заключение к локальным сметам;  

- предоставить утвержденную проектную документацию, укомплектованную в  соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, получившую  повторное положительное заключение АУ ЯНАО «УГЭПД» по технической и сметной  части документации с учетом, выданных замечаний.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Научно- исследовательский центр «Атриум» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 рублей 00 копеек.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия  (изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого  автономного округа.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в  соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, что решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку.  

Е.В. Антонова

Судья 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 08.06.2020 6:05:09

Кому выдана Антонова Елена Викторовна