1020/2020-48411(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  резолютивная часть

Дело № А79-11074/2019

г. Чебоксары

29 мая 2020 года

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи  Владимировой О.Е.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бондаревой Д.Н.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

Администрации города Канаш Чувашской Республики (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) 429330, 

<

...> Победы, д.  24,  

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП  304212917000114, ИНН 

<

***>) 428034, Чувашская Республика, г.  Чебоксары,  

об обязании устранить недостатки, 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета  спора:  

муниципальное казенное учреждение "Центр закупок и бухгалтерского  обслуживания города Канаш Чувашской Республики" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, 429340, 

<

...> Победы, д. 24),  

общество с ограниченной ответственностью "Артифекс" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, 428018, 

<

...>),  

индивидуальный предприниматель ФИО2 (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Новочебоксарск),  

при участии 

от истца: ФИО3 по доверенности от 09.01.2020 № 2 (сроком до  31.12.2020),  

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить частично. 

Обязать индивидуального предпринимателя Львова Алексея Николаевича  устранить недостатки по гарантийным обязательствам, предусмотренным  муниципальными контрактами от 24.09.2018 № 39, от 15.11.2019 № 172 на  выполнение работ: "Ремонт входных групп здания по адресу: ул. Пушкина, д. 10,  к.1 в городе Канаш Чувашской Республики" в месячный срок со дня вступления  решения суда в законную силу, а именно:  

1. Выполнить устройство купола над крыльцом, в соответствии с  локальной сметой - купол из стекла общей площадью 22 кв.м ( № 63 локальной  сметы);  

2. Выполнить оклейку стекла купола бронированной пленкой - 22 кв.м  ( № 64-66 локальной сметы);  

3. Устранить ржавчину на ограждении пандуса из нержавеющей стали,  высотой 0,9 м - 39 м (23 м +16 м) ( № 36,39 локальной сметы; № 2 дополнительной  локальной сметы);  

4. Устранить ржавчину на металлических конструкциях столбов и  купола - 100 кв.м ( № 67-68 локальной сметы);  

5. Выполнить замену керамогранитной плитки пандуса - 3 кв.м ( № 34  локальной сметы);  

6. Выполнить очистку брусчатки от цементного раствора и краски; 

7. Устранить недостатки в покрытии обшивки каркаса фризом  золотистого цвета – заменить обшивку каркаса фризом в местах соединения колонн  и водосточных труб с каркасом основания под купол и обшивку стыков  соединений передней части основания под купол (около букв ЗАГС) общей  площадью 5 кв.м ( № 69-71 локальной сметы);  

8. Устранить ржавчину на лестничных кованных перилах, высотой 1,2 м  - 5,6 м ( № 36-38 локальной сметы).  

В остальной части в иске отказать. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1  в доход федерального бюджета 6`000 (Шесть тысяч) руб. государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний  Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления  арбитражного суда.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики –  Чувашии.  

Судья О.Е. Владимирова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 17.05.2019 10:52:49

 Кому выдана Владимирова Ольга Евгеньевна