59/2020-141972(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

17 июня 2020 года Дело № А55-39045/2019 

Арбитражный суд Самарской области  

в составе судьи Балькиной Л.С. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  после перерыва – секретарем ФИО2,  

рассмотрев в судебном заседании 17 июня 2020 года дело по иску 

Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации  городского округа Самара  

к Обществу с ограниченной ответственностью "Империал" об обязании выполнить гарантийные работы 

при участии в заседании  от истца – представитель ФИО3  

от ответчика – не явился  

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Р Е Ш И Л: 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Империал" выполнить  гарантийные работы по муниципальному контракту № 155 от 10.11.2017 в течение 60  календарных дней с момента вступления решения в законную силу:  

1.1. на объекте коммунально-бытового назначения «Баня № 1», расположенного  

по адресу: г. Самара, Самарский р-н, ул. Пионерская д. 45 -объемы работ согласно  

перечню и количеству материалов и затрат: Расчёт по объёму работ: 

Наименование 

Объём  выполн  яемых  работ,  

кв.м., п.м.  

Ед, 

изм. 

Средняя стоимость за 

единицу с учётом  сметной прибыли,  

НДС, руб. 

Общая стоимость, руб. 

1. Помещение раздевальной 

Разборка покрытий полов из керамических 

плиток. 

131,8  

м2 

150,00 

19 770,00 

Разборка покрытий и оснований: цементе-

бетонных 

131,8  

м2 

150,00 

19 770,00 

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси 

с приготовлением раствора в построечных  условиях (стяжка пола с дренажным лотком)  

131,8  

м2 

300,00 

39 540,00 

Грунтовка пола после каждого цикла работ  

131,8  

м2 

38,00 

5 008,40 

Укладка бордюра из керамических плиток 15 см  

89,44 

м2 

300,00 

26 832,00 

Затирка швов 

131,8 

м2 

300,00 

39 540,00 

Высококачественная штукатурка стен  

85,24 

м2 

655,00 

55 832,20 

Шлифовка стен под окраску 

85,24 

м2 

88,75 

7 565,05 

Грунтовка стен, после каждого цикла работ  

85,24 

м2 

38,00 

3 239,12  

Окрашивание влагостойкими водоэмульсионными  составами поверхностей стен и потолков, ранее  окрашенных водоэмульсионной краской  

с расчисткой старой краски  

198,10 

м2 

191,25 

37 886,62 

Итого по разделу, руб. 

461 971,99  

2.Помещение ожидальной - остывочной 

Разборка покрытий полов из керамических плиток. 

 77,9 

м2 

150,00 

11 685,00  

Разборка покрытий и оснований: цементо - бетонных  

77,9 

м2 

150,00 

11 685,00  

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси  с приготовлением раствора в построечных  

условиях (стяжка) 

77,9 

м2 

300,00 

23 370,00  

Укладка половой плитки 

77,9 

м2 

1225,00 

95 427,50  

Сплошное выравнивание внутренних  поверхностей стен (однослойное  

оштукатуривание) 

104,33 

м2 

655,00 

68 336,15  

Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен и потолков, ранее окрашенных  водоэмульсионной краской с расчисткой старой  краски  

182,23 

м2 

191,25 

34 851,48  

Итого по разделу, руб. 

245 355,13  

3.Ремонт плит покрытия на 1 этаже 

Зачистка, обеспыливание мест оголения арматуры  

30 

м2 

180,00 

5 400,00  

Расшивка и заделка трещин бетонного основания  плит покрытия полимерными материалами  

30 

м2 

150,00 

4 500,00  

Штукатурка основания бетонной плиты покрытия  

30 

450,00 

13 500,00  

Шлифовка под окраску 

30 

88,75 

2 662,50  

Окраска водоэмульсионной краской основания  плиты перекрытия  

30 

м2 

191,25 

5 737,50  

Итого по разделу, руб. 

13 800,00  

Итого по разделам 1,2,3 руб. 

721 127,12  

Накладные расходы 10,0%, руб. 

72 112,71  

Итог за все виды работ с учётом накладных расходов, сметной прибыли, руб.  

793 239,83  

Расчёт по материалам: 

Наименование материалов  

Объём  выполн  

яемых  работ.  

Ед.  изм  

Средняя стоимость  

за единицу по  

Самарской области,  

руб. 

Общая стоимость, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

1. Помещение раздевальной 

Клей для плитки универсальный LITOKOLX11  25 кг  

17 

шт  

398,00 

6 766,00  

Гидроизоляция Гидротекс-В (25 кг) 

21

 шт 

 2 150,00 

 45 150,00  

Затирка для плитки 2 кг 

86

 шт 

 276,00 

 38 916,00  

Шпатлевка Волма 25 кг 

10

 шт 

 230,00 

 2 300,00  

Краска влагостойкая водоэмульсионная (белая)  

89,14

 кг 

 171,60 

 15 296,42  

Плитка керамическая напольная 30x30  

171,34 

м2 

440,00

 75 389,60  

Грунтовка для стен и пола 

45

 л 

 273,75 

 12 318,75  

Колер для краски 

26

 шт 

 215.00 

 5 590,00  

Итого по разделу, руб. 

201 726,77  

2. Помещение ожидальной -остывочной 

Клей для плитки универсальный  LITOKOL X11 25 кг  

17

 шт 

 398,00 

 6 766,00  

Затирка для плитки 2 кг 

86

 шт 

 276,00 

 23 736,00  

Шпатлевка Волма 25 кг 

10 

шт 

230,00 

2 300,00  

Краска водоэмульсионная (белая)  

89,14 

кг 

171,60 

15 296,42  

Плитка керамическая напольная 30x30  

171,34 

м2 

440,00 

75 389,60  

Грунтовка для стен и пола 

45 

л 

273,75 

12 185,00  

Колер для краски 

21 

шт 

215,00 

45 15,00  

Итого по разделу, руб. 

135 

673,02 

3.Ремонт плит покрытия на 1 этаже 

Рем состав для заделки трещин (туба)  

13 

шт 

455,00 

5 915,00  

Грунтовка для стен и потолка 

10 

л 

273,75 

2 737,50  

Шпатлевка Волма 25 кг 

27 

шт 

398,00 

10 746,00  

Краска водоэмульсионная (белая)  

5 

кг 

276,00 

1 380,00  

Итого по разделу, руб. 

20 778,50  

Итого по разделам 1, 2,3 руб. 

358 178,29  

1 

Общая стоимость ремонтных работ и материалов для восстановительного ремонта отделочных материалов и сопутствующих затрат (в т.ч. НДС 20%) руб. 

1 151 418,12  

2 

Общая стоимость ремонтных работ и материалов для восстановительного ремонта 

помещения раздевальной (в т.ч. НДС 20%) руб. 461 971,99+201 726,77  

663 698,76 

3 

Общая стоимость ремонтных работ и материалов для восстановительного ремонта  плит перекрытий 1 этажа (в т.ч. НДС 20%) руб.  

34 578,50 

Сопутствующие затраты 

4 

Транспортные, заготовительно-складские расходы, снабжение материалом, погрузка  мусора в мешки, вывоз мусора, подъём материалов, (в среднем 10,0%), руб. п. 1 * 10%  

115 141,81 

5 

Неучтённые затраты, (в среднем 2,0%), руб. п. 1 * 2% 

23 028,36 

6 

Уборка после ремонта, (в среднем 113,3 руб. за кв.м.), руб. (131,8 кв.м. х 113,3  руб./кв.м.)  

14 936,89 

7 

Итого стоимость ремонтных работ и материалов для восстановительного ремонта  помещений бани № 1 (в т.ч. НДС 20%) руб.  

1 304 525,18  

1.2. на объекте коммунально-бытового назначения «Баня № 22», расположенного  

по адресу: г. Самара, Советский р-н, ул. Стандартная д. 100 - объемы работ согласно  

перечню и количеству материалов и затрат: Расчёт по объёму работ: 

Наименование 

Объём  

выполняемых  

работ, кв.м.,  п.м. (в  

соответствии  

с табл. № 1)  

Ед. изм.  

Средняя  стоимость за  

единицу с  учётом  

сметной  прибыли, НДС,  

руб. 

Общая 

стоимость, руб.  

1. Бассейн 

Демонтаж керамической плитки со стен, дна и  вокруг чаши бассейна  

138,37 

м2 

150,00 

20 755,50 

Грунтовка стен, днища чаши бассейна после каждого цикла работ 

138,37 

м2 

38,00 

5 270,60 

Высококачественная штукатурка чаши бассейна  

138,37 

м2 

655,00 

90 632,35 

Устройство гидроизоляции чаши бассейна 2 раза  

138,37 

м2 

265,75 

36 771,82 

Укладка плитки в чаше бассейна 

138,37 

м2 

1 500,00 

207 555,00  

Высококачественная затирка швов  

138,37 

м2 

300,00 

41 511,00 

Зачистка, обеспыливание мест оголения 

арматуры 

103,9 

м2 

180,00 

18 702,00 

Расшивка и заделка трещин бетонного основания 

чаши бассейна полимерными материалами 

20 

м2 

150,00 

3000,00 

Окраска водоэмульсионной краской основания  бетонной чаши  

103,9 

191,25 

19 870,87 

Окраска воздуховодов масляной краской  

11,56 

м2 

227,50 

2 631,72 

Демонтаж пластиковых дверей 3 1 шт  

652,50 

1 957,50 

Монтаж пластиковых дверей 1 шт  

1 450,00 

4 350,00 

Итого по разделу, руб. 

508 984,48 

1. Помещение моечного отделения 

Ручной демонтаж плитки со стен с сохранением  материала  

55,07 

м2 

150,00 

8 260,50 

Демонтаж плитки пола с сохранением материала  

85,72 

м2 

150,00 

12 858,00 

Укладка настенной плитки 

55,07 

м2 

876,25 

48255,08 

Укладка половой плитки 

85,72 

м2 

1225,00 

105 007,00 

Высококачественная затирка швов плитки стен  

55,07 

м2 

122,50  

6 746,07 

Высококачественная затирка швов половой 

плитки 

85,72 

м2 

122,50  

10 500,70 

Разбор подвесного потолка из пластиковых 

панелей ПВХ 

85,72 

м2 

156,25  

13 393,75 

Монтаж подвесного потолка пластиковыми 

панелями ПВХ 

85,72 

м2 

415,00  

35 573,80 

Окраска воздуховодов 

7,57 

м2 

252,50  

1 911,42 

Монтаж потолочного плинтуса 

42,7 

м2 

147,50  

6 298,25 

Итого по разделу, руб. 

248 804,57 

2. Помещение раздевальной 

Ручной демонтаж плитки со стен с сохранением 

материала 

30,10 

м2 

150,00  

4 515,00 

Демонтаж плитки пола с сохранением материала  

108,3 

м2 

150,00  

16 245,00 

Укладка настенной плитки 

30,10 

м2

876,25  

26 375,12 

Укладка половой плитки 

108,3 

м2 

1 225.00  

132 667,50 

Высококачественная затирка швов плитки стен  

30,10 

м2 

110,00  

3 311,00 

Высококачественная затирка швов половой  плитки  

108,3 

м2 

110,00  

11 913,00 

Окраска потолка водоэмульсионной краской 

108,3 

м2 

203,50  

22 039,05 

Окраска радиаторов отопления 

7 

шт 

850,00  

5 950,00 

Окраска воздуховодов 

15.72 

м2 

252,50  

3 969,30 

Вывоз мусора 

Итого по разделу, руб. 

226 984,97 

Итого по разделам 1,2,3, руб. 

984 774,02 

Накладные расходы 10,0%, руб. 

98 477,40 

Итог за все виды работ с учётом накладных расходов, сметной прибыли,  руб.  

1 083 251,42 

Расчёт по материалам: 

Наименование материалов  

Объём  выполн  яемых  работ.  

Ед. изм 

Средняя  

стоимость за  единицу по  

Самарской  

области, руб.  

Общая стоимость , руб. 

1 

2 

4 

5 

1. Бассейн 

Плитка керамическая 20x30 (белая)  

159,27  

м2 

2 236,00  

356 127,72 

Клей для плитки универсальный LITOKOL  XI1 25 кг  

44 

шт 

398,00  

17 512,00 

Гидроизоляция Гидротекс-В (25 кг)  

14 

шт 

2150,00 

30 100,00 

Затирка для плитки Mopei (белая) 2 кг  

369 

шт 

276,00 

109 296,00 

Шпатлевка Волма 25 кг 

19 

шт 

230,00 

4 370,00 

Краска водоэмульсионная (белая) 

20 

кг 

171,60 

3 432,00 

Рем состав для заделки трещин (туба)  

5 

шт 

455,00 

2 275,00 

2.Помещение моечного отделения 

Плитка керамическая напольная 30x30  

30 

м2 

440,00 

13 200,00 

Клей для плитки универсальный 

27 

шт 

398,00 

10 746,00 

Затирка для плитки Mopei (белая) 2 кг  

119 

шт 

276,00 

32 844,00  

Краска для внутренних работ по металлу  

2 

кг 

151,00 

302,00  

Потолочный плинтус ПВХ 

42,7 

м2 

73,00 

3 117,10  

3.Помещение раздевальной 

Плитка стеновая керамическая 20x30  

30,10 

м2 

525,00 

15 802,50  

Плитка керамическая напольная 30x30  

38 

м2 

440,00 

16 720.00  

Клей для плитки универсальный 

33 

шт 

398,00 

13 134,00  

Затирка для плитки Mopei (белая) 2 кг  

119 

шт 

276,00 

32 844,00  

Краска для внутренних работ по металлу  

4 

кг 

151,00 

604,00  

Эмаль для окраски радиаторов отопления  

4 

кг 

140,00 

560.00  

Краска водоэмульсионная (белая) 

38,51 

кг 

171,60 

6 608.31  

Итого за материалы, руб. 

669 594,63  

1 

Общая стоимость ремонтных работ и материалов для восстановительного 

ремонта и сопутствующих затрат (в т.ч. НДС 20%) руб.  

1 752 846,05 

Сопутствующие затраты 

2 

Транспортные, заготовителы-ю-складские расходы, снабжение материалом, 

погрузка мусора в мешки, вывоз мусора, (в среднем 10%), руб. п. 1 * 10%  

175 284,60 

3 

Итого стоимость восстановительного ремонта исходя из фактических повреждений зафиксированных актом осмотра от 12.07.2019г., составленным экспертом ФИО4 составляет (руб.) в т.ч. НДС 20% 

1 928 130,65 

Взыскать Общества с ограниченной ответственностью "Империал" в доход федерального  бюджета государственную пошлину 6000 руб.  

 Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд,  г.Самара в течение месяца со дня принятия с направлением апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Самарской области.  

Судья / Л.С. Балькина