ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40249383/16-5-2176

г. Москва

31 мая  2017 г.

Резолютивная часть решения объявлена                                             22 мая 2017 года

Полный текст решения изготовлен                                                      31 мая 2017 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Нечипоренко Н.В.  (единолично) 

При ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

Рассмотрев в судебном заседании рассмотрев дело по иску  ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИСАЛЕ" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)

к ответчику: ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МК ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)

о взыскании задолженности по договору № МКЭСС-Т-01/16 от 17.03.2016 г., договору № МКЭСС-Т-02/16 от 04.05.2016 г. в размере 2 627 383,10 руб., неустойки в виде пени в размере 514 967, 08 руб.

с участием:

от истца: ФИО2, паспорт, доверенность от 13.12.2016 г. (в судебном заседании 18.05.2017г.); ФИО3, паспорт, доверенность от 13.12.2016г.

от ответчика: не явился, извещен

В порядке ст. 163 АПК РФ в судебном заседании объявлялся перерыв с 18.05.2017г. до 22.05.2017г.

 

                                                                 УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИСАЛЕ"   обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском, уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ,  к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МК ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ" о взыскании задолженности по договорам подряда  № МКЭСС-Т-01/16 от 17.03.2016г., № МКЭСС-Т-02/16 от 04.05.2016г. в размере 2 627 383 руб. 10  коп., неустойки в размере 514 967  руб. 08 коп.

Определением от 04.04.2017 года была произведена замена судьи Болдунова У.А.  на судью Нечипоренко Н.В. в порядке ст. 18 АПК РФ

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в том числе путем публичного размещения информации по делу на официальных сайтах Арбитражного суда города Москвы http://www.msk.arbitr.ru/ и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://www.arbitr.ru/, в заседание не явился,  представил отзыв на иск, в порядке ст. 131 АПК РФ,   котором исковые требования не признал.  

Дело рассмотрено в отсутствие ответчика, в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

В обоснование заявленных исковых требований истец ссылается на договоры подряда  № МКЭСС-Т-01/16 от 17.03.2016г., № МКЭСС-Т-02/16 от 04.05.2016г. во исполнение которых  истец исполнил принятые на себя обязательства, которые  ответчиком не оплачены,  в результате чего образовалась задолженность в  размере 2 627 383 руб. 10  коп.

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы представителя истца, исследовав и оценив, имеющиеся в деле доказательства по правилам ст. 71 АПК РФ, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.

Как усматривается из материалов дела, 17 марта 2016 года между Обществом с ограниченной ответственностью «МК ЭнергоСпецСтрой» (Заказчик, ответчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ТИСАЛЕ» (Подрядчик, истец) заключен договор подряда № МКЭСС-Т-01/16, в силу п. 1.1 которого  Заказчик поручил, а Подрядчик принял на себя обязательство выполнить работы по бетонированию на объекте - Очистные сооружения и ТП для застройки м/р 11 Ю. Бутово  в соответствии с проектной документацией, а Заказчик обязался создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, а также обеспечить Подрядчика оборудованием и давальческими материалами, принять работы и оплатить их, исходя из расценок, установленных в Протоколе согласования единых расценок договорной цены (Приложение № 1 к договору).

Согласно п. 1.2. договора объем выполняемых работ устанавливается в соответствии с фактически выполненными работами.

В соответствии с п.2.1. договора обеспечение Объекта материалами, электроэнергией, водой и освещением, а также всем оборудованием, инструментами, техникой и подъемными механизмами, необходимыми для выполнения работ, осуществляется за счет средств Заказчика.

Согласно п.п. 2.2.-2.5 договора затраты по бытовым и складским помещениям, по транспортировке отходов строительства и сноса, по эксплуатации и содержанию строительной площадки в течение всего срока выполнения работ, несет Заказчик.

В соответствии с п. 3.1. договора объем работ по договору определяется фактически выполненными Подрядчиком работами, а стоимость единицы работ, составляющих предмет договора, определяется в Приложении № 1 к договору (Протокол согласования единичных расценок договорной цены).

Согласно п.3.2. договора в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания договора Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере  300 000 рублей.

В соответствии с п.3.3. договора два раза в месяц (до 15 и до 30 числа отчетного периода) Заказчик принимает и оплачивает фактически выполненные Подрядчиком работы согласно представленным Подрядчиком Актам о приемки выполненных работ (форма № КС-2) и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет- фактуры. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 5 банковских дней после подписания сторонами Актов о приемки выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Согласно п.3.4. договора окончательный расчет выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 10 банковских дней после подписания сторонами итогового Акта о приемки выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

В соответствие с п.3.8 договора Заказчик принимает выполненный надлежащим образом результат работ в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента его предъявления Подрядчиком.

Согласно п.3.9. договора оплата всех денежных средств Заказчиком Подрядчику производится путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Подрядчика.

В соответствии с п.4.2.3. договора Подрядчик имеет право увеличить стоимость работ при обнаружении необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в проектной и технической документации.

Согласно п.4.4.1. договора Заказчик обязан открыть финансирование работ в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора (п.3.3. договора)

В соответствии с п.4.4.2. договора Заказчик до начала выполнения работ обеспечивает Объект электроэнергией, водой и освещением, а также всем оборудованием, оснасткой, инструментами, техникой и подъемными механизмами, необходимыми для выполнения работ.

Согласно п.4.4.3. договора Заказчик поставляет Подрядчику материалы, необходимые для выполнения работ в соответствии с заявкой Подрядчика, которая подается Подрядчиком раз в неделю.

В соответствии с п.4.4.4. договора в течение срока действия договора Заказчик должен обеспечить Подрядчику для осуществления работ на Объекте:  работу башенного крана в 3-х сменном режиме,  работу геодезиста Заказчика. 

Согласно п.4.4.6. договора Заказчик оформляет всю необходимую техническую и исполнительную, эксплуатационную документацию (в том числе акты скрытых работ, исполнительные схемы, сертификаты и паспорта на применяемые материалы и оборудование) на все выполненные Подрядчиком работы, в объеме и в соответствии, на момент выполнения и приемки работ, со строительными нормами и требованиями договора.

В соответствии с п.4.4.7. договора Заказчик должен передать Подрядчику в течении 2-х дней с даты подписания договора с оформлением соответствующего Акта утвержденную в соответствии с законодательством техническую, проектную документацию, разрешение и ордер на производство земляных работ.

Согласно п.4.4.9. Заказчик обязан производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном статьями 3 и 5 договора.

В соответствии с п. 4.4.13. Заказчик обязан в случаях в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении этой обязанности, Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в Приложении № 1 к настоящему договору стоимости Работ.

Согласно п.4.4.14. договор Заказчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях договора.

В соответствии с п. 4.4.15 договора Заказчик обязан нести иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Согласно п.5.1. договора Подрядчик осуществляет работы в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 2).

В соответствие с п.5.2. договора дата начала работ - в течение 2-х рабочих дней с даты подписания настоящего договора и перечисления аванса, согласно п.3.3. договора.

Согласно п.5.3. договора срок выполнения работ - 3 календарных месяца с даты начала работ, при условии работы крана в трехсменном режиме и своевременной поставке материалов, оснастки, инструментов, обеспечением техникой, подъемными механизмами, необходимым для производства Работ, постоянное (без отключения) обеспечение электроэнергией и освещением, постоянное присутствие и работа на Объекте геодезиста Заказчика, а также своевременной передаче Заказчиком Подрядчику промежуточных работ и конструкций, предусмотренных настоящим договором, при не выполнении которых невозможно выполнение следующих этапов Работ, предусмотренных настоящим договором.

В соответствии с п.5.4. договора в случае нарушения Заказчиком сроков поставки и передачи материалов, оборудования, оснастки, инструментов и т.п., передачи недоброкачественных или не предусмотренных договором материалов, а также в случае нарушения сроков оплаты по договору, Подрядчик имеет право соразмерно увеличить сроки выполнения работ.

Согласно п.5.5. договора срок действия договора - с даты подписания договора сторонами до полного исполнения сторонами своих обязательств.

В соответствии с п.6.1. договора стороны назначают своих уполномоченных представителей, ответственных за оформление и подписание Актов сдачи-приемки объекта, выполненных работ, форм КС-2 и КС-3 и уполномоченных решать вопросы, возникающие в ходе исполнения сторонами договора.

Согласно п.6.2. договора передача выполненного объема работ или результата работ на Объекте может оформляться уполномоченными представителями сторон Актом сдачи- приемки выполненных работ, составленном в простой письменной форме, для последующего составления Актов о приемки выполненных работ (форма № С-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счетов-фактур, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Передача работ Заказчику по договору оформляется Актом о приемке выполненных работ (форма № КС- 2), Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). После подписания их сторонами один экземпляр передается Подрядчику, а другой - Заказчику.

В соответствии с п.6.3. договора Заказчик обязан в срок не более 3-х рабочих дней со дня получения подписанных Подрядчиком документов, перечисленных в п.п. 6.2., 3.3. договора, с участием Подрядчика осмотреть выполненный результат работ и при отсутствии мотивированных замечаний принять его, подписав представленные Подрядчиком документы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

Согласно п.6.4. договора, в случае необоснованного отказа одной из сторон подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, в нем делается отметка об этом, и Акт подписывается другой стороной с правом на обжалование в суде.

В соответствии с п.6.5. договора в случае мотивированного отказа Заказчика от принятия выполненного Подрядчиком результата работ, Заказчик обязан не более чем в 3- х дневный срок с момента начала осмотра результат работ, направить Подрядчику письменное требование об устранении выявленных недостатков.

Согласно п.6.6. договора в случае, если Заказчик в срок не передаст Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ, не предъявит Подрядчику письменных претензий по качеству работ, работы по настоящему договору будут считаться выполненными с надлежащим качеством, принятыми Заказчиком и подлежащими оплате.

В соответствии с п.6.7. договора Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в Акте приемки были оговорены эти недостатки.

Согласно п.6.8. договора Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссыпаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

В соответствии с п.6.11. договора в случае немотивированного отказа Заказчика от подписания Актов по форме КС-2, КС-3 или итогового Акта сдачи-приемки работ, или нарушения им сроков их оплаты, Заказчик уплачивает Подрядчику пени за каждый день просрочки в размере равном 0,1% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки. Обязанность по уплате пени возникает при условии направления требования об уплате.

Согласно п. 7.2. договора в случае нарушения сроков оплаты по договору, Подрядчик имеет  право требовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки.

В соответствии с п. 11.2. договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Вместе с договором стороны были подписали Протокол согласования единичных расценок договорной цены (Приложение № 1 к договору) и График производства работ по Объекту (Приложение № 2 к договору).

В процессе исполнения договора 01 апреля 2016г. стороны подписали дополнительное соглашение № 1 к договору (далее - ДС № 1 к договору).

В соответствии с п.1 ДС № 1 к договору стороны приняли решение увеличить объемы и состав работ по договору. Стоимость дополнительных работ определена в Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 1 к ДС № 1 к договору) и составляет 903 304 рублей.

Согласно п.2 ДС № 1 к договору стороны определили дату начала работ - с момента заключения Дополнительного соглашения, дата окончания работ - 25.04.2016г.

28 июня 2016г. стороны подписали дополнительное соглашение № 2 к договору (далее - ДС № 2 к договору), которым признали утратившим силу Приложение № 1 к договору «Протокол согласования единичных расценок договорной цены» и утвердили новый «Протокол согласования единичных расценок договорной цены» (Приложение № 1 к ДС № 2 к договору).

01 июля 2016г. 28 июня 2016г. стороны подписали дополнительное соглашение № 3 к договору (далее - ДС № 3 к договору).

В соответствии с п.1 ДС № 3 к договору стороны приняли решение увеличить объемы и состав работ по договору. Стоимость дополнительных работ определена в Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 1 к ДС № 3 к договору) и составляет 1 156 000 рублей.

11 июля 2016г. стороны подписали дополнительное соглашение № 4 к договору (далее - ДС № 4 к Договору), в соответствии с п.1  которого стороны приняли решение увеличить объемы и состав работ по договору. Стоимость дополнительных работ определена в Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 1 к ДС № 4 к Договору) и составляет 110 400 рублей.

11 июля 2016г. стороны подписали дополнительное соглашение № 5 к договору (далее - ДС № 5 к Договору), в соответствии с п.1 которого стороны приняли решение увеличить объемы и состав работ по договору. Стоимость дополнительных работ определена в Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 1 к ДС № 5 к договору) и составляет 372 312 рублей.

Таким образом, в ходе выполнения работ по договору стороны увеличили объем и состав выполняемых работ на сумму 2 542 016 рублей, в том числе НДС 18% - 457 562,88 рублей.

04 мая 2016 года между Обществом с ограниченной ответственностью «МК ЭнергоСпецСтрой» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ТИСАЛЕ» (Подрядчик) заключен договор подряда № МКЭСС-Т-02/16, в силу п. 1.1 которого  Заказчик поручил, а Подрядчик принял на себя обязательство выполнить работы по реконструкции участков сети тепловой магистрали  на объекте - Реконструкция участков сети тепловой магистрали № 1 от ТЭЦ-11 от «т. А» до к.115 в районе шоссе Энтузиастов  в соответствии с проектной документацией, а Заказчик обязался создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, а также обеспечить Подрядчика оборудованием и давальческими материалами, принять работы и оплатить их, исходя из расценок, установленных в Протоколе согласования единых расценок договорной цены (Приложение № 1 к договору).

Пункты 1.2. — 3.1. договора  по текстовой части полностью совпадают с теми же пунктами (п.п. 1.2. - 3.1.) договора от 17.03.2016г.

Согласно п.3.2. договора  в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания договора Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере 500 000 рублей.

Пункты 3.3. - 4.4.3. договора  по текстовой части полностью совпадают с теми же пунктами (п.п. 3.3. - 4.4.3.) договора от 17.03.2016г.

В соответствии с п.4.4.4. договора в течение срока действия договора  Заказчик должен обеспечить Подрядчику для осуществления работ на Объекте 1  работу геодезиста Заказчика.

Пункты 4.4.6. - 4.5.3. договора  по текстовой части полностью совпадают с теми же пунктами (п.п. 4.4.6. - 4.5.3.) договора от 17.03.0216г.

В соответствие с п.5.1. договора  дата начала работ - в течение 2-х рабочих дней с даты подписания настоящего договора и перечисления аванса, согласно п.3.3. договора.

Согласно п.5.2. договора срок выполнения работ — 4 календарных месяца с даты начала работ, при условии своевременной поставки материалов, оснастки, инструментов, обеспечением техникой, подъемными механизмами, необходимым для производства работ, постоянное (без отключения) обеспечение электроэнергией и освещением, постоянное присутствие и работа на Объекте 1 геодезиста Заказчика, а также своевременной передаче Заказчиком Подрядчику промежуточных работ и конструкций, предусмотренных настоящим договором, при не выполнении которых невозможно выполнение следующих этапов Работ, предусмотренных  договором.

Пункты 5.3.-5.5.,6.1.-11.6. договора 1 по текстовой части полностью совпадают с теми же пунктами (п.п. 5.4. - 5.6., 6.1. - 11.6.) договора от 17.03.2016.

Вместе с договором 1 стороны были подписали Протокол согласования единичных расценок договорной цены (Приложение № 1 к договору 1).

В процессе исполнения договора от 04.05.2016г. 15 мая 2016г. стороны подписали дополнительное соглашение № 1 к договору 1 , в соответствии с п.1 которого стороны приняли решение увеличить объемы и состав работ по договору 1. Стоимость дополнительных работ определена в Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 1 к ДС № 1 к договору 1) и составляет 384 761,40 рублей.

Согласно п.2 ДС № 1 к договору от 04.05.2016г. стороны определили дату начала работ - с момента заключения Дополнительного соглашения, дата окончания работ - 25.07.2016г.

20 июня 2016г. стороны подписали дополнительное соглашение № 2 к договору  от 04.05.2016г.  (далее - ДС № 2 к Договору 1).

В соответствии с п.1 ДС № 2 к договору 1 стороны приняли решение увеличить объемы и состав работ по договору 1. Стоимость дополнительных работ определена в Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 1 к ДС № 2 к договору 1) и составляет 213 825 рублей.

Согласно п.2 ДС № 2 к договору 1 стороны определили дату начала работ - с момента заключения Дополнительного соглашения, дата окончания работ - 25.07.2016г.

30 июня 2016г. стороны подписали дополнительное соглашение № 3 к договору 1 (далее - ДС № 3 к договору 1),

В соответствии с п.1 ДС № 3 к договору 1 стороны приняли решение увеличить объемы и состав работ по договору 1. Стоимость дополнительных работ определена в Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 1 к ДС № 3 к договору 1) и составляет 413 370 рублей.

Согласно п.2 ДС № 3 к договору 1 стороны определили дату начала работ - с момента заключения Дополнительного соглашения, дата окончания работ - 30.07.2016г.

04 июля 2016г. стороны подписали дополнительное соглашение № 4 к Договору 1 (далее - ДС № 4 к Договору 1),

В соответствии с п.1 ДС № 4 к Договору 1 стороны приняли решение увеличить объемы и состав работ по договору 1. Стоимость дополнительных работ определена в Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 1 к ДС № 4 к договору 1) и составляет 187 450 рублей.

Согласно п.2 ДС № 4 к договору 1 стороны определили дату начала работ - с момента заключения Дополнительного соглашения, дата окончания работ - 31.07.2016г.

08 августа 2016г. стороны подписали дополнительное соглашение № 5 к договору 1 (далее - ДС № 5 к договору 1),

В соответствии с п.1 ДС № 5 к договору 1 стороны приняли решение увеличить объемы и состав работ по договору 1. Стоимость дополнительных работ определена в Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 1 к ДС № 5 к договору 1) и составляет 220 450 рублей.

Согласно п.2 ДС № 5 к договору 1 стороны определили дату начала работ - с момента заключения Дополнительного соглашения, дата окончания работ – 31.08.2016г.

Таким образом, в ходе выполнения работ по договору стороны увеличили объем и состав выполняемых работ на сумму  1 873 874,85 рублей, в том числе НДС 18% - 337 297,47 рублей.

В ходе выполнения работ по договору подряда  № МКЭСС-Т-01/16 от 17.03.2016г. между сторонами были подписаны следующие документы: Акт о приемке выполненных работ форма № КС-2 № 1 от 25.04.2016г. на сумму - 903 304,00 руб. за период с 01.04.2016г. по 25.04.2016г.;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3 № 1 от 25.04.2016г. на сумму 903 304,00 руб., в том числе НДС (18%) - 137 792,14 руб. за период с 01.04.2016г. по 25.04.2016г.;  Акт о приемке выполненных работ форма № КС-2 № 2 от 10.05.2016г. на сумму - 3 276 000,00 руб. за период с 26.04.2016г. по 10.05.2016г.;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3 № 2 от 10.05.2016г. на сумму 3 276 000,00 руб., в том числе НДС (18%) - 499 728,81 руб. за период с 26.04.2016г. по 10.05.2016г.;  Акт о приемке выполненных работ форма № КС-2 № 3 от 27.06.2016г. на сумму - 1 035 150,00 руб. за период с 11.05.2016г. по 27.06.2016г.;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3 № 3 от 27.06.2016г. на сумму 1 035 150,00 руб., в том числе НДС (18%) - 157 904,24 руб. за период с 11.05.2016г. по 27.06.2016г.;  Акт о приемке выполненных работ форма № КС-2 № 5 от 20.07.2016г. на сумму - 535 500,00 руб. за период с 12.07.2016г. по 20.07.2016г.;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3 № 5 от 20.07.2016г. на сумму 535 500,00 руб., в том числе НДС (18%) - 81 686,44 руб. за период с 12.07.2016г. по 20.07.2016г.; всего на общую сумму: 5 749 954 руб.

В ходе выполнения работ по договору были направлены Подрядчиком Заказчику и подписаны в одностороннем порядке следующие документы:  Акт о приемке выполненных работ форма № КС-2 № 4 от 11.07.2016г. на сумму - 407 000,00 руб. за период с 28.06.2016г. по 11.07.2016г.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3 № 4 от 07.2016г. на сумму 407 000,00 руб., в том числе НДС (18%) - 62 084,75 руб. за период с 28.06.2016г. по 11.07.2016г.;  Акт о приемке выполненных работ форма № КС-2 № 6 от 27.07.2016г. на сумму - 273 800,00 руб. за период с 21.07.2016г. по 27.07.2016г.;  Акт о приемке выполненных работ форма № КС-2 № 7 от 27.07.2016г. на сумму - 110 400,00 руб. за период с 21.07.2016г. по 27.07.2016г.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3 № 6 от 27.07.2016г. на сумму 384 200,00 руб., в том числе НДС (18%) - 58 606,78 руб. за период с 21.07.2016г. по 27.07.2016г.;  Акт о приемке выполненных работ форма № КС-2 № 8 от 28.07.2016г. на сумму - 372 312,50 руб. за период с 27.07.2016г. по 28.07.2016г.;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3 № 7 от 28.07.2016г. на сумму 372 312,50 руб., в том числе НДС (18%) - 56 793,43 руб. за период с 27.07.2016г. по 28.07.2016г.; всего на общую сумму: 1 163 512,50 руб.

В ходе выполнения работ по договору от 04.05.2016г.  № МКЭСС-Т-02/16  между сторонами были подписаны следующие документы:  Акт о приемке выполненных работ форма № КС-2 № 1 от 27.06.2016г. на сумму - 1 045 438,00 руб. за период с 04.05.2016г. по 27.06.2016г.;  Акт о приемке выполненных работ форма № КС-2 № 2 от 27.06.2016г. на сумму - 304 562,00 руб. за период с 4.05.2016г. по 27.06.2016г.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3 № 1 от 27.06.2016г. на сумму - 1 350 ООО руб., в том числе НДС (18%) - 205 932,20 руб. за период с 04.05.2016г. по 27.06.2016г.;  Акт о приемке выполненных работ форма № КС-2 № 3 от 05.07.2016г. на сумму - 114 400,00 руб. за период с 27.06.2016г. по 05.07.2016г.;  Акт о приемке выполненных работ форма № КС-2 № 4 от 05.07.2016г. на сумму - 213 825,00 руб. за период с 27.06.2016г. по 05.07.2016г.;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3 № 2 от 05.07.2016г. на сумму - 328 225,00 руб., в том числе НДС (18%) - 50 068,22 руб. за период с 27.06.2016г. по 05.07.2016г.;  Акт о приемке выполненных работ форма № КС-2 № 6 от 31.07.2016г. на сумму - 213 825,00 руб. за период с 28.07.2016г. по 31.07.2016г.;  Акт о приемке выполненных работ форма № КС-2 № 7 от 31.07.2016г. на сумму - 187 450,00 руб. за период с 28.07.2016г. по 31.07.2016г.;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3 № 4 от 31.07.2016г. на сумму 937 769,60,00 руб., в том числе НДС (18%) - 143 649,60 руб. за период с 28.07.2016г. по 31.07.2016г.;  Акт о приемке выполненных работ форма № КС-2 № 8 от 31.08.2016г. на сумму - 919 488,00 руб. за период с 01.08.2016г. по 31.08.2016г.;  Акт о приемке выполненных работ форма № КС-2 № 9 от 31.08.2016г. на сумму - 220 450,00 руб. за период с 01.08.2016г. по 31.08.2016г.;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3 № 5 от 31.08.2016г. на сумму 1 139 938,00 руб., в том числе НДС (18%) - 173 888,85 руб. за период с 01.08.2016г. по 31.08.2016г.; всего на общую сумму: 3 755 932,60 руб.

В ходе выполнения работ по договору от 04.05.2016г.  № МКЭСС-Т-02/16   были направлены Подрядчиком Заказчику и подписаны в одностороннем порядке следующие документы:  Акт о приемке выполненных работ форма № КС-2 № 5 от 27.07.2016г. на сумму - 413 370,00 руб. за период с 30.06.2016г. по 27.07.2016г.;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3 № 3 от 27.07.2016г. на сумму - 413 370,00 руб., в том числе НДС (18%) - 63 056,44 руб. за период с 30.06.2016г. по 27.07.2016г.; всего на общую сумму: 413 370 руб., Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 3 и Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 3 от 27.06.2016г. на сумму - 1 035 150 руб., счет-фактура и счет на оплату № 77 от 27.06.2016г. на сумму 1 035 150 руб.;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 4 и Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 4 от 11.07.2016г. на сумму - 407 000 руб., счет-фактура и счет на оплату № 83 от 11.07.2016г. на сумму 407 000 руб.;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 5 и Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 5 от 20.07.2016г. на сумму - 535 500 руб., счет-фактура и счет на оплату № 84 от 20.07.2016г. на сумму 535 500 руб.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 6 и Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 6, 7 от 27.07.2016г. на сумму - 384 200 руб., счет-фактура и счет на оплату № 91 от 27.07.2016г. на сумму 384 200 руб.;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 7 и Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 8 от 28.07.2016г. на сумму - 372 312,50 руб., счет-фактура и счет на оплату № 97 от 28.07.2016г. на сумму 372 312,50 руб.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 5 и Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) №№ 8, 9 от 31.08.2016г. на сумму - 1 135 618 руб., счет- фактура и счет на оплату № 114 от 31.08.2016г. на сумму 1 135 618 руб.  Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 3 и Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 5 от 27.06.2016г. на сумму - 1 350 000 руб., счет- фактура и счет на оплату № 78 от 27.06.2016г. на сумму 850 000 руб., счет на оплату № 70 от 21,06.2016г. на сумму 500 000 руб.;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 2 и Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 3, 4 от 05.07.2016г. на сумму - 692 531 руб., счет- фактура и счет на оплату № 82 от 05.07.2016г. на сумму 692 531 руб.;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 4 и Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 6, 7 от 31.07.2016г. на сумму - 937 769,60 руб., счет- фактура и счет на оплату № 99 от 31.07.2016г. на сумму 937 769,60 руб.

Письмом № 1908/16-01 от 19.08.2016г. Подрядчик вновь направил Заказчику для подписания, ранее переданные в период с 15.05.2016г. по 08.08.2016г. документы, которое было  получено ООО «МК ЭнергоСпецСтрой» 22.08.2016г.

Подрядчик повторно письмом № 1309/16-01 от 13.09.2016г. направил в адрес Заказчика переданные ранее с письмом  № 1908/16-01 от 19.08.2016г. документы, которое  получено ООО «МК ЭнергоСпецСтрой» 19.09.2016г.

Письмом  № 1010/16-02 от 10.10.2016г. Подрядчик  направил Заказчику документы (скорректированные на основании Ведомости № 15-026-0 объемов работ, выполненных ООО «ТИСАЛЕ», подтвержденных начальником участка, представителем технического надзора и главным инженером ООО «МК ЭнергоСпецСтрой»), ранее переданные с письмом № 1908/16-01 от 19.08.2016г. Письмо  № 1010/16-02 от 10.10.2016г. с приложенными документами было получено ООО «МК ЭнергоСпецСтрой» 13.11.2016г.

Таким образом, по договору подряда от 17.03.2016г. № МКЭСС-Т-01/16  за период с 01.04.2016г. по 28.07.2016г. Подрядчиком были выполнены и переданы Заказчику, а Заказчиком приняты работы на сумму 6 913 466,50 руб.;  по договору подряда от 04.05.2016г. № МКЭСС-Т-02/16  за периодс 04.05.2016г. по 31.08.2016г. Подрядчикомбыли выполнены ипереданы Заказчику, а Заказчиком приняты работы на сумму 4 169 302,60 руб.,

Выполненные работы были оплачены ответчиком частично:  по договору подряда от 17.03.2016г. № МКЭСС-Т-01/16 на сумму  6 156 954 руб.; по договору подряда от 04.05.2016г. № МКЭСС-Т-02/16 на сумму 2 298 432 руб., всего  на сумму 8 455 386 руб. Таким образом, задолженность Заказчика за выполненные работы составляет 2 627 383,10 руб.

Направленная ответчику претензия от  03.11.2016г., полученная  Заказчиком 07.11.2016г., оставлена ответчиком без удовлетворения.

В соответствии со ст. 309  ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. Как установлено судом, обязательства истца были исполнены в полном объеме, надлежащим образом и в срок, что ответчиком и не оспаривается.

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и его приемка заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

При этом, согласно требованиям ст. 720 ГК РФ, заказчик обязан с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии с п. 1 ст. 746 ГК РФ, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со ст. 711 ГК РФ.

Согласно ст. 711 ГК РФ заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом. В материалах дела не представлено достаточных и достоверных доказательств, подтверждающих соблюдение ответчиком порядка принятия либо непринятия выполненных работ, а также расчетов.

В соответствии со статьей 190 ГК РФ установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.

Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

Пунктом 2 статьи 314 ГК РФ установлено, что в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих Определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства.

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.

Следовательно, если обязательство не позволяет установить разумный либо иной срок исполнения, оно является обязательством до востребования и подлежит исполнению в течение семи дней с момента предъявления требования кредитора.

Исходя из изложенного, датой предъявления спорных работ являются дата предъявления документации в соответствии с письмо  № 1908/16-01 от 19.08.2016г. (получено Заказчиком 22.09.2016г.) - начиная с 29.09.2016г., по истечении срока рассмотрения актов, документы считаются принятыми, соответственно работы по договорам, согласно Актов выполненных работ форма № КС-2 и Справок о стоимости работ форма № КС-3, следует считать принятыми.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

Статьей 65 АПК РФ предусмотрена обязанность стороны доказывать обстоятельства своих требований или возражений.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (п. 2 ст. 9 АПК РФ).

Определением суда от 05.04.2017г. судом было предложено сторонам рассмотреть вопрос о назначении судебной экспертизы, представить ФИО экспертов, кандидатуры экспертных учреждений. Однако ответчик в судебное заседание не явился, определение суда не исполнил.

Факт неоплаты товара в размере задолженности по вышеуказанным договорам в размере 2 627 383 руб. 10  коп. установлен в заседании суда и документально подтвержден. Ответчиком доказательства надлежащего исполнения обязательств не представлено,  поэтому требование истца о взыскании задолженности в заявленном размере суд считает правомерным, документально подтвержденным и подлежащим удовлетворению.

В соответствии с п.7.7.1. договоров за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктами 6.11, 7.2. договора соответственно  пени за каждый день просрочки рассчитывается в размере, равном 0,1% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки.

Истец правомерно на основании п.п. 6.11, 7.2. договоров начислил ответчику неустойку за  общий период за общий период с 13.09.2016г. по 14.12.2016г.  согласно представленному   расчету, изложенному в исковом заявлении,  в размере  514 967 руб. 08 коп. Расчет судом проверен, признан обоснованным, поэтому требование истца о взыскании пени по вышеназванным договорам в заявленном размере правомерно и подлежит удовлетворению. Заявления от ответчика о применении ст. 333 ГК РФ не поступило (Постановление Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81).

Доводы ответчика, изложенные в отзыве судом отклоняются, как необоснованные в силу следующего.

Доводы ответчика о том, что  впервые получил приложенные к иску акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат форма (№ КС-3) по договорам и о невозможности подписания части документов по причине не подтверждения техническим надзором Заказчика предъявленных объемов признаются судом необоснованными.

Ссылка ответчика на технический надзор Заказчика необоснованна, так как такой порядок отказа от подписи условиями  договоров не предусмотрен. 

Ответчик признал выполненными, переданными истцом и принятыми ответчиком работы, подтверждаемые представленными документами, подписанными сторонами. При этом ответчик признал изменение условий Договора дополнительным соглашением № 1 от 25.04.2016 г. к Договору, а дополнительное соглашение № 2 от 28.06.2016г.  к Договору посчитал не подписанным, несмотря на то, что акты № 4 (форма № КС-2) и № 4 (форма № КС-3), в которых указаны работы по расценкам, введенным ДС № 2 от 28.06.2016 г. к Договору, признаны ответчиком, т.е. ДС № 2 фактически признано ответчиком.

Таким образом, исходя из фактических обстоятельств дела следует, что сторонами были согласованы дополнительные соглашения №№ 1-5 к Договору, что позволяет рассматривать их как заключенные. Не подписанные ответчиком акты были получены ответчиком, своих возражений по передаваемым работам по объему, качеству и стоимости ответчик не представлял, что позволяет считать указанные акты в качестве односторонних актов сдачи - приемки результата работ.

Также, исходя из фактических обстоятельств дела  сторонами были согласованы дополнительные соглашения №№ 1-5 к Договору  от  04.05.2016г. № МКЭСС-И-02\16, что позволяет рассматривать их как заключенные. Не подписанные ответчиком акты были получены ответчиком, своих возражений по передаваемым работам по объему, качеству и стоимости ответчик не представлял, что позволяет считать указанные акты в качестве односторонних актов сдачи - приемки результата работ. Также отказ ответчика от признания выполнения работ по подписанным актам противоречит общим принципам гражданского права и направлен на нарушение прав истца на оплату выполненных и переданных работ.

Доводы ответчика о том, что истец не выполнив работы, указанные в договоре и не сдав в установленном порядке результат работ Заказчику, в одностороннем порядке отказался от исполнения обязательств по договору и прекратил работы на объекте, что послужило основанием для заключения ответчиком 18.07.2016 г. договора субподряда № 17/69-02 с ООО «Спецтрансмонолит-Юг» на выполнение работ по устройству монолитных железобетонных конструкций фильтровальной станции на объекте: «Очистные сооружения и ТП для застройки мкр. 11, Южное Бутово (заказ 05-029), 2-й п.к.», судом отклоняются, поскольку ответчиком не представлено документов, подтверждающих односторонний отказ истца от выполнения работ по договору.

В соответствии с п.2 ст.715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно п.3 ст.715 ГК РФ если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Доказательств прекращения действия договора ответчиком не представлено.

Таким образом, ответчик в условиях не прекращенных обязательств по договору обратился к другому подрядчику, как указывает ответчик, для выполнения тех же работ, что действующим законодательством запрещено.

В тоже время истцом представлены документы, подтверждающие неоднократное направление ответчику указанных актов для подписания и их получение ответчиком.

После их получения мотивированного отказа от их подписания истцу представлено не было, возражений в адрес истца по объемам, качеству и расценкам от ответчика также не направлено.

Также предмет представленного ответчиком договора от 18.07.2016г.  не совпадает с предметом договора, в соответствии с п.1.1, которого истцу было поручено выполнить работы по бетонированию на объекте - «Очистные сооружения и ТП для застройки м/р 11 Ю. Бутово».

Кроме того, ответчиком признано получение документов от истца, в срок, установленный договорами, мотивированного отказа от их подписания представлено не было, возражений в адрес истца по объемам, качеству и расценкам также не представлялось.

Ссылка ответчика на то, что  истец не сообщил ответчику о необходимости выполнения дополнительных работ по договору является необоснованной.

Как следует из п.п. 1.2. - 3.1.  договоров цена работ установлена сторонами как ориентировочная и определяется фактически выполненными работами.

Согласно пункту 6 статьи 709 ГК РФ подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

Сторонами были частично подписаны дополнительные соглашения по договорам, а также акты выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), часть из которых подписана сторонами, а часть подписана истцом в порядке, установленном п.4 ст.753 ГК РФ.

По неподписанным со стороны ответчика дополнительным соглашениям, ответчик подтверждает необходимость выполнения указанных в них работ и получение указанных дополнительных соглашений ответчиком, что говорит о согласовании сторонами дополнительных условий договоров.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 08.02.2011 № 13970/10, в случае наличия спора о заключенности договора суд должен оценивать обстоятельства и доказательства в их совокупности и взаимосвязи в пользу сохранения, а не аннулирования обязательства, а также исходя из презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10 ГК РФ.

Доказательства одностороннего отказа истца от продолжения работ отсутствуют.

В соответствии со ст.ст. 102, 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на ответчика. 

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 11, 12, 307, 309, 310, 314, 330, 331,    702, 711 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 4, 9, 49, 65, 71, 75, 102, 104, 110, 123, 156, 176, 180, 181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МК ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, адрес: 115516 

<

...>, офис 419Б, дата регистрации: 07.11.2011г.) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИСАЛЕ" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, адрес: 140014 Московская область, 

<

...>, дата регистрации: 24.10.2014г.) сумму долга по договору подряда от 17.03.2016г. №МКЭСС-Т-01/16 и договору подряда от 04.05.2016г. №МКЭСС-Т-02/16 в размере 2 627 383,10 рублей,  неустойку в размере 514 967,08 рублей, а также 38 712 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

Н.В. Нечипоренко