АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

 www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-12457/2023

г. Салехард

25 марта 2024 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Санджиева М.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Вануйто С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  муниципального казенного учреждения «Комитет по строительству и архитектуре  Пуровского района» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Теплогазмонтаж» (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) об устранении недостатков (дефектов) в рамках гарантийных  обязательств по контракту,  

в отсутствие представителей сторон. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

исковые требования муниципального казённого учреждения «Комитет по  строительству и архитектуре Пуровского района» удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Теплогазмонтаж» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в рамках гарантийных обязательств по  муниципальному контракту № 01/04-01/0190300001322000029 от 08.03.2022 на  выполнение работ по благоустройству территории объекта: «город Тарко-Сале,  площадь по улице Тарасова» устранить дефекты выполненных работ, отраженные в  акте от 07 июня 2023 года, а именно:  

- устранить повреждения лакокрасочного покрытия, следы ржавчины,  отсутствие креплений деревянного настила на 5 (пяти) «Интерактивных скамеек»;  

- устранить повреждение лакокрасочного покрытия, следы ржавчины на 4  (четырех) световых столбиках;  

- уложить тротуарную плитку с применением цементно-песчаной смеси,  выровнять образовавшиеся просадки основания, заменить гранитные плиты со сколами  - общая площадь замены тротуарной плитки 395 м2;  

- произвести укрепление откоса, георешетку отсыпать грунтом, посеять  газонную траву - общая площадь не укрепленного откоса 60 м2;  

- устранить повреждения уличных урн в количестве 4 штук.  

Вышеуказанные работы выполнить в течение 30 календарных дней с момента  вступления решения суда в законную силу.  

 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Теплогазмонтаж»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 6 000 рублей.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого  автономного округа.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в  соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку.  

М.А. Санджиев

Судья