И М Е Н Е М   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И 

Р Е Ш Е Н И Е

город Москва                                                                              Дело №А40-115084/24-151-889

23.05.2025 года                                                                          

Резолютивная часть решения изготовлена 17.03.2025 года

Решение в полном объеме изготовлено 23.05.2025 года

Арбитражный суд города Москвы в составе

Судьи Вольской К.В. 

при ведении протокола помощником судьи Е.О. Поддубным

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по исковому заявлению ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» (ОГРН: 

<

***>)

к ответчику ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ» (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 4 179 755, 14 руб.

при участии

от истца: ФИО1 по доверенности от 29.11.2024

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 19.11.2024

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании задолженности в размере 3 961 853 руб. 21 коп., неустойки за период с 22.12.2023 по 14.02.2024 в размере 217 901 руб. 93 коп., неустойки, начисленной на сумму долга, начиная с 15.02.2024 по день фактической оплаты, исходя из 0.1% в день за каждый день просрочки.  

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу. 

Представитель истца заявленные требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал по доводам, изложенным в отзыве. 

Рассмотрев представленные в материалы дела доказательства, заслушав мнения лиц, участвующих в деле, суд пришел к следующим выводам. 

Согласно доводам искового заявления, 26.01.2023 г. Между Обществом с ограниченной ответственностью .«Солнечный свет» (Далее по тексту - «Заказчик; Ответчик») и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтрой» (Дааее по тексту - «Подрядчик; Истец») был заключен Договор подряда № 1-01 (Дачее по тексту - «Договор»).

Согласно п. 1.1 Договора подрядчик обязуется в установленный договором срок, своими силами и/или силами привлеченных с согласия заказчика третьих лиц выполнить по заданию заказчика строительно-монтажные работы, состав и объем которых регламентируется Сторонами в Сметных расчетах, подписываемых сторонами на основании настоящего договора и спецификаций к нему, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.

В соответствии с п. 2.1 Договора цена работ по договору определяется как стоимость работ по отдельным спецификациям, заключаемым в рамках настоящего договора.

Цена работ по каждой спецификации указывается в соответствующей спецификации и в приложении к ней - Сметном расчете, являющимися неотъемлемыми частями договора.

Согласно п. 2.2 Договора оплата работ по Договору производится в порядке и сроки, предусмотренные в спецификациях.

На основании п. 2.2.2 Договора расчет по договору производится заказчиком на основании счета и предоставленных подрядчиком документов, указанных в п. 2.2.1 настоящего договора, согласованных и принятых заказчиком без замечаний (счет-фактура, КС-2, КС-3).

Согласно п. 5.2 Договора сдача и приемка работ осуществляются путем составления и подписания сторонами соответствующих Актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, которые передаются подрядчиком заказчику в день сдачи работ и подписываются обеими сторонами.

Согласно п. 7.6 Договора при просрочке Заказчиком сроков оплаты стоимости работ заказчик выплачивает пени подрядчику в размере 0,1 % от стоимости неоплаченных работ по соответствующей спецификации, за каждый день просрочки на основании письменного требования подрядчика и не более 10 % от стоимости неоплаченных работ по спецификации.

26.01.2023 г. сторонами была составлена и согласована Спецификация к Договору (Приложение № 1) (Далее по тексту - «Спецификация»).

Согласно п. 3 Спецификации цена работ по договору и настоящей спецификации является твердой и составляет 3 499 000 (Три миллиона четыреста девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 %, что составляет 583 166 рублей 67 копеек.

Согласно п. 3.1 Спецификации заказчик выплачивает подрядчику аванс в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания настоящей спецификации в размере 30% от цены работ по настоящей спецификации, что составляет 1 049 700 руб., в том числе НДС 20%, что составляет 174 950 руб.

В соответствии с п. 3.2 Спецификации заказчик производит окончательный расчет выплачивая подрядчику 70% от цены работ по настоящей спецификации, что составляет 2 449 300 (Два миллиона четыреста сорок девять тысяч триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 %, что составляет 408 216,67 коп., в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента приемки результатов работ заказчиком, что подтверждается подписанием сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

На основании п. 4 Спецификации сторонами определена дата окончания работ: 25.02.2023 г., при этом сроки (даты) выполнения отдельных видов и этапов работ, установлены графиком выполнения работ.

В ходе выполнения работ по согласованию с ООО «Солнечный Свет» были произведены работы на большую сумму, а именно 5 011 553,21 руб., в т.ч. НДС 20 % - 835 258,87 руб., что отражено в Ведомости работ на объект: магазин «Sunlight» СПб «Нарвский Универмаг».

Таким образом, сумма, подлежащая к оплате, составляет 3 961 853,21 руб., в т.ч. НДС 20 % - 660 308,21 руб.

Работы по Договору были исполнены ООО «ЭкспертСтрой» в полном объеме и приняты ООО «Солнечный свет». Полный комплект документов, в соответствии с условиями Договора был передан в момент приемки работ, при этом от ООО «Солнечный свет» не поступило ни подписанных экземпляров переданных комплектов документов, ни мотивированных возражений.

С целью завершения деятельности по Договору, в соответствии со Спецификацией, ввиду завершения строительно-монтажных работ и введения объекта в эксплуатацию, ООО «ЭкспертСтрой» повторно направило в адрес ООО «Солнечный свет» полный комплект документов, согласно Договору, в соответствии со списком приложений.

04.01.2024 г. ООО «Солнечный свет» получило документы в полном объеме, мотивированных возражений не предоставило.

15.02.2024 г. Истцом в адрес Ответчика была направлена Претензия, что подтверждается квитанцией об отправке почтового отправления и описью вложения в ценное письмо. Однако, указанная Претензия была проигнорирована Ответчиком, а обязательства не были исполнены.

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд. 

Удовлетворяя требования в части, суд руководствуется положениями ст. 8, 10, 12, 307-310, 330, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса, а также отмечает следующее. 

Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. К ним относятся условия о предмете договора, условия, которые в законе или иных правовых актах определены как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (п. 1 ст. 432 ГК РФ, п. п. 1, 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49).

Существенными условиями являются:

- условия, позволяющие определить конкретный вид работы (п. 1 ст. 702 ГК РФ);

- условие о начальном и конечном сроке выполнения работ (п. 1 ст. 708 ГК РФ).

По результатам исследования совокупности представленных в материалы дела доказательств, судом установлено, что согласно п. 3 Спецификации цена работ по договору и настоящей спецификации является твердой и составляет 3 499 000 руб., в том числе НДС 20 %, что составляет 583 166,67 руб. Согласно п. 3.1 Спецификации заказчик выплачивает подрядчику аванс в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания настоящей спецификации в размере 30% от цены работ по настоящей спецификации, что составляет 1 049 700 руб., в том числе НДС 20%, что составляет 174 950 руб.

Из вышеизложенного следует, что существенные условия договора подряда на выполнение дополнительных работ сторонами не согласованы, а цена договора является твердой на весь срок выполнения работ. Поскольку цена составляет 3 499 000 руб. 00 коп., в материалы дела представлены доказательства перечисления аванса на 1 049 700 руб. 00 коп., а также доказательства выполнения работ и их принятие ответчиком, задолженность последнего перед истцом составляет 2 449 300 руб. 00 коп. 

В остальной части данных требований суд отказывает. 

Поскольку требования по основному долгу удовлетворены судом частично, размер неустойки подлежит перерасчету. По перерасчету суда, за период с 22.12.2023 по 14.02.2024 размер неустойки составит 134 711 руб. 50 коп. из расчета: 2 449 300 * 55 * 0.1%. 

В остальной части данного требования суд отказывает. 

При этом, поскольку до настоящего времени денежное обязательство должником не исполнено,  в силу п. 65 Постановления Пленума ВС РФ №7 от 24.03.2016г. неустойка подлежат уплате до момента фактического исполнения обязательства.

В силу ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований или возражений.

В соответствии со ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд находит требования подлежащими удовлетворению в части. 

Расходы по госпошлине распределены на основании ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями  8, 10, 12, 307-310, 330, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167, 170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ» (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» (ОГРН: 

<

***>) задолженность в размере 2 449 300 руб., неустойку в размере 134 711 руб. 50 коп., неустойку, начисленную на сумму долга 2 449 300 руб. в размере 0,1% с 15.02.2024 по дату фактической оплаты долга, но не более 10% от размера задолженности, а также расходы на оплату госпошлины в размере 27 139 руб.

В остальной части отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                                    К.В. Вольская